『차집관로 성능개선(홍제천)』

공 사 설 명 서

2021.03.

서울특별시 난지물재생센터

(시설보수과)

- 차집관로 성능개선공사(홍제천) -

공  사  설  명  서

1. 공 사 명 : 차집관로 성능개선공사(홍제천)

2. 공사목적

◦ 홍제천 상류에 설치된 차집관로의 통수능력 부족을 해소하고, 우수 토실 등 시설물을 개량하여, 하천 수 및 우수 과다유입 방지 및 적정차집으로 물재생센터 처리부하 경감, 시민 친수 공간 주변  악취 방지 등의 효과를 거두고자 함

3. 현장위치

홍제천 일원(위치도 참조)

4. 공사계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

5. 공사비 : 금 963,780,000원

6. 공사개요

◦ 관교체 L=223m

◦ 가시설(흙막이) 1식

◦ 기타 부대공 1식

7. 현장설명

◦ 현장설명은 별도로 실시하지 않으며, 설계도서 열람으로 갈음

◦ 열람장소 : 난지물재생센터 시설보수과(담당 김승조 전화 02-300-8563)

8. 공사기간 : 착수일로부터 2021.12.23)

◦ 다음의 경우에 한하여 발주처 승인을 받아 공사기간을 연장할 수 있음.

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 공사계약일반조건에서 정하는          사항에 의한 경우

- 기타, 계약상대자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우

- 천재지변 및 불가항력으로 작업이 불가능한 경우

- 용지 및 지장물 보상지연으로 공사기간에 큰 영향을 주었을 경우

- 설계변경에 의한 시공물량 증가로 인하여 소요 공기가 부족하다고 발주기관이 인정한 경우

9. 특기사항

1) 본 공사 입찰방법은 입찰공고서 내용에 따른다.

2) 도급자는 공사착수 전 자기부담으로 현황측량 및 경계측량을 실시하여 적정한 시공이     이루어지도록 한다.

3) 도급자는 본 공사 발주 당시의 현장여건을 정밀파악하고 본 공사로 인하여 인근     시설물에 피해가 없도록 하여야 하며, 인근 시설물에 훼손이 있을 경우에는 도급자     부담으로 즉시 원상복구하거나 변상 조치하여야 한다.

4) 도급자는 공사착수 전 공사에 지장을 초래할 수 있는 지중매설물에 대한 확인조사를     실시하여야 하며, 가스관로, 전기, 통신관로, 상․하수도관로 등은 관할기관의 협조를     받아 공사에 장애가 되지 않도록 사전에 확인하여 조치하여야 한다.

5) 도급자는 지반조사 보고서를 면밀히 검토하고, 필요시 지반조사를 시행하여 설계시     자료와 토층구성이 상이하거나 지하수위의 변동, 지내력부족 등의 사유로 기초공사에     하자가 예상될 경우 피해예방을 위하여 즉시 감독원에게 보고하고 감독원의 지시에     따라 변경시공 등 적절한 조치를 하여야 한다.

6) 도급자는 공사착수 전에 설계 도서를 검토하여 시공에 불합리하거나 현장 상황과     상이한 부분이 있을 경우에는 즉시 감독원에게 서면으로 보고하여 도면이 보완될     수 있도록 조치한다. 또한 물량의 과다산출, 누락, 오기 등 내용이 불분명한 부분이     있을시 감독원에게 보고하고 감독원의 지시에 따라 시공하여야 하며, 시공 및 구조상     필요한 부분은 시공 상세도면을 작성하여 감독원의 승인을 받아 시행한다.

7) 도급자는 공사시행 중 품질관리를 위하여 필요시 도급자 부담으로 토질, 구조, 시공     등 전문기관의 자문을 받을 수 있다.

8) 도급자는 공사 착수 전에 가설시설물 설치계획서, 시공계획서, 안전관리계획서, 예정     공정표 등이 포함된 착공계를 제출하여 감독원의 승인을 받아야 하며, 건설기술진흥법     시행령 제89조 규정에 따라 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하여 시행하여야     한다.

9) 도급자는 본 공사의 종합관리능력을 제고하고 의사결정의 신속화를 도모하기 위하여     건설공사 과정에서 발생되는 각종 문서, 도면, 기술 자료 등을 표준분류체계에 의해     작성하고 사업정보를 가능한 건설 사업관리 정보시스템(CPMIS)을 활용하여 처리     하여야 한다.

10) 도급자는 착공 즉시 설계 도서를 면밀히 검토하여 현장에서 발생되는 토사 반, 출입      계획을 검토하여 우리시에서 운영 중인 서울 사이버 흙 은행에 등재하고 최우선으로      이용하여야 하며, 이로 인해 운반거리 증감 등이 있을 경우 발주처와 협의하여 설계      변경 할 수 있다.

11) 본 공사에 투입되는 모든 자재는 사전에 견본품을 제출하여 감독원의 승인을 받은      후 사용한다.

12) 도급자는 산업안전보건법시행령 제12조에 정한 바에 따라 산업안전보건법시행령      제14조에 의한 안전관리자를 선임하고 산업안전보건법시행령 제13조의 업무를 수행      하도록 하며 산업안전보건법시행규칙 제32조제3항에 정한 바에 따라 고용노동부      장관이 지정하는 건설재해예방 전문 지도기관과 공사착공 후 14일 이내에 기술지도      계약을 체결하고 공사기간 동안 기술 지도를 받아야 하며 기술지도시 지적내용에      대하여는 성실히 이행하여야 한다.

13) 도급자는 건설기술진흥법 제62조, 동법 시행령 제98조에 의거 수급인은 안전관리      계획서에서 정한 시기와 회수에 따라 정기 및 정밀안전점검을 건설안전 점검기관에      의뢰하여 실시하여야 한다.

14) 공사시행 중 건축법, 도로법 총포화약류단속법, 소방법, 공해방지법, 환경보전법,      대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음․진동규제법, 폐기물관리법, 오수․분뇨 및       축산폐수의 처리에 관한법률 등에 저촉되지 않도록 해야 한다.

15) 도급자는 건설산업기본법 제29조에 의거 모든 하도급공사에 대하여 하도급 계약을      체결한 날로부터 30일 이내에 발주자에게 통보를 하여야 한다. 조달청 시설공사      적격심사 세부기준 제4조제2항에 의한 하도급관리계획서를 제출한 경우 적격심사시      제출한 내용대로 이행하여야 하며, 변경하고자 하는 경우에는 당초의 하도급조건      이상으로 하여 사전승인을 받아야 한다.

16) 발주자의 사정에 의한 사업규모 조정, 공기조정 요구 시 특별한 사유가 없는 한      이에 응하여야 한다.

17) 본 공사 추진에 따른 모든 대 관청업무 및 각종 인․허가사항은 도급자가 발주자를      대행하여야 하며, 이에 대한 허가수수료 등은 발주자 부담으로 한다.

18) 공사범위의 구분은 공종별 도면 및 내역에 따르고 도면에 표기되지 않은 사항 및      현장여건 상 설계변경이 불가피한 부분은 감독원의 승인을 받아 변경할 수 있다.

19) 공사현장에서 발생되는 부산물 및 일체의 폐기물은 관계법을 준수하여 재활용이      가능한 품목은 재활용하고 재활용이 어려운 일반폐기물은 관계법에 따라 처리되도록      조치하여야 한다. 다만, 즉시 장외처리가 어려운 경우에는 공사 진행에 방해되지      않는 장소에 모아서 보관하여야 하며 미관에 지장이 없도록 비닐 등으로 덮고       폐기물이 주위로 확산되지 않도록 조치하여야 한다.

20) 본 공사의 입찰에 참가하고자 하는 자(공동도급 구성원 포함)는 반드시 아래 입찰 설명서를 열람 숙지하여야 하며, 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있다.

◦ 입찰설명서 구성내용

- 공사입찰공고

- 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서(조달청 계약 12711-3700, 2009.09.28)

- 공사입찰특별유의서(조달청 시설총괄과-1034, 2015.01.29)

- 공사입찰유의서(기획재정부 회계예규 2200.04-102-12, 2009.04.08)

- 공사계약특수조건(조달청 시설총괄팀-2350, 2006.06.30)

- 공사계약일반조건(기획재정부 회계예규 2200.04-104-20, 2009.07.03)

- 청렴계약입찰특별유의서(조달청 규제개혁법무담당관-4253, 2012.08.23.)

- 청렴계약특수조건(조달청 규제개혁법무담당관-4253, 2012.08.23.)

◦ 관련 회계예규 및 조달청 집행기준은 나라장터의 ‘정보광장-법령정보’ 또는 조달청 홈페이지의       ‘자료실-법령 및 기준’에서 열람할 수 있다.

21) 기타 내용은 공사설계설명서 및 설계도서에 의한다.

22) 설계변경은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동법 시행령, 동법      시행규칙, 공사계약일반조건(기획재정부 회계예규 2200.04-104-20, 2009.07.03),       공사계약특수조건(조달청 시설총괄팀-2350, 2006.06.30)에 의한다.

① 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

- 제22조(물가변동 등에 의한 계약금액의 조정)

② 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

- 제73조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

- 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 제75조(그밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)

③ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙

- 제72조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

- 제73조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 제74조(그 밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)

④ 공사계약일반조건(회계예규 2200.04-104-20, 2009.07.03)

- 제19조(설계변경 등)

- 제19조의2(설계서의 불분명․누락․오류 및 설계서간의 상호 모순 등에 의한 설계변경)

- 제19조의3(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)

- 제19조의4(신기술 및 신공법에 의한 설계변경)

- 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경)

- 제19조의6(소요자재의 수급방법 변경)

- 제19조의7(설계변경에 따른 추가조치 등)

- 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 제21조(설계변경으로 인한 계약금액 조정의 제한 등)

- 제22조(물가변동으로 인한 계약금액 조정)

- 제23조(기타계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)

⑤ 공사계약특수조건(조달청계약12711-60872, 2003.12.27)

- 제16조의2(공사계약내용의 변경)

10. 기타사항

1) 각종 보고서의 제출

① 공사시행과 관련하여 입찰안내서에 정해진 기일 내에 공사감독관 또는 발주기관에 제출        하여야 하며,

② 만약 기일을 경과하여 제출된 경우 매 건별 지연일수마다 일정액의 지연배상금이 부과        되며, 그 부과된 금액은 기성 또는 준공 시 정산할 수 있다.

2) 설계시 조사 불가능한 부분이나 조사 후 변경된 사항에 대하여는 실제에 맞추어     변경을 할 수 있다.

3) 본 공사용 자재 및 인도지가 변경 되었을 때는 설계 변경할 수 있다.

4) 자재대 및 인건비 등 변동이 심한 물가변동을 가져올 경우 설계변경을 할 수 있다.

5) 공사시행 시 현지여건 변동 등에 따른 공법변경이 필요할 경우 설계변경 할 수 있다.

6) 시공측량 결과 지형의 차이 등 현지 여건이 변경되었을 경우 설계변경 할 수 있다.

7) 공사로 인한 환경분쟁 시 발생하는 모든 비용은 도급자가 부담한다.

8) 공사시행시 현장여건에 맞는 시공성 및 경제성이 우수한 공법이 있을 시에는 발주청의 허가를 득하여 설계변경을 할 수 있다.

9) 기타 발주관서가 필요하다고 인정하거나 관계기관의 협의에 따라 불가피한 경우 설계 변경을 할 수 있다.

11. 예정 공정표

세부공종	추진일정					비고
	‘21.03~05	‘21.06~07	‘21.08~09	‘21.12
토공 및 가시설공
관부설공
포 장 공
부대공(기타공)