공 사 시 방 서

1. 공사개요

가. 적용범위

본 시방서는 성북구청에서 발주하는【2018년 구 소규모 편익시설(도로) 설치공사(연간단가)】에 적용한다.

나. 공사의 위치

성북구 관내일원

2. 총   칙

제1조 : 착공서류

가. 착공신고서 제출

계약상대자는 공사에 관한 계약을 체결하였을 때에는 계약체결일로부터 7일 이내에 착공하고 착공신고서를 제출하여야 한다. 다만, 발주부서가 착공시기를 별도로 지정하는 경우에는 이에 따라야 한다.

나. 첨부서류

현장기술자 및 기능공 지정신고서 (현장관리조직, 현장대리인, 안전관리자, 품질관리자 및 포장기능공)

1) 현장기술자 경력사항확인서, 자격증 사본 및 보도포장 전문기술 교육

과정 수료증 사본

2) 포장기능공 보도포장 전문기술 교육과정 수료증 사본

※ 전문건설공제조합 기술교육원에서 시행하는 보도포장 전문기술 교육과정 이수

3) 현장대리인, 장비운전자(아스팔트휘니샤,롤러 등)는 도로포장 전문 기술

교육과정 수료증 사본(또는 교육이수계획서)를 함께 제출

제2조 : 공사공정계획

계약상대자는 발주부서 감독관의 요구가 있을 때에는 공사시행순서, 방법, 주요자재 반입계획, 장비투입계획, 노무계획 등에 대하여 상세히 실시 계획서를 작성 하여 발주부서 감독관의 승인을 받아야 한다.

제3조 : 보고

가. 계약상대자는 공사실시 상황 및 실시공정을 기록하는 공사일보 및 공사 기성고를 작성하여 지시에 따라 제출하여야 한다.

성북구 도로시설과

나. 계약상대자는 별도 작업지시서상의 준공예정일을 초과하여 시공이 되어야 할  경우 즉시 그 이유 및 공정지연 회복책을 수립하여 발주부서의 사전승인후  공사기한을 연기한다.

다. 본 공사의 계약물량은 추정물량으로 발주부서 감독관의 차수별 시공지시 물량에 의거 현장조사 후 시공계획을 수립 제출하여야 하며 공사완료 후 발주부서 감독관의 지시에 의거 차수별 준공 정산서를 제출하여야 한다.

성북구 도로과

제4조: 계약상대자는 공사의 진행을 빠르고 정확한 시공을 위하여 적절하고 합리적인

방법을 발주부서 감독관과 상호 협력하여야 한다.

제5조 : 계약상대자는 공사현장에 다음 기구를 발주부서 감독관과 상의하여 비치한다.

가. 제반시험기구           1식

나. 사진촬영기             1식

다. 안전사고 방지기구      1식

제6조 : 본 공사경계 외에 있는 시설물을 보존하여야 하며 손상을 입혔을 때는 계약         상대자 부담으로 복구하여야 한다.

제7조 : 연약지반이 발견된 경우에는 제반시험 시행 후 그 결과를 발주부서 감독관에게         보고하고 그 지시에 따라 시공하여야 한다.

제8조 : 공사용 가설물

가. 공사용 가설시설물은 공사시공에 필요한 적정규모 이상이어야 하며 제반  규정에 위반되지 않아야 한다.

나.	공사용 가설시설물 규모는 설계서 및 시방서에 제시된 규모와 같이 설치  하여야 한다.

다. 규정되지 않은 가설물 설치는 계약상대자 부담으로 시설하여 가설하며, 시설물 설치 미비로 인하여 공사지연, 안전사고 등은 계약상대자가 책임진다.

라. 공사완공 후 계약상대자는 발주부서 공사감독관의 지시에 의하여 가설물을   철거하여야 하며 철거 후 원상태로 복구하여야 한다.

제9조 : 용지사용

가. 계약상대자는 발주부서 감독관의 승인을 얻어 공사를 시행하기 위해 필요한 발주부서 소관의 용지를 무상으로 일시 사용할 수 있다.

나. 공사를 시행하기 위해 발주부서로부터 차용한 용지이외의 토지의 차용보상 등은 계약상대자 부담으로 한다.

제10조 : 재료관리

공사용 자재는 KS 규격품 사용을 원칙으로 하며, 발주부서 감독원의 승인을 득한 제품에 한하여 사용하며, 반드시 납품자의 품질인증서를 제출하고, 발주부서 감독자의 요구시 품질시험을 실시하여 성적서를 제출하여야 하며, 제품의 변질이 발생하지 않도록 보관에 철저를 기하여야 하며, 검사 및 시험에 합격한 재료라도 사용할 때 발주부서 감독관이 변질 또는 불량품으로 인정할 때는 이를 사용하여서는 안된다.

가. 사급자재

1) 모든 자재는 K.S 규격품을 사용하되 K.S 규격품이 없을 때는 발주부서의 승인을 득한 제품을 사용하여야 한다.

2) 모든 자재는 필요시 품질시험을 실시하여 계약상대자는 발주부서 감독자의 지시에  의거 지정된 기관에 시험을 실시하여 합격된 제품을 사용한다.

4) 사용자재는 제조자로부터 반드시 K.S 인증서, 품질시험성과표 등을   사전 제출받아 발주부서 감독자에게 승인을 득한 후 사용한다.

5) 사급자재 수불부를 작성 기록하고 준공시 제출한다.

제11조 : 시공 후 검사가 불가능한 것에 대한 시공검사 계약상대자는 공사 시공 중  매몰되어 나타나지 않는 부분 또는 준공후 해체되는 가설물 등에 대하여 수시로 부분 또는 전경을 분명히 나타내는 사진을 정리한 사진첩을 상시 현장에  비치하여야 하며, 정산 요구시 발주부서에게 제출하여야 한다.

제12조 : 공사현장관리

가. 공사현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을  경우에는 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 하여야 한다.

나. 공사시 계약상대자는 발주부서 감독관의 허가 없이 공중에 해를 미칠 만한 시공방법을 써서는 안된다.

다. 공사현장에 일반인 및 노무자의 출입을 감시, 풍기, 위생의 단속, 화재도난, 기타의 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

라. 계약상대자는 공사현장의 일반통행인이 보기 쉬운 장소에 공사명, 공기, 발주자명, 공사수급자 등을 소정양식에 따라 공사안내 표시판을 설치하며 도로공사장 교통관리 실무요령에 의거 공사장 안전 및 도로관리에 만전을 기하고 공사장 주변 주민들에게 공사일정 등 내용에 대하여 사전통보 후 공사를 시행 함으로써 주민들의 불편을 최소화 하여야 한다.

마. 계약상대자는 공사장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 대하여  지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

제13조 : 안전조치

가. 계약상대자는 공사시행으로 인하여 인명피해를 끼칠 위험한 장소가 있을 때는  위험표시를 수급인 부담으로 표시하고, 안전사고 및 민․형사건에 대하여  책임을 진다.

나. 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여 유사시에   대한 사전대책을 강구하고, 유사시에는 피해를 최소한도로 적게 받는 응급조치를 하여야 한다.

다. 공사에 필요한 보안조치는 관계법규에 따라 만전을 기하기 위한 조직   계획 점검, 훈련 등을 실시하여야 하고, 필요한 제반시설을 갖추어야 한다.

라. 공사착수전에 보안시설을 하여야 할 사항은 일반적으로 다음과 같다.

1) 출입금지 구역설정

2) 도로의 교통제한 또는 금지

3) 유류 및 폭약 등 위험물 취급에 대한 제반표시 취급관리

4) 전기, 하수도, 상수도 및 통신 등 중요한 시설에 대한 보호

5) 위생적 음료수의 확보

6) 위생적 변소와 배수시설

7) 관급자재에 대한 안전시설

8) 기타 필요한 사항

마. 도로의 교통을 제한하고자 할 때는 다음 요령에 의하여야 한다.

1) 교통제한의 범위, 보안조치, 기간 등에 대하여 발주부서 감독관을 경유하여 소정의  수속을 받아야 한다.

2) 수속 완료후 교통표시 등의 필요한 보안시설을 완료하여 교통제한을  실시하여야 한다.

3) 교통제한기간은 될 수 있는 대로 단축하여야 하고 교통제한 및 교통장애를 될 수 있는 대로 피하는 공법을 취하여야 한다.

바. 작업장 내에서는 안전장구를 착용하고 안전모자를 써야 한다.

사. 공사시공 중에는 인접해 있는 기존구조물 또는 교통시설물 등에 피해를  주지 않도록 필요에 따라 보호시설을 설치하여야 한다.

제14조 : 사고의 보고

토지의 붕괴, 낙반, 가설물이나 파손 기타 공정계획에 영향을 미치는 사고나  인명의 손상 또는 제3자에 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때 혹은 그러한 사고발생의 사항을 발겨하였을 때에는 응급조치를 취하고 발주부서 감독관에게 보고하여야 한다.

제15조 : 제법규 준수

가. 공사시행에 있어서 근로기준법, 노동조합법, 재해구조법 기타 관계법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

나. 노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 계약상대자의 책임하에 이루어지고  사용하는 전 노무자의 모든 행위에 대한 책임은 계약상대자에게 있다.

제16조 : 실험실 운영

가. 계약상대자는 현장에서 공사에 해당되는 시험을 현장에서 직접할 수 있도록               제반장비와 간접노무비에 포함된 시험 기술자를 고용하고 공사가 완료될         때까지 철저를 기하여야 한다.

나. 시험으로 소요되는 기타재료 및 소모품은 계약상대자 부담으로 한다.

다. 시험은 발주부서 공사감독 확인하에 실시하고 실험결과를 기록 보관하여야 하며  발주부서 감독관의 요구가 있을 시는 즉시 제시한다.

라. 관리시험 및 검사실시를 위하여 감독관의 요구가 있을 때는 언제든지   시험에 임하여야 한다.

제17조 : 작업시간

가. 공사시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축할 수 있으며, 야간작업 및 휴일에 작업을 할 때는 미리 발주부서 감독관의 승인을 받아야 한다.

제18조 : 사진촬영

가. 계약상대자는 공사시행에 대한 기록사진을 천연색으로 크기 3×4인치로 4부 작성하여 준공시에 사진첩 및 CD로 제작하여 제출한다.

제19조 : 공사일시중지

발주부서 감독관은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있으며 공사중지로    인한 손해는 계약상대자의 부담으로 한다.

가. 기후의 악조건으로 공사에 손상을 주게 할 우려가 있다고 인정할 때

나. 계약상대자가 설계도서 또는 발주부서 감독관의 지시에 응하지 않을 때

다. 공사중 사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 때

라. 공사중 사원의 기술 미숙으로 조잡한 공사 우려가 있을 때

마. 관련되는 타공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정될 때

제20조 : 공기연장

가. 천재지변 또는 공사용 재료의 국내품귀, 시행청의 사정에 의하여 공사가  중단되었을 때

나. 공사기간중 강우일수 및 강설일수가 과거 5개년 평균강우, 강설일수보다  많아 공사에 막대한 지장을 줄 때

제21조 : 준공검사

가. 계약상대자는 준공상황을 실측하여 정확한 도면을 작성하여 준공계에 첨부  발주부서 감독관에게 제출한다.

나. 준공검사에 필요한 모든 경비는 계약상대자의 부담으로 한다.

제22조 : 공사가 완성되었을 때는 발주부서 감독관의 지시에 따라 가시설물을 제거하고 청소정리하며 검사를 받아야 한다.

제23조 : 계약상대자의 의무

가. 모든 공사는 시방서와 설계도서에 부합되도록 하며, 계약상대자는 기술적인 사항에 대하여 책임을 져야 한다.

나. 계약상대자는 시방서, 설계도면을 충분히 숙지하여 시공을 시행해야 한다.

다. 계약상대자는 발주자가 도면에 의하여 해당공사의 최후 인계를 받을 때까지

공사목적을 계약상대자 부담으로 관리하여 책임을 져야 한다.

라. 손상을 받은 공사 부분이나 표준 이하로 시공된 부분은 감독관이 만족할        때까지 계약상대자가 대치 또는 복구하여야 한다.

마. 계약상대자는 법령에 의해 배치한 현장대리인을 감독관의 승인 없이 임의로 현장을 이탈시켜서는 아니된다.

제24조 : 공사방법

본 공사는 서울특별시 입찰유의서 및 무근 및 철근콘크리트 시방서, 도로공사

표준시방서, 시설공사 계약일반 및 특수조건, 본 특별시방서, 설계도서에 의하며,    만일 현장여건상 변경이 불가피하거나 공사시행중 발주부서의 작업지시사항과    현장여건이 상이할 경우에는 발주부서의 사전승인을 득하여 변경공사를 시행    하여야 하며, 또한 작업지시서상의 공사 기한내 완료 불가시에는 공사기한 연기원을     제출하여 발주부서의 승인후 연기조치할 수 있으며, 공사완료시에는 작업 완료    보고서를 반드시 제출하되, 감독경유후 발주부서에 문서접수한 날을 준공일자로    하며, 만일 준공지연시에는 관계법규정에 의거 지체상금을 납부하여야 한다.

제25조 : 본 공사에 명시되지 않은 경미한 사항은 감독원의 지시에 따라 발주부서 부담으로 시행한다.

제26조 : 발생품

본 공사와 관련하여 생긴 발생품은 감독원의 지시에 따라 정리하며 감독관의    지시에 지정장소에 인도하여야 한다.

제27조 : 건설폐기물 처리

계약상대자는 폐기물발생시 즉시 상차․운반처리하여 주민통행불편이나 환경저해요인이 발생하지 않도록 한다.

제28조 : 본공사 현장사무실용 컨테이너와 울타리등 부대시설은 감독원이 지정    하는 장소에 규정에 맞게 설치하고, 공사기간동안 관리에 만전을 기하고 공사    완료 후에는 원상 복구한다.

제29조 : 계약상대자는 공사와 관련하여 습득하는 공공시설의 제반사항에 대하여 보안을 유지하여야 한다.

제30조 : 공사중 검사시험을 실시하여 부적합한 판정으로 지정된 부위는 계약상대자의 부담으로 철거와 재시공 조치하고, 이를 근거로 국가를 당사자로하는 계약법,  건설기술관리법,  건설산업기본법, 기타 법상의 제제를 할 수 있다.

제31조 : 설계변경조건

가. 물량의 변동이 발생한 때

나. 설계도서와 현장여건이 상이할 때

다. 기타 감독관이 필요하다고 인정할 때

라. 불가피한 사정에 의하여 공사물량의 변동이 있을 때

3. 콘크리트공

가. 사용재료

구조물 콘크리트는 KSF 4009에 규정된 레미콘 사용을 원칙으로 하며, 현장여건상 시멘트콘크리트 타설시 사용골재에 따른 시방배합을 시행하여 소정의 값을 얻어 시공하여야 한다.

나. 콘크리트 강도

재령 28일 강도	슬럼프값 (cm)	굵은 골재 최대 치수	비 고
210Kg/cm2	8 ± 2.5	25 mm	구조물

다. 콘크리트 타설

1) 시공전 철근, 거푸집 기타 배치에 대하여 사전 검측후 발주부서감독원의 승인을 받아야 한다.

2) 평균기온이 4℃ 이하일 때는 적절한 보온조치를 취한후 발주부서감독원의 승인을 받아 타설하여야 한다.

3) 타설시 콘트리트의 온도는 10℃～20℃를 원칙으로 하며, 서중 콘크 리트는 30℃ 이하로 한다.

4) 다짐에 있어서는 진동기를 사용(거푸집 충격)하고 (수직으로 간격    60cm 이하) 발주부서감독원의 지시에 따라야 한다.

5) 사용자는 레미콘 송장에 반드시 출발시간 확인 및 도착시간을 기록하고, 시간 경과된 재료를 사용하여서는 안된다.

(기온 25℃ 이상 90분 이내, 25℃ 이하 60분 이내)

라. 양   생

1) 타설 후 최소 5일간은 콘크리트표면을 습윤상태로 유지하고 2℃ 이상의 온도를 유지하여야 한다.

2) 타설 후 경화를 시작할 때까지 직사광선이나, 바람에 의해 수분이 증발 하지 않도록 보호해야 한다.

3) 콘크리트의 표면을 해치지 않고 작업이 될 수 있을 정도로 경화하면콘크리트의 노출면은 양생용 매트, 가마니등을 적셔서 덮거나 또는 살수를 하여 습윤상태로 보호해야 한다.

4) 거푸집이 건조하면 살수를 실시한다.

마. 마   감

1) 타설 및 다짐후에 콘크리트의 표면은 요구되는 정밀도와 물매에 따라 평활한 표면마감을 해야 한다.

2) 블리딩, 들뜬 골재, 콘크리트의 부분침하등의 결함은 콘크리트 응결전에 수정처리를 완료해야 한다.

3) 거푸집을 철거후 벽체 표면에 곰보등 흠이 생기면 이 부위를 최소   2.8cm 깊이로 제거한 후 시멘트풀로 칠한후 1: 2의 몰탈로 채워야 한다.

바. 시   험

1) 계약상대자는 발주부서감독원의 지시에 따라 제반시험을 실시하여야             한다.

2) 슬럼프 시험은 타설 당일 1일 1회 이상 실시하여야 한다.

3) 1회 시험용공시체는 3개를 제작하며 이때 제작틀은 골재의 최대치수 40mm 이하는 대형을, 25mm 이하는 소형을 사용한다.

4) 레미콘 압축강도 시험은 150m3 당 1회 이상 실시하며, 1개소당 타설량이 10m3 미만의 산재한 구조물은 필요시마다 실시한다.

4. 아스팔트포장

가. 프라임코트

1) 프라임코트에 사용되는 역청재료는 RS(C)-3 또는 발주부서 공사감독자의 승인을 받은 재료로서 KSM2203(유화아스팔트)의 기준에 합격하는 것이어야 한다.

2) 사용할 역청재료가 유화아스팔트인 경우에는 제조후 60일이 넘은 것은  사용해서는 안된다.

3) 사용하는 역청재의 종류는 설계서 또는 발주부서 공사감독의 지시에 따른다.

4) 필요에 따라 발주부서 공사감독자는 시공도중 발췌시험을 지시할 수 있다.

5) 사용량 및 살포온도는 현장조건 시공방법에 따라 달라 현장에 맞는    조건으로 사용해야 한다.

6) 프라임코트를 시공할 표면은 뜬돌, 먼지, 점토, 기타 이물질이 없어야 하며, 보조기층등 역청재를 살포할 표면은 관련 시방서 각 항의 규정에 따라 마무리되어야 한다.

7) 기층표면이 과도하게 건조되어 먼지가 일어난다고 판단될 때에는 프라임코트 시공 전에 기층전면에 걸쳐서 소량의 살수를 하여야 한다.

8) 프라임코트는 표면이 일어나지 않을 정도로 잘 건조된 후 시공해야 한다

9) 기온이 10℃이하일 때는 발주부서 공사감독자의 승인 없이 시공해서는          안된다.

10) 프라임코트는 시공후 RS(C)의 경우 24시간이상 양생해야 한다.

11) 역청재가 표면에 침투후 24시간 경과후에 관찰한 결과 적게 살포된 부분은 추가로 살포하여 시정해야 하며, 역청재가 과다하거나 또는 표면에 완전히 흡수되지 않는 경우에는 표면에 모래를 살포해 과다 역청재를 흡수토록 해야 한다.

12) 프라임코트의 이음부분은 과소 또는 과다살포가 되지 않도록 주의하여야 한다. 이 경우 이미 살포한 프라임코트에는 살포한 선을 따라 비닐등을 덮어 추가살포가 되지 않도록 하고, 그 후 인접부분을 살포하는 것이 좋다.

13) 우천시에 시공해서는 안되며, 작업도중 비가 내리기 시작하면 즉시 작업을 중지해야 하며, 일몰후 시공하여서는 안된다.

14) 역청재를 살포한 프라임코트의 표면은 상층이 완료될 때까지 계약상대자의 책임으로 손상되지 않도록 유지하여야 한다.

15) 포장시공전에 상층에 손상이 생기면 도급자 부담으로 보수하여야 한다.

나. 텍코트

1) 텍코트에 사용할 역청재는 RS(C)-4로 하며 KSM2202, 2203의 규격에  합격하는 것이어야 하며, 발주부서 공사감독자의 사전승인을 받아 사용하여야 한다.

2) 사용할 역청재료가 유화아스팔트의 경우에는 제조후 60일이 넘은 것은   사용하여서는 안된다.

3) 발주부서 공사감독자는 시공중에도 발췌시험을 지시할 수 있다.

4) 역청재료의 살포에는 특별한 경우가 아니면 균일하게 살포할 수 있는 아   스팔트 디스트리뷰터를 사용해야 한다.

5) 디스트리뷰터의 출입이 곤란한 협소한 곳에는 발주부서 공사감독자의    승인을 받아 엔진 스프레이어 또는 핸드스프레이어를 사용할 수 있다.

6) 텍코트를 시공할 포장면은 시공전에 뜬돌, 점토, 점토 기타 유해물을 제거 하고 공사감독자의 검사 및 승인을 받아야 한다.

7) 표면이 일정치 못한 파형부분은 적절한 재료로 치환, 보수해야 한다.

8) 택코트는 표면이 깨끗하고 건조할 때 시공하여야 한다.

9) 기온이 5℃이하일 때는 발주부서공사감독자의 승인 없이는 시공하여서는          안된다.

10) 역청재 살포량은 과잉살포가 되지 않도록 주의하여야 하며, 발주부서 공사 감독자가 지시한 양 이상으로 살포하여 포장의 결합에 유해하다고 판단되는 경우에는 역청재를 제거하고, 재시공하여야 한다.

11) 역청재 살포후 즉시 로울러로 택코트 살포가 균일하지 못한 부분을     시정해야 한다.

12) 역청재를 살포한 표면은 표층완료시 까지 손상이 되지 않도록 보호하여야 하며, 택코트에 손상이 생기면 표층 깔기 전에 보수하여야 한다.

5. 보도 포장

가. 안정층

1) 안정층은 모래포설로 하며 입도는 0～8mm로 한다.

2) 모래 포설두께는 4cm로 하고 다짐을 정밀하게 하여야 한다.

3) 다짐을 평면 진동기로 한다.

4) 안정층 포설을 횡단구배, 시공기준선을 두어 일정한 기준의 레일을     깔고 수평고르기는 인력으로 한다.

나. 블록깔기

1) 안정층 위에 수평 및 평형을 위한 실줄을 설치하여야 하며, 그 높이는 안정층 윗면으로부터 10cm 위에 설치한다.

2) 안정층 위에 설치된 실줄을 따라 한줄씩 및 수줄을 포설한다.

3) 넓이와 각도를 수시로 확인하여 포설하고, 블록의 간격은 2～3mm 이내로 유지하여야 한다.

4) 블록은 보행진행 또는 차량진행방향을 기준으로 마감부 부터 연속적으로 포설한다.

5) 블록의 경계부는 표준블록보다 약간 낮게 설치한다.

6) 기준 경계부 및 조건에 따라 모서리 및 마감부분 시공은 콘크리트      절단기를 사용하여 미관을 고려 이가 맞게 절단 시공한다.

다. 표면다짐

1) 블록깔기 완공 후 표면에 약간의 모래를 살포하고 인위적으로       줄눈을 충진 시켜가며 표면다짐을 하고 청소한다.

2) 모래의 입도는 0 ～ 3mm로 한다.

3) 블록 표면다짐은 콤펙터 다짐으로 3 ～ 4회 한다.

라. 기타 이외 사항은 “서울특별시 보도포장설계․시공편람”의 기준에 의거 발주부서 감독관의 승인을 득하여 시공한다.

6. 기층재 포설

가. 보조기층

1) 보조기층재료는 견고하고 내구적인 부순돌, 자갈, 모래, 슬래그 기타 공사 발주부서 감독자가 승인한 재료 또는 이들의 혼합물로 점토질, 실트, 유기 불순물, 기타 유해물을 함유해서는 안된다.

2) 재료의 외형은 비교적 균일한 형상을 가지고 있어야 하며, 골재원 선정  및 변경은 발주부서 공사감독자의 사전승인을 받아야 한다.

3) 콘크리트포장 공법에서 콘크리트 슬라브 바로 밑에 사용되는 보조기층은   수정 CBR치가 80이상이어야 한다.

4) 보조기층재료의 시료 및 시험결과를 발주부서 공사감독자에게 제출하여야  한다.

5) 재료의 승인을 위한 시료채취는 재료의 생산중 발주부서 공사감독자가 행하는 것으로 한다.

6) 보조기층은 토공시방 규정에 따라 완료된 노상면 위에 깔아야 한다.

7) 보조기층은 노상면이 연약하거나 동결상태에 있을 때 깔아서는 안되며,  노상면이 부적합할 경우에는 면고르기, 재다짐 또는 필요한 경우 치환 등을  실시하여 시방서에 맞는 노상면을 준비하여야 한다.

8) 보조기층 재료는 소정의 입도 및 시방에 맞도록 혼합한 후 발주부서 공사 감독자의 승인을 받아 현장에 반입하여야 한다.

9) 혼합된 보조기층 재료는 입도가 균일하여야 하며, 소정의 함수비를 가지고  있어 재료의 저장, 운반, 깔기 중 재료분리가 일어나지 않도록 예방하여야  한다.

10) 보조기층 재료는 운반, 깔기 및 다짐시에 적절한 함수비를 가지고 있어야 한다.

11) 깔기에 사용하는 장비는 재료분리를 일으키지 않는 장비이어야 한다.

다만 깔기 장비가 들어갈 수 없는 협소한 지역이나 특수한 지역의 경우         에는 발주부서 공사감독자의 승인을 받은 장비를 사용할 수 있다.

12) 보조기층 재료의 깔기는 다짐 후 1층 두께가 20Cm가 넘지 않도록 재료를 균일하게 깔아야 한다.

13) 보조기층은 설계서에 별도 표시가 없으면 기층 끝단에서 양옆으로 각각   60Cm 이상씩 연장 시공하여야 한다.

14) 균일하게 깔은 보조기층은 진동로울러, 타이어로울러 또는 람마로 충분히 다짐을 실시하여야 한다.

11) 다짐은 길어깨로 부터 중앙쪽으로 점진적으로 시행하되 전회 다짐한 곳을 겹쳐 다져야 한다.

12) 보조기층은 마무리면은 계획고보다 3㎝이상 차이가 있어서는 안된다.

13) 완성된 보조기층의 두께측정은 커터로 자르거나 구멍을 파서 측정한다.

14) 보조기층은 시공기간중 항상 양호한 상태로 유지되어야 하며 손상부분은 즉시 보수하여야 한다.

15) 보조기층 마무리면은 기층을 깔기전에 적절한 함수비를 함유하고 있어야  한다. 완성된 보조기층면위를 공사용 차량이 왕래하였거나 발주부서 공사감독자가 필요하다고 인정하는 경우에는 재시험을 실시하여 발주부서 공사감독자의 승인을  다시 받아야 한다.

14) 시험결과 불합격 되었을 경우에는 본 시방서에 따라 도급자 부담으로 재시공하여야 한다.

7. 거푸집

1) 거푸집용 합판은 KSF3110 콘크리트 거푸집용 합판의 요건에 합치하는 제품이어야 하며, 휨이 발생하지 않고 매끈한 표면을 유지할 수 있는 두께로  16㎜ 이상이라야 한다.

2) 콘크리트 타설전 내부의 이물질, 오물을 완전제거하고 박리제 등을 발라야 한다.

3) 거푸집 철거시기는 아래 일수를 기준 한다.

기 온	기 초	기둥보, 벽측면	스라브, 보저면	비 고
5℃ 이상	3～9일	6～9일	14～21일

※ 기온이 5℃ 이하일 때는 1일을 0.5일로 계산한다.

4) 거푸집은 콘크리트 표면을 손상하거나 파손하지 않으며, 콘크리트 부재에 과재하중을 주지 않고 거푸집을 변형시키지 않은 방법으로 해체해야 하며, 공기압력이나 기타 승인된 방법을 사용해야 한다. 콘크리트에서 지렛대로 들어올려서는 안되며, 못은 평면에 맞추어 잘라내야 하고, 표면은 깨끗하고 흠이 없게 유지해야 한다.

8. 관부설 및 접합공

가. 시공조건 확인 및 준비

1) 터파기 표고 및 관구배가 시공 상세도면에 명시 된 대로인지 확인하여야 한다.

2) 터파기는 요구된 표고로 인력으로 다듬어야 하며, 터파기는 기초용 골재로  메워서 고루어야 한다.

3) 관의 손상을 줄 수 있고 되메우기와 다짐에 지장을 줄 수 있는 큰 돌등  단단한 물건은 제거해야 한다.

나. 관부설

1) 관, 연결재 및 부대품은 해당규격과 제작자의 지침서에 따라 부설해야하며, 이음은 수밀하게 봉함해야 한다.

2) 관은 여과용 골재로 10㎝ 이상의 깊이로 돋운 바닥면에 부설해야 한다.

3) 관은 도면에 명시된 경사에 맞추어 부설하고, 경사의 변동은 3m의 연장에     3㎜ 이내라야 한다.

4) 골재는 관의 측면과 정부에 포설하고, 정부의 덮개는 다져진 두께가 30㎝  이상이고 95%이상의 다짐도로 다져야 한다.

5) 다질 때 관을 변위시키거나 손상을 주어서는 안된다.

9. 측구, 표면배수시설

1) 땅파기한 바닥면은 정확한 표고로 깨끗하고 매끈하게 다듬어야한다.

2) 바닥기초는 거푸집을 설치하고, 하수관의 단부에 맞추어 현장치기 콘크         리트를 치고 표면을 수평으로 고루어야 한다.

3) 현장치기 콘크리트로 제작하는 동체에는 하수관이 연결될 수 있도록 슬라브를 두어야 한다.

4) 관의 유입구와 유출구는 명시된 표고와 바닥에 맞추어야 한다.

5) 뚜껑과 틀은 그라우트를 메워서 수평되게 앉히고, 명시된 표고로 원추형 상단부에 고정되게 해야한다.

10. 줄눈재료

1) 줄눈판은 콘크리트 슬라브 팽창수축에 순응하고 팽창시에 밀려 빠져나오지않아야 하며 수축시에는 콘크리트 슬라브 사이에 틈이 생기지 않는 것 이어야 한다. 줄눈판은 또한 내구적이고 설치할 때나 콘크리트를 다질 때에 부서지거나 구부러지거나 비틀어지지 않는 것으로 발주부서 감독원의 승인을 받은 것을 사용하여야 한다.

2) 주입 줄눈재는 콘크리트 슬라브가 팽창수축에 순응하고 콘크리트와 잘 부착하고 물에 녹지 않으며 방수성이고 고온법에 유출되지 않으며 저온법에도 충격에 잘 견디고 토사 등의 침입을 막고 또한 내구적인 것으로서  발주부서 감독원이 승인한 것을 사용하여야 한다.

3) 주입줄눈재용 프라이머는 주입 줄눈재에 적합한 품질의 것을 사용하여야   한다.

11. 기타

1) 본 시방서에 명기되지 아니한 사항은 건설기술관리법시행규칙 제14조의2 의 표준시방서, 전문시방서에 따른다.