보 고 서
			담당	팀장
				04/23
문서번호	공사감독2처-4873
보존기간	5년		협 조
결재일자	2014.04.23.
공개여부	공개
제 목	공사실정보고(면목4동 가배수관로부설-물돌리기)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로설치공사

나. 공사기간 : 2013. 1. 8 ~ 2015. 6. 30.

다. 도 급 비 : 총5,365백만원

라. 공사개요

○ 공릉2빗물펌프장 : 토출용량469㎥/분,  인입관거 412m

○ 면목4동 배수관로 : 강관추진(∅1,500mm@2련) 53m

마. 도 급 자 : (주)승영기술공사 대표 김성찬

바. 발주기관 : 도시기반시설본부(방재시설부)

2		보고 및 검토내용

가. 현황 및 문제점

○ 면목4동 고지배수관로(Ø1,500mm@2열, 26m) 추진기지 위치가 기존배수관로(□3.5×2.5) 상에 위치하고 있어,

○ 추진기지 설치 전에 당초 계획된 저지배수관로(□1.0×1.0)부설 후 우수 및 오수를 처리코자 하였으나 추진기지 가시설 저촉 및 사유지 저촉 으로 저지배수관로 우선부설이 불가한 실정으로,

○ 기존 하수처리를 위하여 추진기지 옆으로 가배수관로(물돌리기) 부설이 불가피한 실정임.

▶ 위치 및 배관도

추진기지

가배수관로

ㆍ가배수관로(물돌리기) : 이중벽관(Ø800mm), 연장 16m

나. 검토의견

○  상기와 같이 추진기지 설치에따른 우수 및 오수 처리를 위한 가배수관로(물돌리기)를 설치함이 타당하다고 사료됨.

ㆍ추가공사비 : 11,660천원

3		행정사항

○ 상기사항에 대한 검토내용을 발주처에 제출하고 결과에 따라 처리코자 합니다.

붙임 : 공사비 산출내역(가배수관로) 1부. 끝.