보 고 서
			담당	팀장
				07/24
문서번호	공사감독2처-12003
보존기간	5년		협 조
결재일자	2014.07.24.
공개여부	공개
제 목	공사실정보고(작업여건 변경, 주간 → 야간)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

나. 공사기간 : 2013. 1. 8 ~ 2015. 6. 30.

다. 도 급 비 : 총5,365백만원

라. 공사개요

o 공릉2빗물펌프장 : 토출용량469㎥/분,  인입관거 412m

o 면목4동 배수관로 : 강관추진(∅1,500mm@2련) 53m

마. 도 급 자 : (주)승영기술공사 대표 김성찬

바. 발주기관 : 도시기반시설본부(토목부)

2		보고 및 검토내용

◯ 저지배수관로 부설 작업여건 변경(주간 → 야간)

- 위  치 : 면목4동 727-121(한마음교회) ~ 면목로 27길

- 규격 및 연장

ㆍPC박스(□1.0m×1.0m) 55m, 흄관(Ø800mm) 73m

- 변경사유

ㆍ 상기위치는 주간에 공사토록 되어 있으나 공사구간이 교통이 혼잡한 서울시 간선도로인 동일로를 횡단하여야 하고

ㆍ 한마음교회 주차장 출입구에 위치하고 있어 주간 출입차량인해 야간공사가 불가피한 실정임.

- 위 치 도

면목4동 한마음교회～ 면목로 27길	동일로 (횡단)

◯ 검토의견 : 공사시행 시간변경(주간 → 야간)

- 간선도로로서 주간에 차량 교통통제가 불가능한 동일로 횡단,

- 주간 차량 진ㆍ출입이 많은 한마음교회 주차장 구간 및 동일로 진입로(면목로 27길)로서 차량 신호 및 통행에 지장이 없는 야간에공사함이 불가피 하다고 사료됨.

ㆍ공사개요

구 분	관종 및 구경	연 장	비 고
계	흄관(Ø800mm) PC박스(□1.0m×1.0m)	73.4m 55.3m
동일로 북측 (의정부 방향)	흄관(Ø800mm) PC박스(□1.0m×1.0m)	19m 45.3m
동일로 남측 (영동대교 방향)	흄관(Ø800mm) PC박스(□1.0m×1.0m)	54.4m 10m

- 소요공사비 : 증) 20,427천원

3		행정사항

○ 상기사항에 대한 검토내용을 발주처에 제출하고 결과에 따라 처리코자 합니다.

따로붙임 : 1) 공사비 내역서 1부.

2) 저지배수관로 종ㆍ평면도 1부. 끝.