보 고 서
			담당	팀장
				10/25
문서번호	공사감독2처-14293
보존기간	준영구		협 조	과장
결재일자	2016.10.25.
공개여부	공개
제 목	공사실정보고(제5회)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 신월1동 223번지 외 7개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2015. 4. 18 ~ 2016. 12. 23

다. 공사개요 : D=20∼300mm, L=2,453m

라. 도 급 액 : 534,617,510원

마. 발 주 청 : 강서수도사업소(급수운영과)

바. 시 공 사 : 민천건설(주) 대표 김명옥

2		보고내용

상기 공사와 관련하여 시공사로부터 “민천16-10-23(2016.10.24)”호로 실정보고가 접수되어 아래와 같이 검토 보고합니다.

가. 분기부 시공방법 변경

1) 현황 및 문제점

- 당초 8구간은 150㎜ 신설관을 400/300 분기에 연결하는 것으로 설계되어 있으나 GIS도면과 달리 400㎜에서 분기된 300㎜ 기존관로가 다른 관로와 연결되어 있기에 설계대로 시공이 불가능한 실정임.

· 위치：신정동 204-7 (7구간 종점부 교차로)

· 규모：당초-400/300 분기에 150㎜ 신설관 연결

변경-300/150 부단수 분기

□ 위치 및 현황

공사위치(8구간)

기존관GIS현황

현장 현황

300/150 부단수 분기 후 관 연결

기존400mm

기존300mm

기존200mm 캡설치

기존300mm

기존400mm

기존200mm

2) 검토의견

- 발주처, 공사감독, 현장대리인이 입회한 현장 확인 결과 기존관 부설 상황이 설계와 상이하여 설계대로의 시공이 어려운 실정임. 이에 대하여 300/150 부단수 분기하여 신설관을 부설토록하는 발주처의 구두 승인으로 우선 시공하고 추후 설계변경시 반영코자 함.

※ 개략공사비 : 증) 394천원

3		조치의견

- 상기 보고내용을 발주청에 승인 요청하고 그 결과에 따라 조치하고자 함.

붙임 : 시공업체 실정보고서 1부.  끝.