공사 실정 보고 검토 결과서

공 사 명 :  군자교 ~ 군자역간 송배수관 정비공사

공사기간 : 2016. 9. 2 ~ 2016. 12. 30

공사개요 : 구경 500mm, 연장 520m

도 급 액 : 257,399천원

시 공 사 : ㈜인포건설 , 대표자 김동곤

구 분	공단 공사실정 보고내용	사업소 검토의견	적용사항
공사감독2처 -16219호 (2016.11.22.)	가) 당초 본공사의 시험 굴착은 7개소로 설계되었 으나, 나) 정확한 「지하 시설물 및 지반정보」를 확인하기 위하여 추가적인 시험굴착이 필요한 실정임	가) 실정보고 내용대로 추가적인 시험 굴착을 시행하여 지하 시설 물에 대한 안전 관리에 만전을 기하여 주시기 바람 나) 또한,추가 시험굴착에 대하 여는 설계 변경시 반영 조치 하시기 바람.	설계 변경시 반영조치