공사실정보고 검토결과서

□ 공 사 명 : 제기동 1152-10~142-12외 4개소 배급수관 정비공사

□ 공사개요 : D=150~300㎜, L=2,285m

□ 공사기간 : 2017.05.11. ~ 2017.12.03.

□ 도 급 액 : 892,580,300원

□ 시 공 사 : 케이비알건설산업(주) 대표 구영규

□ 감독기관 : 서울시설공단(공사감독2처)

구 분	실정보고내용	사업소 검토의견	적용사항
공사감독2처-9746호 (2017.09.08.)	❍ 3구간 횡단굴착 실시 결과 지하 매설물로 인하여 일부 구간 측구 하단 부설 필요 ❍ 신설관로 측구 하단 부설에 따른 신규단가 발생 및 물량 변경 ❍ 측구 깨기에 따른 복구공사 시행 검토	❍ 향후 유지관리를 위하여 측구 하단 부설 연장 최소화하여 시공함이 타당함. ❍ 신규단가 발생 및 물량변경은 설계변경시 반영토록 함. ❍ 측구 복구는 도로굴착 허가 내용(원인자복구)에 따라 원인자 시행함이 타당함. - 차로폭 평삭 후 재포장	❍ 설계변경시 반영 ❍ 우리사업소 관내 포장복구업체에 복구의뢰