보 고 서
			담당	팀장
문서번호	공사감독3처-1250
보존기간	3년		협 조
결재일자	2014.02.17.
공개여부	공개
제 목	공사실정보고 7회(어린이대공원 놀이동산 재조성사업 전기공사)

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 어린이대공원 놀이동산 재조성사업 전기공사

나. 공사개요 : 옥외보안등 공사 1식, 건축전기공사 1식, 옥외전기철거 공사 1식

다. 도 급 비 : 194,874,000원(총차)

- 1차분 : 91,541,000원, 2차분 : 103,333,000원

라. 공사기간 : 2012. 12. 14. ~ 2014. 4. 30.

마. 도 급 자 : 라온엘에스디(주) 대표 임순옥

바. 발 주 처 : 동부공원녹지사업소 시설과

2. 보고내용

- 상기 공사에 대한 일부 변경사항이 발생하여 아래와 같이 보고 합니다.

공 종	현황 및 문제점	검토의견 및 대책	개략금액 (순공사비, 천원)	비 고
1. 전력간선 설비공사	▷설계에 공원등 분전반 설치가 과학관옆에 설치토록 되어 있으나 유지관리업체에서 안전 및 미관을 고려 전기실 울타리내 설치 요청	▶공원등 분전반 설치 위치를 전기실 울타리내에 설치하고 설계변경 반영	(증) 228	회의록 (2.14)

3. 조치의견

- 상기 일부 변경사항을 발주처에 통보하여 승인을 득한 후 변경 시행하고자 함.

붙 임 : 1. 회의록 1부.  끝.