보 고 서
			담당	팀장
문서번호	공사감독3처-3167
보존기간	3년		협 조
결재일자	2014.04.18.
공개여부	공개
제 목	공사실정보고 8회(보완)

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 어린이대공원 놀이동산 재조성사업 전기공사(2차)

나. 공사개요 : 옥외보안등 공사 1식, 건축전기공사 1식, 옥외전기철거 공사 1식

다. 도 급 비 : 95,060,000원

라. 공사기간 : 2012. 12. 18. ~ 2014. 4. 30.

마. 도 급 자 : 라온엘에스디(주) 대표 임순옥

바. 발 주 처 : 동부공원녹지사업소 시설과

2. 보고내용

- 상기 공사에 대한 일부 변경사항이 발생하여 아래와 같이 보고 합니다.

공 종	현황 및 문제점	검토의견 및 대책	개략금액 (순공사비, 천원)	비 고
1. 옥외보안 등 공사	▷설계에 공원등 등주내 배선(F-CV 4㎟*2C × (5m*2L))이 반영토록 하였으나 등기구 제작사에서 등주내 배선이 제작, 납품되어 별도 반영이 불필요한 실정임	▶설계에서 공원등 등주내 배선 제외	(감) 1,016

3. 조치의견

- 상기 일부 변경사항을 발주처에 통보하여 승인을 득한 후 변경 시행하고자 함.  끝.