문서번호	토목부-23394
결재일자	2016.11.15.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
협조

공사용도로 및 교통안전시설물 설치 검토보고

- 광복교~안양교 도로확장공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

도시기반시설본부

(토목부)

공사용도로 및 교통안전시설물 설치 검토보고

- 광복교~안양교 도로확장공사 -

안양천 제외지의 보도 및 자전거도로를 통해 공사차량이 안양교 공사장에 진출입함으로써 공사용도로 및 우회도로(보도, 자전거도로) 조성 및 교통안전시설물 설치로 원활한 공사추진을 도모하고 시민의 안전을 확보하고자 하며, 공사중 교통소통대책 유관기관 협의 결과에 따른 안전시설물 설치 검토보고임.

▢ 관련근거

○ 광안건 제2016-154호(2016. 11. 15.) :

안양교(좌안) 공사용도로 및 교통안전시설물 설치 실정보고 승인 요청

▢ 공사개요

○  위   치  : 광명시 철산동~구로구 구로동 구로IC

○ 규    모  : 도로확장(B=4차로→6차로, L=1.11km)

- 광복교 보도설치(L=67m), 안양교 철거 및 신설(L=275m, 아치교)

○ 공사기간  : '16. 4. 1. ~ '19. 9.12

○ 도 급 비  : 42,186백만원(1차 : 4,710백만원)

○ 시 공 사  : ㈜KCC건설

○  감 리 사  : ㈜동부엔지니어링외 2개사

▢ 추진경위

○ `16.07.21. : 공사중 교통소통대책 협의 회신(광명시 광역도로과-15866호)

- 차량 진출입시 안전사고 발생하지 않도록 안전요원 상시배치

○ `16.08.16  : 공사중 교통소통대책 협의 회신(광명경찰서 경비교통과-6444호)

- 공사중 우회도로 및 대체도로 확보

○ `16.09.01 : 교통안전시설 개선조치 통보(서울지방경찰청 교통관리과-25111호)       - 안내표지판, 공사구간 통제수 배치 교통혼잡 방지, 교통처리계획 지도

▢ 건설사업관리단 보고내용

○ 안양천 좌안 하부 공사차량 진출입시 보도 및 자전거도로 이용자의 안전확보를 위해  관계기관(서울지방경찰청, 광명경찰서) 규제심의 요청에 따라 공사용 도로를 개설하고,

○ 공사시 단계별 교통안전시설물을 설계에 반영하여 공사주변 보도 및 자전거도로  이용자 안전을 확보함이 타당한 것으로 사료됨.

▢ 단계별 시공계획

구 분	규제심의내용	검토의견
1단계 (공사용 도로 개설)	ㆍ하천옆 자전거도로 차단 및 우회 ㆍ보행자 및 자전거 이용자 안전을 위한 통제수 배치 ㆍ공사차량과 물놀이 시설 분리용 강성 방호벽 설치 ㆍ교통통제수에 의한 교통류 관리 (교대통행)	ㆍ공사 안내표지판 및 안전시설물 설치 (1개소에 3개 설치 -0m,50m,100m) ㆍ교통신호수 배치 및 가교제작장에 가림막 울타리 설치 ㆍ물놀이시설 안전로프 활용하고 추후 민원발생시 설치 검토 ㆍ교통신호수 배치
2단계 (가교 Seg1-Bent2 시공중)	ㆍ기존 보도 및 자전거도로를 하천옆 공사용도로로 우회	ㆍ기존 보도 및 자전거도로 우회 안내 간판 및 안전시설물 설치
3단계 (가교 Seg1-Bent2 완료후)	ㆍ기존 보도 및 자전거도로 통행	ㆍ기존 자전거도로 가교 벤트 위치에 따른 안전 시설물 설치

▢ 수량 증․감 대비표

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증․감	비고
<공사용도로>
무근콘크리트깨기	T=30cm 미만(기계)	㎥	-	167	167
보조기층포설 및 다짐	백호우포설	㎥	-	46	46
콘크리트포장/포설	T=20cm	㎡	-	900	900

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증․감	비고
<교통안전시설>
안내간판	A형(900×1800)	ea	-	33	33
쏠라경광등	Φ125	ea	-	7	7
쏠라윙카호스	10M/롤	m	-	351	351
PE드럼	Φ550×850mm(분리형)	ea	-	50	50
PE방호벽	1200×600×900mm(중형)	ea	-	30	30
차선규제봉	Φ200×Φ80×750mm	ea	-	10	10
가림막휀스	w3000×H1800	경간	-	57	57
<관급자재>
레미콘	25-21-08	㎥	-	171	171
<폐기물>
폐콘크리트운반비		㎥	-	167	167
폐기물처리비		ton	-	385	385

▢ 공사비 증⦁감 대비표

(단위:백만원)

공 종	금 액		증 감	비 고
	당 초	변 경
직 접 공 사 비	-	84	84
관 급 자 재 비	-	11	11
폐 기 물 처 리 비	-	12	12
계	-	106	106

▢ 조치계획

○ 상기 책임건설사업관리자의 보고내용과 같이 공사용도로 및 우회도로(보도, 자전거도로) 조성 및 교통안전시설물 설치 공정에 대하여 추후 자문회의를 거쳐 설계변경에 반영하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.