공 사 작 업 일 지

ㅇ공사명 : 북한산 구조창고 공사

(최고)30°c

ㅇ일  자 : 2015. 06. 11.  목요일       ㅇ날  씨 : 맑음   기온 : (최저)21°c

ㅇ작성자 : 현장대리인       최정우 (인 또는 서명)

ㅇ확인자 : 감  독  자       백정현 (인 또는 서명)

1. 공사추진상황

공사종류	설계량	단위	전일까지작업량	금일작업량	누계 작업량	비고
토공사	20㎥		0	20㎥	20㎥

2. 장비투입상황

장비명	규격	전일까지투입	금일 투입	누계 투입	장비명	규격	전일까지투입	금일 투입	누계 투입
백호	9.3㎥	0	1	1

3. 인력투입상황

구 분	전일까지투입인원	금일투입인원	누계투입인원	비 고
보통인부	0	2	2
특별인부

4. 주요작업 참여자명단 (작업반장급 이상)

이효석 외 1명

※ 현장여건에 따라 조정 사용할 수 있음

공 사 작 업 일 지

ㅇ공사명 :  북한산 구조창고 공사

(최고)31°c

ㅇ일  자 : 2015. 06. 16.  화요일       ㅇ날  씨 : 맑음   기온 : (최저)20°c

ㅇ작성자 : 현장대리인       이석준 (인 또는 서명)

ㅇ확인자 : 감  독  자       안상훈 (인 또는 서명)

1. 공사추진상황

공사종류	설계량	단위	전일까지작업량	금일작업량	누계 작업량	비고
석축쌓기				11㎥	11㎥

2. 장비투입상황

장비명	규격	전일까지투입	금일 투입	누계 투입	장비명	규격	전일까지투입	금일 투입	누계 투입
백호	9.3㎥	1	1	2

3. 인력투입상황

구 분	전일까지투입인원	금일투입인원	누계투입인원	비 고
보통인부	2	4	6
특별인부	0	2	2

4. 주요작업 참여자명단 (작업반장급 이상)

서정훈외 3명

※ 현장여건에 따라 조정 사용할 수 있음

공 사 작 업 일 지

ㅇ공사명 :  북한산 구조창고 공사

(최고)31°c

ㅇ일  자 : 2015. 06. 18.  목요일       ㅇ날  씨 : 맑음   기온 : (최저)20°c

ㅇ작성자 : 현장대리인       이석준 (인 또는 서명)

ㅇ확인자 : 감  독  자       안상훈 (인 또는 서명)

1. 공사추진상황

공사종류	설계량	단위	전일까지작업량	금일작업량	누계 작업량	비고
콘테이너 설 치	100%			100%
기존 사무실과 구조창고 연결	100%			100%

2. 장비투입상황

장비명	규격	전일까지투입	금일 투입	누계 투입	장비명	규격	전일까지투입	금일 투입	누계 투입
크레인		0	1	1

3. 인력투입상황

구 분	전일까지투입인원	금일투입인원	누계투입인원	비 고
보통인부	6	3	9
특별인부	2	2	4

4. 주요작업 참여자명단 (작업반장급 이상)

이석경외 4명

※ 현장여건에 따라 조정 사용할 수 있음

공 사 작 업 일 지

ㅇ공사명 :  북한산 구조창고 공사

(최고)29°c

ㅇ일  자 : 2015. 06. 22.  월요일       ㅇ날  씨 : 맑음   기온 : (최저)19°c

ㅇ작성자 : 현장대리인       이석준 (인 또는 서명)

ㅇ확인자 : 감  독  자       안상훈 (인 또는 서명)

1. 공사추진상황

공사종류	설계량	단위	전일까지작업량	금일작업량	누계 작업량	비고
전기인입공사	100%			100%

2. 장비투입상황

장비명	규격	전일까지투입	금일 투입	누계 투입	장비명	규격	전일까지투입	금일 투입	누계 투입

3. 인력투입상황

구 분	전일까지투입인원	금일투입인원	누계투입인원	비 고
보통인부	9	1	10
특별인부	4	1	5

4. 주요작업 참여자명단 (작업반장급 이상)

이석경외 1명

※ 현장여건에 따라 조정 사용할 수 있음

공 사 작 업 일 지

ㅇ공사명 :  북한산 구조창고 공사

(최고)31°c

ㅇ일  자 : 2015. 06. 23.  화요일       ㅇ날  씨 : 흐림   기온 : (최저)20°c

ㅇ작성자 : 현장대리인       이석준 (인 또는 서명)

ㅇ확인자 : 감  독  자       백정현 (인 또는 서명)

1. 공사추진상황

공사종류	설계량	단위	전일까지작업량	금일작업량	누계 작업량	비고
에어콘이설	100%			100%

2. 장비투입상황

장비명	규격	전일까지투입	금일 투입	누계 투입	장비명	규격	전일까지투입	금일 투입	누계 투입

3. 인력투입상황

구 분	전일까지투입인원	금일투입인원	누계투입인원	비 고
보통인부	10	1	11
특별인부	5	1	6

4. 주요작업 참여자명단 (작업반장급 이상)

이석경외 1명

※ 현장여건에 따라 조정 사용할 수 있음

공 사 작 업 일 지

ㅇ공사명 :  북한산 구조창고 공사

(최고)31°c

ㅇ일  자 : 2015. 06. 24.  수요일       ㅇ날  씨 : 흐림   기온 : (최저)21°c

ㅇ작성자 : 현장대리인       이석준 (인 또는 서명)

ㅇ확인자 : 감  독  자       안상훈 (인 또는 서명)

1. 공사추진상황

공사종류	설계량	단위	전일까지작업량	금일작업량	누계 작업량	비고
구조장비 선반	100%			100%

2. 장비투입상황

장비명	규격	전일까지투입	금일 투입	누계 투입	장비명	규격	전일까지투입	금일 투입	누계 투입

3. 인력투입상황

구 분	전일까지투입인원	금일투입인원	누계투입인원	비 고
보통인부	11	2	13
특별인부	6	0	6

4. 주요작업 참여자명단 (작업반장급 이상)

황정연외 1명

※ 현장여건에 따라 조정 사용할 수 있음