공사현장별 현안사항

(29개 현장 38건)

< 토목총괄과 >

연번	사업명	현안사항	조치계획
1	월드컵대교 건설공사	부반력 방지를 위한 교량상부 형식 변경 - 곡선교 부반력에 대한 안정성 확보를 위해 외부전문가 기술 자문(‘13. 9.~’14. 3.)받은 바 있으나(DCB 공법 : 시공사 제안), - 유사 대안공법(SB-Arch)이 있어 경제성, 안정성 등을 비교 검토하여 최적의 공법을 선정코자 함	- 안정성, 경제성, 시공성 등을 고려 투명하게 공법을 선정하기 위하여 기술심사담당관에 공법선정을 의뢰(‘15. 1.29)하여 처리코자 함
		시민감사 옴부즈만 직권감사 현황 보고 시민감사 옴부즈만 직권감사 처분결과 「북단IC 분류하수관 보호공」 설계변경 시 공사편의와 원가절감 목적으로 시공사 주도로 설계변경을 추진하였으므로 기 적용한 협의율을 낙찰율로 조정 적용, 약 2,871 백만원 감액 조치 요구 재심의 요청(‘14.12.31)	1.30(금) 재심의 예정이며, 발주처 협의와 지시로 인한 설계변경이므로 협의율을 적용하는 것이 타당함을 소명하고 소명이 받아들이지 않으면, 처분 결과에 대하여 법무담당관 변호사 자문을 받아 처분결과를 통보해 줄 것을 요구할 예정임
2	장안교 (구교) 성능개선공사	가설교량 시공구간 지장물 저촉 보고 - 가설교량 교각설치 지점에 지장물(가스관) 확인	둔치 좌·우측에서 지장물 확인을 위한 줄파기 시행 시공성, 경제성 등을 검토하여 이설 및 존치를 확정 후 공사시행
3	서대문고가 철거공사	공사중 교통처리계획 규제심의 처리지연 - 공사중 교통처리계획 규제심의 요청(‘14.12. 1.) 및 자료보완 후 재요청(’15. 1.13.) 하였으나, 심의가 지연되고 있음	2월에는 규제심의 상정 및 심의가 완료될 수 있도록 관련부서(서울지방경찰청)와 협의

< 광역도로과 >

연번	사업명	현안사항	조치계획
4	구리 암사대교 건설	【시설물 인수인계 추진】 준공이 임박함에 따라 시설물별 유지관리주체 지정 등 사전점검을 통해 인수·인계 차질없이 추진 ▪ 운영부서 현장 합동점검(’14.9.24) ▪ 유지관리주체 지정 등 관계부서 협조 요청(’14.11 / ’15.1)	시설물 관리부서 회의개최 및 현장 합동점검을 통해 시설 보완 등 인수인계 추진 ▪’15.2.10 : 회의 개최 ※ 기 완료구간 인수인계 방안 등 ▪’15.2.∼5. : 현장 합동점검 ▪’15.6. : 최종 점검 ▪’15.7.1 : 시설물 인수인계
		【아천IC,Ramp-K,L 개통방안】 아천IC, Ramp(K,L) 접속부 평면교차 구간 개통방안 검토 추진	아천IC 일대 교통량 조사 등 교통영향평가후 대안 마련 ※ 교통영향평가 : 1.5개월 구리시, 경찰서 등 관계기관 협의 결정
		【구리시 요구사항 검토】 한강시민공원 진입도로 및 통행로 조성 ▪매년(4.1일) 한강 둔치내 축제 행사에 차질이 없도록 3월말까지 완료 요청	행사에 차질이 없도록 감리단 검토를 거쳐 조속 추진
		암사대교 북단 교량 직하부 공간 주차장(잔디블럭 및 벤치)조성 ▪ 면적 : 약 13,000㎡	잔디블럭 조성시 약12억 추가 공사비 발생으로 포장공법(마사토 포장)변경 검토 후 구리시 재협의

연번	사업명	현안사항	조치계획
5	구리 암사대교 연결도로 건설	강일삼거리, 고덕교 확장시행 여부	도로계획과 방침 결정 후 시행
6	남부순환로 (개봉역앞) 구조개선	- 두산아파트 정문앞 방음벽 20m 구간 철거 요청 · 후문으로 진출한 차량이 남부순환로 김포방향으로 진입을 위해 철거를 요구	- 불법 U-TURN으로 사고 위험이 예상되므로 수용 불가 ※ 철거 여부에 대한 아파트 자체 설문결과 560세대중 430세대 참여 하여 찬성 310세대(72%), 반대 120세대(28%), 기권 130세대임
		지중화(한전, 통신)사업 추진 지연 준공기한 공기 부족 · 동절기 공사통제 및 지장물 등으로 공사가 지연되어 준공 기한에 차질 예상	유관기관 합동회의 등 수시 개최하여 사업이 정상적으로 끝날 수 있도록 행정 지원 ※ 향후계획 · ‘15. 5 : 지중화사업 완료 · ‘15.5~6 : 보도포장 완료 · ‘15. 6월 : 준공
7	율곡로 창경궁앞 도로구조 개선	돈화문월대 앞 도로선형 변경 설계	도로선형변경 방침 검토 중
8	서부트럭 터미날 지하차도 건설	지하관리실 이전 요청에 대한 검토(강서도로사업소)	- 강서도로사업소 기전과 요구 사항 등 반영하여 보완대책 마련 중임
		임금지급 체불(3건) 처리	- 가압류 해지조건으로 1/30 지급예정

연번	사업명	현안사항	조치계획
9	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장	- ’15년 예산 과소배정으로 금년 예산(50억) 조기(‘15.8월) 소진으로 공사중지 예상 ※ 간접비 소송 제기 예상	’15년 추경예산 편성시 추가로 50억 요청하여 공사추진 ※ ’16년이후 필요 예산 217억원
		- 암사 정수장앞 사거리부분 평면선형 조정(안) 조속 결정 필요 · 요 구 자 : 이정훈 시의원 · 내 용 평면선형 조정으로 중심선을 15m 이동시 여유토지에 녹지(수림대) 조성 및 차로 추가 확보	’14년 예결위에서 15억 추가예산 요청하였으나 미수용 도시계획시설 변경없이 가용부지 내에서 중심선 이동(5m)하여 여유토지에 조경(수림대) 식재토록 시의원 설득예정
		- 보상완료된 토지내 무단 점유자 (세입자) 지장물(건물, 비닐하우스)에 대한 명도소송 진행 필요 · 고덕동 318-3번지 등 건축물 10동	‘15.2월에 점유이전 가처분 및 명도소송 제기
		- 생태육교 설치에 대한 고덕시영 재건축 조합측과 협의 지연 · 생태육교 2아치계획이 되어있으나, 1아치 추가 요구와 생태육교 상부 조경에 대하여 추가 시공 요구	빠른 시일내 재협의하여 추진 생태육교 부분에 대하여 공사비 50:50 비용분담(안) 제시하였으나, 조합측 답변없음

< 터널건설과 >

연번	사업명	현안사항	조치계획
10	방화대교 남단 접속도로 건설공사	- 램프 하부공은 ‘14. 9월 공사 재개 승인후 ’15. 1월 현재 교각 시공중 (2월말 완료 예정) - 램프 상부공은 ‘14. 12월에 승인신청 및 절차 진행중	- ‘15. 2월중 고용노동부 승인예정 (3월부터 착공)
11	서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사	- 경원선 과선교량 (St Box)은 “시설물의안전에관한특법” 규정에 의거 정기적(5년) 진단 시행 경과 - ‘09. 2. 정밀안전진단 시행	정밀안전진단 결과에 의거 보수보강 시행
12	응봉교 확장 및 성능개선공사	- 터널형방음벽 설치	- 디자인 설계공모 선정후 - 실시설계(2월중) 및 디자인 심의
13	용비교~행당여중간 도로개설 공사	2015년 개통지연	2015년 추경반영 (부족예산 : 29억원)
14	신림~봉청터널 도로건설공사	- 1공구(난곡사거리) 28필지중 23필지 보상이 완료 - 5필지 중토위 수용재결중.	보상완료 건물 3월 단계적 철거 - 미 이주자 명도소송 병행 추진
15	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사	- 시,종점부 민원 및 급경사로 터널형과 반터널형으로 설계 (구배 : 5.7~6.0% → 9.7~10.4%) - ‘14.10월 감사원 감사시 차로폭 축소에 따른 소음 기준 미반영 - 터널형방음벽 설치요구 `	- 감사결과 주민설명회 등을 개최하여 방음벽 형식 검토
16	의주로지하차도 평면화 공사	PC옹벽 제작(2개월) 소요	납품업체 수시점검 공정관리 (3월 착공)

< 교량건설과 >

연번	사업명	현안사항	조치계획
17	동부간선 도로확장 공사(1공구)	- 경원선 철도이설에 따른 공사일시 중지(’12.1 ~ ‘15.12)되었으며, 경원선 철도이설 ’15년 완료 필요한 실정이며 동부간선도로 개통 Critical path 임 - 15. 1월 현재 공정율 (철도이설 68.7%, 월계역사25%) ※ 월계4구역 이주현황 : 210세대중 138세대 이주완료 (수용재결 7월 예정)	- 2015년 12월 말까지 이설공사 완료 토록 공정관리에 만전(도로계획과) - 확장공사 구간내 저촉 편입토지 우선 이주토록 공동대응 마련 (월계4구역 조합 및 시공사, 토목부)
18	동부간선 도로확장 공사(2공구)	- 창동주공아파트(17~19단지)지하화 또는 터널형 방음벽설치 민원 - 지하화 요구로 동부간선도로 전구간 개통(‘17.12월) 지연우려	- 지하화와 터널형 방음벽은 타지역과의 형평성과 경제성 등으로 원칙적으로 불가하고, 아파트별 소음도에 따라 방음벽 설치 계획으로 주민들 이해설득 중임 사업주관부서(도로계획과)에서 최종 방침결정 후 조치 필요
19	동부간선 도로확장 공사(3공구)	- 터널형 방음벽 설치 요구 - 터널형 방음벽은 타지역과의 형평성과 경제성 등으로 원칙적으로 불가	- 아파트별 소음도에 따라 방음벽 설치 계획으로 주민들 이해 설득 - 노원구에서 시행(아주대학교)한 용역결과에 대해 설계자, 비상주감리원등이 검토중에 있으며, 검토결과에 따라 노원구청장을 방문 후 결과에 따라 주민설명회 개최 등 후속조치 이행
20	천호대로(광나루역)확장공사	- 연차별(‘15년 130억원 배정 예정) 예산 확보 곤란으로 공사 장기화 우려 - 당초 `16.12. 공사 준공 예정이었으나 `17년 이후로 공사 준공 연기 불가피 ※ 공사장 안전관리비 등 매몰비용 발생	- ‘15년 예산확보 부족분(70억원)에 대하여 사업주관부서(교통운영과) 추경 확보 요구 도시개발특별회계(도로계획과)를 본공사에 반영토록 협의

연번	사업명	현안사항	조치계획
21	천호대로(광나루역)확장공사	- 파형강판이 구조적으로 안전성을 확보되는 것으로 검토되었으나, 외부 안전점검시 대단면 파형강판 시공시 안전성 우려 및 불안 제기	- 전문가 집단의 자문을 받아 개선방안을 돌출하여 안정성 확보 방안 강구 ※ ‘15.1.15. : 자문회의 실시
22	서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로 및 고척교 확장공사	- 서울지방국토관리청의 안양천 하천점용 변경 및 연장 허가 지연	- 서울지방국토관리청과 지속적인 협의
23	신사사거리~고양시계간 도로개설공사	- 고양시측 건물 영업권 보상지연으로 공사 착수 지연	- 중앙토지수용위원회 수용재결 후 공탁(‘15년 2월) 및 공사 시행

< 토목설계과 >

연번	사 업 명	현 안 사 항	조 치 계 획
24	제물포터널민자사업 실시설계	- 서울시민디자인심의 결과 : 유보(2015. 1.28 14:30)	- 심의결과 국장님 보고 ※ 도시공간개선단 협의 후 행정2부시장 보고예정
25	탄천변동측도로 확장 실시설계	도로계획과 사업계획 검토 중 ※ 노선계획 미결정으로 '12.6.28. 부터 실시설계 용역 일시중지	주관부서와 협의 시행
26	도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입)설시설계	- 화랑로 진입램프 설계완료 진출램프계획(도로계획과) 검토중	주관부서 협의 시행
27	성산대교성능 개선사업 실시설계	- 기본설계중(교량안전과)으로 설계감리 일시 중지	주관부서 협의 시행

< 도시고속도로과 >

연번	사업명	현안사항	조치계획
28	강남순환도시고속도로(4공구)건설공사	- 강남순환 4공구 시점부 지하차도 공기가 서부간선 접속계획 변경에 따른 재설계(‘14. 8월) 및 지하차도공사 구간에 존치하는 무허가 지장물(104동) 철거 지연 강남순환도로와 접속하는 서해안고속도로(성산방향) 접속은 감사원 지적사항을 반영하여 2차로에서 4차로로 확장 시공 종점부(시흥3동) 현대빌라 주변에 터널형 방음벽 설치요구	- 실시설계용역을 ‘15. 2월 완료예정이며 노선 변경없는 남측지하차도부터 착수(‘15. 1월)하고 무허가 건물에 대한 명도소송은 ‘15.2월중 완료하여 3월중 강제철거 예정으로 추진중 5월중 실시설계 완료 및 한국도로공사와 지속 협의하여 접속승인 완료후 공사착수(‘15. 6월) 강남순환도로와 현재빌라와의 수평거리 55m, 높이 9m 이격되어 있어 기설계된 직립형 방음벽으로도 소음기준치 이내로 주민 이해설득
29	강남순환도시고속도로(8공구)건설공사	과천시 구간 도시계획시설결정 및 실시계획 인가와 보상지연으로 절대공기가 부족하여 민자구간 개통(‘16.5월)에 차질 우려	본선 랜딩을 위해 사전절차로 우회로 확보를 위한 주암교 시공부지(과천시구간)에 대한 보상절차 조속 추진 관련부서와 긴밀한 업무협조를 통해 ‘15. 5월까지 보상완료하여 가능한 빠른시일내에 공사착공