(양식)

2017년 안전관리 향상을 위한

공사장 추진 공정 보고회 (6월)

2017. 6. 23(금) 15시

강남수도사업소

(담당자와 검토후 총괄로 보내주세요)

주요공사 추진 현황 보고                                                                                            [2016. 6. 23. 현재]

연번	공 사 명	사업비 (백만원)	사 업 개 요	공정률 (%)	시공사	감독청 (보고자)	업 무 담당자
1	영동2교~영동3교간배수관 정비공사	1,282	D=100~600, L=888m	L= 347m (39.0%)	㈜씨엔씨신한	시설관리공단 (최용원)	박 홍
2	서초1교~진흥아파트교차로간배수관 정비공사	600	D=100~500, L=520m	L= 0m ( 0%)	고황엔지니어링(주)	시설관리공단 (손성국)	이생기
3	이수고가차도~사평지차도간 배수관 정비공사	3,000	D=1200mm L=600m	L= 0m ( 0%)	고황엔지니어링(주)	시설관리공단 (손성국)	강희창
4	압구정동 429번지 외 7개소 배급수관 정비공사	1,470	D=100~300, L=1,890m	L= 660m (34.9%)	진영공영(주)	시설관리공단 (최호진)	고원석
5	개포동 140번지 외 6개소 배급수관 정비공사	1,540	D=150~300, L=1,500m	L=825m (55.0%)	대평건설	시설관리공단 (손성국)	김병주
6	잠원동 50-1번지외 6 개소 배급수관정비공사	1,890	D=150~300, L=2,400m	L= 0m ( 0 %)	㈜일승토건	시설관리공단 (최용원)	김일구

공사추진 현황 보고

(공사명 :               )

□ 사업개요

○ 위    치 :

○ 공사개요 : D=500mm, L=m

○ 공사기간 : 2017. 05. 24 ~ 2017. 11. 19.

○ 수 급 자 :   건설  대표 :

○ 사 업 비 :  백만원 (도급비 :  백만원, 관급비 : 백만원)

○ 발 주 처 : 강남수도사업소 급수운영과  박홍(3146-4853)

○ 감 독 청 : 서울시 시설관리공단 손성국(*************)

○ 공    정 : 0% [D=500mm, L=438m]

□ 추진실적

○ 추진내용

- 시공현황(공정율:34.9%)(실적 660m/목표 1,890m)

- D=30~300mm, L=660m 부설완료(3,4,5,6,7구간 완료)

구간	위치	관경	연장	시공일자		포장복구		비고
				착수	완료	복구현황	복구기관
계			1,890		660
1	압구정동 409-429	300	780	17.06.09			삼주건설 (원인자)	야간
2	신사동 580-2~583	300	290				삼주건설 (원인자)	야간
3	신사동 607-13	100	50	17.04.26.	17.04.26.	가복구	강남구청 (관리청)	주간
4	신사동 607-17	100	70	17.05.02.	17.05.03.		강남구청 (관리청)	주간
5	신사동 589-18~590-22	150	295	17.05.13.	17.05.17.		강남구청 (관리청)	주간,야간
6	신사동 589~589-17	200	150	17.04.28.	17.04.30.	완전복구	강남구청 (관리청)	주간
7	신사동 626-23~626-78	100	95	17.05.04.	17.05.04.		강남구청 (관리청)	주간
8	신사동 626-78~627-21	150	160				강남구청 (관리청)	주간

○ 세부 추진실적 (6.29 ~ 7.21)

- 관부설 D500mm, L= 100m (   에서            까지)

‣ 기존관철거(L=0m) 및 기존관 폐쇄(L=438m)

※ 미철거 사유 :

- 제수변설치: D500mm, 1개소(구형변실)

○ 공사준비 검토사항

- 공사안내판 설치(대형 및 소형) 및 안전관리설치현황

‣ 사전예고 교통안내간판(500, 300, 200, 100m등) 설치

‣ 공사장 전방 싸인보드, 로봇신호수, 에어간판, 교통신호수 배치

- 공사시행전 자재적치 및 운반

‣ 직관은 공사직전 현장으로 자재운반

‣ 이형관 및 기타자재

‣ 공사완료후 남은 자재는 중간집하장으로 운반

○ 공사중 검토사항

- 포장복구(기존 아스팔트 두께등)

‣

‣

- 공사중

‣

○ 공사완료 검토사항

-

‣

‣

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

-

-

○ 대  책

-

-

□ 향후계획

○ 관로 부설(1구간) :

○ 기 성 시 행(1차) :

○ 설계 변경 시행   :

○ 공 사 준 공     :

□ 기타(특이) 사항

○ 노무비 지급 등 공사대금 관련 보고

-

○ 품질, 안전 등 점검사항 보고

- 관충진 시공계획서 및 사급자재공급원 검토

-

-

○ 기타 문제점 및 건의사항 보고

- 특이사항 없음

□ 위치도

1구간 - 8월~9월중 작업완료 예정

2구간 - D300, L=410m완료, D100, L=100m완료 (8월초 작업완료 예정)

범 례(부설)

완료 :

예정 :

□ 사진대지

안전관리(신호수 배치-모범운전자)	안전휀스 설치전경
관부설 및 다짐 전경	제수변설치 및 변실정비
환토재(모래)부설 및 심도 전경	포장복구 및 공사완료 후 물청소 전경