‘17년 노후 배·급수관 정비공사장 자체 현장점검 시행

2017년 우리 사업소에서 시행중에 있는 「노후 배·급수관정비공사 」의 사업소 자체 현장점검을 실시하여 공사장 안전 및 품질관리, 주민불편을 최소화 하고자 함

1		공사현황

○ 2017년 노후배급수관정비공사 현황 :6건(급수운영과 3건, 시설관리과 3건)

연번	공사명	공사개요	진행사항	비고
1	군자동 103-503외 2개소 배급수관정비공사	D=80~200mm L=979m	야간 1~2구간 D=200mm, L=784m 정비중 (596m완료 61%)	급수운영과 (주·야간공사)
2	자양동 229-59~612-17외 3개소 배급수관정비공사	D=150mm L=1,036m	1~4구간 정비완료 L=1,036m(100%)	급수운영과 (주간공사)
3	행당동12번지외 5개소 배급수관정비공사	D=150~300mm L=1,580m	5구간 D=150mm, L=153m 정비중	급수운영과 (주·야간공사)
4	제기동 1152-10~142-12외 4개소 배급수관정비공사	D=150~300mm L=2,285m	확인굴착 시행	시설관리과 (주,야간공사)
5	장안동 93-27~285-1외 6개소 배급수관정비공사	D=80~300mm L=2,554m	D=200mm, L=335m 정비중	시설관리과 (주,야간공사)
6	묵동 170-1번지 외 13개소 배급수관정비공사	D=150~300mm L=1,870m	4구간 D=200mm, L=70m 정비중	시설관리과 (주,야간공사)

2		공사장 현장점검 일정

○ 점검일정 : ‘17.06.08.(목) ~‘17.06.09.(금)(2일간) 오전 10:00 ~

○ 점 검 자

연번	점검일	점검자	비고
1	‘17.06.08(목)	사업소장, 급수운영과장, 급수설비팀장, 담당자, 직반장	급수운영과
2	‘17.06.09(금)	사업소장, 시설관리과장, 시설관리팀장, 담당자, 직반장	시설관리과

3		현장점검 대상

○ ‘17.06.08.(현재) 주간에 진행중인 공사

- 급수운영과

연 번	공 사 명	구간별 공사현황	담당자	비 고 (‘17.06.08.목)
1	행당동12번지외 5개소 배급수관정비공사	D=150mm, L=153m (금호동 1265-78번지 일대-5구간)	김왕근	오전 10:30~11:30

행당동12번지외 5개소 배급수관정비공사(위치도 - 5구간)

※군자동 103-503외 2개소 배급수관정비공사는 야간공사이고 금주에 공사시행 안한 관계로 방문제외

- 시설관리과

연번	공사명	구간별 공사현황	담당자	비 고 (‘17.06.09.금)
1	장안동 93-27~285-1외 6개소 배급수관정비공사	D=200mm, L=335m (장안동 99-13~94-27, 1구간)	박상현	오전 10:00~11:00
2	묵동 170-1번지 외 13개소 배급수관정비공사	D=200mm, L=70m (묵동 122-183~122-376, 4구간)	박윤선	오후 13:00~14:00

장안동 93-27~285-1외 6개소 배급수관정비공사(위치도 - 1구간)

묵동 170-1번지 외 13개소 배급수관정비공사(위치도 - 4구간)

4		행정사항

○ 현장점검시 지적사항에 대하여 시설관리공단에 통보

(지적사항 조치결과 보고토록 조치).끝.