공사장 특정관리대상시설 지정 현황(2014년)

○ 도시기반시설본부 토목부

연번	공 사 명	위치	공사개요	총공사비 (억원)	착공일	준 공 예정일	시행 부서 (과)	업무담당 성 명 (전화 주․야․)	감리사 및 책임감리원 (전화번호)	시공사 및 현장대리인 (전화번호)	공정 (%)	상태 등급 (A~E)	지정 일자	비고
1	강남순환도시 고속도로(4공구) 건설공사	금천구 독산동 ~광명시 소하동 ~금천구 시흥동	연장 2.48km 왕복4~8차로 지하차도 1개소 L=760M 본선교량:820m 토공900m	1,685	'01.12.29	'14.05.19	도시고속도로과	시희식 주)3708-8662 야)#############	서영ENG 장경식 주)3708-8662 야)############	임광토건 백승순 주)809-2945 야)#############	41	D	‘01.12.29	도로
2	강남순환도시 고속도로 8공구	서초구 양재동	8km 지하차도 3개소 교량 1개소	3,681	'02.07.3	'14.05	도시고속도로과	양준식 주)3708-8666 야:)#############	동명기술공단 최태규 #############	롯데건설외1 이상무 #############	20.5	D	‘02.7.3	도로
3	방화대교 남단 접속도로 건설공사	강서구 방화동 ~올림픽대로	도로개설 B=5.9~19.2m, L=3,021m	847	‘05.10.05	‘14.12.31	터널건설과	박근우 주)3708-2566 야)#############	㈜삼보기술단 송기명 주)2662-1256 야)#############	금광기업(주) 염왕렬 주)2666-6782 야)#############	85	D	‘07.05.08	도로
4	구리암사대교 건설공사	강동구 암사동 147-6	B=24~44m L=2,740m	2,318	‘06.04.05	‘14.12.30	광역도로과	조양연 주)3708-2557 야)#############	(주)도화종합기술공사 외 1개사 우재경 주)3427-5014 야)#############	현대건설(주) 이종협 주)442-1502 야)#############	88	D	‘12.01.10	교량
5	용비교-행당중간 도로개설공사	성동구 금호동 4가-성수동	B=19.5-26.4m L=718.4m	277	‘07.03.22	‘14.12.31	터널건설과	이석우 주)3708-2567 야)#############	(주)평화엔지니어링 장현종 주)3395-8842 야 )#############	한신공영(주) 주동수 주)2281-4595 야)#############	70	D	‘07.03.22	도로
6	남부순환로(개봉역앞)구조개선공사	구로구 개봉동 198-1	-지하차도 폭:4차로 연장:736m -남.북측 측도 폭:2~3차로 연장:2,280m	490	‘07.09.10	‘14.06.30	광역도로과	이한규 주)3708-2556 야)#############	(주)동명기술공단 탁승국 주)2060-5938 야)#############	(주)케이에스씨건설 조광희 주)2060-5652 야)#############	91	D	‘07.09.10	도로

연번	공 사 명	위치	공사개요	총공사비 (억원)	착공일	준 공 예정일	시행 부서 (과)	업무담당 성 명 (전화 주․야․)	감리사 및 책임감리원 (전화번호)	시공사 및 현장대리인 (전화번호)	공정 (%)	상태 등급 (A~E)	지정 일자	비고
7	동부간선도로 확장공사(1공구)	월계3동~초안산	B = 4~6차로 L = 1,400m	-	‘07.10.12	‘16.12.31	교량건설과	장종환 주)3708-2577 야)2647-9125	포스코엔지니어링 외 1 [공사중지] (‘12.1~’14.12)에 따른 철수	㈜풍산건설 외 1 [공사중지] (‘12.1~’14.12)에 따른 철수	24	공사중지및시설물인수인계로 시설관리공단에서관리	‘07.10.12	지정유보
8	강남순환도시고속 도로 5공구	금천구 시흥동	연장 5.13km (터널 4.99km) 금천영업소	6,233	'07.11	'14.05	도시고속도로과	여용석 주)3708-8661 야)#############	선진ENG 전영호 #############	두산건설외2 박종현 #############	63	D	'07.11	도로
9	동부간선도로 확장공사(3공구)	상계8동 주공15단지~의정부시계	B = 6차로 L = 2,250m	557	‘08.02.15	‘16.12.31	교량건설과	장종환 주)3708-2577 야)2647-9125	동부엔지니어링 김구환 주)930-1628 야)#############	세원건설㈜ 주)930-1607 야)#############	40	D	‘08.12.31	도로
10	서부트럭터미널 앞 지하차도 건설공사	양천구 신정3동 735-5	B = 18.5m L = 1,075m H = 5m	696	‘08.03.10	‘14.06.30	광역도로과	박천용 주)3708-2558 야)#############	(주)동일기술공사 윤부영 주)2615-5915 야)#############	중앙건설(주) 김상봉 주)2697-1281 야)#############	95	D	‘08.03.10	도로
11	강남순환도시고속 도로 7-2공구	서초구 우면동	연장 2.70km (터널 2.09km) 선암영업소 교량 1개소	2,879	'08.04	'14.05	도시고속도로과	여용석 주)3708-8661 야)#############	선진ENG 강창규 #############	대림산업외1 박장우 ############	62	D	'08.04	도로

연번	공 사 명	위치	공사개요	총공사비 (억원)	착공일	준 공 예정일	시행 부서 (과)	업무담당 성 명 (전화 주․야․)	감리사 및 책임감리원 (전화번호)	시공사 및 현장대리인 (전화번호)	공정 (%)	상태 등급 (A~E)	지정 일자	비고
12	응봉교 확장 및 성능개선공사	성동구 응봉동 9-1번지	폭 4→6차로 연장625m DB18→DB24	643	‘08.10.20	‘15.12.31	터널건설과	이석우 주)3708-2567 야)#############	(주)건화 김종철 주)2282-0187 야)#############	한신공영(주) 이경록 주)2281-4595 야)#############	74	D	‘08.10.20	교량
13	겸재교 건설 및 연결도로확장공사	휘경동~면목동	교량건설 B=20m L=395m	380	‘08.10.23	‘15.12.31	터널건설과	이석우 주)3708-2567 야)#############	(주)동일기술공사 이봉우 주)3394-5053 야)#############	㈜한진중공업 이후영 주)2216-6950 야)#############	60	D	‘08.10.23	도로
14	동부간선도로 확장공사(2공구)	녹천교~상계8동 주공15	B = 7~8차로 L = 3,200m	1,705	‘08.12.31	‘16.12.31	교량건설과	장종환 주)3708-2577 야)2647-9125	㈜이산 강종구 주)999-3872 야)#############	㈜한라 김성진 주)903-2041 야)#############	42	D	08.12.31	도로
15	선사로~고덕지구간 도로확장공사	강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동165-11	도로확장 폭2차로→4~ 6차로, 연장3.72km	.512	‘09.01.06	‘14.12.31	광역도로과	이한규 주)3708-2556 야)#############	㈜한국건설관리공사 조석기 주)426-8221 야)#############	㈜대저건설 김진우 주)442-1181 야)#############	47	D	09.03.05	도로
16	강남순환도시고속도로 6-2공구	관악구 봉천동	연장 2.4km (터널 2.37km)	2,516	'09.04	'14.05	도시고속도로과	여용석 주)3708-8661 야)#############	도화ENG 김일환 #############	롯데건설외1 이득복 #############	91	D	'09.04

연번	공 사 명	위치	공사개요	총공사비 (억원)	착공일	준 공 예정일	시행 부서 (과)	업무담당 성 명 (전화 주․야․)	감리사 및 책임감리원 (전화번호)	시공사 및 현장대리인 (전화번호)	공정 (%)	상태 등급 (A~E)	지정 일자	비고
17	강남순환도시고속도로 6-1공구	관악구 신림동	연장 1.13km (터널 0.86km) 관악I.C	2,223	'09.05	'14.05	도시고속도로과	여용석 주)3708-8661 야)#############	도화ENG 김일환 #############	GS건설 민병혁 #############	60	D	'09.05
18	용마터널 민간투자사업 건설공사	중랑구 면목동 ~구리시 아천동	총연장 : L=3,556m, -왕복4~6차로 -터널 2.56km -교량 210m/3개소 -지하차도 383m	1,029	'09.11.21	'14.11.20	토목총괄과 사업시행자 용마터널 주식회사	오열상 주)3708-2544 용마터널주식회사 윤병수 주)576-9214	(주)제일엔지니어링 윤상현 주)446-1251 야)#############	SK건설(주) 정운경 주)453-0166 야)#############	88	D	'09.11.21	도로
19	월드컵대교 건설공사	마포구 상암동 ~영등포구 양평동	B=31.4m (왕복 6차로) L=1.98km	2,251	‘10.03.22	‘15.08.22	토목총괄과	김성권 주)3708-2547 야)#############	㈜포스코엔지니어링 외1개사 김동귀 주)302-0675 야)#############	삼성물산(주)외2개사 허우영 주)303-4523 야)#############	17	D	’10.03.22	교량
20	강남순환도시고속도로 7-1공구	서초구 방배동	연장 1.04km (터널 0.54km) 사당IC 교량 1개소	1,497	'10.06	'14.05	도시고속도로과	여용석 3708-8661 #############	도화ENG 김일환 #############	현대산업개발 이종민 #############	46	D	'10.06
21	남부순환로~오정대로간 도로개설공사	강서구 외발산동 산71-11	도로개설 1.23km B=40.0m 교량 1개소	126	'10.09.29	'14.10.7	광역도로과	박상철 주)3708-2559 야)2699-7732	(주)수성엔지니어링 이원희 주)3437-8601 야)#############	보훈종합건설(주) 윤태원 주)032-672-1968 야)#############	30	D	'12.12.14	도로
22	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	신림동~봉천동	터널건설 B=왕복4차로 L=2.48km	1,690	‘10.10.08	‘17.12.31	터널건설과	조현형 주)3708-2568 야)#############	㈜신성엔지니어링 금동욱 주)885-8078 야)0#######5267	지에스건설㈜ 김광호 주)785-5407 야)#############	16	D	10.10.08	도로

연번	공 사 명	위치	공사개요	총공사비 (억원)	착공일	준 공 예정일	시행 부서 (과)	업무담당 성 명 (전화 주․야․)	감리사 및 책임감리원 (전화번호)	시공사 및 현장대리인 (전화번호)	공정 (%)	상태 등급 (A~E)	지정 일자	비고
23	율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사	종로구 권농동8 ~종로구 원남동166	도로확장 폭28.2m ~30.7m(6차로), 연장:800m	342	′10.10.11	′15.06.30	광역도로과	박천용 주)3708-2558 야)#############	(주)한국해외기술공사 손기수 주)734-0597 야)#############	북일종합건설(주) 서종원 주)741-0623 야)#############	36	D	′10.10.11	도로
24	천호대로(광나루역)확장공사	광나루역~아차산사거리	B=6→10차로 L=900m	809	‘10.10.11	‘15.12.20	교량건설과	김동현 주)3708-2576 야)#############	주)수성엔지니어링 ############	대보건설(주) 황성규 주)455-3460 야)#############	48	D	‘10.10.11	도로
25	서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사	용산구 보광동~주성동	기존교량 철거 및 재설치 B=2차로, L=753m,	247	‘11.01.06	‘14.12.31	터널건설과	박근우 주)3708-2566 야)#############	㈜한국종합기술 김용선 주)927-8863 야)#############	㈜흥화 백현기 주)790-1611 야)#############	46	D	‘12.01.27	교량
26	구리암사대교 연결 도로 건설공사	강동구 암사IC~훈련원사거리	도로개설 B=29.5~31.5 (6차로) L=1.44KM	204	‘12.08.02	‘14.3.24	광역도로과	박상철 주)3708-2559 야)#############	㈜제일엔지니어링 우재경 주)3427-5013 야)#############	㈜신성건설 김무훈 주)426-1239 야)#############	27	D	‘12.08.02	도로
27	신사사거리~ 고양시계간 도로개설공사	덕양구 향동동 ~은평구 신사동	L = 867.0m (터널 2개소 서울시 495m 고양시 475m) B = 25.0m	265	‘12.12.27	‘15.12.26	교량건설과	이상근 주)3708-2579 야)#############	(주)신명건설기술공사 한광언 주)389-9879 야)#############	현대건설(주) 서준호 주)389-7530 야)#############	13.5	D	'12.12.27	도로

연번	공 사 명	위치	공사개요	총공사비 (억원)	착공일	준 공 예정일	시행 부서 (과)	업무담당 성 명 (전화 주․야․)	감리사 및 책임감리원 (전화번호)	시공사 및 현장대리인 (전화번호)	공정 (%)	상태 등급 (A~E)	지정 일자	비고
28	서남권 돔야구장 주변 보행자전용 도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장공사	구로구고척동서남권돔야구장동측안양천주변길	∘보행광장 설치 B=28.3m,L=150m ∘고척교 확장 교량확장 (B=37.5m → 52.5m, L=203m)	305	‘13.04.08	‘15.2.28	교량건설과	이상근 주)3708-2579 야)#############	(주)삼보기술단 양회만 주)2060-6543 야)#############	대지건설(주) 문상필 주)2060-5533 야)#############	16.4	D	13.04.08	교량
								이하여백