"희망 제로페이 되나요?"
		서울시설공단
수신	동부공원녹지사업소장(시설과장)
(경유)
제목	공사중지 업무처리 사항 알림

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원하며, 시설과-229(2019.02.11.)호 및 공사감독     3처-737(2019.02.18.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여「서울숲 무장애 친화공원 조성공사」에 대하여 아래와 같이     시공사에 공사중지를 지시하였음을 알려드립니다.

가. 공사개요

- 공 사 명 : 서울숲 무장애 친화공원 조성공사

- 공사기간 : 2018. 12. 7. ~ 2019. 4. 15.

- 도 급 액 : 금731,450,000원

- 도 급 자 : 신평산업(주) 대표 이석연

- 발 주 처 : 서울시 동부공원녹지사업소 시설과

나. 공사중지 내용

- 중지사유 :“서울숲의 미래상설정 및 조성운영 기본계획수립”용역 추진            중에 있으므로 본 공사와 주요 공간별 계획이 중복되지 않도록 서울공원            마스터플랜 확정시 까지 공사 추진 일정에 대한 조정이 필요하여 중지

- 중지기간 : 착공일로부터(2018.12.7) ~ 별도지시일 까지

붙임 : 공사중지 알림(시공사 통보 문서) 1부.  끝.

							서울시설공단이사장
										팀장
협조자
시행			공사감독3처-925									(	2019.02.27.					)		접수			시설과-348								(	2019.2.27.					)
우	133-739					서울시 성동구 청계천로 540 (10층 공사감독 3처)															/			http://www.sisul.or.kr
전화		2290-7217						/전송			2290-7267					/	noh315@sisul.or.kr												/	대시민공개