공사중 교통처리계획(당초)

공사 단계		교통처리계획	공사기간	공사시간	세부내용	비 고
1단계		- 보도 점용으로 임시보행공간 확보 및 보행안전 도우미 배치 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	2016.12.1~ 2016.12.20(20일)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 보도 Set-back (안전시설물설치->지장물이설-> 보도Set-back->포장) - 점용차로수 : 기존차로수 유지
2단계		- 도로점용후 차로조정을 통해 교통영향 최소화 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	2016.12.21~ 2017.3.31(약4개월)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 지하차도 교대 설치 (안전 시설물 설치 -> 기초콘크리트(교대)설치) - 점용차로수 : 2개 차로
3단계		- 도로점용후 차로조정을 통해 교통영향 최소화 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	2017.4.1~ 2017.7.31(약4개월)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 지하차도 교각 설치 (안전 시설물 설치 -> 기초콘크리트(교각)설치) - 점용차로수 : 2개 차로
4단계		- 도로점용후 차로조정을 통해 교통영향 최소화 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	2017.8.1~ 2017.8.15(15일)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 상부 설치 - 안전시설물 설치->거더, Beam, 프리캐스트 설치 - 점용차로수 : 2개 차로
5 단 계	5-1 단계	- 도로점용후 차로폭 조정 및 임시보행 공간 확보 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	상부 설치 : 2017.8.16~ 2017.11.15(약3개월) 교통섬 철거 : 2017.8.16.~2017.8.25.(10일)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 상부 설치 (안전시설물 설치 → 교량슬라브 설치 → 아스팔트 포장→ 보도설치 → 포장 및 도색) - 교통섬 철거 (안전시설물 설치 → 교통섬 철거 → 지장물 이설 등) - 점용차로수 : 기존차로수 유지
	5-2 단계	- 도로점용후 차로폭 조정 및 임시보행 공간 확보 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	상부 설치 : 2017.8.16~ 2017.11.15(약3개월)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 상부 설치 (안전시설물 설치 → 교량슬라브 설치 → 아스팔트 포장→ 보도설치 → 포장 및 도색) - 점용차로수 : 기존차로수 유지
6 단 계	6-1 단계	- 도로점용후 차로폭 조정 및 임시보행 공간 확보 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	상부 설치 : 2017.8.16~ 2017.11.15(약3개월) 보도 설치 : 2017.10.16~ 2017.10.25(10일)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 상부 설치 (안전시설물 설치 → 교량슬라브 설치 → 아스팔트 포장→ 보도설치 → 포장 및 도색) - 보도 설치 (안전시설물 설치 → 보도설치 → 노면도색) - 점용차로수 : 기존차로수 유지
	6-2 단계	- 도로점용후 차로폭 조정 및 임시보행 공간 확보 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	상부 설치 : 2017.8.16~ 2017.11.15(약3개월) 보도 설치 : 2017.10.26~ 2017.11.15(21일)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 상부 설치 (안전시설물 설치 → 교량슬라브 설치 → 아스팔트 포장→ 보도설치 → 포장 및 도색) - 보도 설치 (안전시설물 설치 → 보도설치 → 노면도색) - 점용차로수 : 기존차로수 유지
7단계		- 도로점용후 차로폭 조정 및 임시보행 공간 확보 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	2017.11.16 ~ 2017.12.15(30일)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 회전교차로 설치 (안전시설물 설치 -> 교차로 설치 -> 노면도색) - 점용차로수 : 기존차로수 유지

공사중 교통처리계획(변경)(1)

공사 단계		교통처리계획	공사기간	공사시간	세부내용	비 고
1단계		- 도로점용후 차로조정을 통해 교통영향 최소화 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	2017.1.16~ 2016.1.21(6일)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 중앙분리대 철거공사 (안전시설물 설치 -> 중앙분리대 철거) - 점용차로수 : 1개 차로	공사추가
2단계		- 도로점용후 차로조정을 통해 교통영향 최소화 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	2017.1.22~ 2017.3.7(45일)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 안전시설물 설치 → 중앙부 보강 - 점용차로수 : 2개 차로	공사추가
3단계		- 보도 점용으로 임시보행공간 확보 및 보행 안전 도우미 배치 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	2017.3.8~ 2017.3.27(20일)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 안전시설물 설치 → 지장물 이설 → 보도 Set-back → 포장 - 점용차로수 : 기존차로수 유지	당초1단계
4단계		- 도로점용후 차로조정을 통해 교통영향 최소화 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	2017.3.28~ 2017.5.11(45일)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 안전시설물 설치 → 하부 슬라브 보강 - 점용차로수 : 2개 차로	공사방법재검토-> 점용위치변경
5단계		- 도로점용후 차로조정을 통해 교통영향 최소화 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	2017.5.12~ 2017.8.29(110일)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 안전시설물 설치 → 하부슬라브 보강 및 Beam 거치 - 점용차로수 : 2개 차로	공사방법재검토-> 점용위치변경
6 단 계	6-1 단계	- 도로점용후 차로폭 조정 및 임시보행 공간 확보 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	상부설치 : 2017.8.30~ 2017.10.8(40일) 교통섬철거 : 2017.8.30.~2017.9.3(5일)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 상부설치 (안전시설물 설치 → 교량슬라브 설치 → 아스팔트 포장 → 보도설치 → 포장 및 도색) - 교통섬 철거 (안전시설물 설치 → 교통섬 철거 → 지장물 이설 등) - 점용차로수 : 기존차로수 유지	당초5-1단계
	6-2단계	- 도로점용후 차로폭 조정 및 임시보행 공간 확보 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	상부설치 : 2017.8.30~ 2017.10.8(40일)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 상부설치 (안전시설물 설치 → 교량슬라브 설치 → 아스팔트 포장 → 보도설치 → 포장 및 도색) - 점용차로수 : 기존차로수 유지	당초5-2단계
7 단 계	7-1단계	- 도로점용후 차로폭 조정 및 임시보행 공간 확보 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	상부설치 : 2017.8.30~ 2017.10.8(40일) 보도설치 : 2017.9.5.~ 2017.9.14(10일)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 상부설치 (안전시설물 설치 → 교량슬라브 설치 → 아스팔트 포장 → 보도설치 → 포장 및 도색) - 보도설치 (안전시설물 설치 -> 보도설치 -> 노면도색) - 점용차로수 : 기존차로수 유지	당초6-1단계
	7-2단계	- 도로점용후 차로폭 조정 및 임시보행 공간 확보 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	상부설치 : 2017.8.30~ 2017.10.8(40일) 보도설치 : 2017.9.15~ 2017.9.29(15일)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 상부설치 (안전시설물 설치 → 교량슬라브 설치 → 아스팔트 포장 → 보도설치 → 포장 및 도색) - 보도설치 (안전시설물 설치 -> 보도설치 -> 노면도색) - 점용차로수 : 기존차로수 유지	당초6-2단계

공사중 교통처리계획(변경)(2)

공사 단계	교통처리계획	공사기간	공사시간	세부내용	비 고
8단계	- 도로점용후 차로폭 조정 및 임시보행 공간 확보 - 도로점용후 차로조정을 통해 교통영향 최소화 - 공사안내표지판 및 교통안전표지판 설치 - 교통안전시설물(안전칸막이 및 윙카, 라바콘, 경광등 등) 및 교통통제수 배치	2017.9.30~ 2017.10.8(9일)	주간공사 (09~18시) (24시간점용)	- 회전교차로 설치 (안전시설물 설치 → 교차로설치 → 노면도색) - 점용차로수 : 기존차로수 유지	당초 7단계