공  사  지 침 서

2018. 2

서부도로사업소

(기 전 과)

	목 차

Ⅰ. 일  반  지  침  서

1. 일 반 사 항

2. 자 재 관 리

3. 안 전 관 리

Ⅱ. 공  사  지  침  서

1. 일 반 사 항

2. 특 기 사 항

Ⅰ. 표준 지침서

1. 일반사항

1-1 적용범위

ㅇ 이 지침서는 서울특별시 서부도로사업소에서 발주한 ‘2018년도 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)’에 적용한다.

ㅇ 본 계약상대자는 공사와 관계되는 법률, 시행령, 규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고 있어야 한다. 계약상대자는 항상 이를 준수 하여야 하며 계약상대자 자신이나 그의 고용인이 상기의 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규를 위반함으로써 여하한 민원이나 책임문제가 야기되지 않도록 한다.

1-2 공사감독자의 임무

ㅇ 공사감독자는 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여  계약상대자, 현장대리인, 현장요원, 계약상대자가 당해 공사를 위하여 지정 하거나 고용한 자 및 계약상대자와 하도급 계약을 체결한자에 대하여 관련법규 및 계약조건이 정하는 범위 내에서 공사시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 행한다.

1-3 계약 상대자의 책무

ㅇ 계약상대자는 공사 착수 전에 설계 도서를 면밀히 검토하고 설계서의

오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지

않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

ㅇ 계약상대자가 발주부서에 통지하지 아니하거나 발주부서의 지시를 받지

않고 임의로 수행한 공사에 대하여는 기성 양으로 인정하지 않는다.

또한 계약상대자가 임의로 시행한 공사에 대하여 발주부서의 원상 복구나

시정 지시가 있을 때에는 계약상대자 즉시 이행 한다.

ㅇ 계약상대자는 당해 공사를 위하여 현장대리인을 임명, 지정하여 현장에 상주하여야 한다.

ㅇ 공사 목적물을 발주부서에 인도하기 전에 발생한 공사 목적물의 파손,

오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 계약상대자 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 즉시 교체, 원상복구 한다.

ㅇ 계약상대자가 발주부서에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또

는 이의 제기는 공사 감독관을 반드시 경유하여 서면으로 하여야만 그

효력이 발생한다.

ㅇ 계약상대자는 교통 통제 시에 교통통제 계획서 및 작업계획서를 작성

하여 감독관을 경유 관련 기관에 소정의 수속을 받아야 한다.

ㅇ 공사 시행중 감독자의 지시에 의거 각 공종에 따른 검수를 득한 후 다음 공

종으로 공사가 시행 되도록 하며, 공사 완료시 즉시 검사를 받아야 한다.

ㅇ 계약상대자는 공사시행 기록 사진을 공사 전 · 후의 천연색으로 3×4인

치를 2부 작성하여 공사완료 검사원과 함께 제출하여야 한다.

1-4 현장대리인

ㅇ 계약상대자는 공사계약 일반조건 제14조 규정에 의해 현장대리인을 현

장에 상주하여 공사감독관의 지시에 따라 공사현장의 단속 및 긴급 보

수 공사에 대한 모든 사항을 처리하게 하여야 한다.

1-5 설계변경

ㅇ 계약상대자는 설계도서의 변경이 불가피할 경우에는 발주부서의 승인을 득하여 변경 시행 할 수 있다.

1-6 기성 양의 조정

ㅇ 공사의 검사결과, 기성 양 부족 및 부적합 시공 부분에 대하여는 기성

양을 조정하여 공사금액을 지불 할 수 있다.

2. 자재관리

2-1 적용기준

ㅇ 공사에 사용하는 자재는 다음과 같은 순서에 따라 적합한 자재를 사용한다.

가. “산업 표준화법”에 의한 한국산업 규격 표시(K.S)품을 사용한다.

- 건설기술관리법 제25조에 의한 품질검사 전문기관에서 품질 시험

을 실시하여 K.S 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것.

- “산업표준화법”에 의한 K.S 표시품과 동등이상의 성능이 있다고

건설 교통부령이 정하는 것.

나. ‘가’항에 적합한 자재가 없을 경우에는 공사 감독자의 승인을 얻어

다른 것과 균형이 유지되는 것으로써 품질 및 성능이 우수한 시중

제품으로 사용한다.

2-2 반입 및 검수

ㅇ 품질시험, 검사시험 결과 불 합격률이 높다고 인정되는 생산업체의

자재에 대하여 발주부서는 계약상대자에 사용제한을 지시할 수 있으며,

계약상대자는 이에 따라야 한다.

ㅇ 공사의 특성상 상시 보수해야 할 자재는 비축하여, 공사감독원의 보수

지시가 있을 시, 즉시 보수가 되도록 한다.

ㅇ 계약상대자는 자재 반입시 한국산업규격표시허가증(사본) 또는 품질

관리 시험 성적서를 공사감독자의 검사를 받은 후 자재를 반입시켜야

한다.

2-3 자재의 보관, 취급

ㅇ 자재는 준공 전·후를 막론하고 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등 품질

에 영향을 주는 일체의 변화가 생기지 않도록 보관, 운반, 취급 등을 철

저히 한다.

ㅇ 공사에 사용되는 자재는 적정 사용량을 상시 보유하여야 한다.

ㅇ 자재 중 화기 위험이 있는 자재는 다른 자재와 분리하여 보관하고 화재

예방대책을 수립하고 시행 한다.

ㅇ 계약상대자는 자재 반입에 따른 검수기록 상황을 정확히 기록하고 상시 비치하여야 하며, 이에 대한 보관 및 관리에 책임을 진다.

3. 안전관리

3-1 적용범위

ㅇ 건설공사의 안전, 보건 및 환경관리는 관련법이 정하는 바에 따라야 한다.

3-2 관리 및 보상

ㅇ 계약상대자는 공사장내의 계약상대자의 직원 및 작업인원 등의 통제 안

전, 보안, 위생 및 안전사고에 대하여 안전 대책을 수립 시행한다.

ㅇ 공사에 필요한 안전관리 수칙을 숙지하도록 충분한 안전교육을 하고

항상 주의를 환기시킬 것이며, 공사 중에 기기가 손상될 우려가 있을

때는 필요한 모든 예방책을 강구하여야 한다.

ㅇ 계약상대자는 본 공사의 수행으로 인하여 인접한 주민은 물론 통행인

과 타조영물에 피해를 주지 않도록 한다.

3-3 안전관리계획 및 안전점검 실시

ㅇ 계약상대자는 건설기술관리법에 의한 안전계획 수립 및 안전점검을

실시하여야 한다.

3-4 출입자 통제

ㅇ 계약상대자는 공사안전 및 보안 유지를 위하여 공사장에 관련자 외의

사람이 출입하거나 불필요한 사진을 촬영하는 것을 통제하여야 한다.

3-5 안전관리상태 점검

ㅇ 발주부서는 공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 계약상대자

의 안전에 관한 제반의 관리 상태를 점검 또는 진단하여 미흡하거나

잘못된 사항에 대한 시정 및 해당 공사의 일시중단을 요구할 수 있으며

이와 같은 요구가 있을 때는 즉시 해당 공사를 중지하고 시정 한다.

3-6 안전관리비 서류비치

ㅇ 계약상대자는 노동부고시 “건설공사 표준안전관리비 계상 및 사용기준”

에 의거 계상된 안전관리비를 동 고시 별표의 내용에 준용하여 건설사

현장근로자의 산업재해 및 건강장해 방지에 사용하고 감리원 또는 공

사감독자 또는 관계인이 확인할 수 있도록 사용내역서, 사진, 증빙서

류 등을 작성하고 비치하여야 한다.

3-7 사용내역 제출

ㅇ 계약상대자는 기성 또는 준공검사원 제출 시 공사 감독자에게 안전관리비 항목별 세부사용내역 및 집행영수증 사본을 제출하여야 한다.

3-8 기  타

ㅇ 계약상대자는 공사 착수 전에 공사장 내에 있는 기존 수목의 보호방안을 강구하고, 수목의 손상 또는 수목의 생육을 저해하지 않도록 주의하여야 한다. 공사 중 수목을 손상하였거나 생육에 문제가 발생하였을 경우에는 즉시 그에 상응하는 조치를 취하여야 한다.

ㅇ 계약상대자는 호우, 홍수, 태풍, 지진 등에 대한 기상예보에 충분히 주의 및 사전 대책을 강구하고 유사시 피해를 최소한으로 적게 받도록 응급조치를 하여야 한다.

ㅇ 계약상대자는 공사시행으로 인하여 기존의 지상, 지하 시설물에 영향을 미쳤을 때는 이를 즉시 원상복구 후 공사 감독관의 승인을 받아야 한다.

Ⅱ. 공사 지침서

1. 일 반 사 항

1-1. 본 공사지침서는 경관조명 유지보수공사를 시행함에 있어 공사 사항을

규정하며, 표준지침서와 본 공사 지침서에 준하여 시공하여야 한다.

1-2. 본 공사는 단가계약으로 시행하는 공사로서 작업지시에 의거 시공하되

긴급사항은 유선지시에 의거 우선 시공하여야 하며 공사완료 후 정산한다.

1-3. 본 공사는 시설물의 기능을 계속적으로 유지하면서 시행하는 부분공사로

교통체증에 직접 영향을 주는 공종은 물론 감독관의 필요하다고 판단되는

주요 공종에 대하여 감독관의 지시에 따라 야간작업을 시행하여야 한다.

1-4. 계약자는 평일 및 휴일 주 ․ 야간의 긴급 돌발사고 및 재난에 대비 즉시

작업에 임할 수 있는 차량, 자재, 인원, 장비를 확보 상시 대기하여야 한다.

1-5. 현장대리인은 당일 작업계획 및 결과를 감독관에게 매일 보고하고 공사

추진 상 차질이 예상되는 사안에 대해서는 감독관에게 사전보고 및 협의           하여 승인을 득하여야 한다.

1-6. 하자담보 책임기간은 준공검사완료일로부터 1년간

2. 특 기 사 항

1-1. 적용범위

ㅇ 본 공사는 일반적인 전반 기술 기준과 상기 시방사항에 적용한다.

1-2. 법규의 적용

ㅇ 전기사업법 등 시행령 및 시행규칙

ㅇ 전기공사업법 등 시행령 및 시행규칙

ㅇ 전기설비 기술기준 준칙

ㅇ 내선규정

ㅇ 한국산업규격(K.S)

ㅇ 한전전원공급규정

ㅇ 전기용품 및 생활용품 안전관리법

ㅇ 한국공업규격

ㅇ 기타 관계법령

1-3. 공사의 시행

ㅇ 계약상대자는 공사 시행 전 전력계통 및 관계설비의 계통을 숙지하고 공기를 시행함은 물론, 지상․지하의 기존 시설물을 검토하여 시설물에 손상이 없도록 하여야 한다.

ㅇ 관계관서의 수속

- 계약상대자는 계약 후 공사에 필요한 신고, 허가, 검사 등이 있을 경우에는 관계기관(한전, 구청, 경찰서 등)에 신고, 허가, 검사 등을 필하여야 한다.

ㅇ 기기, 자재의 사용

- 본 공사의 감독관이 요구하는 시험품목에 대하여는 시공 전에 시험성적서를 제출하여야 한다.

2-1. 배관공사

1) 노출배관

① 본 공사의 배관자재는 아연도금 된 강제전선관(KSC8401)을 사용한다.

② 전선관 배관은 C챤넬 및 파이프클램프를 사용하여 배관한다.

③ C챤넬은 1.6T이상을 사용하여 지지간격으로 2m 이내로 한다.

④ 전선관 굴곡전선관을 구부릴 경우는 전선관 단면이 심하게 변경되지 않도록 하고, 굴곡부의 반경을 전선관 지름의 6배 이상으로 한다.

⑤ 전선관 배관 시 직각으로 구부리는 경우 36mm이상의 관을 노말밴드를 사용한다.

⑥ 습기나 분진이 많은 장소에서는 배관 후 전선을 인입할 때까지 관내의 습기 및 먼지 등이 침입하지 아니하도록 적당한 예방조치를 하고, 전선인입 직전에 청소하여야 한다.

⑦ 물기가 많은 장소에 시설하는 관로는 수분이 고이지 않도록 방습 ․ 방수대책을 세운다.

2) 지중배관

① 전선관 포설시 관내로 흙과 같은 이물질이 들어가지 않도록 하고, 되메우기 전 관통시험을 하여 재 굴착하는 일이 없도록 한다.

② 전선관의 연결 시 물이 스며들거나 쉽게 이탈되지 않도록 견고하게 연결한다.

③ 차량, 기타 중량물의 하중을 받는 장소는 깊이 1.2m이상, 보호설비를 할 경우와 기타장소는 0.6m이상으로 배관한다.

④ 수공(Hand-Hole)과 연결 시에는 케이블 입선 후 물이 관로에 스며들지 않도록 마감처리 해야 한다.

⑤ 타 공사 굴착 시 가로등관로 매설지점을 인지할 수 있도록 지중매설 관로를 묻은 상단(배관포설 지면에서 250mm)에는 전기위험표시 테이프를 관로상부를 따라 부설하여야 한다.

3) 선로 배선공사

① 전선관 내에서는 배선이 접속되는 일이 없도록 한다.

② 케이블을 포설하는 경로에서의 외상의 염려가 있는 경우는 금속관이나 철재커버로 보호한다.

③ 수공 또는 접속박스 등에서 전선을 상호 접속할 때에는 압착단자 등을 이용하여 구간점검 및 절연저항측정을 위해 분리 결속이 용이하게 하고 충전부가 노출되지 않도록 충분히 절연처리 하여야 한다.

④ 전선은 선로의 각상을 구분할 수 있도록 색상 또는 기호 등으로 구분된 것을 사용하여야 한다.

⑤ 가로등의 주간선에서 분기하는 전원용 리드선은 길이는 50cm, 굵기 4㎟를 표준으로 한다.

(안정기의 리드선을 직접 주간선에 접속하는 일이 없도록 할 것)

2-2. 접지공사

1) 접지선은 녹색의 절연전선(GV6㎟이상)을 사용한다.

2) 접지봉은 땅 속의 깊이 75cm이상 매설한다.

3) 접지공사는 제3종 접지로 실시한다(접지저항 값 100Ω이하)

3-1. 교통통제 및 안전시설 설치

1) 교량에서 시행되는 모든 공사의 제반작업 시 도로 안전조치 이행 기준에 의거하여 교통통제 및 안전시설물을 설치하고 작업을 시행한다.

2) 작업은 출·퇴근 시간을 피해서 작업을 하여야 한다.

3) 공사 시점 전방에 반드시 복장을 갖춘 교통 통제수를 배치하여 통행 차량을 유도하고 안전사고에 각별히 유의한다.