보 고 서
			담당	팀장
문서번호	공사감독2처-9974
보존기간	준영구		협 조	차장
결재일자	2017.09.12.
공개여부	공개
제 목	공사현장 실정 보고 (도종 변경)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 구로동 256번지 외 3개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2017. 05. 22. ~ 2018. 01. 11.

다. 도 급 액 : 579,038,600원

라. 공사개요 : D=20~300mm, L=1,922m

마. 도 급 자 : (주)송암홀딩스 대표 공연

바. 발 주 청 : 강서수도사업소(급수운영과)

2		보고내용

상기 공사와 관련하여 상수도관로 매설 도로 종류 변경에 대한 검토 보고 임.

1. 현황 및 문제점

상기 공사의 1구간 중(신도림동 648번지 앞 (대림e편한세상 2차, 6

차 아파트)) L=110m 가 당초 설계에는 아스팔트 도로로 신설 상수

도 관로를 매설하도록 되어 있으나, 확인굴착 결과 하수도 박스 및

통신박스로 인하여 차도에는 매설공간이 없어 상수도 관로 매설이 불가한 실정 임

2. 검토내용

상기와 같은 사유로 1구간 중(신도림동 648번지 앞) L=110m 에 대

하여는 금번 매설하는 상수도 관로 구간을 차도에서 보도로 변경 시공하는 것이 타당하다 사료됨

- 고압블록 포장걷기 : 증) L=110m , 1.1a

- 아스팔트 포장깨기 : 감) 26㎥

※ 개략공사비 : 증) 약647천원

3		조치의견

상기 사항에 대하여 발주처에 통보하고 그 결과에 따라 추후 설계변경시

반영 하고자 함.

붙임 : 1. 도급사 실정보고서 1부.

2. 공사비 산출내역서 1부.  끝.