보 고 서
			담당	팀장
문서번호	공사감독2처-9977
보존기간	준영구		협 조	차장
결재일자	2017.09.12.
공개여부	공개
제 목	공사현장 실정 보고 (도로 절단 및 깨기량 증감)

1		공사 현황

가. 공 사 명 : 구로동 256번지 외 3개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2017. 05. 22. ~ 2018. 01. 11.

다. 도 급 비 : 579,038,600원

라. 공사개요 : 관부설(D=20~300mm L=1,922m)

마. 시공회사 : (주)송암홀딩스 대표 공연

바. 발 주 청 : 강서수도사업소 급수운영과

2		보고 내용

1. 현황 및 문제점

○ 상기 공사의 2구간(신도림동 644번지 앞(신도림 2차 동아아파트)) 시공 중 도로  굴착 확인 결과 기 매설된 통신 및 하수도 관로 등 지장물로 인하여 신설 상수도 관로는 아스팔트 도로와 측구에 걸쳐서 만 매설이 가능한 상태이며,

○ 도로 절단시 아스팔트 도로 한쪽면 만 절단후 시공시에는 경계석 및 보도 침하가 발생될 수 있는 실정임. 이를 방지하기 위하여 측구 측 절단이 필요한 실정이며,  이에 따라 측구 콘크리트 절단 및 깨기(측구(T=0.2m)) 물량 증가가 발생됨.

지하 매설물(통신 케이블)	지하 매설물(하수도 관로)

3		검토 의견

○ 상기와 같은 사유로 2구간(신도림동 644번지 앞, L=104m)은 아스팔트 도로와 측구를 이중으로 절단하여 경계석 및 보도 침하를 방지하는 것이 타당하다고 사료됨.

- 아스팔트 포장 절단(T=20cm) : 감 104m

- 콘크리트 포장 절단(T=20cm) : 증 104m

- 아스팔트 포장 깨기(0.6) : 감 25㎥

- 콘크리트 포장 깨기(0.6) : 증 25㎥

※ 개략공사비 : 증) 약2,291천원

4		조치 의견

○ 상기 내용을 발주청에 보고하고 그 결과에 따라 시공 후 추후 설계변경시 반영하     고자 함.

붙임 : 1. 도급사 실정보고서 1부.

2. 공사비 산출내역서 1부.  끝.