보 고 서
			담당	팀장	공사감독3처장	시설안전본부장
문서번호	공사감독3처-9815
보존기간	준영구		협 조	부장
결재일자	2017.10.30.
공개여부	공개
제 목	공사현장 실정보고서(2회) 검토 - 안양천생태공원 파크골프장 조성사업

1. 공사 개요

○ 공 사 명 : 안양천생태공원 파크골프장 조성사업

○ 도 급 액 : 금247,731,800원

○ 공사기간 : 2017. 08. 18 ~ 2017. 11. 15

○ 발 주 처 : 서울시 양천구청 공원녹지과

○ 도 급 자 : 천백조경(주) 대표 최호남

2. 검토 내용

○ 발주처 검토요청 사항

구분	검토요청 사항	검토결과	비고
식재공	▸ 계약된 규격의 잔디 수급이 불가능하므로 잔디 규격을 변경하여 당초 예산부족으로 미반영된 부분까지 시공	▸ 당초 계약된 물량은 계약금액 그대로 반영하고 추가되는 물량만 수급가능한 규격 금액으로 반영 - 잔디떼붙임-1(0.6×0.4×T2㎝): 0㎡→14,326.3㎡ ※ 잔디총면적 : 19,464㎡	공원녹지과-20739 (17.10.24) 회의록 첨부 (17.10.27)
	▸ 사업대상지 여건에 맞춰 식재 수종 및 수량 변경. 왕벚나무 및 회양목 등 식재를 제외하고 수크령, 그린라이트 등 수목식재 검토	▸ 물에 취약한 수종 대신 경관향상 및 하천변에 잘 자라는 수종으로 변경 - 왕벚나무(H4.0×B10): 19주 → 0주 - 회양목(H0.3×W0.3): 1,500주 → 0주 - 산철쭉(H0.3×W0.3): 1,100주 → 0주 - 자산홍(H0.3×W0.3): 1,800주 → 0주 - 삼발이지주목(중형,Ø60×L1,800): 19조 → 0조 - 수목보호틀(100×100×1000): 18m → 0m - 남천(H0.9) : 0주 → 120주 - 무늬쥐똥나무(H0.4) : 0주 → 100주 - 대왕제브라(25㎝) : 0본 → 240본 - 무늬새그라스(6치포트) : 0본 → 350본 - 그린라이트(25㎝) : 0본 → 600본 - 독일붓꽃(구근) : 0촉 → 600촉 - 핑크뮬리(6치포트) : 0본 → 150본 - 퍼플뮬리(8㎝) : 0본 → 3,000본 - 무늬억새(40㎝) : 0본 → 120본 - 무늬억새(25㎝) : 0본 → 200본 - 대왕갈대(40㎝) : 0본 → 50본 - 가우라(4치포트) : 0본 → 30본 - 수크렁(340x500x40㎜) : 0매 → 750매
관급	▸ 파크골프협회 요구사항으로 코스로드 자재가 야자매트에서 잔디보호매트로 변경	▸ 야자매트 설치비 삭제 - 코스로드(야자매트,W1000): 407.4m → 0m ※ 파고라 및 잔디보호매트 관급 변경은 발주처에서 통보받은 후 적용 예정	공원녹지과-20739 (17.10.24)

※ 상기내용 중 시공시 현장상황 등에 따라 발생하는 일부 경미한 변경사항은 설계변경시 반영

3. 개략공사비

구 분		금액(천원)					비고
		당초	공사비 증감			변경
			전회	금회(2차)	누계
총공사비 계		303,818	15,242	270,143	285,385	589,203
도 급 비 계		247,731	15,242	283,994	299,236	546,967
	공급가액	225,210	13,857	258,176	272,033	497,243
	부가세	22,521	1,385	25,818	27,203	49,724
관급자재비		56,087	0	-13,851	-13,851	42,236

4. 조치 계획

○ 상기 내용에 대하여 발주처의 승인을 득하여 추후 설계변경 시행

붙 임 : 1. 개략공사비 내역서 1부

2. 잔디 구적 도면 1부

3. 회의록 1부.  끝