공사 추진현황 및 잔여공정 추진계획(봉화캠핑장)

Ⅰ		계약현황

(단위: 원)

구분	전 기	통 신	소 방	비고
공사명	봉화군황평분교가족자연체험시설 전기공사	봉화군황평분교가족자연체험시설 통신공사	봉화군황평분교가족자연 체험시설 소방공사
내용	전열, 조명	CCTV, 방송, 전화	자탐설비, 소화기
착공	2017.10.30	2017.10.30	2017.10.30
준공	2017.12.08	2017.12.08	2017.12.08
도급자	우진건설(주)권제원	우신통신(주)장성주	㈜산업전기소방 김진현
도급비	74,490,000	18,687,200	11,152,030

Ⅱ		변경내용

(단위: 원)

구분		전 기	통 신	소 방	비고
공사명		봉화군황평분교가족자연체험시설 전기공사	봉화군황평분교가족자연체험시설 통신공사	봉화군황평분교가족자연 체험시설 소방공사
1차	금액	74,490,000	18,687,200	11,152,030	선행공정
	기간	~ 2017.12.21	~ 2017.12.21	~ 2017.12.21
2차	금액	93,431,420	19,276,680	12,713,450	지중동결
	기간	~ 2018.2.28	~ 2018.2.28	~ 2018.2.28
3차	금액	93,431,420	19,276,680	12,713,450	지중동결
	기간	~ 2018.3.12	~ 2018.3.26	~ 2018.3.26	지중동결
4차	금액	93,431,420	-	-	추가공정
	기간	~ 2018.3.26	-	-

Ⅲ		공사추진결과

❍ 옥외 지중 전기배관 완료(전기, 통신, 소방)

❍ 교사동 화장실 배관 완료

❍ 1차 기성(노무비) 지급완료(‘18.3.8)

❍ 전선 및 케이블 입선 완료

❍ 조달구매품 3종 검수 및 지급(옥내등, 옥외등, 전기분전반)

❍ 옥내등, 옥외등 설치완료

Ⅳ		잔여공정 추진계획

❍ 분야별 공정내역

구분	공 정	내 용	일 정	비고
전기	분전반 설치	수전반1, 평상전열1,화장샤워실3	~3.19
	조명, 전열 기구 설치	외등 8, 평상전열 20, 옥내등 81	3.13~3.19	교사동시건
	수전	전기안전공사점검, 한전계량기 설치	3.16~3.19
통신	방송장치 설치	관리실 내	~3.20	교사동 출입제한 (시건)필요
	CCTV 설치	카메라 5대, 제어반 1세트	3.13~25
소방	자동화재탐지설비 설치	감지기8(4),유도등 6,수신기 이설	~3.20	교사동 출입제한 (시건)필요
	소화기 설치	소화기함 20, 소화기 28개	~3.20

Ⅴ		공사추진 순서

❍ 잔여공정 계획수립 ⇒ 설계변경 ⇒ 공정추진 ⇒ 수전 ⇒ 시험운영 ⇒

보완 ⇒ 준공

- 공정계획 수립 : 전기, 통신, 소방(~3.16)

- 설계변경 : 전기, 통신, 소방(~3.13, 현장 여건 반영)

- 준공계 접수(3.20)

- 공사준공 검사(3.26)