원활한 상수도관 정비사업 추진을 위한

공사 관계자 회의 결과 보고

2017.  1.  31.

남부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

공사 관계자 회의 결과 보고

우리 사업소에서 시행 예정인 2017년 배급수(송배수)관 정비공사의 원활한 사업추진을 위한 시설공단 감독자 회의 개최 후 결과를 보고 드림

1		회의개요

□ 일 시 : 2017. 1. 25.(수) 15:00

□ 장 소 : 사업소 2층 회의실

□ 대상사업

○ “여의도동 15~15-3외 8개소 배급수관정비공사” 외 8건

□ 참석자(17명)

○ 사 업 소(13) : 급수운영과장, 시설관리과장 외 11명
(※ 사업별 공사 업무담당자 배석)

○ 시설공단(4) : 서홍석 과장 외 3명

□ 회의안건

○ 설계변경 최소화를 위한 설계작업 공동(시설공단 감독) 참여

○ 재해 발생 제로를 위한 안전관리 추진계획 방안

○ 조기발주, 조기착공 추진 방향

2		2017년 사업 현황

□ 공사개요

○ 대    상 : 여의도동 15~15-3외 8개소 배급수관정비공사 외 8건

○ 구경(연장) : 150~800㎜, L=16.7㎞

○ 사 업 비 : 166억원

□ 추진계획

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	공담감독	사업소 담당
		구경(㎜)	연장(m)
계		150～300	12,470	10,037
1	여의도동 15~15-3외 8개소 배급수관정비공사	200~300	2,270	1,902	서홍석	안규태
2	대림동 681-5~688-2외 6개소 배급수관정비공사	150~300	2,320	2,017	서홍석	구본천
3	신대방동 346-25~342-87외 7구간 배급수관정비공사	150~300	2,000	1,363	고기영	전소영
4	은천동 959-8번지 주변외 3개소 배급수관 정비공사	200~300	1,660	812	이지환	김재엽
5	서원동 10번지 주변외 1개소 배급수관 정비공사	200	2,170	2,043	이지환	서장원
6	가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사	300	2,050	1,900	고기영	최선보

○ 배급수관정비공사(6건, 연간단가 330m 별도 추진)

○ 송배수관정비공사(3건)

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	공단감독	사업소 담당
		구경(㎜)	연장(m)
계		400～800	3,900	6,600
1	가산동471-1 ~ 680번지외 1개소 송배수관정비공사	400~600	2,200	2,700	고기영	류태현
2	난곡사거리 ~ 미성초등학교간 송배수관정비공사	600~800	800	1,600	이지환	이 철
3	신길우성3차아파트앞 ~ 구로디지털단지 송배수관정비공사	800	900	2,300	서홍석	박행종

3		주요 회의내용

□

공사관리

○ 현장확인, 물량산출 등 설계도서 공동(사업소, 공단) 작업 추진

- 공사 계약심사 요청(‘17.2.10.한)

○ 계약 후 지체 없는 공사 착공을 위한 신속한 착공자료 검토 추진

○ 2017년 사업 물량이 가장 많은 우리사업소 실정을 감안 안전관리

및 시공품질 확보를 위해 감독자 증원 요구

- 현재 3명  ⇒  최소 5명 이상 (타 사업소 배치 인원 : 2~3명)

〔2017년 사업소별 정비물량 현황〕

(단위:㎞)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	89	16	3.2	14.3	9.4	9.2	16.7	9.6	10.6
배급수관	71	12.4	2.6	11.5	7.1	7.9	12.8	7.6	9.1
송배수관	18	3.6	0.6	2.8	2.3	1.3	3.9	2.0	1.5

※ 본부 전체 사업 물량의 19% 차지

□

공사장 안전관리

○ 안전사고 예방을 위한 안전관리계획 수립 철저

- 형식에 치우치지 않는 보행자,작업자 안전을 위한 실효성 있는 계획 수립 요구

□

청렴도 향상

○ 건전한 소통문화를 통해 공사업체와 감독자간 상호 신뢰성 제고

○ 청렴의식 고취를 위한 실천 다짐

4		향후계획

□ 공사 준공시까지 매월 공정보고회 정례화로 공정관리 추진

□ 회의 개최결과 시설관리공단 통보

○ 회의내용을 시설관리공단에 조치토록 통보.

붙임  참석자 명부 1부.  끝.