보 고 서
			담당	팀장
				05/24
문서번호	공사감독2처-3801
보존기간	준영구		협 조	차장
결재일자	2017.05.24.
공개여부	공개
제 목	공사 실정보고(5구간 연결공사 야간시공 변경)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 개봉동 339번지 외 6개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2017. 4. 13. ∼ 2017. 12. 17.

다. 도 급 액 : 644,811,930원

라. 공사개요 : D20 ~ 300mm  L=2,215m

마. 도 급 자 : (주)미래엔티씨  대표 박병훈

바. 발 주 청 : 강서수도사업소(급수운영과)

2		보고내용

상기 공사와 관련하여 시공사로부터 “개봉동********4(2017.05.24.)”호로 실정보고가 접수되어 아래와 같이 검토 보고합니다.

가. 현황 및 문제점

1) 당초 5구간의 시공이 주간으로 설계되어 있으나 남부순환로의 우회로(작은굴다리) 및 개봉1동사거리 앞으로 교통량이 많고 기존관 연결시 교통 통제 및 상가의 영업 피해로 주간공사를 반대하고 있어 주간공사가 불가능한 실정임.

2) 연결관 시공시 병원 및 상가 밀집지역의 단수가 되는 세대수가 많아

전세대 가설급수 설치가 어려운 실정임.

위치	사진대지	위치도
개봉동 444-2	D300 제수밸브 및 D150 퇴수밸브 설치, D300 기존관 연결
개봉동 5-2	300*300 분기, 300*150 분기, D300, D150 제수밸브 설치
개봉동 97-3 (작은굴다리)	300*300 분기, 300*150 분기, D300 제수밸브 및 D150 퇴수밸브 설치
개봉동 62-2	300*300 분기, D300 제수밸브 설치

지번	사진대지	위치도
개봉동 62-20	D80 기존관 연결(3개소)
개봉동 67-27 (개봉1동 사거리앞)	D300 제수밸브 설치 및 D300 기존관 연결

나. 검 토 내 용

1) 5구간 주간공사시 상가와 주거지역의 진출입로로 차량통행 불가 및 상가밀집지역으로 주간공사 반대 민원이 많고 시민 이용이 많은 병원과 상가 등 단수세대가 많아 가설급수설치가 곤란하여 물사용량이 적은 야간에 시공하는 것이 적정한 것으로 판단됨.

→ 이에 따라 단수 및 차량 통행 불가로인한 시민들의 불편을 최소화 할 수 있도록 단수세대수를 정확히 파악하여 단수홍보를 사전에 실시하고 굴착협의 후 주간공사에서 야간공사로 변경 시공하는 것이 타당하다고 판단됨.

※개략공사비 : 증)9,914천원

3		조치계획

상기 보고내용을 발주청에 제출하고, 그 결과에 따라 조치하고자 함.

붙임 : 시공사 실정보고 1부.  끝.