보 고 서
			담당	팀장
				05/22
문서번호	공사감독2처-3657
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2017.05.22.
공개여부	공개
제 목	공사 실정보고서 검토보고 (콘크리트깨기량 증가, 하수도복구량 증가 및 보행자 녹색매트 설치)

Ⅰ		공 사 현 황

가. 공 사 명 : 성내동 49-14 ~ 50-17 외 8개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2017. 04. 05 ~ 2017. 08. 22

다. 도 급 액 : 250,115,620원

라. 공사개요 : 배급수관(D=20~200㎜) 부설 L=1,414m

마. 도 급 자 : 일류건설(주) 대표 김해숙

바. 발 주 청 : 강동수도사업소(시설관리과)

Ⅱ		보고내용

상기 공사와 관련하여 시공사에서 제출한 『실정보고 검토요청 제출건(일류 2017-0338)호』 에 대한 검토보고 입니다.

가. 기존 포장도로 콘크리트 발생으로 인한 신규공정 및 물량 변경건

1) 현황 및 문제점

- 연장(위치) = L：약520m (3구간, 6구간, 7구간, 8구간 및 9구간)

- 상기 구간은 아스팔트 포장도로(T=0.125m)로 설계 되었으나 횡단굴착 및 관로부설을 위한 굴착결과 콘크리트(T=0.2m) + 아스팔트 덧씌우기(T=0.05m) 포장도로로 확인 됨.

2) 검토의견

- 폐기물 및 콘크리트 포장깨기 증가 수량에 대하여 설계변경시 정산 반영코져 함.

- 공사개요

‧ 콘크리트 깨기량 : 증)125㎥(당초 0㎥ ⇒ 변경 125㎥)

‧ 아스팔트 깨기량 : 감) 47㎥(당초 78㎥ ⇒ 변경 31㎥)

‧ 도급액 : 증) 약4,786천원

나. 방진덮개 대체 보행용 녹색매트 설치로 인한 신규공정 발생건

1) 현황 및 문제점

- 연장 : L = 약440m

- 구간 : 6구간, 7구간, 8구간 및 9구간

- 상기 구간 굴착부에 방진덮개를 설치시 비산먼지로 인한 민원이 발생하고 뭉쳐지는 경우가 많아 주변 시민(주로 노인이 거주함)의 안전사고가 우려됨.

2) 검토의견

- 보행용 녹색매트를 설치하여 민원발생 및 안전사고 발생을 예방코져 함.

- 도급액 : 증) 약320천원

다. 가정 PVC하수도 부설(복구)공 수량 증가

1) 현황 및 문제점

- 구간 : 8구간 및 9구간

- 상수도 부설을 위한 상기 구간 굴착시 가정 하수관이 저촉됨.

- 저촉 하수관은 노후도가 매우 심각하며 구배 불량으로 인해 긴 연장 부설후 공용하수관에 접합되어 있는 실정임

2) 검토의견

- 가정하수관을 원상복구코져하며 증가 수량은 설계변경시 반영코져함

- PVC하수도 부설공 : 증)80m (당초 0m ⇒ 변경 80m)

- 도급액 : 증) 약1,120천원

Ⅲ		행정사항

상기 검토 내용을 발주청에 제출하여 공사가 원활히 추진될 수 있도록 조치코자 함.

붙임 : 시공사 공문 1부.  끝.