보 고 서
			담당	팀장
				전결 08/31
문서번호	공사감독2처-12232
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2018.08.31.
공개여부	공개
제목	공사 실정사항(마천동 포장복구 신규공종 추가 반영 건) 검토 보고

1		공사현황

가. 공 사 명 : 2018년 강동수도사업소 관내포장도로 굴착복구공사

나. 공사기간 : 2018. 04.16 ~ 2019 . 04. 30.

다. 도 급 비 : 2,140,008,000원

라. 공사개요 : 아스팔트포장 361a,콘크리트포장6a,보도브럭포장6a

마. 도 급 자 : 지에스성신건설(주)  대표 박준구

바. 발 주 청 : 강동수도사업소장(급수운영과)

2		보고내용

상기 공사와 관련하여 마천동 1구간 포장복구공사 중 신규공종(도막형바닥재) 추가 반영 관련의 현장 실정사항에 대한 검토 보고 임.

1) 현황 및 문제점

- 마천동 배급수관 1구간(마천동 17~8번지) 포장복구공사 구간중 3개소 험프구간에 도막형바닥재-로드팔트(아스팔트/스텐실)가 시공되어 있어 포장공사완료 후 원상복구해야 하는 현장 실정임.

2) 위치도 및 현황사진

마천동 1구간(마천동17~8번지일대) 도막형바닥재  설치 3개소 위치도

마천동 1구간(마천동15-9번지) 도막형바닥재 시설현황 전경사진

3) 검토결과

- 상기와 같은 마천동1구간의 현장실정을 감안하여 기 시설되어 있는 도막형바닥재를(3개소 504㎡) 포장복구공사 후 원상복구 조치하는 것이 타당할것으로 사료됨.

- 개략 공사비

공종 및 물량	개략 공사비(순공사비)	비 고
도막형바닥재(스텐실) 3개소 504㎡	약 24,210천원	증) 24,210천원
※설계변경시 내역 수량조정으로 총도급액 변동없음.

3		조치의견

- 상기 공사 실정사항을 발주청에 통보하여 설계변경시 반영코자 함.  끝.