보 고 서
			담당	팀장
문서번호	공사감독2처-12453
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2016.09.29.
공개여부	공개
제 목	공사 실정 보고(상수관로 이설)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사(비굴착갱생)

나. 공사기간 : 2016. 07. 25 ~ 2016. 12. 21

다. 도 급 액 : 518,815,500원

라. 공사개요 : D=600mm, L=487m(개착 12m, 비굴착갱생 475m)

마. 도 급 자 : 홍익산업개발(주) 대표 정 연 용

바. 발 주 청 : 남부수도사업소(급수운영과)

2		보고내용

상기 공사와 관련하여 도급사로부터 제출받은 상수관로 이설에 대한 검토 보고임.

1. 상수관로 이설

가. 공사위치 : 작업구#2(독산동 982-1)

나. 당초설계 : 작업구(□3.0m×4.0m) 설치

다. 현황 및 문제점

- 작업구#2 독산동 982-1번지 앞은 배수관(D200)이 부설되어 있고 송수관 및 배수관 주변이 풍화암으로 되어있어 관하부 터파기가 불가한 상태임.

■작업구#2-배수관(D200) 저촉 현황

현 장 위 치 도
현 황 사 진
저촉되는 배수관 D200 하수관 D600 송수관 D600 이설위치 풍화암
풍화암깨기

라. 검토의견

- 작업구#2 가시설 설치를 위하여 저촉되는 배수관(D200, L=10m) 이설후 터파기를 시행하는 것은 타당하다고 사료됨.

- 개략공사비 : 증) 578천원

3		조치의견

- 상기 사항에 대하여 발주청에 제출하여 승인 요청 후 그 결과에 따라 시행 하고자 함.

붙 임 : 실정보고 관련 서류 1부.  끝.