보 고 서
			담당	팀장
문서번호	공사감독2처-12243
보존기간	준영구		협 조	과장
결재일자	2016.09.26.
공개여부	공개
제 목	공사 실정 보고(작업구 가시설 구조설계 및 안정성 검토)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사(비굴착갱생)

나. 공사기간 : 2016. 07. 25 ~ 2016. 12. 21

다. 도 급 액 : 518,815,500원

라. 공사개요 : D=600mm, L=487m(개착 12m, 비굴착갱생 475m)

마. 도 급 자 : 홍익산업개발(주) 대표 정 연 용

바. 발 주 청 : 남부수도사업소(급수운영과)

2		보고내용

상기 공사와 관련하여 도급사로부터 제출받은 작업구 가시설 구조설계 및 안정성 검토에 대한 검토 보고임.

1. 작업구 가시설 안정성 검토

가. 공사감독2처-11422호, 급수운영과-21645호와 관련하여 작업구 규격변경 및 사용부재에 대한 안정성 검토 시행

나. 가시설 구조검토 확인

- 지하매설물 저촉으로 인한 작업구 규격변경(□3.0m×4.0m→□2.0m×3.0m) 및 사용부재 변경에 대한 시공도면 및 구조계산서를 검토한 결과 적정함.

- 구조검토 확인 : 토목구조기술사(9915802009U) 김희욱

- 개략공사비 : 증)3,500천원

다. 가시설 변경 현황

항 목	규 격		비 고
	당 초	변 경
엄지말뚝	H-300×300×10×15(도면) H-300(물량내역서)	H-300×300×10×15
띠장	H-300×300×10×15(도면) H-298×201(물량내역서)	H-200×200×8×12
피스브라켓	H-300×300×10×15×400(도면) H-298×201(물량내역서)	H-300×300×10×15×400
주형보 받침	H-440×300×13×24(도면) H-298×201(물량내역서)	H-300×300×10×15
주형보	H-440×300×13×24(도면) H-700×300×13×24(도면) H-300×305×15×15(물량내역서)	H-300×300×10×15
토류판	T=6cm	T=6cm, T=10cm
복공판	2000×750×200(도면) 1990×750×200(물량내역서)	2000×750×200
주형보 브레이싱	PL-150×150×14 PL-652×143.5×16 Ls-90×90×10×170	-
근입장길이	2.5m	1.5m
가시설 규격	3.0m×4.0m 7개소	3.0m×4.0m 4개소 2.0m×3.0m 3개소

- 구조검토 용역 결과에 따라 변경된 도면으로 시공

- 추가 발생되는 버팀보, 잭, 강재운반 등에 대하여 신규대가 적용

- 변경되는 가시설공에 대하여 계약단가 적용

- 개략공사비 : 감)12,514천원

3		조치의견

- 상기 사항에 대하여 발주청에 제출하여 승인 요청 후 그 결과에 따라 시행 하고자 함.

붙 임 : 실정보고 관련 서류 1부.  끝.