문서번호	토목부-6713
결재일자	2016.4.6.
공개여부	비공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	광역도로과장	토목부장		시설국장
협 조
	건축관리과장

‘구리암사대교 건설공사’ 준공기한 연기 검토 보고

2016. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

‘구리암사대교 건설공사’ 준공기한 연기 검토 보고

책임감리원으로부터 ‘구리암사대교 건설공사’ 아천IC 군·경 합동검문소 건축 협의(허가)에 따른 절대공기 부족으로 준공기한 연기(총차,16차)요청 사항이 있어 검토보고 드림.

※ 암사감리 2016 - 46호(’16.4.4.) : 준공기한 연기 검토 보고

Ⅰ		사업개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 건설공사

○ 공사규모 : 교량 건설 폭 4∼6차로, 연장 1.13㎞

○ 총공사비 : 243,975백만원(16차 3,359백만원)

- 도급비 : (총차)196,703백만원, (16차)3,163백만원

○ 계약기간 : ’06.4.5.∼’16.4.30.(16차 ’15.11.2.∼’16.4.30)

○ 계 약 자 : 현대건설㈜  대표 정수현

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

Ⅱ		‘군·경 합동검문소’ 협의경위

○ 2012.∼ 2015. : 군·경 합동검문소 설치 관련 협의(구리시 등 4개기관)

- 교통광장내 군사시설(군·경 합동검문소)설치 허가 불가 입장 → 도로법에 의한 도로관리시설(초소)로 설치시 허가 협조(구리시 : 2015. 7)

※ 도로구역 결정 및 점용허가(서울시), 건축 허가(구리시)

○ 2015.12.03. : 아천IC 교통광장 ‘도로구역 결정 및 지형도면’ 고시(서울시)

○ 2015.12.17. : ‘군·경 합동검문소’ 추진방안 수립

○ 2015.12.18. : 도로점용허가(서울시)

○ 2015.12.22. : 건축 협의(허가)신청(도로관리시설 : 초소)

○ 2016.02.16. : 건축 협의(허가)(구리시)

○ 2016.03.10. : 건축 공사 착공 신고필증 교부 (구리시)

○ 2016.04월 현재 : 공정 98.4%

- 군·경 합동검문소 기초 공사 중(건축 공정 6.0%)

Ⅲ		준공기한 연기

□ 감리단 보고내용

○ 준공기한 연기

구분	당 초	변 경	비고
총차	’06.04.5. ∼ ’16.4.30.	’06.04.05. ∼ ’16.8.31.	증)123
16차	’15.11.02.∼ ’16.4.30.	’15.11.02. ∼ ’16.8.31.	증)123

○ 연기 사유

- 아천IC ‘군·경 합동검문소’ 구리시 건축 허가(’16.2.16.) 및 착공신고필증 교부(’16.3.09.)에 따른 절대공기 부족

□ 감리 검토의견

○ 공용건축물(도로관리시설 : 초소) 건축공사 소요기간 부족으로 공사계약일반조건 제26조(계약기간의 연장) 규정에 의해 공사 준공기한을 연기하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

Ⅳ		조치계획

○ 상기 감리단 검토의견과 같이 잔여공사 추진에 차질이 없도록 공사 준공기한을 연기코자 함.

- 준공기한 연기(총차,16차) : ’16.4.30. → ’16.8.31.(증 123일)

붙  임 : 1) 준공기한 연기의뢰서 1 부.

2) 예정공정표(16차) 및 건축공사 세부공정표 각 1 부.

3) 감리단 준공기한 연기 검토보고서 1부.

4) 구리시 건축 협의(허가) 및 착공 신고필증 1 부.   끝.