□ 증설공사 추진현황

펌프장	규 모	사업비 (백만원)	공사기간	추진내용	공정율	비고
한남	․증설(1,360㎥/분) ․건축물 증축 512㎥	10,126	‘17.5~’19.06	○ 증설펌프장 슬래브 콘크리트 타설 ○ 유수지 복개구간 파일 시공․	43%
행당	․증설(600㎥/분) ․유수지 확충 7,000㎥	10,373	‘17.5~’19.06	○ 유수지 바닥 거푸집 설치 ○ 유수지 바닥 무근 콘크리트 타설․	45%
상수	․증설(36㎥/분) ․건축물 개축 781㎡	6,862	‘17.5~’19.06	○ 펌프장 구조물 가시설 설치 ○ 수문, 맨홀 콘크리트 타설	21%
당인	․증설(820㎥/분) ․건축물 증축 275㎡	11,468	‘17.5~’19.06	○ 토출관로 설치 ○ 유입수로 이설․	34%
염창1	․유수지 확충(2,160㎥) ․건축물 개축 965㎡	5,978	‘17.5~’19.06	○ 유수지 지하벽체 콘크리트 타설 ○ 구조물 1층 바닥 콘크리트 타설․	20%