문서번호	기반시설과-4101
결재일자	2016.10.7.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
협조	기전설비과장
	주무관

공사 현안사항 검토보고

(뚝섬공원 친환경주차장 조성공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

한강사업본부

(기반시설과)

공사 현안사항 검토보고

(뚝섬공원 친환경주차장 조성공사)

『뚝섬공원 친환경 주차장 조성공사』추진과 관련하여 기존포장 콘크리트 블럭 반출계획 변경, 발생품 재활용, 가로등 이설 등 공사 현안사항에 대한 검토 보고임.

공사개요

❍ 공 사 명 : 뚝섬공원 친환경주차장 조성공사

❍ 사업위치 : 뚝섬공원 제3주차장(현 임시주차장)

❍ 공사내용

- 사철나무 1,460주, 애기배롱 4,500주 회양목 6,550주, 명자나무 700주 식재 등

- 잔디블럭시공 4,128㎡, 아스콘 포장 755㎡ 등

❍ 사 업 비 : 415백만원 (도급비 263백만원)

- 도급비 263백만원, 관급비 122백만원, 기타(이전비 등) 40백만원

❍ 공사기간(시공사) : 2016. 9. 9. ~ 12.20 ((주)수야조경개발)

보고내용

❍ 콘크리트 블럭 반출계획 변경 (폐기물처리→재사용)

- 현황 : 공사대상지(제3주차장) 기존 콘크리트 블럭이 포장면 훼손(요철 등)이 있으나 블록 상태는 양호하여 재 사용 가능함

- 처리계획변경

구 분	당 초	변 경	비 고
콘크리트블럭 처리(4,700㎡)	건설폐기물 처리	재사용처리	재사용처 : 수방사 군수처 자재하차 : 남양주 금곡동 부대
비 용	25백만원	6백만원 (상차 운반)	예산절감 : 19백만원

[콘크리트 블럭 포장 현황]	[블럭 세부현황]

❍ 제3주차장 보행출입구간 발생품 재활용 보수

- 현황 및 조치계획

: 제3주차장 보행출입 구간에 버스전용주차구역의 판석을 재활용하여 보수시공 추진 (주변부 잔디도 재활용)

- 공사규모 : 3m×2m, 2개소

[판석포장 현황]	[판석발생품 재활용 대상지]

❍ 관광버스 주차구역 주변 가로등 이설

- 현황 및 조치계획

: 관광버스 주차구역 개선 구간에 저촉되는 가로등 5개소 이전은 가로등유지관리부서(기전설비과)에 공사 협조요청

- 공사규모/소요예산 : 가로등 5개소 / 약22백만원

- 예산과목 : 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 접근체계 개선, 뚝섬 한강공원주변 교통체계 개선, 시설비

- 현황사진

[가로등 현황]	[이설계획]

조치의견

❍ 주차장 콘크리트 블럭 반출작업 및 주차장 보행진출입로 보완 공사는 상기 계획대로 완료하고 설계변경시 정산코자하며,

❍ 가로등이설 5개소는 기전설비과에서 이전토록 공사예산(22백만원)을 재배정 조치코자합니다.

붙임 : 가로등 위치도 및 현황사진 1부. 끝.