붙 임 1

< 제출 양식 >  ※ 주무과 수합 제출

공약 이행 자체점검 결과

- 2017.12.31. 기준 -

2018. 1월

안전총괄본부(도로관리과)

작 성 자	도로관리과장 : 박문희 ☎2133-8150	도로관리팀장 : 최연우 ☎8152	담당 : 고동오 ☎8181

혁신-92		원격 ‘스마트 제설’로 눈길사고 방지해요!

추진 상황	이행 후 계속 추진	사업 구분	임기 내	계속
총 사업비	4,634백만원	집 행 액	4,134백만원

□ 최종목표

○ ’노즐형 액상살포장치’ 설치 확대

○ PC 전용 프로그램 활용 원격 제설

□ 추진계획(정책개요)

○ 자동액상 살포장치 설치

-  상습결빙지역 및 고갯길 등 제설취약지역 설치장소 선정

- 지역별 설치방식 결정 및 설치

○ 사업기간 : ’14년 ~ ’17년 12월

□ 연차별 추진계획

단위사업	’14년	’15년				’16년	’17년	’18.6월	임기 후
		1분기	2분기	3분기	4분기
자동액상 살포장치 설치	3개소	2개소	-	-	4개소	8개소	8개소	-	4

○ ’17년 분기별 세부 추진계획

단위사업	’17년
	1분기	2분기	3분기	4분기
자동액상 살포장치 설치	-	-	-	8개소

□ 연차별 투자수요(계획)

(단위 : 백만원)

단위사업	임기 내							임기 후
	구 분	계	’14년	’15년	’16년	’17년	’18.6월
자동액상 살포장치설치	시 비	4,634	434	1,200	1,500	1,500	-	800

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

단위사업	임기 내							임기 후
	구 분	계	’14년	’15년	’16년	’17년	’18.6월
자동액상 살포장치 설치	시 비	4,134	434	800	2,100	800	-	800

□ 시민 참여실적

(단위 : 횟수)

단위 사업	설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	보고서 발간
자동액상 살포장치 설치	-	-	-	-	-

□ 추진 실적

단위사업	’14년	’15년				’16년
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
자동액상 살포장치 설치	3개소	2개소	-	-	4개소	-	-	2개소	8개소

단위사업	’17년
	1분기	2분기	3분기	4분기
자동액상 살포장치 설치	-	-	-	8개소

○ 추진실적

설치년도	설 치 위 치	규 모(m)	금액(백만원)	관리기관
계			4,134
2014년	헌릉로 연결도로	650	190	서초구
	성수대교 북단 진입램프	500	135	성동도로사업소
	잠실대교 남단 진입램프	300	109	동부도로사업소
2015년	성수대교 북단(강남방향 진입램프)	400	70	성동도로사업소
	한남대교 북단 (용산방향에서 진입램프)	500	165	남부도로사업소
	금화터널 진출입 도로 (신촌방향, 봉원고가하부)	400	145	서부도로사업소
	성수대교 남단 E 램프	400	110	성동도로사업소
	성수대교 남단 F 램프	400	110	성동도로사업소
	금천종합복지타운 ~벽산5단지아파트(금하로)	550	200	금천구
2016년	천호대교 남단 램프	150	130	동부사업소
	구리암사대교 암사IC(A,B,F,G 램프) 1구간	1,600	380	동부사업소
	구리암사대교 암사IC(D,E 램프) 2구간	1,000	280	동부사업소
	구리암사대교 아천IC(F,G 램프) 3구간	900	250	동부사업소
	금화터널 진출입 도로 (금화터널~현저고가)	150	110	서부사업소
	신도림고가(도림천고가교 방향)	1,000	260	남부사업소
	용비교 램프(성수대교 북단사거리)	400	150	성동사업소
	방화터널 진출램프(올림픽개로 방향)	650	200	강서사업소
	오류고가차도(궁동213~오류동123)	670	160	구로구
	도림고가차도 (문래동사거리~영등포자이아파트 입구)	600	180	영등포구
2017년	박석고개 (구파발역 방향)	700	170	서부도로 사업소
	박석고개 (연신내역 방향)
	동작대교 남단 (올림픽대로 김포방향 램프)	300	105	남부도로 사업소
	동부간선도로 달팽이램프 (강변북로 구리 방향)	800	180	성동도로 사업소
	동부간선도로 달팽이램프 (강변북로 일산 방향)
	방화터널 진입램프	600	150	강서도로 사업소
	화곡고가 하부도로	200	90	양천구
	문성로 난곡터널 주변	300	105	관악구

○ 추진방침

-  2017년 겨울철 대비 강설 초기대응 향상을 위한 자동액상살포장치 설치 사업 추진계획(도로관리과-10933, 2017.7.3.)

□ 추진상 문제점(애로사항) 및 개선방안

○ 해당없음

□ 향후 계획

○ ’18년 분기별 세부 추진계획

단위사업	’18년
	1분기	2분기	3분기	4분기
자동액상 살포장치 설치	-	-		4

○  액상살포장치 설치 장소 조사               : ’18.  5 ~ 7월

○  액상살포장치 설치                         : ’18.  8 ~ 9월

○  액상살포장치 설치 및 가동                 : ’18. 10 ~ 11월

□ 타 기관(중앙부처 등)과 협조사항

○ 해당없음

작 성 자	도로관리과장 : 박문희 ☎2133-8150	도로관리팀장 : 최연우 ☎8152	담당 : 고동오 ☎8181