공정관리 추진 계획

<마곡지구 집단에너지공급시설 설치관련>

□ 공정관리 방향

○ 마곡지구 집단에너지공급시설의 기본․실시설계 및 공사 적기 시행

○ 부천(GS파워)열 연계 수열시설 적기 설치 및 수열공급

□ 공정관리 구분

○ 집단에너지공급시설 건설공사 설계발주 전 단계부분

○ 기본 및 실시설계 단계부분

○ 시공 및 시험운전 단계부분

□ 공정관리 방법

○ 주간 공정회의

- 일  시  :  매주 수요일 07시

- 장  소  :  집단에너지사업단 회의실(관리동 3층)

- 참석자  :  녹색에너지과장, 사업단실장, 담당팀장, 담당자

○ 월간 합동 공정회의

- 일  시  :  매월 첫주 금요일 14시

- 장  소  :  서소문별관1동 11층 회의실

- 참석자  :  본부장(기후변화정책관), 녹색에너지과장, 집단에너지팀장,                집단에너지사업단장, 사업단실장, 현장대리인 등

○ 공정지연 만회대책

- 공정지연 시 원인분석 및 공정만회대책(돌관작업) 수립 등