공정보고회(10월) 결과보고

우리 사업소에서 시행 중인 배급수(송배수)관정비공사에 대한 10월   공정보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

1		보고회 개요

□ 일 시 : 2016. 10. 10.(월) 16:00

□ 장 소 : 사업소 2층 회의실

□ 대상사업

○ 독산로~시흥대로간 송배수관정비공사 외 5건

□ 참석자 : 22명

○ 사 업 소 : 13명(행정지원과장, 급수운영과장, 시설관리과장)

※ 사업별 공사 업무담당자 배석

○ 시설공단: 3명 (박태문 팀장 외 2명)

○ 시 공 사 : 6명 (세웅인포션 현장대리인 등)

□ 회의안건

○ 사업 추진실적 보고 및 부진사항에 대한 대책 마련

○ 철저한 공사장 안전관리 구축

○ 상호 신뢰구축을 통한 청렴문화 정착 조성 등

2		공정현황

(’16. 9. 30. 기준)

연번	공 사 명	공사기간	공사개요		추진 현황 (m)	공정률			비고
			구경 (mm)	연장 (m)		계획	실적	대비
계	계	-	400~ 800	10,976	6,144	66%	56%	84%	부진
1	독산로~시흥대로간 송배수관정비공사(APC)	2016.7.25.~12.21.	600	400	작업구 6개소 설치	38%	30%	78%	부진
2	여의도동 5-2구간외 1개소 송배수관정비공사(개착)	2016.5.16.~11.28.	400	400	465	87%	89%	102%	양호
3	독산동 378-242번지외 6개소 배급수관 정비공사	2016.5.4.~12.27.	80 ~300	2,560	1,197	62%	48%	77%	부진
4	행운동63-19~63-43번지외 9개소 배급수관 정비공사	2016.4.29.~12.16.	100 ~200	2,120	950	60%	48%	80%	부진
5	신대방동685-3～644-1번지외 5개소 배급수관 정비공사	2016.5.10.~12.24	100 ~300	2,375	1,590	75%	67%	89%	부진
6	여의도동24-3～26-4번지외 7개소 배급수관 정비공사	2016.5.11.~12.23.	200 ~300	3,121	1,936	77%	77%	100%	양호

3		주요 지시사항

□

공사관리

○ 전반적인 공정보고회 자료가 부실하므로 세부계획서 작성 재 보고

- 공기내 공사가 마무리 될 수 있도록 구체적인 계획서 작성 필요

○ 기존관 철거 실적 증대를 위한 적극적인 관리 대책 추진

- 신관 부설 중 발견되는 모든 폐상수도관은 적극 철거 조치 등

○ 공사 중 민원이 유발되지 않도록 세심한 관리 필요

- 단수시간 준수 등 공사로 인한 주민 불편이 없도록 사전 조치 철저

- 민원 발생시 철저한 초동대처로 민원이 확대되지 않도록 관리 철저

○ “여의도동 송배수관 정비공사”의 공원 녹지대 구간에 대해서는 기존관

충진에 대해 타당성 검토

□

공사장 안전관리

○ 공사현장 보행자 통행로 확보 및 안전시설 확보 철저

○ 각종 장비 사용 등으로 인한 작업자 안전사고 예방 철저

○ 되메우기 불량으로 인한 도로 침하(동공) 발생이 없도록 시공관리 철저

〔행정지원과장 당부사항〕

안전한 공사장 관리를 위해 사람이 우선이다는 생각과 항상 원칙에

기본을 두고 공사관리에 임하여 주기 바람

□

청렴도 향상

○ 다양한 소통채널 확보로 현장 불만 해결 및 상호 청렴성 제고

○ 청렴문화 확산을 위해 불필요한 오해의 소지가 없도록 직무수행

□

행정사항

○ 계획대비 부진공정 사업에 대하여는 장비 및 인력투입 계획을 포함한 공정만회 대책을 구체적으로(주 단위) 작성하여 제출지시

(제출자 시설관리공단 ‘16.10.17한)

4		향후계획

□ 10월 공정보고회 개최결과 통보

○ 공정보고 회의내용을 시설관리공단에 통보 보완토록 조치

□ 11월 공정보고회 개최

○ 2016.11.1.(화) / 사업소 2층 회의실.  끝.