- 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 -

회  의  자  료

□ 추 진 현 황

	[ 보 상 ]
• 2015. 3.17. ~ 4. 1. : 과천구간 보상계획 공고(농어촌공사) - 부체도로 미설치 구간(미림원예종묘) 제외 • 부체도로 제외구간 도시관리계획 및 실시계획 변경도서 작성 중

	[ 주요공종 : 공정률 22.35% ]
• 시점부 본선교각 P3 코핑 강재거푸집 조립(’15.3.24~4.2.) • 주암교(수서방향) A2 기초 철근조립(’15.3.20~3.26, 돌관작업) • 화물터미널 앞 터파기 및 복공 가시설 설치(계속)

□ 현 안 사 항

구분	내 용	조 치 계 획	관련 도면
보상	과천구간 미림원예종묘 앞 부체도로 미설치 계획으로 해당구간 보상대상 제외 ⇒ 전체 보상일정 차질	도시관리 및 실시계획 변경인가 후, 추가 보상 요청 4월초 실시계획 변경인가 신청 5월초 고시예정	#1
	제2염곡지하차도 공사 중 대체도로 설치를 위해 AT센터 토지 일시사용 필요 ⇒ 점유자가 지장물 보상을 위한 조사·측량 거부	토지 일시사용을 위한 실시계획 변경 추진 우선, 토지조서 작성하여 실시계획 변경 열람(4월) 고시 전까지 지장물조사 협조요청	#2
민원	주암교 하부도로 계획 철회 및 남측과천화훼집하장으로 차량 직접 진입 가능한 U턴차로 설치 요구	본선교 하부 U-Turn 차로검토(안) 주민설명회 개최 ※ 2015. 3.27(금)	#3

별첨 1		과천화훼집하장 앞 부체도로 설치계획(안)

별첨 2		과천화훼집하장 진입 U-Turn 차로 검토

	양재대로 횡단보도 대기 보행 신호 시 화훼단지로 진출입
검토 1안)	본선 진출입 램프 교차, 교각 근접, 시거확보 불량 등 보행자, 운전자 안전사고 위험
검토 2안)	U턴차로 진출입 테이퍼 길이 미확보 안전성 불량 횡단보도 추가설치

별첨 3		AT센터 토지 일부 일시사용 계획(안)

▢ 도로건설사업 구간 외 토지 일시사용 계획(교통전환 대체도로)

▢ 양재화훼단지 토지 일시사용 계획 조감도

국제원예종묘

전국영농화훼유통조합

1 구간

2 구간

공사중 보도선

공사중 보도선

최종 보도선