과  장

심사자

설계자

설    계

심    사

결    재

2014년 8월   일

2014년 8월   일

설      계    (변   경)   서

공 사 명 : 2014년 기전시설물 일상유지 보수공사(연간단가) 제1회 설계변경서

구               분

변 경 전

변 경 후

증 감 액

비     고

총       공       사       비

131,570,900

131,570,900

0

작업물량 조정

도급비

공    급      가    액

119,609,909

119,609,909

0

부   가   가   치   세

11,960,991

11,960,991

0

계

131,570,900

131,570,900

0

관     급     비

이     전     비

* 공사(변경)개요
1.	가로등 건주		12본	→변경후	0본	감	- 12
2.	등기구 교체		20개	→변경후	67개	증	+ 47
3.	안정기, 램프교체		230개	→변경후	54개	감	- 176
4.	전선관 배관		1,350m	→변경후	531m	감	- 819
5.	전원케이블 배선		1,010m	→변경후	2,786m	증	+1,776
6.	가로등기구 세척		152개	→변경후	1,317개	증	+1,165
7.	터널, 지하차도 글로브세척		120개	→변경후	2,667개	증	+2,547