과  업  내  용  서

2018. 1

상수도사업본부

(생  산  부)

목      차

제1장 과업의 개요	1

제2장 일반사항	3

제3장 성과품 작성기준 및 성과품제출	8

과 업 내 용 서

제1장 과업의 개요

1. 과 업 명 : 정수장 녹지조성 및 유지관리 기본계획 용역

2. 과업의 배경 및 목적

가. 과업의 배경

○ 정수센터 내 수목현황을 조사하여 실태를 파악하고 아리수를 생산하는 시설(수처리 시설)의 특성에 맞는 수목을 선정하고 관리방안을 마련하여 아리수 생산환경의 안전하고 깨끗한 이미지를 제고하기 위함.

나. 과업의 목적

○ 각 정수센터 녹지 내 수목현황 조사

○ 각 정수센터 별 특성에 맞는 녹지조성(수목식재) 및 관리방안 마련

3. 과업의 범위

가. 공간적 범위

○ 아리수정수센터 : 6개소

정수장	위 치	현 황(㎡)
		부지면적	녹지면적(잔디면적)
계		1,403,578	595,297(205,114)
광 암	경기도 하남시 서하남로 293	207,407	100,880(31,665)
구 의	광진구 광나무로 571	177,772	104,029(26,807)
뚝 도	성동구 왕십리로 27	149,818	20,896(9,733)
영등포	영등포구 노들로 11	137,125	64,782(36,030)
암 사	강동구 고덕뒷길 131-1	276,250	147,497(59,824)
강 북	경기도 남양주시 고산로 171	455,206	157,213(41,055)

나. 시간적 범위 : 착수일로부터 120일

다. 내용적 범위

○ 각 정수센터 녹지 내 수목현황 조사

○ 아리수 생산시설에 적합한 식재수목 선정 및 유지관리 기준 마련

○ 정수장 특성에 맞는 녹지조성 방안 마련

4. 과업 세부내용

가. 정수센터 녹지 현황분석

○ 정수센터 일반현황

- 정수센터별 수목현황 조사(수종, 규격, 생육현황 등)

○ 기존 수목 및 도입수목에 대한 분석

- 아리수 생산시설에 적합한 수목선정과 장단점 분석

- 실제 식재사례 및 조사 등

나. 기본구상

○ 조성방안 설정

- 각 정수센터별 특성에 맞는 녹지 개선, 관리방안 마련

다. 정수장 녹지조성 기본계획

○ 정수장 조성계획

- 정수센터 적합수종(장려, 지양) 선정

· 녹지 및 건물과의 간격을 고려한 수종 선정

· 정수시설, 주변 자연경관에 어울리는 수종

- 정수시설의 특성에 맞는 녹지조성

○ 정수장 유지관리 계획

- 정수센터별 녹지 관리에 대한 개선계획 마련

- 수종별 가지치기, 비료주기, 병충해 방제 등 유지관리 방안 마련

제2장 일반사항

1. 과업수행 및 공정보고

가. 과업수행방법

1) 수급인은 과업내용서와 관계법령 및 제규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

2) 용역수행 처리절차는 본 과업내용서에 따르고, 과업내용서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주청과 협의하여 처리함으로서 내실 있는 설계가 되도록 하여야 한다.

나. 착수신고서 제출

수급인은 계약 후 7일 이내 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주청에 제출하여야 한다.

1) 착수 보고서

2) 인력투입 계획서

가) 사업책임기술자 선임계(이력서 포함), 분야별 책임기술자 등

나) 책임기술자 중 내국인은 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서, 외국인은 졸업증명서, 경력확인서 등 학력 및 경력을 확인할 수 있는 서류

3) 기술용역예정 공정표

4) 장비투입 계획서

5) 기타 과업 수행에 필요한 사항

다. 과업수행계획서 제출

수급인은 계약 후 20일 이내에 과업의 특성 및 현장여건을 감안한 과업수행계획서(공동수급일 경우 공동수급인 상호간의 과업분할 협의서 첨부) 1부를 제출하여 발주청의 승인을 받아야 하며, 이에 포함될 내용은 다음과 같다.

1) 세부공정계획서

2) 과업의 성과품 제출계획서

3) 과업수행조직 및 인력(장비)투입계획서

4) 건설기술 경력사항 확인서

5) 참여기술자 인적사항, 참여과업내용 및 참여예상기간

6) 참여기술자의 보안각서

라. 업무협의 및 공정보고

1) 보고 시기

다음의 경우에는 발주청에 사전 보고하여 검토를 받아야 한다.

가) 용역착수, 중간단계, 마무리단계 검토 시

나) 준공 시

다) 공정보고 시(필요시)

라) 기타 발주청의 요청이 있는 경우

2) 용역진행 보고

수급자는 용역진행보고를 아래 공정에 따라 발주자가 지정한 장소에서 보고 하여야 한다.

가) 착수보고(공정 20%) : 계약일로부터 1개월 이내

- 현장조사 계획 수립(조사대상, 범위)

- 용역 세부추진 방향 수립

- 용역기간별 공정관리 등

- 관련 전문가 자문 및 관계자 회의 개최계획 등

나) 중간보고(공정 70%) : 계약일로부터 3개월 이내

- 현장조사 현황 보고

- 기본구성안 작성 등

- 과제별 세부 계획안 보고

- 전문가 자문회의 병행(조경, 생태, 수목보호 등 분야)

6. 발주자 관련자료 제공

가. 자료제공 : 정수센터 조감도, 녹지관련 자료 등 관련서류

나. 제공되는 자료는 계획 참고용으로 제공된 것으로 그 내용의 오류 및 정확성을 검토한 후 사용하여야 한다.

다. 자료의 반납 : 제공된 자료는 용역완료 후 반납하여야 하며 멸실 또는 훼손시에는 손해를 배상하여야 한다.

7. 용역변경 조건

가. 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

나. 기타 발주자가 필요하다고 인정하고 수급자와 협의된 경우

다. 위 각 호의 사유로 과업 변경요인이 발생할 시 또는 계약체결 후 예정가격 또는 계약금액의 결정에 하자, 착오가 있음이 발견되거나 기타 계약금을 조정하여야 할 사유가 발생하였을 때.

8. 보안사항

가. 본 과업수행 대상시설은 국가 보안시설로서 수급인은 보안대책을 수립하고 대표자와 참여기술자의 보안각서를 착수계와 함께 제출하여야 한다.

나. 성과품은 수급인이 소유하거나 임의로 복사, 외부로 유출시켜서는 안 되며 과업 폐기물은 분쇄 또는 소각 처리하여야 한다.

다. 기타 보안에 결함이 없도록 하여야 하며 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 민·형사상 책임은 수급인이 책임진다.

라. 용역계약에 의해 수행된 용역사업의 결과물에 대한 저작재산권 일체와 2차적 저작물 또는 편집 저작물의 작성권은 서울특별시가 소유하며, 서울특별시장은 정책상 연구 결과물의 내용을 일부 보완 또는 수정할 수 있다.

9. 하도급 사항

가. 수급인는 발주자로부터 도급 받은 용역에 관하여 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 그 계약을 체결하기 전에 다음 각 호의 사항을 발주자에게 통지하고 승인을 받아야 한다.

1) 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

2) 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

3) 하도급 기간 및 하도급 금액 등

나. 용역감독자는 다음에 해당하는 사항이 발생하였을 경우에는 즉시 발주자에게 보고하여야 한다.

하도급 통지 또는 하도급에 관한 승인사항을 위반하거나 일괄 하도급 하는 경우

다. 수급인은 하수급인을 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

1) 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

2) 관련법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자

라. 수급인은 하도급 부분에 대하여 발주자로부터 기성금 및 준공금을 지급 받았을 때에는 그 대금을 지급 받은 날부터 15일 이내에 하수급인에게 해당부분에 대한 대금을 현금으로 지급하여야 한다.

마 책임한계

하도급으로 시행한 당해 설계 성과에 대하여 전적으로 수급인의 책임으로 한다.

10. 기타사항

가. 본 과업에 투입된 기술자는 과업기간 중 임의로 교체할 수 없으며 교체가 불가피한 경우에는 발주자의 사전승인을 받아야 하고 발주자에 의해 과업수행에 부적합하다고 판단된 기술자에 대하여 지시에 의거 즉시 교체하여야 한다.

나. 본 과업 내용서는 과업수행을 위한 제반사항에 법령과 정부제정 각종 시방서에 의거 발주자와 협의 수행하여야 한다.

다. 성과품 작성은 감독원과 협의하여 결정하고 과업 완료시 성과품을 작성 제출하여 감독의 승인을 받아야 한다.

라. 과업 수행한 내용을 빠짐없이 보고서에 수록 제출하되 그 내용을 발주기관의 허가 없이 학술발표, 연구논문게시, 언론기관 보도 등 타인에게 열람시킬 수 없으며 과업수행 상 발생한 폐기품은 소각한다.

제3장 성과품 작성기준 및 성과품 제출

1. 도서의 작성

가. 문자는 한글사용을 원칙으로 하되 필요한 경우 영문 또는 한문을 병기하여 기록할 수 있다.

나. 보고서에 게재하는 사진 등은 디지털카메라로 촬영 jpg압축 파일화 한다.

다. 단위는 미터법으로 표시하되 숫자는 아라비아 숫자로 표기한다.

2. 최종성과물 제출

최종성과물은 과업수행완료 15일 전까지 성과품(안)을 제출하여 발주기관의 사전 검토를 받은 후 계약서상 준공 일까지 납품하여야 한다.

내 용	규 격	수 량	비 고
기본계획보고서	A4, 옵션인쇄, 아트지 260page 내외	10부	워드프로세서로 작성 CD-ROM에 포함
정수센터 녹지 현황도	원도 1부 포함 인쇄물		인쇄물 보고서에 첨부 CD-ROM에 포함
정수센터 녹지 계획도	원도 1부 포함 인쇄물		인쇄물 보고서에 첨부 CD-ROM에 포함
사진 및 영상자료	JPG, AVI 압축 CD-ROM으로 제출		기본계획보고서 CD-ROM에 포함
Powerpoint 보고용화일	CD-ROM으로 제출	1부