남촌 탐방로 조성 기본 및 실시설계 용역

과업내용서

2018. 1.

중 구 청

[도로시설과]

목   차

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과업의 명칭	3

2. 과업의 배경 및 목적	3

3. 과업의 범위	4

4. 과업의 기간	5

Ⅱ. 과업 수립원칙 및 세부내용

1. 수립의 일반원칙	5

2. 조사, 자료수집 및 상위계획 검토	6

3. 세부과업내용	9

4. 기본설계	12

5. 실시설계	14

Ⅲ. 과업수행 일반지침

1. 일반사항 및 용어의 해석	21

2. 책임과 보고의무 및 보안	23

3. 하도급 사항 및 설계변경 등	28

4. 기타 특이사항	32

Ⅳ. 보고서 및 성과품 제출

1. 일반사항	33

2. 보고서 및 성과품 제출	34

Ⅴ. 예정공정표

1. 예정공정표	38

Ⅵ. 위치도	39

과 업 내 용 서

[ 남촌 탐방로 조성 기본 및 실시설계 용역]

Ⅰ		과업의 개요

1. 과업의 명칭

○ 본 과업의 명칭은 “남촌 탐방로조성 기본 및 실시설계 용역” 이라 한다.

2. 과업의 배경 및 목적

가. 배  경

○ 남촌지역(회현동 일대)은 ｢서울로 7017｣과 ｢서울역 일대 도시재생활성화계획(남촌재생플랜)｣을 바탕으로 서울로(Seoullo)와 남산을 잇는 보행공간으로  활성화

○ 남촌지역은 역사·문화적으로 우수한 지역자산(남산옛길, 은행나무, 일신교회 등)을 보유 중이나 낙후된 기반시설 등으로 일반 보행자 뿐 아니라, 지역  주민들의 활용도가 낮아 지역자산을 적극적으로 활용하지 못하는 상황임.

또한, 지역자산 간 연계 방안이 마련되어 있지 않아, 시너지 효과 미비

○ 따라서, 남촌지역 주민들이 제시한 의견과 ｢남촌재생플랜｣ 등 관련 계획을 연계하여 지역특색을 활용할 수 있는 도시재생사업이 필요

나. 목  적

○ 서울로 7017 개통에 따라, 사업대상지인 회현동과 유기적인 연계를 통해 남촌지역(회현동 일대) 보행 활성화 및 지역 활성화에 기여

○ 남촌지역자산과 거점시설 간 연계를 강화하여 지역자산 적극 활용

○ 노후화된 보행로 개선, 안내체계 개선, 지형적 보행불편(상대적으로 높은 경사도 등)개선, 보차도 분리, 휴식공간 마련, 가로시설물 정비 등을 검토하여 보행환경을 증진(보행편의, 안전 등)하고자 함

○ 또한, 사업과정에서 지역주민 및 관련전문가 등이 참여하여 발굴된 자산을 실현하여 도시재생사업 취지를 반영하고자 함

3. 과업의 범위

가. 공간적 범위

○ 중구 회현동 일대 506,000㎡

연번	세부 사업명	규모 (m)		위치	비고
		연장	폭
	6건	1,020
1	남산옛길 조성4	360	8	퇴계로 4길
2	남산옛길 조성5	660	3.5~7	퇴계로 8길~10길
3	탐방로 조성	-	-	구역내 전체

나. 내용적 범위

○ 지역 내 도시계획, 교통계획 등 상위계획과 제반 현황 자료 수집․분석

○ 대상지역의 지리적 특성, 동네 특성 등을 분석하여 특화된 차별성 제시

○ 2개 보행가로 및 탐방로(구역전체) 설계 지침 작성 및 공공디자인 적용

○ ｢남촌재생플랜｣에서 제시한 ‘남촌탐방로 조성사업(안) 및 남산 옛길 조성사업(안)’을 바탕으로 현황조사 및 보완, 기본 및 실시설계(안)을 작성하여 시행

○ 세부사항으로 보도 및 차도 정비, 안내시설 설치, 가로녹화 등 보행환경 개선(보행편의, 보행안전, 경관개선 등)을 위한 공공시설을 대상으로 함

○ 지역 주민의 의견를 청취하고 검토하여 기본 및 실시설계 진행

○ 보행 문화(특화)거리 운영방안 및 사업추진을 위한 실행지침

① 마스터플랜 수립

② 주민의견 수렴 및 설명회 개최

③ 기본 및 실시설계(사업별/공정별)

④ 기타 본 사업의 과업목적 달성을 위해 “발주기관”이 요구하는 사항

4. 과업의 기간 : 착수일로부터 120일

○ 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질없이 수행해야 하며, 다음의 경우에는 발주기관의 승인을 받아 과업기간을 변경할 수 있다.

- 천재지변으로 과업 수행에 차질이 있을 때

- 발주기관의 계획 변경 등 방침에 따라 본 과업의 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

- 과업 수행과정에서 예기치 못한 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때

- 기타 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

Ⅱ		과업 수립원칙 및 세부내용

1. 수립의 일반원칙

가. 상위계획 반영

○ 본 용역의 모든 사항은 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 근거  하고, 국가도시재생기본방침, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제19조에 따른 도시기본계획, 도시재생활성화계획 및 실행계획 등 관련 법령 및 각 기준들을 따른다.

○ 현재 수립 중인 ｢회현동 일대 지구단위계획｣, ｢회현동 일대 건축자산 진흥구역 지정 및 관리계획 수립 등｣ , ｢남촌 재생 플랜｣ 등 관련 용역과의 정합성을  유지한다

○ 기 수립된 용역(스페이스 마케팅, 보행네트워크 용역 등) 등에 부합하도록 한다. 또한 서울시 디자인 가이드라인 및 설계지침 등에 부합되게 작성하여야 한다.

○ 사업계획은 현행법 안에서 추진이 가능한 내용을 중심으로 작성

나. 주민참여 협의체(거버넌스)

○ 과업수행시 주민협의체, 마을공동체 등 지역주민의 의견을 충분히 수렴하고, 설계(안)에 대하여 도시재생지원센터(공공), 전문가 등과 상호 의견조율을  통한 주민중심의 합리적 설계안을 마련하도록 한다.

다. 기타사항

○ 서울역 일대 도시재생활성화지역 도심관광 네트워크 조성 기본원칙으로 한다.

○ 사업 추진 과정에서 예상되거나 발생되는 각종 장애요인에 적극 대응하고,     중장기적 해결 과제는 개선방안을 함께 제시

2. 조사, 자료수집 및 상위계획 검토

가. 조사, 자료수집 일반사항

1) 계약당사자는 당해 지역내 기존시설, 지형, 토지이용분포, 각종 지장물 등  제반현황과 자료를 수집, 분석하여야 한다.

2) 조사 항목

가) 현지답사

○ 계약상대자는 현지 답사하여 현지여건에 계획시설물이 적합한지 여부를    확인하고 지형, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여야 한다.

나) 관련계획 자료조사

다) 입지 및 대상지 적정성 여부 조사 및 보완

라) 지역 현황 조사 및 보완

○ 도로 및 보행동선체계, 보도 현황, 도로포장상태, 가로시설물, 지장물 등

○ 가로변 건축물 용도, 건축물 입면, 옥외광고물, 토지소유구분 등

○ 가로변 건축물 전면, 측면 공지 등 활용가능 공간

○ 각종 시설물의 유형별 위치, 규모, 형태, 재료, 색채 등 현황파악

마) 교통 및 보행교통량 기존자료 검토 및 조사보완

○ 첨두시 방향별 차량교통량, 보행교통량 조사자료

○ 차선수, 차로폭,(측구여부포함)등, 보도폭, 유효보도폭 등 , 교통안전시설물

조사자료

○ 기수립된 보행 관련 용역자료 검토

○ 필요시 보완 조사

바) 지명유래 및 역사문헌자료, 주변인문환경 검토 및 조사보완

사) 기타 본 과업 수행시 필요한 사항조사

3) 주민의견 수렴

가) 기본설계 및 실시설계 확정전에 주민설명회 등을 통해 주민의견을 수렴하여야

하며 필요한 홍보자료, 도면 등을 발주청의 요구에 따라 작성, 제출한다.

나) 도시재생사업 관련 ‘남촌 재생 플랜’, ‘서울역 일대 활성화 실행계획’ 등 관련

계획 추진을 위한 주민협의체 의견 수렴

나. 자료조사 및 분석

1) 본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연관성 있게 상세히 검토 반영하여야 한다.

2) 도시계획사항 및 토지이용계획

○ 구간내의 도시계획 현황과 토지이용 계획 등 관련계획을 조사․검토하여 일관성

있는 사업계획을 수립하여야 한다.

3) 계약상대자는 기존 도시계획시설 변경이 수반될 경우 도시계획 시설변경 결정고시를 위하여 필요한 자료를 발주청의 지시에 따라 작성하여야 한다.

4) 현지답사

○ 계약상대자는 현지 답사하여 현지여건에 계획시설물이 적합한지 여부를 확

인하고 지형, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여야 한다.

5) 기타조사

○ 사전조사 또는 기본계획 등을 통하여 기 조사된 자료가 있는 경우에는 조사된 내용을 요약하여 기재한다.

○ 기 조사된 자료가 있으나 충분치 못한 경우에는 추가 조사범위, 조사물량 등 필요한 조사내용을 기재한다.

○ 사업부지내의 기존식생을 조사하여 이식이 가능한 수종은 활용조치

- 계획지역의 수목생육 적합판단 및 토량개량 등의 방안을 제시 하기 위해 필요시 토양조사 시행한다.

○ 교통특성 분석 (필요지점의 교통량, 통행속도, 주차차량 등)

- 보행 횡단시설의 추가 설치지점 등

- 대중교통시설간 연계 보행동선 분석

○ 서울역 주변의 지역성(Regionalism)과 맥락성(Contextualism)을 반영하기 위해 문헌조사, 지명유래 등 조사 검토 및 보완

○ 국‧ 내외 유사사례 및 우수사례 조사 검토

- 국내외 보행친화가로 조성 사례를 통한 도입효과, 기법 등 적용검토

다. 상위계획검토

○ 계획구간 내 도시계획 현황, 토지이용계획 등 상위계획과 관련사업계획을 조사하고 주변여건을 충분히 조사 검토하여 일관성 있는 사업계획이 수립되도록 한다.

○ 본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연계성을 검토한다.

- 다음 사항에 대하여 대상여부를 면밀히 검토하고 사업대상에 해당될 경우 관련규정에 의거 협의도서 작성

· 도시계획시설 (변경) 결정 등

· 기타 각종 영향 및 평가 대상

○ 법령, 상위 계획 검토 및 대안제시

○ 관련법령, 기본방침 및 각종 가이드라인(문화거리조성) 등

○ 토지 이용, 교통, 공간구조 및 기반시설 등 도시계획 연계한 보행동선 네트워크 계획 검토 및 보완

○ 주변지역을 포함한 상위 및 관련 정책․계획 현황 연계 실태

- 서울역 7017프로젝트 기본 및 실시설계

- 서울역 일대 도시재생활성화지역 기본계획

- 서울역 일대 도시재생활성화지역 주요가로 정비 계획

- 2030 서울시 공원녹지 기본계획

- 서울시 가로수 및 가로변녹지 조성 및 관리지침

○ 기타 검토가 필요하다고 판단한 사업관련 상위계획

○ 주민, 전문가, 유관기관, 기업 및 각종 단체 등 주민의견 수렴

- 수렴된 주민의견을 설계에 반영

3. 세부과업내용

가. 공통사항

○ 계획의 방향

- 보행자 편의의 도로 구조로 개선되어야 하며 사고예방 및 보행자 편의를 위한 시스템을 제시하여야 한다.

- 지역 활성화를 위한 전략 구상과 이용자의 행태를 고려한 공간조성을 검토하여야 하며, 보행의 편익을 도모하는 가로시설을 확충,「걷고 싶은거리」가 조성되도록 계획하여야 한다.

- 상징적인 가로조성 계획수립 가로별 특성에 맞는 상징적인 가로조성 계획을 수립한다.

- 주민 참여를 적극적으로 유도하는 방안을 모색하여야 한다.

- 디자인거리 계획(보도조성, 상징물설치, 가로공공시설 통폐합 등)을 수립한다.

○ 발굴된 자료 검토 및 보완을 통한 스토리텔링과 탐방로 코스개발

- 보행 네트워크 구성에 활용할 역사, 문화 및 관광자원의 문헌조사를 통하여 관련 전문가 및 연구자에 의한 구체적이고 근거 있는 사진 및 자료 등의 자원 검토 및 수집을 실행하도록 하여 사업에 종합적으로 반영한다.

○ 보행로 및 가로시설물 정비계획

- 보행자의 편의성, 주변 경관, 도로의 기능 등을 감안하여 특색 있는 계획 수립

- 보행자의 안전과 쾌적한 이용을 도모할 수 있는 체계화 된 보행동선 제시

- 지역자산 연계를 위한 탐방로 안내표지판 설계

- 통합적인 가로시설물 설치를 위한 디자인 제시

- 관광, 문화자원 발굴 및 거리별 상징적인 디자인 가로조성

- 골목길 활성화를 위한 가로경관 개선 및 보행공간 조성

- 차량의 주행에 제공되는 불필요한 공간에 대한 적극적인 활용 방안을 제시하여야 한다

- 포장 재료의 고급화 및 다양화로 쾌적한 보행공간이 조성되도록 제시하여야 한다.

- 보행에 지장을 주지 않는 범위내에서 적극적인 편익시설 배치계획을 수립하여야 한다.

- 가로 시설 및 지장물의 통합화

· 가로 환경을 산만하고 복잡하게 하고 있는 각종 시설물(분전함, 공중전화박스, 신호기, 교통안내판 등)을 통합, 정비하는 방안을 제시하여야 한다.

· 통신 및 시설 등의 지중화 방안을 검토하여 해결 방안을 제시하여야 한다.

· 도로 디자인과 어울리는 기존 건축물의 장기적인 정비방안 검토하여야 한다.

○ 장소애착(Topophilia)과 주민참여계획(Btton up-Design) 수립

○ 차도 및 교차로 정비계획

- 접근성 향상 및 보행공간 확보를 위한 교통 대책수립

- 조업차량(상인들 조업차량, 물류배송)을 위한 주·정차 허용구간 설치

- 첨두시에 교통체증 발생 대비 주차제한 차선 등 차도 설계기법 제시

- 필요시, 우회전을 편리하게 해주는 교통섬을 제거하여 보행공간 확보

○ 건축물 및 외부공간 정비계획

- 건축물 입면 및 무질서한 옥외광고물, 입간판 개선방안 제시

- 건축물 전면공간 활용방안 제시

- 가로공간을 건축물 및 외부공간영역, 보행로 및 가로시설물영역, 차도 및 교차로영역으로 구분

○ 녹지계획 및 기타

- 주변여건을 종합적으로 검토하여 소규모 녹지 등 공간 특성화 계획 수립

- 친환경 배수 또는 식재를 통한 우수관리 기법 등 도입 검토

- 쾌적한 보행환경을 위한 녹지확보 및 배치계획

- 보행자를 고려한 가로수 및 식수대 조성

- 식재를 통한 우수관리체계, 띠녹지 등 다양한 설계기법 제시

- 식재설계는 지역의 특수성을 감안하여 민원발생(주변 상가)의 최소화를 위해 수목의 수종 및 규격, 배식 간격을 설정

- 주민의 휴식, 커뮤니티를 위한 소규모 포켓쉼터 공간 조성

- 레인가든을 조성하여 빗물저류 및 Biotop 조성

- 수목 생육환경 조성을 고려한 적정한 규모 이상의 녹지조성 또는 플랜터 조성 계획 수립

나. 탐방로 조성

○ 탐방로 조성 과업의 공간적 범위 설정 및 기본방향 설정

- 회현동의 고유 장소성을 고려한 기본방향 설정

- 관광객 유입을 위한 이벤트 프로그램과 컨설팅 및 도로/ 주차계획

- 이벤트 및 다양한 프로그램 제시

- 탐방프로그램 및 코스 개발 구체화

○ 남산 옛길 및 지역자산과의 연계

- 기존 자산(남촌재생플랜 및 실행계획)과 연계한 걷고싶은 거리 조성

- 매력적인 탐방로 조성을 위한 국내 및 해외사례 조사, 적용검토, 개발

- 기타 안내표지판 등 각종 도구를 통한 매력적인 장소 조성

(일신교회 주차장 입면 개선 및 안내표지판 설치 포함)

○ 역사문화 탐방로 조성을 위한 구상 및 계획 구체화

- 역사문화자원 및 지역특성을 고려한 자산들을 연계 검토

- 지역 역사문화자원의 특성을 반영한 설계 방향 설정

- 주변 토지이용을 고려한 안전하고 쾌적한 가로경관 제시

- 지역이 가지고 있는 장소적 특성을 고려한 구간별 테마 설정 및 진입부 공간 계획

- 구간별 건축물 및 외부공간 영역, 보행로 및 가로시설물 영역, 차도 및 교차로 영역으로 구분여부를 검토하여 정비계획 제시

- 광장, 공원 및 지원시설, 발굴된 자산 등을 거점조성으로 확대

- 역사문화자원의 보행네트워크 연계를 위한 거점 대상지 선정

- 거점 공간의 특화 및 명소화를 위한 기능, 용도 제시

○ 탐방로 운영방안 및 사업추진을 위한 실행계획

- 탐방로 팜플렛, 도면 등 활성화 방안 제시

- 회현동 일대 역사문화자원들을 연계하는 쾌적하고 보행친화적인 탐방로 조성을 위한 프로그램 및 탐방로 구체화

- 역사문화탐방로 구간 별로 역사문화자원들의 가치와 특성이 느껴질 수 있는 테마 설정과 이에 맞는 디자인 계획

- 다양한 계층의 방문객과 지역주민들의 역사문화 탐방로 편리한 이용을 도울 수 있는 안내판, 표지판, 지원시설 등의 안내시설물에 대한 설치 및 배치 계획·설계

- 역사문화탐방로의 지속가능한 활용을 위한 관련계획의 주민의견 반영 방안 마련

- 일신교회, 은행나무광장 등 발굴된 스토리를 연계 하여 조사 분석보완하여 설계

○ 역사문화탐방로 일대 도로 및 보행동선체계, 도로시설물, 토지소유구분 등에 대한 현황 파악

- 차량으로부터 안전하고 쾌적한 보행환경을 위한 역사문화탐방로 조성 기본구상 제시

- 탐방로 각 구간 별로 역사문화자원들의 특성이 반영된 테마 설정 및 구체화 디자인 계획

- 효율적인 역사문화탐방로 이용을 위한 시설물 계획

․ 보도, 가로시설물, 조경 및 소공원 등에 대한 배치 계획

․ 안내시설물: 보행안내판, 바닥형안내표지판, 지원시설 구상 및 조성 계획

- 역사문화탐방로의 조성을 위한 사유지 매입 방안 및 관련법령에 따른 제한 사항 및 필요 절차 제시

4. 기본설계

○ 기본계획(마스터플랜, 제안요청서 계획안) 검토

- 기본계획(제안요청서 계획안 등)의 다음사항이 여건변경이 있는지, 부적합한 사항이 있는지 조사․검토하여 설계에 반영하여야 한다.

․ 기본계획(제안요청서 계획안 등)시 규정한 각종 조건

․ 관련계획의 사항

․ 기본계획 주민의견 청취후 건의사항에 대한 검토

․ 기타 주요한 사항

○ 컨텐츠 기획개발안 제시

- 역사, 문화, 관광자원의 특성화가 가능한 컨텐츠 기획·개발하고 그 방향을 제시한다.

- 컨텐츠 세부 주제 선정 등 기획, 개발 실행계획을 수립하고 컨텐츠 제작·설치 로드맵을 작성하여 스토리텔링 기획개발안 및 결과물을 제시한다.

○ 기본 디자인 구상 계획 수립

- 보도블록, 휀스, 맨홀, 식재, 분전함 등 현황조사를 통한 디자인개발 기본방향 제시

- 거리특성을 고려하여 하나의 이미지로 거리 전체 통합디자인 컨셉 제시

- 개선된 거리를 대표하는 변경 전 ․ 후 모습 제시, 여건분석 및 종합분석을 통한 전체 이미지 부여

○ 탐방로 구간별 테마를 적용한 가로공간 영역별 특화 디자인 가이드라인 및 설계지침 작성

- 건축물 및 외부공간, 보행로 및 가로시설물, 차도 및 교차로 영역

- 역사문화자원 진입부, 소공원, 지원시설 등 가이드라인 작성 및 설계지침 작성

○ 사업비 산출, 연차별 투자계획 및 유지관리계획 제시

○ 시설물 디자인 제시

- 거리 전체 통합디자인에 어울리도록 개별 시설물 디자인 검토 및 제시

- 보행자 편의의 도로 구조로 개선되어야 하며 사고예방 및 보행자 편의를 위한 디자인 검토 및 제시

- 비우고 통합된 시설현황 변경 전․후 모습 제시

․  신호등․표지판 통합지주 디자인

․  맨홀커버, 분전함, 보도포장 등 디자인

- 가로환경의 종합적 야간경관 계획 및 이미지 연출 제시

․  야간경관의 독립적이고, 체계적인 디자인 검토 및 제시

․  야간경관 계획은 색상 중심이 아닌 연출방법, 연출 이미지 중심의 디자인 검토 및 제시

- 공원녹지 등에 설치되는 공공시설물 색채 등 디자인 가이드라인을 참고할 것 : 서울시홈페이지(분야별 정보 / 환경,공원,상수도 / 공원녹지 / 공원 자료실)에서 다운로드

○ 보행길에 대한 프로그래밍을 제시하고 계절별 시간대별 도입 활동계획 수립

5. 실시설계

○ 실시설계 수립

- 디자인 개발 사항의 구체적 실시설계

- 주요 상세도 작성(디자인 시설물, 상징조형물, 가로, 가로수 및 조경 등)

- 추정사업비 산출

○ 시설물 설계

- 정밀성과 함께 융통성 있게 설계한다.

- 인간공학에 바탕을 둔 기능적 스케일로서 설치상황에 적합한 치수를 선택한다.

- 공해, 습기, 광서 등에 견디고 구조적으로 안정되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이 하도록 설계한다.

- 과업지역 내 설치되는 시설물은 전체적으로 통일된 분위기를 연출하도록 한다.

- 구조물 및 부속시설물은 주변과의 조화, 구조적 안전성, 시공성, 경제성 및 미관 등을 고려하여 형식과 연장, 공법을 비교검토하고 향후 운영 및 유지관리에 편리한 구조형식을 제시한다.

- 주요 구조물의 공법 비교검토는 공사중과 운영시 주변시설물과 환경 등에 미치는 영향을 검토하여 민원을 최소화하고 환경오염이 적은 방법을 강구토록 한다.

- 본 계획으로 인한 일시적 사유지 저촉, 진출․입 장애에 따른 민원 대처방안 및 환경피해 최소방안을 검토 제시하여야 하며 지역여건, 주변개발사업, 민원발생 등으로 인한 공사시행 시 애로사항 등을 예측 판단하고 이에 대한 해소 방안을 검토 제시한다.

- 전구간 가로에 대한 입면디자인, 단면설계를 제시하여 가로 통합디자인을 구현한다.

○ 식재설계

- 식재설계 시 각 수종에 적합한 식재밀도와 수목간격을 유지한다.

- 지역적 특성과 지형의 고저차 등에 따라 조화롭게 식재한다.

- 식재설계는 지역의 특수성을 감안, 여건에 맞게 식재 방식을 이용하고 자유롭고 안정된 배식방법을 시도한다.

- 식물생육이 불리한 식재기반은 충분한 토심을 확보하고 생육을 위한 별도의 조치를 강구한다.

- 사람이 휴식하거나 모이는 장소에는 녹음을 제공할 수 있도록 식재한다.

- 수림 조성시 상층, 중층, 하층의 구성이 되도록 군락식재를 한다.

- 식재 설계시 기본설계 수립완료 시점에서 수종 및 규격별 수급계획을 보고한다.

- 회현동 및 명동 일대 등 장소와 주제에 맞는 테마 가로정원을 조성하도록 한다.

○ 도로 및 포장설계

- 각종 도로는 도로의 구조․시설기준에 관한 규정 및 지침에 의거하여 포장의 용도 및 원지반 조건에 적합한 포장설계가 되도록 한다.

- 동선은 종류에 따른 이용자의 빈도, 경제성, 유지관리, 미관 등을 고려하여 설계한다.

- 보도의 마감재는 미관과 내구성을 고려하여 설계한다.

- 보도 및 계단 처리 시에는 장애인을 고려한 시설로 설계한다.

○ 보도포장 설계

- 기본계획에서 제시한 보도포장에 대하여 면밀히 검토하여 각 블록별 패턴에 적합하며, 시공성, 내구성, 경제성 등을  종합적으로 고려하여 우수한 재질을 선택하여야 한다.

- 겨울철이나 우기시 미끄럼 등 이용자의 안전사고 예방을 위하여 ‘서울형 보도포장 미끄럼 저항기준’을 적용한다.

- 인위적인 포장을 최소화하며 포장시에는 투수성을 고려한 재료를 우선적으로 적용하여 생태면적율을 높이는 방안을 검토한다.

- 포장시설은 장애인 및 보행약자 등 모든 사람들이 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 유니버설 디자인 개념을 도입하고, 보행장애요소가 발생하지 않도록 설계하여야 한다.(서울시 무장애 친화공원 가이드라인(2015.서울시)’ 참고)

- 본 사업의 목적에 부함하고 내구성을 겸비한 다양한 친환경 보도포장 재료 및 공법 적용

- 기본구상 수립시 각 구간별 보도포장 패턴을 제시하고 자문회의 또는 주민의견 청취회 등을 통하여 최적안을 확정한다.

○ 기타사항

- 창의성이 있고 실용적이어야 하며, 지역경제 활성화 유도 및 볼거리가 제공될 수 있는 문화시설이 확보된 공간 조성

- 간판의 경우 글씨서체, 색채, 건물외벽 부착방법 및 부착위치에 대한 기본틀(안) 마련

○ 기타 부대시설 설계

- 기본계획 교통자료 검토

· 기본계획의 교통현황조사 및 교통처리계획 등 관련 자료를 충분히 검토, 분석하여 교통안전시설, 교통처리계획 등의 계획수립은 사전에 발주청과 협의하여야 한다.

- 도로표지판

· 도로표지판은 이용자의 편의 및 안전을 고려하여 설계하여야 하며, 가로등이 인접해 있는 구간은 통합표지판을 검토해야 하며, 표지판의 재질은 내구성과 경제성 등을 비교하여 설계하여야 하며 도로표지판 체계 등에 대하여는 사전에 발주청과 협의하여야 한다.

- 교통관리시설(도로표지, 교통신호기, 차선도색 등)은 도로교통법령과 경찰청의 교통안전실무편람 등을 참조하여 설계하여야 한다.

- 차선도색은 도로교통법령, 관련 경찰청과 협의하여 설계한다.

- 도로 시․ 종점부의 돌출구간에 안내 및 충격 완화시설과 장애물 표지 등은 도로 안전시설 설치 및 관리지침의 충격흡수 시설편과 시선유도시설 중 장애물표지의 설치방안 등을 참고하여 실시설계도면을 구체적으로 작성하여야 한다.

- 본선과 측도 접속부 및 유출입부의 차선도색은 교통류의 혼란이 일어나기 쉬우므로 표지병, 안내표지 등 도로안전시설의 설치 및 관리지침을 참고하여 관련시설의 설치를 고려한 세심한 계획을 수립하여야 한다.

- 철거공사 폐기물처리는 적법하게 설계한다..

- 기타 부대시설의 설계는 발주청과 협의하여 설계한다.

○ 기전설비 설계

- 본 용역수행과 관련하여 관련된 사항은 다음의 법령 및 규정에 명시된 사항을 준수하여 설계용역을 수행한다.

· 전기사업법, 동 시행령 및 시행규칙

· 전기공사업법, 동 시행령 및 시행규칙

· 전력기술관리법, 동 시행령 및 시행규칙

· 전기설비 기술기준     (5) 내선규정 및 배전규정

· 한전 전기공급약관, 한전공급규정

· 한국산업규격(KS) - KSA 3701 도로조명기준

· 도로시설물 유지관리 지침 및 규정

· 전기통신기본법, 시행령 및 시행규칙

· 정보통신공사업법, 시행령 및 시행규칙

· 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

· 전파법령 및 시행규칙

· 엔지니어링 산업진흥법, 시행령 및 시행규칙

· 도로교통법

· 경찰청 훈령 및 예규 또는 지시

· 교통신호제어시스템 NEMA 규격집

· 교통신호제어기 규격서(경찰청)

· LED 교통신호등 표준지침(경찰청)

· 전구식 교통신호등 표준규격서(경찰청)

· 시각장애인용 음향신호기 규격서(경찰청)

· 기타관련 법령 및 기준

· 용역기간 중 법령 또는 기준이 바뀌었을 경우 새로운 법령 또는 기준에서 정하는 바에 따르며 법령 또는 규정이 서로 상충되는 부분이 있을 경우 발주처와 협의하여 결정한다.

- 조명설계는 운전자의 피로감과 눈부심이 없도록 설계하여야 한다.

- 가로등의 배관배선은 토공의 경우 지중 배관배선방식으로 하고, 교량구간은 노출배관배선으로 한다. 점멸방식은 무선 원격 조정방식으로 하며, 격등 점멸이 가능하도록 하며 수신기는 1대만 설치한다. 단, 가로등에 대한 배선도, 배치도, 수전반 결선도 및 상세도, 조도계산서, 부하용량계산서 및 전압강하계산서는 별도 제출하여야 한다.

- 수전지점은 한국전력과 협의하여 인입이 쉬운 곳으로 결정하고 경제적이고 효율적인 방법으로 설계하되, 기존 가로등 전원함 위치에서 부하용량 증․감에 따른 수용 신청을 할 수 있도록 한전측과 협의하여 검토 시행한다.

- 가로등 설치는 도로조명기준 KSA3701과 도로기전시설물 유지관리지침 및 규정(기전분야)에 적합한 설계를 하여야 하며, 전기 절약을 위해 국가에서 추진하고 있는 LED조명에 대하여도 검토한다.

- 가로등은 주변 경관 및 건축물 여건 등 미관을 고려하여 설계 검토한다.

- 사고 및 긴급상황 발생시 연락을 위한 비상전화 등 통신수단 설치계획을 검토하여 필요한 경우에는 발주기관과 협의 후 설계하여야 한다. 또한 고가차도 및 교량 내부에도 유지관리를 위한 조명시설을 설치하여야 한다.

- 공사구간에 신설되는 가로등주 및 광원의 종류는 디자인을 통일하여 설치되도록 검토한다.

- 사업계획 지역 내 모든 시설물은 신설, 철거, 이설 대상인지 여부를 조사하여야 한다.

- 철거대상 시설물은 사용가능 물품과 불용물품으로 분류 조사되어야 하며, 사용가능 물품의 경우 재사용 계획 및 처리계획을 수립하여야 한다.

○ 지장물 이설 설계

- 시공장비, 작업공간, 고압선 등 시공장비 사용에 지장을 주는 지장물을 포함하여 지장물중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 맨홀, 상․하수도관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관등) 해당기관과 협의하여 이설비를 산출하고 이를 공사비에 반영하여야 한다.

- 특히 상수도는 관리기관과 협의하여 설계를 시행하고 관리부서 협의결과에 따라 본 공사에 포함하여 설계하여야 한다.

- 이설계획은 지장시설물 관리부서의 확인을 거쳐 이설가능여부 및 이설시기 등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 반영하여야 하고, 지장물 이설공사 순서를 설계에 반영하여야 하며, 이설에 필요한 기간을 공사기간에 포함시켜야 한다.

- 공사시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당기관(관리자)과 협의하여 적절한 보호방안을 수립 공사중에 손상이 없도록 한다.

○ 배수설계

- 일반사항

· 하수배제 방식은 기본설계에서 검토된 자연형 하수처리방식으로 설계하되, 우·오수관의 오접방지를 위한 방안을 검토하여야 한다.

· 상수도시설기준 및 하수도 시설기준에 의하여 설계하되, 포항 상·하수도 시설계획과 연계하여 작성한다.

· 관종 및 관접합은 경제성과 유지관리를 감안하여 발주처와 협의하여 결정한다.

- 관로설계

· 기본설계에서 제시된 설계방법을 세부적으로 검토하여 건설부제정 하수도 시설기준에 의하여 설계하되 발주처와 협의ㆍ결정한다.

· 하수도의 토구는 인접지역의 유수소통 및 하류지역 침수 등을 감안, 발주처와 협의하여 결정하되 하수배출로 인한 피해를 극소화하여 민원이 발생하지 않도록 설계하여야 한다.

· 하수도의 구배는 토사 및 부유물의 침전이 없고 세굴이 일어나지 않도록 하며 역수방향 등을 세밀히 검토하여 설계한다.

· 사업대상지와 연결된 하천(당해구역에 영향을 미칠 경우)에 대하여는 해당하천 정비기본계획 및 공공하수도 정비기본계획 등을 참고하여 관계기관과 사전협의를 거쳐 설계하도록 한다.

· 관매설 깊이는 동결심도 및 기타 매설물을 고려하여 결정한다.

· 주변지역의 배수가 완전히 이루어질 수 있도록 특단의 조치를 강구하여 민원이 발생치 않도록 설계에 만전을 기하여야 한다.

· 우수맨홀 뚜껑은 차도의 경우 대상지 특성에 맞는 방법을 검토하고, 보도 및 녹지에는 보도포장재와 조화되는 재질로 하며, 시설 밀집지역내 오수맨홀의  경우에는 밀폐된 주철제 맨홀을 사용한다.

· 맨홀간격은 하수관로의 기점, 합류점, 경사변환점, 수평방향변환점 및 단면의 변화점에 반드시 설치하여야 하며, 직선구간에서는 30 ～ 50m 이내로 한다.

· 기타 빗물받이, 측구, 연결하수관 등의 설치기준 및 세부구조는 국토교통부제정  “하수도시설기준”에 의한다.

· 우수의 배수체계는 자연형 배수체계로 하여 물의 이동을 최대한 존중하도록 하며 재활용이 가능하도록 설계한다.

○ 재료선정

- 공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업규격(K.S), 각종 표준시방서 규정에 적합한 것으로 경제성, 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영하며, 이를 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는 발주청의 승인을 받되, 설계서에 KS, 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하도록 공사시방서 및 설계도면에 명시하여야 한다.

Ⅲ		과업 수행의 일반지침

1. 일반사항 및 용어의 해석

가. 일반사항

○ 본 과업에서 "발주기관"은 서울특별시를 말하며, "계약상대자"는 본 용역 계약을 체결한 수급인(용역업체)을 말한다.

○ 본 과업내용서는 ‘남촌 탐방로조성 기본 및 실시설계 용역’ 수립에 대한 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 계약상대자는 과업내용서와 관계 법령 및 규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행해야 한다.

○ 참여인원은 발주기관의 승인없이 임의로 교체할 수 없으며, 발주기관은 과업수행 중 계약상대자의 현장대리인 또는 기술자가 과업수행에 부적당하다고 인정될 때에는 계약상대자에게 현장대리인 및 기술자의 교체를 요구할 수 있고 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 지체없이 교체해야 한다. 이 경우 교체되는 기술자는 기존의 기술자와 동등 이상의 자격 및 경력을 갖춘 자이어야 한다. 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입 지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다.

○ 참여 기술자는 각 분야 기술자가 함께 참여토록 하고, 각종 자료의 수집 및 자료구축 작업 등에 대하여는 관련분야 전문가의 지원을 받아 과업을 수행할 수 있다.

○ 필요한 경우 국내․외의 전문기술 및 지식의 활용과 정보교환자료 등 최신기술을 이용할 수 있으며, 발주기관과 협의 또는 발주기관의 필요에 의하여 관계전문가로부터 자문을 받아 과업을 수행할 수 있다.

○ 계약상대자는 발주기관이 지정한 감독관의 지휘감독을 받아 과업을 수행해 한다.

○ 과업지시서에 명기되지 않은 사항 및 관련법규 등의 개정으로 인한 소요업무 등은 반드시 발주기관과 협의하여 처리해야 한다.

○ 계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의를 하여 과업을 수행해야 한다.

- 과업수행 계획서 및 착수신고서의 내용 변경

- 관계기관과의 협의사항

- 기타 용역감독자의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

○ 과업지시서의 내용에 이견이 있을 때에는 양질의 용역성과 도출이 가능한 방향에서 상호 협의하여 결정하며, 조정이 어려울 경우에는 관계전문가 등의 자문을 통하여 조정할 수 있다.

○ 과업수행시 관련자료의 수집 및 행정적인 지원이 필요한 경우 발주기관은 관련자료 등을 계약상대자에게 제공할 수 있으며 제공된 자료에 대해 계약상대자는 그 내용의 오류, 정확성을 반드시 확인한 후 사용해야 한다.

○ 과업에 이용된 통계자료는 통계청, 국토교통부, 서울시, 중구, 정부기관 및 한국은행 통계 등 공공기관의 자료를 활용하며, 인용한 통계자료는 반드시 그 출처를 명시해야 한다.

○ 용역 수행 처리절차는 과업내용서에 따르고, 과업내용서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 협의․처리하여 내실있는 설계가 되도록 해야 한다.

○ 계약상대자는 발주기관이 정당하게 요구하는 자료에 대하여 기일 및 시간을 엄수하여 작성 및 제출해야 한다.

나. 용어의 해석

○ 사용언어 및 문자의 해석에 있어 발주기관과 계약상대자간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 해야 하고, 그 뜻이 분명치 못한 용어는 알기 쉽고 정확하게 정의한 후 사용하며, 과업내용서상의 용어 해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정해야 한다.

○ 성과품 작성에 사용하는 용어

- 계약조건에서 정의, 사용한 용어

- KS 등 표준규격에서 정의, 사용한 용어

- 기술용어사전에서 정의, 사용한 용어

- 정부제정 제기준 용어

- 기타 국어사전에서 정의, 사용한 용어

○ 성과품 작성에 사용하는 맞춤법

- 한글 맞춤법 (교육부)

- 외래어 맞춤법 (교육부)

- 기본외래어 용어집

○ 성과품 작성에 사용하는 문장 구성

- 과업내용서에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가 빠진 문구의 사용은 지양

- 형용사, 부사는 문장의 연결이 확실히 되도록 사용

- 누구나 쉽게 이해될 수 있도록 평이한 문장사용

- 의사전달이 명확하도록 간결하고 서술적, 명령적 구술체 사용

○ 사용언어 및 문자

- 과업 수행상 사용언어는 한글로 작성하며, 업무상 필요한 통역, 번역에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

- 사용단위는 “계량 및 측정에 관한 법률”에서 규정한 단위를 사용한다.

2. 책임과 보고 의무 및 보안

가. 계약상대자의 책임과 업무

○ (계약상대자의 책임범위) 감독관의 승인을 받은 도서라 할지라도 계약상대자의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대해 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

○ (손실보상) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우, 이에 대한 손실보상 등을 책임져야 한다.

○ (이의방법) 계약상대자가 발주기관에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 서면으로 해야만 효력이 발생한다.

○ (문서의 기록비치) 계약상대자는 과업의 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요사항을 문서로 작성․비치해야 하며, 발주기관의 제출 요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

○ (안전관리의 의무) 계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임져야 한다.

○ (법률준수의 의무) 계약상대자는 과업을 수행함에 있어 관계법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 사항에 대하여 책임져야 한다.

나. 착수신고서 및 기타 제출 서류

○ 계약상대자는 계약체결 후 7일 이내 계약문서에서 정하는 바에 의하여 과업에 착수해야 하며, 착수 전에 관계법령에서 정한 서류 및 다음 각 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출해야 한다.

- 책임기술자 선임계(이력서 첨부), 기술용역 예정공정표, 과업수행 조직표

- 분야별 참여기술자 및 인력(장비)투입 계획서

- 용역 수행에 필요한 서류

․  내국 기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서

․  외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류

- 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

○ 과업수행계획서는 착수일로부터 10일 이내에 과업의 특성 및 여건 등을 감안한 과업수행계획서를 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 포함될 내용을 다음과 같다.

- 세부공정계획서

- 과업 수행계획서

- 과업의 단계별 성과품 제출계획서

- 과업수행조직 및 인력(장비) 투입계획서

- 참여기술자 인적사항, 참여하고 있는 과업내용 및 예상기간

- 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

다. 과업수행보고

○ 착수 보고

- 계약상대자는 현장여건 및 용역수행의 여건을 감안하여 용역착수 후 15일 이내에 착수보고를 해야 하며, 착수보고는 책임기술자가 직접 보고하되, 과업의 내용별 및 일정별에 따라 세부 과업수행계획서를 작성·보고하여야 한다.

○ 공정 보고 – 발주기관 요구시 대면보고

- 계약상대자는 주간․월간 공정보고를 서면 제출해야 하며 내용은 다음과 같다.

- 현재 과업수행 내용과 다음번 과업수행 계획

- 공정 보고서 (예정공정표와 비교)

- 과업 수행상 주요 문제점 및 대책

- 기타

- 작업일지 양식은 “건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정”에 따른다.

- 참여기술자 투입일수 기록(Time Sheets) 제출

: 계약상대자는 참여기술자의 투입일수에 대한 개인별기록을 월간 단위로 작성

참여기술자별 투입기록(  월)

성      명 :       인

책임기술자 :       인

월/일	투입시간	휴일(야간) 근무시간	수행업무	비 고
1
..
30

○ 계약상대자는 아래의 제출일까지 공정보고서 작성ㆍ제출해야 한다.

- 월간 공정보고 : 익월 5일까지 (기준일 : 매월 말일)

- 주간 공정보고 : 격주 화요일 (기준일 : 매주 금요일)

○ 월말 공정보고서에는 기간 중 수행한 과업내용 및 다음 달의 예정 과업내용을 상세히 기술하고 당초 예정공정보다 현저한 지연이 발생할 경우 보완대책 등을 수립하여 발주기관에게 즉시 보고해야 한다.

○ 중간보고(수시보고)

- 다음의 경우에는 관련 자료를 제출하고 책임기술자가 설명해야 한다.

- 주요계획(안) 작성 완료시

- 발주기관 및 관련기관 등 관련 자료의 보고 등 요구사항이 있을 경우

- 발주기관이 용역수행 중 필요하다고 요구할 경우

- 과업수행과 관련하여 토론회, 공청회, 유관기관과의 회의 및 보고회 등이 필요한 때에는 발주기관과 협의하여 시행하며, 필요한 보고자료 및 도면 등의 관련 자료를 발주기관에게 사전 제출해야 한다.

○ 최종 보고

- 계약상대자는 과업이 완료된 때에 최종보고서(안)를 준공예정일 30일전에 발주기관에게 제출하여야 하며, 용역준공 전 종합보고를 하여 최종 승인을 받아야 한다.

○ 용역 감독 및 점검

- 발주기관은 본 과업을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약 관련 업무 내용을 확인ㆍ감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조해야 한다.

- 기술인력 동원 현황, 업무수행 상태, 기타 확인이 필요한 사항

- 발주기관은 용역의 품질 확보를 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 지적사항을 즉시 시정해야 한다.

라. 심의 및 자문회의

○ 자문회의 자료 제출

- 계약상대자는 아래 진행단계 등 최종 성과품 납품전 심의회의를 개최하여 분야별 전문가의 심의를 받아야 하고, 이에 필요한 자료를 ‘계약상대자“의 부담으로 제출하여야 한다.

(1) 기본계획 수립 단계

(2) 발주청의 심의회 개최 계획에 의한 요구시

(3) 설계 진척도 80% 단계(마무리단계)

○ 지적사항의 조치

- 자문회의 지적사항에 대하여는 면밀히 분석․검토하여 발주청에 조치계획을 보고 및 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

○ 신기술, 특정 공법 및 특정업체 제품 등의 적용

- 계약상대자는 신기술, 특정 공법 및 특정업체 제품 등을 설계에 반영코자 할 경우에는 그 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 종합적으로 검토, 자문회의 시 공개하여 적정한 것으로 판단된 경우에 한하여 설계에 반영토록 한다.

○ 디자인심의(자문), 설계자문, 워크숍 및 건설기술심의 등

- 경관자문대상 시설물에 대해서는 설계과정 및 자문회의 등에 디자인 전문가를 참여시켜 당해 시설물의 디자인 수준을 향상시키고 도시미관을 제고하여야 하며, 기본설계 완료 전 우리시 경관자문을 받아야 하고, 디자인 심의 완료후 기본 설계안이 변경될 경우 추가로 디자인심의를 받아야 한다.

○ 경관심의 및 자문 자료의 제출

- 본 과업수행 기간 중 “발주기관”은 설계자문위원회를 구성하며 “계약상대자”는 다음과 같은 경우를 포함하여 3회 이상 설계사항에 대한 자문을 받아야 한다.(이에 필요한 자료는 “계약상대자”의 부담으로 제출하여야 한다.)

(1) 착수단계           (2) 중간단계      (3) 마무리단계

(4) 설계내용의 주요사항이 변경될 경우 또는 설계방향 결정을 위하여 자문을 받을 필요가 있는 경우 등 “발주기관”이 필요하다고 인정하는 경우

마. 보안 및 비밀 유지

○ 과업 내용은 타 목적에 사용할 수 없으며, 승인 없이 외부에 발표하거나 활용하여서는 아니 되며, 계약상대자는 과업수행 중 보안유지를 위해 다음사항을 준수해야 한다.

- 과업수행에 따른 보안 대책을 수립하여 착수계 제출 시 계약상대자 대표의 보안각서(서식 1)와 함께 제출해야 한다.

- 과업수행 참여자 전원은 보안의 책임이 있으며, 보안의무에 대하여 보안각서(서식 2)를 제출해야 한다.

- 보안 책임자를 지정하고 자료 보관함 비치 및 통제를 엄격히 해야 한다.

- 모든 자료․계획 내용․성과품 및 보안이 필요하다고 지시한 문서나 도서 등은 감독관의 허락 없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출 또는 반출되어서는 아니 된다.

- 과업 중 폐기물은 파쇄 처리해야 하며, 기타 보안상 하자가 없도록 해야 한다.

- 참여기술자가 교체될 경우에는 인수인계를 철저히 하고, 참여기술자의 변경사항은 발주기관의 확인을 받아야 한다.

3. 하도급 사항 및 설계변경 등

가. 하도급 사항

○ 계약상대자는 발주기관으로부터 도급받은 용역에 관하여 하도급계약을 체결한 경우에는 계약을 체결한 날로부터 15일 이내에 다음 사항을 발주기관에 통지하고 관리 받아야 한다.

- 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

- 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

- 하도급 기간 및 하도급 금액 등

○ 용역감독자는 다음에 해당하는 사항이 발생했을 경우에는 즉시 발주기관의 장에게 보고해야 한다.

- 하도급 통지 또는 하도급에 관한 승인사항을 위반하거나 일괄 하도급을 하는 경우

- 하도급대금 지불과 관련하여 분쟁 또는 민원이 발생하는 경우

○ 계약상대자는 하도급인을 선정할 때 다음 사항을 고려하여 선정해야 한다.

- 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

- 관련법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자 (하도급거래 공정화에 관한 법률 제2조 제9항)

○ 계약상대자는 하도급 부분에 대하여 발주기관으로부터 기성금 및 준공금을 지급받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급해야 한다. (하도급거래 공정화에 관한 법률 제6조 및 제13조 제3항)

○ 하도급으로 시행한 당해 용역의 성과는 전적으로 계약상대자의 책임으로 한다.

○ 건설기술용역의 하도급 계약과 관련하여 관계법령이나 계약서 등에 특별히 정한 경우를 제외하고는 “건설기술용역 하도급 관리지침”에 따른다.

○ 계약상대자는 건설기술진흥법 시행규칙 제31조에 따라 하도급 승인을 받기 위해서는 동법 시행규칙 별지 제32호서식의 하도급 계약승인신청서를 발주기관에 제출하여야 한다.

○ 발주기관은 건설기술용역 하도급 관리지침에 따라 하도급 계약의 적정성 여부를 검토하여 7일 이내에 그 승인 여부를 계약상대자에게 알려야 한다. 다만, 하도급 적정성 판단에 상당한 시일이 요구되는 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 1회에 한해 통지기간을 연장할 수 있으며, 통지기간을 연장한 경우에는 그 사유와 7일 이내의 통지예정 기한을 정하여 지체없이 계약상대자에게 알려야 한다.

나. 계약상대자의 시정요청

○ 계약상대자는 다음에 해당하는 사항은 발주기관의 장에게 서면으로 시정을 요구할 수 있다.

- 용역 감독자가 과업 범위 이외의 부당한 업무를 지시할 때

- 용역 감독자가 정당한 사유없이 기술자의 교체를 요구할 때

- 용역 감독자가 정당한 사유없이 용역 업무를 지연시킬 때

다. 용역중지 및 부분준공

○ 계약상대자의 귀책사유가 아닌 인․허가 지연, 민원 발생, 관계기관 협의지연 및 각종 심의 신청기간 소요, 예산 미편성 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 불가하다고 판단될 경우 감독관은 용역 중지를 명할 수 있다.

○ 본 과업 추진과 관련하여 사업시행과 관련된 승인등을 득하지 못하거나 발주기관의 추진 계획 및 정책 변경 등에 따라 과업의 계속 수행이 불가능하거나 불필요할 경우에는 발주기관과 협의를 거쳐 부분 준공할 수 있으며, 부분 준공시의 정산기준은 지방계약 관련법령에 따른다.

○ 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 경우는 과업의 일부 또는 전부를 타절하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

라. 계약내용(설계) 변경

○ 용역수행 중 계약내용 변경사항이 발생하였을 경우에는 지방자치단체 용역계약 일반조건에 따른다.

○ 계약상대자는 용역수행 중에 주요 과업내용에 대한 변경 없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성 여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 발주기관의 지시를 받아 우선 과업 변경해야 한다. 다만, 주요 과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경해야 하며, 과업내용변경에 필요한 내역서 등 관련자료를 발주기관에 제출해야 한다.

○ 발주기관은 다음과 같은 경우에 설계 변경을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

- 상위 계획 또는 발주기관의 계획 변경으로 인하여 과업 범위 및 내용이 변경된 때

- 지자체 또는 관계 기관과의 협의내용 반영을 위한 과업 내용 변경 시

- 계약상대자의 귀책사유가 아닌 용역의 중지 등에 따른 과업 기간의 연장

- 사업추진 계획 변경에 따른 사업규모 등이 변경될 경우

- 발주기관이 필요에 의하여 계약상대자와 협의된 경우

○ 발주기관은 다음과 같은 경우에 용역기간 조정을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다.

- 상위 계획의 변경 등으로 과업기간 내 과업 준공이 어렵다고 판단될 때

- 계약상대자의 귀책사유가 아닌 인․허가 등에 따른 관계기관의 협의 지연, 각종 위원회의 심의 지연 등으로 인하여 과업기간 내 추진이 불가능하다고 판단될 때

- 천재지변으로 과업 수행이 불가능 할 경우

- 기타 발주기관이 필요에 의하여 계약상대자와 협의된 경우

마.  기타 사항

○ 본 과업을 수행함에 있어 다수의 공동계약에 의거 과업을 수행할 때는 계약자 상호간에 과업분할 협의서를 작성 수행하여야 한다.

○ 설계 주변경관 파괴, 토양오염, 소음, 진동 및 분진의 발생을 최소화 할 수 있는 공법과 기술을 고려한 환경 친화적인 설계기법을 도입하여 설계에 반영하여야 한다.

○ 설계도서는 “도로의 구조․시설 기준에 관한 규칙” 및 법규, 지침, 각종 시방서 및 설계기준 등을 적용하여 작성하되, 실시설계시 적용이 용이하도록 하여야 한다

○ 본 과업내용에 명시되지 아니한 사항(기본설계 자문회의 결과 미 반영된 사항, 주민요구 사항, 기타) 등에 대해서도 발주청의 지시가 있을 때는 성실히 수행하여야 한다.

4. 기타 특이사항

○ 과업 내용서 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 양질의 연구성과 도출이 가능한 방향에서 협의에 의하여 결정하되, 협의불가시에는 지방자치단체 용역계약 일반조건에 따른다.

○ 주민중심의 협력체계 강화를 위하여 계약상대자는 전문가(건축, 디자인, 문화예술 등) 및 지역주민 등과 적극적인 의견을 조율하여 계획에 반영될 수 있도록 해야 한다.

○ 계약상대자는 발주기관에서 선정한 운영위원회 및 협력 연구기관, 참여기술자 등의 원활한 업무 추진을 위하여 협업체계를 구축하고, 도시재생지원센터의 업무에 협조해야 한다.

	<서울역 일대 도시재생활성화지역 도시재생지원센터>
○ 위 치 : 중구 만리동1가 51-1 SKY 1004 빌딩 9층 901호 ○ 역 할 - 도시재생의 현장 컨트롤타워 (주민접점 역할수행) - 도시재생활성화계획 수립과 관련 사업의 추진 지원 - 도시재생활성화지역 주민의 의견조정을 위하여 필요한 사항 - 현장 전문가 육성을 위한 교육 프로그램의 운영 - 마을기업의 창업 및 운영지원 등 도시재생사업의 현장 컨트롤타워 기능 수행 ○ 주요기능 - 민․관․전문가가 참여하는 장소중심의 공유․협업체계 거버넌스 구축 - 주민협의체 구성․협업, 서울시 중간지원조직 협업 - 서울역 일대 도시재생사업 관련 지역별 주민과의 소통 및 교감, 민원처리 - 활성화 방향 및 지역 발전구상에 대한 주민 설득 및 의견 수렴 - 지역별 계획을 수립하고 도시재생활성화계획 반영 사업 발굴 및 협조

○ 참여기술자는 도시계획, 교통, 건축, 경제산업, 문화․경제, 복지․아동, 사회 등 각 분야 전문가 등이 필요시 함께 참여토록 하고, 특히 거버넌스 구성·운영과 학술적 연구가 필요한 과업은 지역에 대한 이해도가 높은 연구기관 등의 관계 전문가가 참여토록 하여 발주기관의 승인을 득한 후 과업을 수행해야 하며 이 경우 과업수행에 따른 용역비 등은 계약상대자의 부담으로 수행해야 한다.

○ 과업수행과 관련하여 간담회, 설명회, 토론회의, 워크숍, 공청회의, 관계 기관과의 회의 및 보고회 등이 필요한 때에는 발주기관과 협의하여 시행하며, 필요한 보고자료 및 도면 등의 관련 자료를 발주기관에게 사전 제출해야 한다.

○ 추가과업이 필요한 경우에는 발주기관 요구에 따라 계약상대자는 특별한 사유가 없는 경우 이를 수용해야 한다.

○ 각종 보고서의 내용은 중간평가·보고회 등 검토 가능한 수준이어야 하며, 필요한 자료는 파워포인트 또는 한글문서로 작성하여 제출해야 한다.

○ 계획 수립의 전반적인 사항, 도시재생사업에 대한 설명과 이에 대한 공감대를 형성할 수 있도록 설명회 및 공청회를 개최해야 한다.

○ 직접경비(성과품 작성, 성과보고서, 주민간담회, 설명회, 공청회 등)는 실비정산하여야 하며, 직접경비로 인정받기 위해서는 이를 증빙할 개최회수, 실제비용 등의 자료를 제출해야 한다.

Ⅳ		보고서 및 성과품 제출

1. 일반사항

○ 모든 성과품 인쇄는 발주자와 사전협의 후 실시해야 하며, 발주자의 요구에 따라 작성하여 제출한다.

○ 보고서 작성과정에서 수급인은 항상 발주처와 긴밀한 협의를 하여야 하며, 본 과업수행 중 감사로 인한 처분결정 등이 있을 시에는 이에 따라야 한다.

○ 성과품의 품질관리 및 실명제를 위해 최종 용역보고서 및 설계도면 등에 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관의 담당자(설계 등 용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기재해야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인 후 날인하도록 해야 한다.

○ 과업이 완료된 때에는 용역 성과품을 준공예정일 15일전에 발주기관에게 제출하여 사전검토(사전검토에 소요된 기간도 본 과업기간에 포함)받아야 하며, 성과품 납품과 동시에 준공계를 제출해야 한다.

○ 모든 제출물에 대하여 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 지체 없이 재작성하여 제출해야 한다.

2. 보고서․  성과품 작성 및 제출

가. 보고서 작성

○ 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 표기하는 것을 원칙으로 하며, 미터법을 사용해야 한다.

○ 발주기관의 특별한 요구가 있는 경우를 제외하고는 A4 양식으로 작성해야 하며, 도면은 A3 양식으로 작성을 원칙으로 한다.

○ 내용 및 편집의 구성은 개조식으로 작성하여 간결하고 명확하게 표현해야 한다.

○ 기초조사, 분석, 정리내용, 관련계획과 정책의 분석내용, 기본구상과 방향, 계획 작성내용과 배경, 각 단계별 작업과정, 중간평가·보고 과정 및 내용, 정책․제도와 관련한 건의 및 개선방안 등 모든 내용을 보고서에 포함한다.

○ 도면 자료의 제출형식은 우리시 도시계획정보관리시스템과 연계 활용하는데 문제가 없도록 발주기관과 협의하고, 모든 성과품 일체는 감독관의 검사를 받아 제출해야 한다.

○ 시각화 자료(조감도 등) 등의 제작은 반드시 발주기관과 협의해야 하며, 발주기관의 요구사항이 있을시 이를 협의하여 처리한다.

○ 기타 세부사항 및 성과품 작성 등과 관련된 사항은 용역과정 중에 상호 협의해야 한다.

나. 성과품

○ 목 록

성 과 품 종 류		수 량	비 고
종합보고서		20부
요 약 보 고 서		20부
공사시방서(토목, 건축, 기계, 전기계장 등)		20부	필요시
설계도서		20부	토목, 조경, 건축, 전기, 통신
수량산출서		20부	토목, 건축, 기계 전기계장
설계예산서		20부
유지관리지침서		20부
설 계 도 면	설 계 원 도	20식	(CAD FILE)
	축소판 원도	20식
	축 소 도 면	20부
조감도(전체및구간구분)		20식
지장물 조사 등 현황사진 앨범 및 필름		20식
기타 발주청 요구 자료		20식

※ 제출수량은 추후 과업성과품 배부계획에 따라 조정될 수 있음

○ 성과품은 심의용 및 최종성과품으로 구분한다.

○ 계약상대자는 과업완료전이라도 공사발주에 필요한 관계도서에 대한 납품요구가 있을 시는 우선 납품하여야 한다.

○ 성과품 작성기준

- 계약상대자는 성과품 작성시 “건설공사의 설계도서 작성기준(국토교통부)”의 작성기준에 따라 작성하여 발주기관의 검토후 제출하여야 한다.

○ 성과품의 인쇄

- 모든 성과품 인쇄는 발주기관과 협의후 인쇄하여야 하며 발주기관의 요구에 따라 작성 제출하여야 한다.

다. 용역 결과물의 저작권 등

○ 본 용역의 성과품에 대한 저작재산권 일체와 2차적 저작물 또는 편집저작물의 작성권은 서울특별시가 소유하며, 서울특별시는 정책상 필요시 용역결과물의 내용을 일부 보완 또는 수정할 수 있다.

○ 사진·이미지 등에 대한 저작권 관련 문제가 제기되지 않도록 유의해야 하며, 저작권 관련 문제의 민․형사상 책임은 계약상대자에 있다.

○ 성과품 발간시 계약상대자는 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 감독관과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 발주기관과 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간한다.

Ⅴ		예정공정표

구 분	과업기간(착수일로부터 4개월)
	1				1.5				2				2.5				3		4
1. 기초 자료조사 및 계획검토
ㆍ현황조사(측량,교통,지장물 등)
ㆍ관련계획 검토
ㆍ착수보고회
ㆍ기본 구상안
2. 기본설계
ㆍ중간보고회
ㆍ자문회의
ㆍ각종 심의회
ㆍ설명회(워크숍)
3. 실시설계
ㆍ중간 및 최종 보고회
4. 성과품 작성 등

※ 범례  전체사업 예정공정

시범사업 예정공정

Ⅵ		사업대상지

※ 탐방로 조성 대상구간은 밝은 구간이며, 붉은색 점선 경계는 서울역활성화구역지역경계임

※ 붉은색 실선은 보행로 조성사업 구간임

※ 과업추진과정에서 탐방로 조성 사업 구간은 변경 될 수 있음