과 업 내 용 서

【 강변북로 교통시설안전진단 용역 】

2018. 10.

서 울 특 별 시

Ⅰ		과 업 개 요

1. 과업 명칭 : 강변북로 교통시설안전진단 용역

2. 배경 및 목적

○ 본 과업은 서울시 자동차전용도로 이용자 측면에서 실제 발생한 교통사고 관련 자료, 교통사고 원인조사결과 등을 토대로 도로 구조·시설 등 도로의 기능과 관련 모든 안전상의 결함을 분석하고

○ 교통사고의 사전예방 및 사고의 심각도를 저감시켜 안전하고 쾌적한 도로환경 조성에 필요한 개선방안 등 자료를 제공하고 교통시설안전진단 하는데 그 목적이 있다.

3. 과업 기간

○ 본 과업의 기간은 착수일로부터 7개월로 한다

4. 과업 범위

○ 공간적 범위 : 강변북로

노선명	구간	연장(km)	차로수	비고
강변북로	아차산대교~난지도시계	29.43	4~8

○ 과업 대상

① 자동차전용도로 본선구간

② 교  량

③ IC, JCT

④ 접근도로 접속부

Ⅱ		과 업 내 용

1. 대상구간 도로교통 안전시설 보완 필요사항 도출

○ 대상구간 현황 분석

- 기하구조, 교통량, 교통사고 등

- 교통운영 및 서비스수준 분석

- 교통표지 및 안내체계 조사

- 설문조사(노선버스 운전자, 일반운전자)

- 면담조사(담당업무 직원, 안전순찰팀, 고속도로 순찰대)

○ 대상구간 현장조사 및 분석

- 상세점검표 및 측정장비를 이용한 현장조사

(노면미끄럼저항측정기, 반사성능(표지판 등), 경사측정기 등)

- 야간·악천후(강풍, 안개 등) 노선 조사

- 주행속도, 시거, 곡선반경, 편경사 등 기하구조 조사 및 검토

- 진․출입부 상충조사

- 도로 선형 안전성 평가

- 비정규시설(표지, 안전시설 등) 설치현황 조사

- 교통안전상 문제점 분석

- 인간공학적 측면에서의 원인분석

○ 개선(보완) 방안 제시

- 진출부 위치에 따른 엇갈림 보완을 위한 안내체계 개선방안 제시

- Positive guidance 등 선진기법을 활용한 개선방안 제시

- 노선별, 위치별 개선방안

- 비정규 시설 개선 운영방안

- 단기&장기 개선안 구분 제시

○ 집중관리구간 선정

- 교통사고 다발지점 (차대차, 차량단독)

- 보행자사고 다발지점 (보행자 무단횡단사고 등 발생지점)

○ 장기 검토과제

- 서울시 자동차전용도로 도로특성을 감안한 구간단속 방안

- LCS를 이용한 교통사고 감축을 위한 차로별 교통운영 방안

○ 주요 성과물

- 위치별 지적사항 및 보완(개선)방안 집계표 및 도면

- 개선타당성 (선정사유 및 개선 필요성)

- 대상구간 조사 및 분석자료 (교통사고 특성 및 내역)

- 개선방안 (추정공사비 포함)

- 기타 개선방안 수립 및 시행을 위해 필요한 사항

2. 교통사고 감소를 위한 안전시설 설치 표준모델 연구

○ 해외문헌 조사 : 해외의 교통사고 다발구간 및 IC/JC 유출입부 안전시설 설치현황 등 문헌조사

○ 표준모델 제시

- 교통사고 다발구간 사고유형별(졸음, 주시태만, 연결로 급커브 등) 안전시설 설치 표준모델 제시

- 운전자 경로인지 및 속도감속 유도를 위한 고속도로 IC/JC 유출입부 안전시설(노면표시, 표지판 등) 개선방안

3. 특별제안

○ 고속도로 전반에 대한 교통안전 권고사항 및 개선 필요사항

Ⅲ		과업 일반지침

1. 과업수행기준

○ 과업수행은 수급인이 아래 절차를 기준으로 작성하여 서울시의 승인을  받은 과업수행계획서에 의한다.

가. 착수보고 : 계약일로부터 15일 이내

○ 과업수행 방향 및 방법

○ 분야별 참여인력 및 조직 편성표

○ 과업 세부수행 계획표

○ 기타 과업수행에 필요한 사항

나. 중간보고 : 계약일로부터 4개월 이내, 1회 이상

○ 용역의 기본적 성과계획, 목표, 그동안 수행내용 등 보고

○ 제시된 의견과 지적사항은 검토 반영

다. 최종보고 : 과업만료 15일전

○ 용역 결과를 종합하여 결과보고

2. 과업수행 일반지침

1) 본 과업은 체약체결 즉시 착수하여야 하며 착수 전 본 과업 내용서에  근거한 세부과업수행 계획서를 작성·제출하며 우리시의 승인을 받아야 한다.

2) 과업수행 계획서에는 현장 대리인계, 과업 참여자의 분야별 명단, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 첨부·제출하고 과업착수 시에는 착공계를 제출하여야 한다.

3) 과업참여자의 변경 시에는 우리시와 협의하여 정하도록 한다.

4) 과업의 원활한 수행을 위하여 과업단계별·분야별 전문가로 구성된 자문위원회 또는 관련기관 협의회를 구성·운영할 수 있으며 과업내용과 관련된 각계 전문가의 의견을 광범위하게 수렴하여야 한다.

5) 과업수행계획서에 따라 실시하는 중간보고 및 최종보고회는 사업책임자가 직접 보고하고, 기본계획 범위결정, 부분별 계획 등 과업수행 단계별 기본방향과 진단내용에 대하여 발주자, 분야별 전문가, 과업수행자가 참여하는 회의를 개최하여 수정, 보완, 의견제시 등으로 과업의 질을 높이고 원활한 과업수행을 도모하며, 세부 추진일정 및 현지조사계획 등에 대하여 업무담당자와 사전에 긴밀히 협의한 후 수정하여야 한다.

6) 본 과업 내용서에 규정되지 아니한 사항은 관계 법규 및 지침, 관련 시방서에 의거 업무담당자와 협의하여 수행하거나 결정한다.

7) 과업수행 중 여건변동으로 과업범위 또는 내용의 변경, 기간연장 등 변경이 있을 때에는 우리시와 협의를 통해 설계변경할 수 있다.

8) 본 과업완료 후에도 경미한 추가작업은 추가작업의 원인자 부담으로  수행한다.

9) 우리시는 본 과업 수행에 부적격하다고 판단되는 과업참여자에 대하여 현장대리인에게 교체를 요구할 수 있으며 현장대리인은 요구 받은 즉시 과업참여자를 교체하여야 한다.

10) 최종보고서는 인쇄 전 그 내용에 대하여 우리시와 협의하여야 한다.

11) 각종 보고서의 내용은 중간평가·보고회 등 검토 가능한 수준이어야 하며, 수급인이 파워포인트를 제작하여 필요한 자료를 작성·제출하여야 한다.

12) 본 과업내용서 해석에 의견차가 있을 때에는 쌍방 협의에 따른다.

3. 보안대책

1) 본 과업은 향후 서울시 교통안전정책 추진에 활용될 예정으로, 결정과정에 있는 사항의 보안 관리를 철저히 하여야 한다.

2) 수급인은 보안대책을 수립하여 과업수행 대표자와 종사자 및 관련된  각 개인별 보안각서와 함께 제출하여야 한다.

3) 모든 성과품 및 과업 수행과정 자료는 수급인이 소유할 수 없으며  본 과업 수행을 위해 필요한 용도 이외의 목적으로 업무담당자의 허가없이 복사 또는 유출하거나 사용할 수 없다.

4) 과업폐기물은 소각 또는 세단기 처리를 하여야 하며 그 처리내용  (일시, 장소, 방법, 처리자) 및 목록을 제출하여야 한다.

5) 과업수행 장소는 필요시 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제  하여야 한다.

6) 용역수행 시 작성한 자료와 성과품에 대하여는 업무 담당자와 협의  하여 내용의 중요도에 따라 대외비 및 일반자료로 분류하여 보관하고, 정·부 책임자를 지정·보고 하여야 한다.

7) 용역수행 시 대외비 이상의 자료는 반드시 업무와 직접 관계가 있는자에  한하여 열람할 수 있도록 며, 열람 기록전을 첨부하여야 한다.

8) 과업의 내용상 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 성과를  작성 시에는 참여인원은 최소화하고, 업무일지를 비치하여 작업내용을 기록하여야 한다.

9) 용역수행 과정에서의 각종 회의 시, 본 과업내용이 포함될 경우에는  배포선을 감안하여 필요한 수량만을 생산하고, 회의 종료 후 회수하여 파기하여야 한다.

10) 대외비 이상으로 분류된 자료 및 성과물을 발간하고자 할 때, 발간  업체 관련자의 보안관리는 과업수행자의 보안관리 기준에 따른다.

11) 과업수행 중 또는 수행 후 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은  수급인이 진다.

4. 성과품

가. 성과품의 제출

○	계약상대자는 본 용역의 납품예정 성과품을 과업종료 20일 전에 발주기관에 제출하여 사전검토를 받아야 한다.

○ 계약상대자는 검토 받은 용역 성과품을 수정하여 발주기관의 확인을 받은 후, 최종 성과품을 인쇄하여 제출토록 한다.

나. 성과품 제출목록

○ 특별교통안전진단

- 본 과업과 관련된 성과품은 다음과 같으며, 이에 대한 지불은 산출  내역서상의 계약금액으로 한다.

성과품의 종류	제출시기	제출형태	제출부수	비고
○ 안전진단 및 기본설계보고서 (개선안도 포함)	준공 시	제본(칼라)	30부	A4(A3)
○ 현황사진 및 비디오 촬영	준공(필요)시	CD-ROM	1식	-
○ 과업관련자료 저장파일	준공(필요)시	CD-ROM	1식	-

○ 기본설계

- 경찰청 규제심의 도면 (A3)

․ 서울시 및 서울지방경찰청 각 3부씩

- 최종보고서

․기본설계보고서(책) : 안전진단에 포함

※ 배부처 : 해당 구청, 경찰서, 서울시설공단, 서울지방경찰청, 서울도서관  등

․ 개략공사비 산정 도서

․ 현황 및 개선도 CD 10장

․ 설계도면(A3) : 10부

나. 용역성과품 작성지침

○ 모든 성과품은 국문사용을 원칙으로 하되 전문용어 또는 뜻이 혼동되거나 불명확한 경우에는 영문, 한문 등을 표기할 수 있으며, 개조식 작성을 원칙으로 하나 필요한 경우 서술식으로 작성할 수 있다.

○ 모든 성과품은 관련 규정, 지침 등 제 기준에 의거 작성하되 순서, 편집방법 등 필요사항은 최소한 인쇄 일주일 이전에 발주자와 협의후 시행하여야 한다.

○ 필요한 경우 도표, 사진을 포함한다.

다. 사업성과물의 저작권

○ 본 용역의 성과품에 대한 저작재산권 일체와 2차적 저작물 또는 편집 저작물의 작성권은 서울특별시가 소유하며, 서울특별시는 정책상 필요시 과업결과물의 내용을 일부 보완 또는 수정할 수 있다.

5. 진단실시결과의 입력

○ 계약상대자는 규칙 제17조제4호에 따른 교통안전진단 실시결과를 진단실시 후 30일 이내에 별지 제1호 서식에 따라 교통안전정보관리체계에 입력하여야 한다.

6. 특기사항

○ 본 용역의 수행 중 계획내용의 추가 수정, 변경 검토 등의 검토사항에        대하여 쌍방 당사자 간 협의하여 결정한다.

【붙임 1】

예정 공정표

구 분	2018년			2019년
	30일 (12월)			60일 (1월)			90일 (2월)			120일 (3월)			150일 (4월)			180일 (5월)			210일 (6월)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
착수회의
자료수집
교통사고 원인분석
대상구간 현장조사
노선특성 조사
구간별 문제점분석 및 개선안 수립
기술자문회의실시
교통안전시설 개선 도면작성
관계기관 합동회의 교통안전시설 심의
지점별 보고서작성
종합보고서 작성
종료회의