도림천 단면확장 기본 및 실시설계

과 업 내 용 서

2018. 4.

	서울특별시 (하천관리과)

목      차

1.0 일반사항	1

1.1 과업의 명칭	1

1.2 과업의 목적	1

1.3 과업의 개요	1

1.4 주요업무의 사전승인	2

1.5 과업수행 및 공정보고	2

1.6 용역감독 등	5

1.7 계약상대자의 책임	5

1.8 관계기관 협의 및 인․허가	5

1.9 설계자문	6

1.10 건설기술심의위원회 심의 등	6

1.11 경관심의	7

1.12 설계의 경제성 등 검토(설계VE)	8

1.13 신기술․신공법의 도입 등	8

1.14 보안 및 비밀유지	9

1.15 타 계약상대자와의 업무한계	9

1.16 하도급 사항	9

1.17 과업내용 변경	10

1.18 용역수행자의 교체	10

1.19 용어의 해석	11

1.20 설계 등 손해배상	11

1.21 계약상대자의 시정요청	11

1.22 용역 성과품의 품질관리	11

1.23 발주기관의 제공자료	11

1.24 적용기준 및 시방서	12

1.25 준수사항 및 설계 시 고려되어야 할 사항	12

2.0 자료수집 및 조사	16

2.1 기본방침	16

2.2 관련자료 조사	16

2.3 현지답사 및 현장조사	17

2.4 수리․수문조사 및 분석	17

2.5 지장물 조사	17

2.6 측량	18

2.7 지반조사 및 토질시험	20

2.8 토취장, 골재원, 사토장 조사	24

2.9 동일 또는 유사 공종의 건설공사 사후평가 조사	24

2.10 배수시설조사	24

2.11 구조물 조사	24

2.12 위험공종 목록화하여 안전사고 예방	24

2.13 설계에 적용된 현장 조사결과 목록화	25

3.0 기본 및 실시설계	26

3.1 일반사항	26

3.2 기본 및 실시설계	26

3.3 설계기준 설정	28

3.4 하천개수공	28

3.5 토공설계	32

3.6 선형 설계	33

3.7 포장 및 보도설계	33

3.8 지장물 이설 설계	34

3.9 가시설 설계	35

3.10 구조물설계	36

3.11 배수시설 설계	39

3.12 유․출입 시설 설계	40

3.13 계측계획	41

3.14 기전설비 설계	41

3.15 전기설계	44

3.16 통신설비설계	45

3.17 하천환경정비공	45

3.18 유지용수공	47

3.19 교통처리계획 수립	48

3.20 사후평가	49

3.21 시공 및 유지관리계획	49

3.22 폐기물 처리	50

4.0 성과품 작성 및 납품	51

4.1 일반사항	51

4.2 성과품의 구성 및 내용	51

4.3 성과품 납품	59

※ 위치도	60

1.0 일반사항

1.1 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 『도림천 단면확장 기본 및 실시설계 용역』이라 하며 서울특별시 하천관리과를 ‘발주기관’이라 하고 용역사를 ‘계약상대자’라 한다.

1.2 과업의 목적

본 과업은 안양천권역 하천기본계획(서울지방국토관리청, 서울시 고시 제2016-145호)에 따라 도림천의 단면확장을 통하여 도림천의 통수능을 증가시키는데 그 목적이 있다.

1.3 과업의 개요

1) 과업의 위치 : 도림천 승리교 ~ 동방1교 구간 약 1.6km

2) 과업의 규모 및 내용

○ 현장조사 및 측량

- 노선측량 1,800m(단면확장 구간 1,600m + 상,하류 각100m)

- 지하매설물조사

○ 지반조사 : 1식(용역발주 물량은 28공임)

○ 기본계획 검토 및 보완

- 신림공영차고지 저류조, 주변시설을 활용한 임시저류 등을 반영한 수리·수문분석 후 홍수량, 홍수위 산정 및 홍수방어대책 보완

- 단면확장구간 교량 재설치 혹은 보수보강 기본계획

○ 기본 및 실시설계

- 단면확장 연장 1.6km, 확폭 약 8.0m(반복개화 혹은 암거신설)

(하천기본계획에 따른 100년빈도 홍수량을 통수 할 수 있는 규모의 단면확장으로 측량 후 좌안, 우안, 양안, 하도 내 단면확장 등 최적안 검토 후 설계)

3) 과업기간

(1) 본 과업기간은 착수일로부터 18개월(540일)로 한다.(공휴일 등 휴지일수 포함)

(2) 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

① 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

② 발주기관의 계획변경에 따라 본 과업의 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

③ 당초 과업수행에서 예기치 못한 사항의 발생으로 변경이 불가피하게 될 때

④ 기타 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생 되었을 때

1.4 주요업무의 진행 및 주민설명회

1.4.1 주요업무의 사전승인

계약상대자는 다음사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

2) 관계기관과의 협의사항

3) 용역 수행자의 교체

4) 설계기준의 설정 또는 변경

5) 하도급 사항

6) 공공측량 계획

7) 기타 발주기관의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

1.4.2 주민설명회 및 의견수렴 : 항목추가

1) 계약상대자는 주민, 이해 당사자의 의견수렴 등 과업기간 중 발주기관에서 시행하는 업무를 충실히 지원하여야 한다. 필요시, 과업수행을 위해 요구되는 경우 발주기관을 대행하여 업무를 수행하여야 한다.

2) 계약상대자는 주민설명회를 하기 전에 설명자료 등에 대하여 발주기관의 승인을 받아야 한2다.

3) 계약상대자는 주민설명회 이후 의견수렴결과를 발주기관에게 즉시 보고하여야 하며, 용역준공시에 회의록 등 주민설명회 자료를 정리하여 제출하여야 한다.

4) 주민설명회 및 주민의견수렴 과정에서 제기된 의견에 대해서는 그 내용과 대책을 검토하여 발주기관과 협의하여야 한다.

1.5 과업수행 및 공정보고

1.5.1 과업수행방법

1) 계약상대자는 과업내용서와 관계법령 및 제 규정 등에 따라 발주기관의 지휘감독을 받아 본 과업을 성실히 이행하여야 한다.

2) 용역수행처리절차는 본 과업내용서에 따르고, 과업내용서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 사전협의하여 처리함으로써 내실 있는 설계가 되도록 하여야 한다.

3) 공정계획에 의한 과업수행 중 중요 결정사항 등은 수시로 협의하여 공정추진에 지장이 발생하지 않도록 하여야 한다.

4) 공정부진 및 설계품질 저하 우려 시 계약상대자는 본 과업의 목적을 달성할 수 있도록 인력 및 기술적 대책 등을 제시하고 추진하여야 한다.

1.5.2 착수신고서 제출

1) 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 계약문서에 정하는 바에 따라 기술용역을 착수하여야 하며 착수 시 관계 법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

(1) 착수신고서

① 착수보고서(설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침 별지 제1호 서식)

② 기술용역 예정공정표

③ 사업책임기술자 선임계(이력서, 기술자격증 사본 첨부)

④ 도급내역서

⑤ 건설기술용역 실적관리 시스템의 정보입력 결과

(2) 분야별 참여기술자 및 장비 투입계획서

(3) 용역수행에 필요한 다음 서류

① 내국 기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 등 공인기관의 경력증명서

② 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류

(4) 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

(5) 계약상대자는 건설기술진흥법 제30조에 따라 건설기술용역 실적관리 시스템에 해당 용역의 정보를 입력한다. 그리고 동법 시행규칙 제27조(별지27호 서식)에 의거 설계 등 용역업자의 현황통보 및 관리를 위한 자료(전산파일)를 발주기관에 제출한다.

1.5.3 과업수행계획서 제출

1) 과업수행계획서는 계약체결 후 14일 이내에 과업의 특성 및 현장여건을 감안한 과업수행계획서(공동수급일 경우 공동수급인 상호간의 과업분할협의서 첨부)를 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 포함될 내용은 다음과 같다.

(1) 세부공정계획서

(2) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

(3) 과업수행조직 및 분야별 참여 인력(장비) 투입계획서

(4) 건설기술 경력사항 확인서

(5) 참여기술자 인적사항, 참여하고 있는 과업내용 및 예상기간

(6) 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

1.5.4 업무협의 및 공정보고

1) 보고시기

(1) 조사 및 자료수집 완료 시

(2) 용역착수, 중간단계, 마무리단계 검토 시

(3) 설계심의 또는 자문회의 시

(4) 성과품 작성 시

(5) 준공 시

(6) 공정보고 시

(7) 주간 업무협의, 월간 정기 공정보고 시

(8) 기타 발주기관의 요청이 있는 경우

2) 월간 정기 공정보고

계약상대자는 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 월간공정보고서를 매월 말일을 기준으로 하여 다음달 5일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

(1) 과업추진 내용 및 공정 현황

(2) 관련기관(부서) 업무협의 등 추진사항

(3) 업무관련 회의 및 발주기관 지시사항 처리결과 (승인사항 포함)

(4) 과업 수행상 중요 문제점 및 대책

(5) 참여기술자 현황

(6) 다음 달 과업수행 계획

3) 중간보고

설계용역 시행과정에서 담당공무원 및 용역 참여기술자간 합동회의를 주기적으로 추진하고 계약상대자는 발주기관의 요구가 있거나 다음 각각의 경우 관련자료를 제출하고 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 발주기관의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)을 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

(1) 주요 단계별 과업이 종료 되었을 때

(2) 분기 1회 이상의 중간보고 시

(3) 주요계획 및 방침의 설정과 변경 시

(4) 주요민원 발생시

4) 작업일지 작성

계약상대자는 착수와 동시에 작업일지를 작성하여 과업수행 완료시 제출하여야 하며 작업일지 양식은 서울특별시 설계용역관리 편람에 수록된 양식으로 한다.

5) 참여기술자 투입일수 기록(Time Sheets) 제출

계약상대자는 참여기술자의 투입일수에 대한 개인별기록을 월간 단위로 작성하여 월간공정보고시 제출하되 과업 착수후 3개월이 지난 후 10일 이내에 투입기록을 제출하여야 한다.

참여기술자별 투입기록(  월)

성      명 :       인

책임기술자 :       인

월/일	투입시간	휴일(야간) 근무시간	수행업무	비 고
1/1
.
1/31

6) 발주기관 지시사항 검토

(1) 계약상대자는 발주기관의 요구가 있을 경우 각종 검토회의 등을 통하여 기술자문 및 검토를 받아야 한다.

(2) 계약상대자는 발주기관의 요구가 있거나 주요 공정을 선정 또는 완료하기 이전에 관련 자료를 제출하고 담당분야별 책임 또는 관련 기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 지적 및 보완사항에 대하여는 발주기관의 의견을 수렴한 후에 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

1.6 용역감독 등

1) 용역감독

발주기관은 과업을 시행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무 내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

(1) 기술인력 동원 현황

(2) 용역 단계별 과업추진 내용 및 공정현황

(3) 기타 확인에 필요한 사항

2) 용역점검

(1) 계약상대자는 발주기관이 설계품질 확인과 용역업무의 적정 수행여부 확인에 적극 협조

(2) 정기점검과 수시점검을 실시 할 수 있으며 발주기관으로부터 지적받은 내용 및 요구내용에 대하여 계약 상대자는 과업범위를 벗어나지 않는 한 모두 반영하여야 한다.

(3) 발주기관은 제출된 추진계획에 대비하여 공정이 지연될 때는 계약상대자로 하여금 부진공정 만회대책을 작성 제출토록 하고, 필요시 부실벌점 부과 등의 조치를 취한다.

1.7 계약상대자의 책임

1) 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 과오나 오류 등으로 과업 수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 용역 준공 후라 할지라도 설계과오나 오류 등이 있어 이에 대한 발주기관의 수정, 보완 요구가 있을 때에는 타당한 범위 내에서 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

2) 문서의 기록비치

계약상대자는 과업의 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 사항을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

3) 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

4) 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

1.8 관계기관 협의 및 인 ․ 허가

1) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 다음과 같은 관련부서의 인 ․ 허가에 필요한 서류를 작성 제출하여야 한다.

항 목	수 량	관련기관	비 고
도로점용허가 신청서류	1 식	관련구청
공사 중 교통처리에 관한 사항	"	교통운영과, 서울지방경찰청
기타 인․허가에 필요한 부수되는 서류	"	해당부서

2) 계약상대자는 과업과 관련하여 관계기관 협의 및 인 ․ 허가에 필요한 자료를 설계공정 진행에 따라 필요한 시기에 작성 제출하여야 하며(인․허가 및 협의 주체는 발주기관) 제출된 자료에 대하여는 계약상대자가 책임진다.

3) 계약상대자는 본 과업 중 관련기관과 사전협의 및 설명이 필요한 경우에는 성실히 협조하여야 한다.

1.9 기술자문

1) 계약상대자는 발주기관으로부터 설계자문의 시기, 내용 등에 대한 계획이 통보되면 기술자문이 효율적으로 시행될 수 있도록 자료를 제출하여야 한다.

① 기본설계 완료단계

② 실시설계 완료단계

③ 설계방향 결정이 필요한 경우 또는 설계내용 주요사항이 변경될 경우

④ 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 경우

2) 발주기관은 설계자문 시기, 내용 등 기술자문 시행계획을 시행 14일 전까지 계약상대자에게 통보하여야 하며, 계약상대자는 효율적인 설계자문이 될 수 있도록 발주기관에 자문시행 7일 전까지 설계자문을 위한 자료를 제출하여야 한다.

3) 계약상대자는 설계자문 시 지적사항에 대하여 면밀히 분석․검토하여 발주기관에 조치계획을 보고하며 특별한 사유가 없는 한 설계에 반영하여야 한다.

1.10 건설기술심의위원회 심의 등

1) 심의시기

건설기술심의위원회 설계심의는 과업의 난이도와 소요공사비 등을 고려하여 관련 지침에 따라 시행토록 한다.

2) 심의준비

계약상대자는 발주기관으로부터 설계심의 등에 대한 계획이 통보되면 심의에 필요한 자료를 작성 제출하여야 한다.

3) 심의결과 반영

계약 상대자는 설계심의 시 지적사항에 대하여 면밀히 분석‧검토하여 발주기관에게 조치내용을 보고하여야 하며 특별한 사유가 없는 한 설계에 반영하여야 한다.

1.11 경관심의

1) 일반사항

(1) 지역특색의 자연환경과 인문환경에 부합되고, 조화를 이룰 수 있는 환경 친화적인 경관설계가 되어야 한다.

(2) 시설물이 위치한 장소의 상위계획과 지역계획을 연계하고 인근에 설치된 교량의 디자인을 고려하여 조화를 이룰 수 있도록 함으로서 시너지 효과를 창출할 수 있도록 한다.

(3) 기존시설의 구조적 안전과 관리, 교통소통, 주간경관 등에 저해요소가 되지 않도록 해야 한다.

(4) 현장을 답사하여 조사한 후 현장조건을 충분히 고려하여 시공이 가능한 계획을 수립하여야 한다.

2) 세부사항

(1) 현황조사

① 관련지역의 자연, 사회, 역사, 문화, 지역환경을 분석한다.

② 현지조사를 통하여 현지개발사항, 주변의 생활환경분석, 주요 조망권 조사 및 분석을 하여야 한다.

③ 국토개발계획, 지역개발계획, 각종 영향평가, 지구내 토지이용계획등 상위계획을 조사 분석하여야 한다.

④ 현황분석을 바탕으로 계획의 기본적인 상황을 분석하고 계획과 관련된 기본과제를 도출한다.

(2) 주제설정 및 디자인

① 전체의 통일성 및 개별시설물의 개성을 부여하여야 한다.

② 장래 이미지를 명확히 하고 디자인의 포인트 및 방향을 확립한다.

③ 시설물별 대안(형식, 부대시설) 디자인을 구조분야와 협의한 후 검토하여 제시하여야 한다.

④ 경관계획의 창작사항과 현지지형 및 주변과의 조화를 위해 경관시점(내부자 시점, 외부자 시점)을 검토하여야 한다.

(3) 설계변경 사항

① 시설물 경관설계 과정에서 필요한 경우 발주기관과 협의하여 모형제작, 3D시뮬레이션, 특수경관조명설계 등을 추가 반영할 수 있다.

(4) 시공 및 유지관리

① 시공 및 유지관리의 용이성‧경제성 등을 감안하여 가장 적합한 형식이 결정되어야 한다.

② 특수한 공법 등의 시공방법 및 유지관리 방안을 제시하여야 하며, 일상적인 유지보수가 불가능한 방법을 계획해서는 아니 된다.

(5) 협의 및 보고

① 업무보고는 업무착수 시, 교량경관 형식 선정 시, 부대시설을 포함한 경관설계 완료시 협의 및 발주기관의 의견을 청취·반영하여야 한다.

② 시설물 경관설계(안)이 수립되는 시점에서 구조전문가 및 발주기관의 의견을 청취하여 설계에 반영하여야 한다.

③ 해당 관계기관이 정하는 바에 따라 경관심의를 득하여야 한다.

(6) 성과품 제출

① 설계심의보고서(A4)

② 데이터 파일 1식

1.12 설계의 경제성 등 검토(설계VE)

1) 계약상대자는 관련지침에 따라 설계의 경제성 심의자료를 작성하여 발주기관 사전 검토를 받은 후 실시할 수 있도록 하여야 한다.

2) 계약상대자는 다음 각 호의 자료를 설계의 경제성 등 검토 실시 최소 10일 전에 검토조직에 제시하고 설계의 경제성 등 검토업무 진행 과정에서 추가로 요구되는 자료가 있을 경우 이에 적극 협력하여야 한다.

① 설계도

② 주요 설계기준

③ 설계도서

④ 사업내역서, 공사비산출서

⑤ 각종계산서

⑥ 기타 필요하다고 인정하여 요구하는 자료

3) 계약상대자는 설계의 경제성 등 검토결과 승인된 VE 제안에 대한 조치계획서를 작성하여 발주기관에 제출하고, 설계내용에 수정․반영 및 그 결과를 보고서에 수록하여야 한다.

1.13 신기술 ․ 신공법의 도입 등

1) 계약상대자는 건설기술진흥법 시행규칙 제40조 따라 신기술과 기존 공법에 대하여 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으로 비교·분석하여 해당 건설공사에 적용할 수 있는지를 검토해야 한다.(환경 신기술, 방재신기술 등 타법에 의해 지정된 신기술도 필요시 설계 반영 여부 검토)

2) 신기술을 반영하는 경우에는 건설기술심의위원회 심의(공사비가 100억원 이상)나 건설신기술 활용심의위원회 심의 또는 자문(공사비가 100억원 미만)을 받아야 한다.

3) 신기술 등 특정공법 적용시에는 자체공법선정위원회를 구성하여 공법을 선정하고 건설기술심의위원회 심의나 건설신기술활용심의위원회 심의 또는 자문을 받는 방안을 검토하여야 한다.

4) 신기술 등 특정공법을 적용하기로 결정한 경우에는 목록표 작성과 해당 도면에 공법 명칭을 명기하여야 한다.

5) 공법 선정시 관련 신기술이 있음에도 불구하고 기타의 유사 또는 기존 기술을 반영하고자 하는 때는 서울특별시 건설신기술 활용촉진에 관한 조례 제10조에 따라 발주기관의 자체공법선정위원회의 의결을 거쳐야 하며, 그 사유를 시장이 정한 양식에 따라 설계보고서에 기록하여야 한다.

1.14 보안 및 비밀유지

1) 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야한다.

2) 과업성과품 발간 시 유의사항

계약상대자는 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 용역감독자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간 시는 발주기관과 협의하여 발간한다.

3) 보안관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대해서 책임을 져야 한다.

1.15 타 계약상대자와의 업무한계

본 과업을 수행함에 있어 다수의 공동계약에 의거 과업을 수행할 때는 계약상대자 상호간에 과업분할 협의서를 작성, 수정하여야 하며, 착수와 동시에 발주기관에 제출한다.

1.16 하도급 사항

1) 건설기술용역의 하도급 계약과 관련하여 관계법령이나 계약서 등에 특별히 정한 경우를 제외하고는 건설기술용역 하도급 관리지침에 따른다.

2) 계약상대자는 건설기술진흥법 시행규칙 제31조에 따라 하도급 승인을 받기 위해서는 동법 시행규칙 별지 제32호서식의 하도급 계약승인신청서를 발주기관에 제출하여야 한다.

3) 발주기관은 건설기술용역 하도급 관리지침에 따라 하도급 계약의 적정성 여부를 검토하여 7일 이내에 그 승인 여부를 계약상대자에게 알려야 한다. 다만, 하도급 적정성 판단에 상당한 시일이 요구되는 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 1회에 한해 통지기간을 연장할 수 있으며, 통지기간을 연장한 경우에는 그 사유와 7일 이내의 통지예정 기한을 정하여 지체없이 계약상대자에게 알려야 한다.

4) 계약상대자는 하도급 부분에 대하여 발주기관으로부터 선급금, 기성금 및 준공금을 지급 받았을때에는 그 대금을 받은날로부터 15일 이내에 하수급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급하여야 한다.(하도급거래 공정화에 관한 법률 제6조 및 제13조3항)

5) 하도급으로 시행한 당해 용역성과에 대하여 전적으로 계약상대자의 책임으로 한다.

1.17 과업내용 변경

1) 과업 내용 변경사항이 발생하였을 경우, 발주기관은 행정안전부 예규 제21호(2018. 1. 10.) 『지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준』 제 14장 용역계약 일반조건에 따른다.

2) 계약상대자는 설계용역수행 중에 주요 설계과업내용에 대한 변경 없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 발주기관의 지시를 받아 우선 과업을 변경하여야 한다.

3) 다만, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 설계변경에 필요한 내역서 등 관련자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

4) 계약상대자는 다음 항목에 해당하는 때에는 발주기관과 협의하여 변경을 요구할 수 있다.

(1) 과업업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때

(2) 계약내용에 따른 이행수량에 의한 정산 변경 시

(3) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

(4) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

(5) 관계기관과의 협의, 발주기관의 계획이 변경된 때

(6) 지층상태가 불규칙하여 변경이 불가피할 때

1.18 용역수행자의 교체

1) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관에서 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서 발주기관으로부터 교체요구가 있는 경우 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

2) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타, 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 등급․경력을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

3) 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업 기간 중에 계약상대자가 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전 동의를 받아야 하고, 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다.

1.19 용어의 해석

1) 과업내용서상의 용어해석에 차이가  있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

2) 과업성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현방법 등은 발주기관과 계약상대자간에 해석상 분쟁이 야기되지 않도록 알기 쉽게 정확히 정의한 후 사용하여야 한다.

1.20 설계 등 손해배상

계약상대자는 설계 등 용역계약을 이행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역 목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우 이를 배상하여야 하며, 계약상대자는 보험 또는 공제에 가입하고, 당해 용역을 완료하기 전에 보험증서 또는 공제증서를 발주기관에 제출하여야 한다.

1.21 계약상대자의 시정요청

계약상대자는 발주기관 주관부서 업무담당자(이하 용역감독자)가 다음의 각 호의 1에 해당하는 경우 서면으로 발주기관의 장에게 이의 시정을 요청할 수 있다.

1) 용역감독자가 설계과업 범위 이외의 부당한 업무를 지시할 때

2) 용역감독자가 정당한 사유 없이 건설기술자의 교체를 요구할 때

3) 용역감독자가 정당한 사유 없이 용역 업무를 지연시킬 때

1.22 용역 성과품의 품질관리

1) 설계의 실명화를 통한 설계도서의 품질관리를 위해 최종 용역보고서 및 설계도면에 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관의 담당자(설계 등 용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인 후 날인하도록 하여야 한다. (건설기술진흥법 제48조 제5항, 시행규칙43조, 본 과업내용서의 별표2 참조)

2) 참여기술자의 명단은 “설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침” 별지 제5호 서식에 의거 작성하되, 주민등록번호 뒷자리는 **로 암호화 처리하여야 한다(보고서도 동일)

1.23 발주기관의 제공자료

1) 본 과업수행을 위해 계약 후 발주기관이 제공할 자료는 다음과 같다.

(1) 사업예정지 주변지역 수치지형도 또는 수치지도 1부

(2) 사업예정지 주변 하수관망도 및 내부조사 자료 1부

(3) 본 과업 관련보고서 및 수리분석자료 1부

- 안양천권역 하천기본계획(도림천, 대방천, 봉천천, 오류천, 시흥천)(2015, 국토교통부)

- 서울시 풍수해저감종합계획(2016, 서울시)

- 신림공영차고지(저류조 포함) 기본 및 실시설계(2016.12~2018.7)

(4) 기타 필요자료 1식

2) 상기 자료는 설계 참고용으로 제공된 것으로 계약상대자는 그 내용의 오류, 정확성을 확인하되, 오류가 발생한 경우 발주기관에 보고하여 확인 후 사용하여야 하며, 본 과업 이외의 목적으로 사용할 수 없다.

3) 상기 제공 자료는 성과품 제출 시 반납한다.

1.24 적용기준 및 시방서

1) 본 설계용역에 적용하는 다음의 설계기준 및 시방서는 최신의 것이어야 하며, 관련 기준이 개정된 경우 용역완료일까지 수정된 최신 기준을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의․적용하여 수행한다.

(1) 국토교통부 및 관련 학회 각종 표준시방서, 설계기준 및 설계지침서

(2) 한국산업규격(KS)

(3) 서울시 각종 설계 및 시공편람

- 전문시방서, 지반조사 편람, 시설물 설계 및 시공편람

(4) 관련법령

- 하천법, 하수도법, 지진재해대책법, 도로의 구조․시설기준에 관한 규칙, 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙

(4) 관련설계 기준

- 하천설계기준, 상수도설계기준. 하수도설계기준, 하천시설물표준도, 하수도표준도

(5) 시설물 안전관리에 관한 특별법

(6) 건설기술진흥법에 의한 품질시험규정

(7) 서울특별시 친환경상품 구매촉진에 관한 조례․시행규칙

(8) 기타 관련 법규

(9) 기타 발주기관이 제공하는 관련자료

2) 통계자료는 공신력 있는 기획재정부, 국토교통부 및 정부기관, 지방자치단체, 기타 한국은행 등 공공기관의 자료를 활용하고 인용된 통계자료는 반드시 출처를 명시한다.

3) 관련법령 및 기준에 대하여 명기한다.

1.25 준수사항 및 설계 시 고려되어야 할 사항

1) 준수사항

(1) 본 과업을 충실하게 수행하기 위하여 계약상대자는 본 과업내용서와 관계법령 및 제규정에 따라 성실히 수행하여야 한다.

(2) 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 경우는 본 과업의 일부 또는 전부를 타절하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

(3) 본 과업 내용서에 명시되지 않은 사항이라도 발주기관이 과업 수행상 필요로 추가 과업을 요청할 경우에는 그 내용 및 비용 등을 상호 협의하여 결정하며 계약상대자는 이를 성실히 수행하여야 한다.

(4) 본 과업내용서 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의 불가 시는 지방자치단체 용역계약 일반조건에 따른다.

(5) 계약상대자는 본 과업을 수행하기 위한 과업수행팀을 별도 구성하며, 과업의 내용에 따라 단계별 과업기간을 세분한 과업수행 계획서를 작성 제출하여 효과적인 사업관리가 될 수 있도록 한다.

(6) 발주기관은 다음과 같은 사유로 계약상대자가 과업 수행을 계속하기가 곤란하다고 판단될 때는 해약할 수 있다.

① 과업 수행이 불가능하다고 인정될 때

2) 조사 및 설계 시 고려되어야 할 사항

(1) 설계변경 및 공사비 증액의 최소화

(2) 환경 친화적 건설공사를 위한 공법 및 적용기준 제시

(3) 건설폐자재 활용방안 검토, 제시

(4) 계약상대자는 발주기관이 실시설계에 대한 설계의 경제성 등 검토를 실시하고자 하는 경우 이에 필요한 관련 자료 등을 제공하여야 하며, 설계개념 발표 및 VE제안서에 대한 의견개진 등 설계VE 활동에 적극 협조하여야 한다.

(5) 계약상대자는 설계의 경제성 등 검토결과 승인된 VE제안에 대한 조치계획서를 작성하여 발주기관에 제출하고, 설계내용에 수정․반영 및 그 결과를 보고서에 수록하여야 한다.

(6) 발주기관과 시공자간에 클레임이 발생하지 않도록 설계도서 작성

(7) 공사시방서에 시공상세도면의 목록 제시

(8) 동일 또는 유사공종의 건설공사 사후평가 결과를 조사, 검토하여 본 설계에 반영

(9) 건설공사 사후평가 결과 작성을 위한 실시설계 사후평가표 작성(서울특별시 건설공사 사후평가 수행지침 참고)

(10) 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와는 별도로 안전관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용) 계상 : 안전관리비를 잠정금액(PS단가)으로 설계내역서에 포함하여 작성

(11) 관계기관과의 충분한 협의를 통한 공사 중 설계변경 요구사항 사전 방지

(12) 동일 또는 유사 공사의 사고사례 조사 및 안전대책 수립 의무화

(13) 설계에 적용 가능한 건설 신기술의 공법 및 적용기준 제시

(14) 우기・동절기 등 공사 중지 기간 및 출퇴근 시간대 공사로 인한 교통체증으로 시민불편 유발 여부 등을 충분히 고려하고 공정관리 전문가 참여하여 적정 공사기간 산정

(15) 본 과업내용서에 명시되지 아니한 사항(설계심의결과 미 반영된 사항, 자치구 및 주민요구사항, 기타)등에 대해서도 발주기관의 지시가 있을 때는 성실히 수행해야 한다.

(16) 건설기술 진흥법 시행령 제98조에 따른 안전관리계획을 수립하여야 하는 공사에 해당되는 경우 건설안전을 고려한 설계(DFS, Design For Safety)를 시행하며, 안전관리계획을 수립하여야 하는 공사에 해당되지 않는 경우 가능한 준용하도록 한다.

① 설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소되도록 한다.

② 시공단계에서 설치되는 가설 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려해야 한다.

③ 깊은 지하 굴착을 최대한 배제하여야 한다.

④ 위험장소에서의 작업을 최소화하기 위해 공장제작 자재의 활용을 적극적으로 고려한다.

⑤ 동일 작업장소에서 시공절차가 충돌되지 않고 안전하게 작업이 이루어지도록 해야 한다.

⑥ 시설물의 유지관리가 용이하도록 개・보수 및 청소를 위한 전용통로, 설비의 설치 및 제거가 용이한 반입구 등이 고려되어야 한다.

⑦ 부서지기 쉬운 자재가 사용되지 않도록 하여야 하며, 석면 및 석면이 함유된 자재가 사용되지 않도록 하여야 한다.

⑧ 해체 및 개・보수 공사 시 기존 구조물이 안전하도록 하여야 한다.

⑨ 지반굴착공사의 시공시기가 장마철, 해빙기와 겹칠 경우에는 이에 대한 안전성검토를 실시하여야 한다.

⑩ 건설공사 중 근로자의 안전확보를 위하여 「산업안전보건법」 제23조부터 제24조까지에서 정하는 내용을 고려해야 한다.

(17) 안전관리문서의 제출

① 설계과정 중에 도출한 건설안전 위험요소(Hazzard) 및 위험성(Risk)에 대한 평가를 실시한 결과로서 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 형태로 작성된 설계안전성검토(DFS)보고서

② 설계에 가정된 각종 시공법과 절차에 관한 사항

③ 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항

(18) 기존 설계에서 조사한 구간은 기존 자료를 최대한 활용하되, 현장을 확인하여 현황이 맞지 않아 조사가 필요하다고 판단되는 구간은 재조사 실시

(19) 유지관리대상 시설은 유지관리 시설물 목록을 작성하고 실시설계 준공 시 제출하여 하수도 관리 전산시스템에 별도 DB관리되도록 할 것.

(20) 최종 성과품은 하수도 또는 방재시설 관리 전산시스템 보유 데이터 갱신에 활용될 수 있도록 하수도 또는 방재시설 GIS DB 관리부서와 긴밀히 협의하여 설계

(21) 과업의 범위는 관련계획 변경 등 설계 수행과정에서 조정될 수 있다.

(22) 환경영향 평가를 고려한 설계

(23) 문화재 보호를 고려한 설계

2.0 자료수집 및 조사

2.1 기본방침

1) 현장조사 및 계획수립 시 발주기관의 지역현황을 토대로 기 수립된 도시계획, 하천기본계획, 하수도정비 기본계획변경 등을 검토하여 계획을 수립한다.

2) 모든 계획은 기존 자료를 최대한 이용하여 검토하며 합리적인 계획을 수립한다.

3) 본 과업은 대상지역에 대한 기본계획 검토를 토대로 설계를 수행한다.

4) 지반 및 지하수위 조사를 통하여 관로 하부의 지지력을 확보하여 암거 및 인접건물 침하, 암거경사 불량 등과 같은 문제점을 해소한다.

5) 조사업무 수행 중 과업여건상 과업내용의 변경이 필요할 경우 상호간의 합의에 의해 변경할 수 있다.

6) 서울시 제공 및 기 완료된 용역 결과 자료를 충실히 조사하여 최대한 활용하되 일목요연하게 그 내용을 정리하고, 용역수행을 위해 반드시 보완이 필요하다고 판단되는 경우 해당 자료의 조사를 추가로 지시할 수 있다.

2.2 관련자료 조사

1) 제반사업의 연관성

본 과업과 관련된 제반사업계획을 조사하여 설계의 자료로 활용한다.

2) 도시계획사항 및 토지이용계획

계획구간내의 도시계획 현황과 토지이용 계획 등 관련 사업계획을 조사․검토하여 일관성 있는 계획이 수립될 수 있는 자료를 제공한다.

3) 계약상대자는 본 과업과 관련된 다음 제반계획 및 시설을 검토하여 설계의 자료로 활용한다.

(1) 각종 장기계획(하천기본계획, 하수도정비기본계획, 도시계획 등)

(2) 각종 관련계획(도림천 복개철거 및 친수공간 조성 기본 및 실시설계 등)

(3) 기존시설에 관한자료

(4) 지형도 및 주요 지하매설물(상수도, 전기, 통신, 가스, 경전철 등), 지하철 및 지상구조물 기초형상

(5) 타 기관 및 타 부서 사업계획

(6) 도로대장 등 타 부서 시설물관리대장

(7) 기본계획 이후 설치된 관로 및 관련 시설물에 대한 자료

(8) 토지이용계획, 가로 및 도로계획

(9) 사업지구 내 주변 토질조사 자료

(10) 기타 본 설계와 관련된 자료

4) 조치사항

계약상대자는 기존 도시계획시설 변경 또는 신규결정이 필요할 경우 도시계획시설 변경 및 결정고시를 위하여 필요한 자료를 발주기관과 협의하여 작성하여야 한다.

2.3 현지답사 및 현장조사

1) 과업구간에 기존 배수시설물(하천, 하수도, 저류조 등)의 현황(규모, 종·평면, 유입부 구조 등)을 면밀히 조사하고 통수단면과 종단도에 대하여 사전에 조사 후 계획규모의 홍수량이 통과할 수 있는지 상세히 검토하여 설계에 반영토록 한다

2) 또한, 지형, 지질, 하천 등의 자연 상황과 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공사용도로, 공사부지, 작업장 등의 확보 가능여부를 판단하여야 한다.

3) 현지답사 시에는 반드시 사진(또는 드론촬영 영상 등)을 찍어 사진첩에 정리하고 계획, 설계 시에 참조하도록 한다.

2.4 수리 ․ 수문조사 및 분석

1) 침수피해현황 및 도림천에 연결된 하수도 시설물 현황을 상세히 조사하고, 암거신설에 따른 변화 및 하수도시설(관거, 맨홀 등) 신설을 제시한다.

2) 과거 침수피해 발생 일시와 관련된 피해현황, 피해원인, 피해규모에 대하여 조사하여야 하며, 침수 피해 당시 강우발생기록 및 홍수규모 (해당빈도)를 년도 별로 상세히 조사 후 원인분석을 하여 설계에 반영토록 한다

3) 강우시 도림천 수위, 저류조 등 저류시설물의 저류시기 및 저류량, 펌프장의 가동률을 조사하고 단면확장과 연계하여 분석한다. 특히 현재 운영중인 서울대 정문앞 저류조 및 설계중인 신림공영차고지 저류조 운영조건을 고려한 수리·수문 검토를 실시한다.

4) 수리‧수문 조사 및 분석을 시행하여 설치암거(종단교량)의 적정단면을 계획하고, 하천기본계획의 변경이 필요시에는 변경을 진행하여야 한다.

2.5 지장물 조사

1) 조사방법

(1) 발주기관은 지하시설물 통합정보 시스템을 의무적으로 활용하여 대상지 주변 지하 시설물도를 설계용역업체에 기본적으로 제공한다.

(2) 계약상대자는 발주기관에서 제공된 지하 시설물도를 참고하여 계획구간의 각종 지하매설물 및 지장시설물의 저촉여부를 조사하여 누락된 지하시설물이 없도록 유관기관과 협의(협의결과 발주기관 사전보고)한다.

2) 설계적용

(1) 현장조사 결과와 당해 시설물 관리부서의 관리도면 및 서울특별시(공간정보담당관)에서 제작한 수치지형도(S=1:1,000)를 비교․검토하여 맨홀의 위치 등 지장물의 위치를 정확히 측량하고 지장물의 폭(직경), 매설심도를 표시한 지장물도를 작성, 제출하여야 한다.

(2) 지장물중 이설이 필요한 시설은 해당기관과 협의를 완료하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

(3) 공사시 터파기 등으로 인한 보호공이 필요한 시설 등에 대하여는 해당기관과 협의하여 적절한 보호방안을 수립하고 공사중에 손상이 없도록 한다.

(4) 조사된 지장물은 현황도에 정확히 표기되어 있어야 한다.

2.6 측량

1) 일반사항

(1) 측량은 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 및 동법 시행령에 의거 용역감독자의 지시에 따라 실시하고 측량이 완료되면 발주기관의 확인을 받는다. 서울특별시 수치지도(1/1,000)와 비교 ․ 평가하여 정확도를 높여 시행하여야 한다.

(2) 계약상대자는 측량을 실시하기 전에 작업계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

(3) 작업계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

① 조사물량

② 작업계획표 (외업, 내업)

③ 인원편성

④ 주요기기

⑤ 특기사항 (안전관리, 사진촬영)

⑥ 위 치 도

⑦ 기    타

(4) “계약상대자”는 측량작업 시 안전사고 방지에 유의하고 안전사고 발생에 따른 모든 책임을 진다.

(5) 측량작업 시 필요한 관계기관의 제 수속은 “계약상대자” 부담으로 신속히 처리한다.

(6) 측량을 위해 교통 혹은 보행의 금지 또는 제한이 필요한 경우 해당 경찰서 및 발주기관과 협의하여 허가를 득한 후 시행한다.

(7) 기 시행한 측량성과를 활용하는 것을 원칙으로 하되 필요시 측량을 시행하도록 한다.

(8) 작업일지

계약상대자는 작업 진행사항을 작업일지에 기록하여 발주기관이 확인할 수 있도록 하여야 한다.

(9) 측량기구의 점검 및 보정

측량기구는 각 조사에 적정한 것을 사용하여야 하며 사용 시에는 점검 및 보정하여야 한다.

(10) 성과품 제출

성과품(원도, 작업일지, 야장)은 용역준공 납품 시 발주기관에 제출하여야 한다.

2) 현황측량

(1) 각종 기준점이나 주요 측점은 도면 및 보고서에 표기한다.

(2) 현황측량의 축척은 1/500~1/1,200으로 한다.

(3) 교차로 주요건물 및 시설 등에 대한 지형지물 명칭을 기입하고, 지하 매설물 및 지상공작물에 대한 현황을 포함하여 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행 규칙」에 따라 작성한다.

(4) 지적현황도는 현황측량의 성과와 구청(또는 해당구청)에 비치된 지적원도 및 도시계획 선을 확인하여 작성하여야 한다.

3) 종․횡단측량

(1) 기본 및 실시설계 시 국가수준점과 서울시 공간정보담당관에서 기설치하여 관리하는 도시기준점을 활용토록 한다.

(2) 국토지리정보원의 수준점 성과를 이용하여 그 폐합차가 허용범위 이내에 들도록 하고 주요지점에 표석(수준점)을 설치하고, 위치 및 표고를 평면 및 측량 성과품에 명시하고 추후 공사 측량에 이용이 가능하도록 한다.

(3) 기존 관로의 측량결과(관저고 및 맨홀 지반고)는 관로 정비계획의 기초 자료로 활용하고 기존 하수관망도에 기록한다.

(4) 본 공사에 필요한 종‧횡단측량은 20m 간격으로 시행하되 지형 등이 급변하는 곳에는 보조측점을 설치하도록 한다.

(5) 종‧횡단 측량은 종단면도의 축척 측점에 종 ․ 횡단 측량을 실시하되 왕복측량으로 허용오차 내에 들도록 실시하고 종단면도의 축척은 종 1:100, 횡 1:500으로 작도하고 횡단면도의 축척은 1:100으로 한다.

4) 기타

(1) 공공측량 성과심사에 지장이 없도록 자료를 작성 제출한다.

5) 용지조사

(1) 지장물 및 소유자 확인

- 본 과업에 편입되는 용지 및 지장물을 정확히 조사하고, 지목별, 지장물별(가옥, 수목 등)로 지번과 소유자를 확인하여야 한다.

(2) 조사 자료의 제출

- 지적조사에 따라 편입되는 용지에 대한 토지등기부등본 및 토지대장, 지장물에 대한 지장물 현황조사를 용지도와 함께 발주기관에 제출하여야 한다.

(3) 조치사항

- 보상 및 공사에 영향을 줄 수 있는 서울특별시의 각종 인․허가 사항을 조사하여 과업수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

2.7 지반조사 및 토질시험

1) 일반사항

(1) 기 시행한 지반조사 성과의 활용 여부를 검토한다.

① 서울특별시의 지반정보통합 관리시스템 : http://surveycp.seoul.go.kr

② 국토교통부의 국토지반정보 통합관리 시스템 : http://www.geoinfo.or.kr

(2) 계약상대자는 본 과업내용서에 의거 조사하며, 과업내용서에 명시되지 않은 사항은 「토질 및 암석시험규정」, 「한국산업규격(KS)」, 「서울특별시 지반조사편람」 및 기타 토질 규정에 따라 시행하여야 한다.

(3) 지반조사에 대한 자료는 국토교통부 국토지반정보포털시스템(www.geoinfo.or.kr)에 등록할 수 있도록 전산파일 형식(한글, 워드, PDF, CAD 등)으로 작성하여 CD에 담아 발주기관에 제출한다.

(4) 과업내용서 이외의 조사

본 과업내용서에 명기되지 않았으나 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 발주기관과 협의 후 실시한다.

(5) 인‧허가 사항

인‧허가(토지사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 계약상대자 부담으로 이행하여야 한다.

(6) 세부조사계획서의 제출

계약상대자는 지반조사 세부 조사계획서를 제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 조사에 착수하여야 하며 조사계획서는 계약서, 과업내용서, 지반조사 편람 등을 참고하여 작성하되 다음사항을 포함하여야 한다.

① 조사내용(목적, 개요)

② 조사의 순서 및 방법(위치도, 계획표, 시험방법 등 포함)

③ 조사공정표

④ 조사조직표

⑤ 조사내용, 조사방법, 주요장비 및 기기

⑥ 가설비계획

⑦ 기타 교통처리 등 필요한 사항

(7) 안전관리

① 계약상대자는 공사안전 관리지침을 참고로 하고, 항상 조사의 안전에 유의해 현장관리를 하여야 하며 재해의 방지에 노력하여야 하고, 조사현장이 위험하여 일반의 출입을 금지할 필요가 있을 경우는 가설펜스 등에 의한 충분한 안전조치 및 출입금지의 표시를 해야 한다.

② 계약상대자는 조사 실시 중 관리자의 허가없이 유수 및 교통의 방해, 공중에 불편이 되는 행위 및 조사방법을 택하여서는 안 된다.

③ 계약상대자는 조사지점 주변에 있는 지상․지하의 기존 및 가설구조물에 피해나 지장을 미치지 않게 조치하여야 한다.

(8) 사전 및 사후 조치사항

계약상대자는 도로상에서 조사를 행하는 경우는 교통안전에 대한 발주기관, 도로관리자 및 관할경찰서와 협의해 안전표지판 등을 설치하여야 하며, 조사완료 후 노면을 원상복구하고 현장정리를 깨끗이 하여야 한다.

2) 조사 및 시험

(1) 기존자료 조사 및 조사계획서 제출

계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 지형도, 지질도, 항공사진 등과 타 기관에서 기시행한 조사기록과 기본설계 등 기존자료를 수집하고 대상지역의 지형 및 지질특성을 파악하여 시추공의 위치 등을 포함한 조사계획을 수립하고 본 조사의 성과분석시에 참고하여 최상의 결과가 도출되도록 한다.

(2) 지표지질조사

축척 1: 25,000 지형도와 기존지질도를 이용하여 계획지역 일대에 노출되어 있는 지층의 다음과 같은 특성을 위주로 지표지질조사를 시행하여야 한다.

① 암석의 종류 및 분포상태

② 풍화심도 및 상태

③ 절리나 단층 등 지질구조의 발달상태

④ 계획지역 지역사면의 안정성

⑤ 구하천이나 매립지의 분포

⑥ 지반의 특수성, 자연 지하수위, 피압용출수 등 지하수 특징

⑦ 풍화대, 퇴적층 및 연약지반 특성 및 분포상태

⑧ 기타 구조물 건설에 영향을 줄 수 있는 제반지형 및 지질적 주변상태

(3) 시추조사

① 상수도, 가스, 기타 지중케이블선 등의 관리기관과 사전 협의하여 지하매설 지장물이 예상되는 지역은 피하여 인근지점에서 시추를 실시하되 일정심도 까지는 인력터파기를 실시하여 반드시 지장물을 확인하여 지장물의 파손을 사전에 예방하여야 한다.

② 시추조사는 원칙적으로 일정한 압력 및 회전속도를 유지할 수 있는 유압식 시추기를 사용하고 시추공경은 NX로 굴진하는 것을 원칙으로 한다.

③ 시추간격 및 심도는 서울특별시 지반조사 편람의 규정을 원칙으로 하나 지질상태의 변화가 심하고 공사기간 중․장기적 안정성이 요구되는 주요구조물(교량, 지하차도) 설치지역은 발주기관의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있으며 기반암층 확인을 원칙으로 하되 기반암이 깊을 경우 하부 5.0m이상 또는 기초 폭 단변의 2배 이상을 시행한다.

④ 시추 시 사용하는 용수는 굴진 시 순환수나 스라임의 색조를 이용하여 지층변화 상태를 파악할 수 있도록 청수를 사용하여야 한다.

⑤ 암반층 시추 시에는 반드시 다이아몬드비트를 사용하고 이중 코어베럴을 사용하여 코어회수율을 최대한 높여야 하며, 굴진속도를 가능한 범위 내에서 암층별로 구분, 기록·유지하여야 한다.

⑥ 지반강도가 낮은 풍화토층, 풍화암층, 연암층, 또는 파쇄대가 나타나는 경우는 코어 회수율을 높이기 위하여 삼중 코어베럴이나 D-3 코어베럴을 이용하여 시추한다.

⑦ 시추각도는 수직으로 함을 원칙으로 하되 지표 지질조사 결과에 따라 파쇄대나 단층 등 구조선의 확인 등을 위하여 필요한 경우에는 경사시추를 수행하여 최대의 시추효과를 얻도록 한다.

(4) 자연시료 채취

연약점토층에서는 시추조사와 병행하여 실내시험용 불교란 자연시료를 채취하여야 하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 파라핀을 사용하여 밀봉하고 시료상자에 보관하며 이동중의 교란을 방지한다.

(5) 지하수위 측정

시추공내의 지하수위는 시추 완료 후 24, 48 및 72시간이 경과한 후 각각 측정하여 조사지점의 안정된 수위를 산정하고 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간을 통하여 수시로 측정하여 지하수위의 변동 상태를 파악한다.(발주기관 협의 후 시행)

(6) 시추공 보존

① 시추를 완료한 시추공은 매몰되지 않게 PVC 관과 뚜껑을 설치하여 공사 중 지하수위 측정이 가능하도록 하여야 한다.

② 별도의 이용계획이 없는 시추공은 오물이 투입되지 않도록 하여야 하며, 지표면 하부 1m까지는 벤토나이트 또는 시멘트 슬러리를 주입하여 다짐하면서 되메움한 후, 되메움 조치한 굴착공 위에 30～40㎝ 두께의 콘크리트를 밀봉하고, 콘크리트면에서 지표면까지는 깨끗한 흙으로 다지면서 되메움하여야 한다.

3) 현장시험

(1) 표준관입시험

① 표준관입시험은 KS F 2307 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시하여야 한다.

② 시험회수는 지층이 변할 때마다 동일층이라도 1.0m 깊이마다 1회씩 실시하여야 하며 N치가 50회에 도달하더라도 관입깊이가 10㎝ 미만일 때는 타격을 중지하고 그때의 관입깊이와 타격회수를 기록한다.

③ 채취된 시료를 함수비 변화가 없도록 200g 이상으로 2개의 시료병에 넣어 밀폐시킨 후 시추번호, 심도 및 N치, 현장, 토질분류 등 제반정보가 기록된 규정된 명패를 부착한다.

(2) 기타 현장시험

① 특정구간의 현장여건으로 인하여 설계 목적상 필요하다고 판단되는 경우 계약상대자는 다음과 같은 시험을 수행할 수 있다. 이때 계약상대자는 추가시험의 합당성에 대한 전문가의 자문의견서를 첨부한 시험계획서를 제출하여 발주기관의 검토․확인 후 사전승인을 득하여야 하며, 시험소요 경비는 실비 정산한다.

② 양수시험, Sounding, 물리탐사, 공내재하시험, 현장투수시험

4) 시료정리

(1) 조사중 채취된 흙시료는 채취, 시추공번호, 채취심도 등 필요한 사항을 기록한 표준명패가 부착된 시료병에 넣어서 시료상자에 보관한다.

(2) 암석코어는 표준규격의 시료상자에 시추공 및 채취심도별로 정리하며, 상자에는 시추공번, 상자번호, 과업명, 조사일시 등 제반정보를 기재하여 상자의 식별이 용이하도록 한다.

(3) 암석코어가 아닌 스라임만이 채취된 경우에는 스라임을 흙시료와 같은 요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관한다.

5) 보고서

(1) 지반조사 보고서는 과업내용에 명시한 사항과 조사방법 및 결과, 조사지역의 지층분포 및 기타 설계에 필요한 자료들을 검토하여 보고서내에 수록한다.

(2) 지층명, 두께, 토성 및 역학적 성질을 분석 ․ 수록하여야 한다.

(3) 시료의 종류와 시료의 공학적 특성을 분석 ․ 수록하여야 한다.

(4) 시추위치 평면도, 시추주상도, 지질단면도, 시추작업 사진 등을 수록하여야 한다.

(5) 시추 주상도에는 다음 사항을 명시한다.

① 시추공번호, 시추지점 좌표 및 표고

② 암석명, 색상, 풍화도

③ 분류된 지층명과 특성

④ 강도, 절리간격, 절리면 상태, 암질표시율(RQD), 코어회수율(TCR)

⑤ 지하수위 관측치

⑥ 표준관입시험 결과의 N치

⑦ 기타 참고사항

(6) 각종 현장시험 결과 및 성과분석 자료를 수록한다.

(7) 조사 ․ 시험결과로 얻어지는 각종지반의 물성치를 기재하여야 하며, 계획지역의 지반구성상태, 연약지반현황, 예상되는 구조물 기초의 종류(콘크리트기초, 자갈기초, 모래기초 등)에 따른 적합성 여부, 허용지지력 등을 수록하여야 한다.

2.8 토취장, 골재원, 사토장 조사

(1) 서울특별시에서 수행하고 있거나 또는 추진예정인 각종 공사장과 국토교통부「토석정보공유시스템」 을 이용하여 공사시 시공성 및 경제성을 최대한 높일 수 있는 토취장, 골재원 및 사토장을 조사하여 본 과업에 사용 여부를 발주기관과 협의하여 결정한다.

2.9 동일 또는 유사 공종의 건설공사 사후평가 조사

1) 서울특별시 One-PMIS(pmis.eseoul.go.kr), 정보소통광장(opengov.seoul.go.kr),

국토교통부 건설CALS 시스템(http://www.calspia.go.kr)을 활용하여 동일 또는 유사공종의 건설공사 사후평가 결과를 조사한다.

2) 조사 결과를 검토하여 설계에 반영한다.

2.10 배수시설조사

1) 기 수립된 배수계획 등 건설관련 용역보고서의 자료를 활용․검토한다.

2) 과업노선 주변의 장래 계획시설 및 기존 구조물의 확장계획, 폐 구조물의 처리시설 등을 조사한다.

3) 과업노선 주변의 배수로 현황을 조사한다.

2.11 구조물 조사

1) 과업 범위에 설치되어 있는 현존구조물 현황조사(위치, 안전등급, 설계도 등)와 아울러 당해 지역의 자연조건 및 관련 시설물의 상태 등을 고려한 구조물의 추가, 개량, 보완여부를 조사한다.

2) 현지 주민의 의견을 수렴하여 민원의 최소화 및 합리적인 설계가 되도록 조사하여야 한다.

3) 기존 구조물은 점검･진단 등의 이력 및 결과를 조사하고, 과업구간 내 기존 유턴차로 및 횡단보도 구간 구조물의 재사용 하는 방안을 검토하고 있으므로 기존 구조물의 상태를 면밀한 조사와 내하성능을 분석하여 사용가능여부, 보수보강 필요성, 처리대책을 제시하여야 한다.

2.12 위험공종 목록화하여 안전사고 예방

사고사례를 분석하여 위험공종을 목록화하고 안전사고 예방을 위한 꼭 지켜야 할 사항을 검토, 설계 시 반영토록 하며 아래의 내용을 포함하도록 한다.

(1) 지반굴착 및 흙막이공법 적용구간 안전대책

(2) 구조물 시공 시 안전대책

(3) 우기 시 및 동절기 안전대책

(4) 유지관리 종합안전대책 등

2.13 설계에 적용된 현장 조사결과 목록화

지반조사, 측량조사, 지장물조사, 지하매설물 관련기관 협의내용 등을 포함한 종합 조사보고서를 작성하며 아래의 내용을 포함토록 한다.

(1) 문헌자료와의 차이점 및 보완사항

(2) 현장조사결과에 따른 검토사항, 설계적용목록

3.0 기본 및 실시설계

3.1 일반사항

1) 기본 및 실시설계는 하천기본계획 사항을 토대로 추진한다.

2) 본 과업 수행 시 주변 사업계획 및 진행중인 사업(도시개발사업 등)등을 면밀히 검토하여 상호 연계되는 계획이 되도록 하고 인근 주민의 요구사항을 계획 초기단계에서 부터 조사 및 검토하여 설계에 반영한다.

3) 복개하천을 감안하여 반복개구조물의 수리적‧구조적 안전성 측면에서의 설계기준을 제시한다.

4) 수리분석에 필요한 모형은 『안양천권역 하천기본계획(도림천, 대방천, 봉천천, 오류천, 시흥천)(2015, 국토교통부)』에서 구성한 HEC-RAS 모형 등을 활용하되, 측량 등의 결과에 따라 보완하여 사용한다.

5) 지하매설물 관리기관별 중·장기 정비계획 및 병행시행 가능 여부 등을 검토하고, 지장물로 인한 하수관로의 구조적, 기능적 결함 요인 등을 분석하여 구배, 통수능 확보를 위한 정비계획을 설계에 반영한다.

6) 기존 수방시설인 펌프장, 배수시설(저류조, 하수관로, 빗물받이 등), 주변시설을 활용한 임시저류 효과 등을 재검토하여 단면확장의 규모 및 범위를 설계에 반영한다.

7) 본 사업과 관련한 법적 제한조건, 지상 및 지하 매설 지장물 이설에 따른 시공의 난이도 및 이설에 따른 시간적‧공간적 제한조건, 지역주민의 민원 등 제반 제한조건 등을 종합적으로 검토‧분석하여 제반 문제점 등을 단면확장 사업이 안전 측면에서 합리적이고 경제적으로 신속히 완료될 수 있는 실현 가능한 선결과제 및 해결방안 등을 제시하여야 한다.

8) ‘지하안전관리에관한특별법’ 제14조 및 제24조에 따라 터파기 공사를 시행할 때는 대상사업에 대한 ‘지하안전영향평가’ 또는 ‘소규모 지하안전영향평가’를 받도록 한다.

9) 내진설계 반영 적정여부에 대하여 전문가(구조기술사 등) 검토의견 작성 및 서명 날인 후 ‘내진설계 체크리스트’를 설계보고서에 수록하고, 또한 설계보고서, 구조계산서, 지반보고서 등에 산재되어 있는 내진설계 자료를 요약하여 설계보고서에 수록하도록 한다.

10) ‘지하안전관리에관한특별법’ 제14조 및 제24조에 따라 터파기공사를 설계할 때는 대상사업에 대한 ‘지하안전영향평가’ 또는 ‘소규모 지하안전영향평가’를 받도록 한다.

11) 시공과정의 안전성 확보를 위해 설계단계부터 사전에 위험성을 평가하고 저감대책을 세울 것

- 「건설기술진흥법시행령 제75조의2」에 따라 안전관리계획 수립대상 공사는 실시설계시 자체 기술자문위원회 등을 거쳐 시공과정의 안전성 확보 여부를 검토

- 계약상대자는 설계시 건설안전을 고려한 설계가 되도록 다음 사항을 준수

・설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소되도록 함

・시공단계에서 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려

・실시설계시 시공전문가(건설기계, 가설구조물 등 위험공종 부문)를 참여시켜 공사 중 발생할 수 있는 위험요소를 선제적으로 검토

- 계약상대자는 아래 내용이 포함된 문서를 설계성과 납품 목록에 명시하고 준공시 제출

・「건설공사 안전관리업무 수행지침」 별지1호 서식에 따라 작성된 ‘설계안전 검토보고서’

・시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항

3.2 기본 및 실시설계

3.2.1 기본설계

1) 기본설계는 하천기본계획을 토대로 다음 각 호의 업무를 수행한다.

(1) 설계 개요 및 법령 등 제기준의 검토

(2) 기본계획 결과의 검토

(3) 구조물 설치로 인한 수리 ․ 수문의 영향 분석

(4) 기본적인 구조물 형식의 비교·검토

(5) 구조물 형식별 적용 공법의 비교·검토

(6) 기술적 대안 비교·검토

(7) 대안별 시설물의 규모, 디자인의 검토

(8) 대안별 시설물의 경제성 및 현장적용타당성 검토

(9) 시설물의 기능별 배치 검토

(10) 개략 공사비 및 공기 산정

(11) 측량, 지반, 지장물, 수리, 수문, 지질, 기상, 기후, 용지조사

(12) 주요 자재·장비 사용성 검토

(13) 주요 기자재 선정 기준

(14) 경제성 분석(공사비, 시설내구연한, 용지비 및 보상비, 유지관리비 및 주요기기별 LCC(Life Cycle Cost)를 감안한 총비용 산정 비교)

(15) 설계도서 및 개략 공사시방서 작성

(16) 설계설명서 및 계산서(수리수문, 구조, 기타) 작성

(17) 관계법령 등의 규정에 따라 기본설계시 검토하여야 할 사항

(18) 단면확장에 따른 환경적 영향 검토

3.2.2 실시설계

1) 실시설계는 기본설계 결과를 바탕으로 관계법령 및 기준 등에 적합하게 건설업자가 시공에 필요한 설계도면 및 시방서등 설계도서를 작성하는 것으로 다음 각호의 업무를 수행한다.

(1) 설계 개요 및 법령 등 제기준 검토

(2) 기본설계 결과의 검토

(3) 구조물 형식, 디자인 결정 및 설계

(4) 구조물별 적용 공법 결정 및 설계

(5) 시설물의 기능별 배치 결정

(6) 장비 반입구, 반입동선 및 준공 후 설비 유지관리 계획

(7) 각종 장비 등에 대한 배치계획

(8) 각종 설비의 현장․중앙제어 및 감시계획

(9) 주요 기자재에 대한 성능보증 사항

(10) 특수공구 목록 제시

(11) 공사비 및 공사기간 산정

(12) 토취장, 골재원, 사토장 등의 조사확인(현지조사 및 토석정보시스템 등 이용)  샘플링, 품질시험 및 자재공급계획

(13) 측량․지반․지장물․수리․수문․지질․기상․기후․용지조사

(14) 기본공정표 및 상세공정표의 작성

(15) 시방서, 내역서, 단가규정 및 구조 및 수리계산서 작성

(16) 공사중 재해대책 및 환경관련(소음, 진동, 비산먼지, 악취, 오염 등) 대책 수립

(17) ‘공사실명제’ 시행에 따른 제반사항(사업비 등) 반영

- 공사 준공표지판 부착, 건설공사 시공관리 대장(CD), 주요 공정마다 감독관이 입회한 사진 촬영 및 보전

3.3 설계기준 설정

1) 하천기본계획을 기본으로 하여 금회 산정한 홍수량 및 홍수위와 비교검토를 시행하여,  최적의 설계기준을 설정한다.

(1) 강우강도식 및 지속시간별 확률강우량 등 산정근거 제시

(2) 최근 강우 사상을 반영한 강우와 면밀한 수문분석을 통한 확률강우량 및 유출량(홍수량)을 산정 제시

(3) 현재 수행중인 “홍수량 산정 표준지침(한국수자원학회)”, “전국 하천유역 홍수량 산정용역”의 홍수량과 비교검토 결과 제시

(4) 본 사업에서 적용 홍수량은 사업의 규모 및 예산, 사업 후 설계홍수량에 대한 침수피해방지 등 중요한 요소이므로 금회 홍수량 산정과 관련하여 명확한 근거자료를 제시

2) 하천기본계획시 분석한 강우자료 및 유입량 분석 및 시설물계획 등을 검토하고, 신림공영차고지 저류조, 주변시설을 활용한 임시저류 등을 반영한 홍수량, 홍수위 산정 및 홍수방어대책을 보완토록 한다.

3.4 하천개수공

1) 축제공

(1) 축제지역 조사

① 축제 예정지의 토질, 토양, 함수상태, 연약지반 유.무 기초지반의 투수성 등 지반조건을 조사 한다

② 기성제방이 설치 되어있을 경우 정밀점검 결과를 토대로 그 부위를 축제 부위로 이용할 수 있는지의 여부를 검토한다. (특히 토질상태, 기존제체의 안정성, 기존호안 활용가능 여부, 법면의 식생상태, 기존구조물의 노후상태 등 검토)

③ 지류 합류부의 축제계획은 본류의 배수위 영향을 검토하여 지류 축제계획을 수립하여야 한다.

④ 제방이 현재 도로로 활용되고 있는 경우는 향후 안전한 제방역할을 감당할 수 있는지의 여부와, 도로기능을 제내측으로 변환하고 제방의 본래 기능만 담당할 수있는 여건이 되는지의 여부를 조사하여야 한다.

⑤ 도시지역 등 지역적 제약여건으로 흉벽(Parapet)으로 부득이 축제해야 할 부분이 있는지의 여부를 조사하여야 한다.

⑥ 홍수 시 투수성 지반을 통해 제내지의 용수현상 등이 발생할 수 있으므로 과거에 형성되었던 하도가 차단된 지역 또는 홍수시 제내측으로의 용수 또는 지하수상승 현상발생 여부 그리고 토질시험 결과에 의한 기초 지반투수성 등을 면밀히 검토하여 대책을 강구하여야 한다.

⑦ 하천 선형의 사행정도 조사

⑧ 하도의 하상변동 가능성 및 세굴, 퇴적실상 조사

(2) 축제의 선형(도상)

① 축제의 선형은 기본적으로 하천기본계획상의 선형 또는 급류부, 완류부 등의 특성에 알맞는 선형을 유지하되, 자연형(홍수흔적, 과거의 하천형태)에 최대한 가깝도록 하며, 유수의 안전하고 원활한 소통, 효과적인 하천관리가 가능하고, 하천생태계의 서식 보전이 가능한 선형이어야 한다.

② 계획하폭 및 축제선형은 계획홍수규모를 대상으로 하되, 환경, 경관, 친수성, 안전성 등을 감안하여 검토하여야 한다.

③ 축제 선형의 중심선은 계획제방의 제외지측 비탈머리를 기준으로 한다.

④ 지류 하류부의 선형은 가능하면 예각을 유지하고, 유수의 원활한 소통을 고려하여 도류제 설치방안 등에 대하여 검토하여야 한다.

(3) 제방축제(단면확장)

① 제방단면은 계획 홍수규모에 대응할 수 있는 규모이어야 하며, 침윤, 제체의 활동, 파이핑, 세굴 침하 등에 대한 안정성을 검토하여야 한다.

② 제방축제(단면확장) 기본계획, 상위계획, 하천설계기준 등을 비교 검토하여 결정하여야 한다.

② 지류의 배수영향구간에 대한 제방계획고는 본류의 제방계획고보다 가급적 낮지 않도록 하여야 한다.

③ 단면확장은 주변여건(건출물 인접 및 교통현황 등), 시공성, 유지관리 등을 고려하여 적합한 형식을 선정한다.

④ 흉벽(Parapet)의 설치가 필요한 구간의 흉벽 기초계획고는 계획홍수위 이상으로 하고 옹벽높이의 지상부가 가급적 1.0m이내가 되도록 하고, 차량의 주행에 영향을 최소화 하는 흉벽형식을 선정한다.

⑤ 단면확장시 하천구조물은 필요시 관련기준(도로교설계기준 등)을 준용하여 내진구조가 되도록 설계하여야 한다.

2) 호안공

(1) 호안은 제방이나 하안이 유수에 의한 파괴나 침식으로부터 보호될 수 있는 공법을 채택하되 하상내 호안재료원의 존재 유무, 호안의 중요성, 공사기간, 시공성, 미관, 경제성, 내구성등과 하천규모, 하천경사, 수심, 하상변동 상황을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.

(2) 호안공법은 제방사면의 소류력을 계산한 후 이를 고려하여 결정하되 돌붙임, 블럭붙임, 돌망태, 자연석(조경석)쌓기 등 여러가지 공법을 비교 검토하여 현지여건에 적합하고 경제적인 공법을 택하여야 한다.

(3) 호안의 종류를 결정함에 있어 생태계를 보전하고 자연적인 하천환경을 유지하기 위해 자연석, 목재, 나무가지, 천연섬유 등을 이용한 자연형 호안공법의 적용 여부에 대하여도 검토하여야 한다.

(4) 호안의 법선은 유수가 원활하게 소통될 수 있도록 유수의 방향을 고려하여야 하며, 저수호안의 경우 저수시뿐 아니라 홍수시의 흐름방향도 감안하며 설계하여야 한다.

(5) 호안의 높이는 설치공법, 설치장소의 수리조건, 지형 등을 고려하여 결정하되 고수호안의 경우는 계획홍수위까지, 저수호안의 경우 홍수터에까지 설치하는 것을 원칙으로한다. 단, 고수호안의 경우 다음과 같은 경우에는 제방 둑마루까지 설치하여야 한다.

① 특별히 중요한 제방

② 파랑이 발생하는 장소

③ 급류하천(수면경사 1/200 이상)

④ 고조의 영향을 받는 하구부 구간

⑤ 굴곡이 심한 만곡부의 외측안

(6) 호안의 파괴는 호안의 기초부분의 세굴에 의한 경우가 많으므로 계획하상에서 1.0m이상 유지되도록 하되 계획하상에 홍수시 일시적 세굴깊이를 고려하여 호안의 근입깊이를 결정하여야 한다. 또한 수충부로써 깊은 세굴이 예상되는 곳, 보 및 낙차공의 상하류, 첩수로, 방수로 등 하상저하가 예상되는 하천에서는 더 깊게 설계하여야 한다.

(7) 저수호안의 경우 저수호안의 법선이 심하게 만곡되어 있는 구간에서는 유수의 직진성으로 인해 저수호안비탈머리 부분이 세굴되는 경우가 많으므로 호안머리 보호공을 설치하도록 한다.

(8) 호안의 기초부분에서 발생하는 파괴를 막기 위해 설치되는 밑다짐공(섶침상, 목공침상, 콘크리트 블록, 사석공 및 돌망태공 등) 은 소류력을 견딜 수 있고, 하상변화에대해 굴요성이 있어야 하며, 시공이 용이하고 내구성이 큰 종류를 설치하여야 한다.

(9) 호안은 제방 성토재 또는 뒷채움 토사의 토압 또는 수압, 토사의 유출 등으로 파괴될 수 있으므로 사면안정 검토를 실시하여 안정적으로 설계하여야 한다.

(10) 사석을 호안공으로 사용할 경우 하천설계기준에서 정한 방법에 의해 사석의 중량을산출하되 하상변동에 의해 사석이 유실되지 않도록 특히 유의하여야 한다.

(11) 블록을 호안공으로 사용할 경우 비탈멈춤공을 반드시 설계하여야 한다.

(12) 밑다짐 사석을 시공할 경우 사석의 높이는 당해 공사구간 하천의 수위를 조사하여 최소한 상시수위보다 0.5m이상 되도록 계획하여야 하며 비탈경사는 1:1.5, 폭은 중소하천에서는 3.0m이상, 대하천에서는 4.0m이상(최소두께는 1.5m이상)되도록 설계하여야 한다.

3) 배수구조물

도심지역의 배수구조물은 지형적인 여건(제내의 도로이용, 가옥밀집)등을 고려하여 적절한 위치에 경제성, 시공성 등을 면밀히 검토한 후 설치하여야 한다.

(1) 배수구조물을 설계함에 있어 1/5,000 지형도를 이용하여 배수유역도를 작성하고 (유역이 큰 경우 1/25,000지형도 이용), 집수면적, 배수계통을 파악하여야 한다. 이때 필히 현장조사를 실시하여 배수구조물의 위치도 선정하여야 하며, 배수구조물 계획지점의 유입수로 규격, 유입수로 상류측의 구조물 제원 등을 조사하여 배수문의 단면을 결정한다.

(2) 배수구조물은 유수작용에 안전한 구조가 되도록 하여야 하고 부근의 호안이나 구조물에 현저한 영향을 미치지 않아야 하며, 하상이나 고수부지의 세굴을 방지할 수 있는 구조가 되도록 설계하여야 한다.

(3) 수문의 방향은 제방법선에 직각방향으로 설치하는 것을 원칙으로 하고 수문설치 위치는 수충부나 연약지반을 피하여 하상이 안정된 지점을 선정하여야 한다.

(4) 배수구조물의 단면은 집수면적내의 강우량, 본류와 내수의 유출상황 등을 고려하여 계획배수량을 배제할 수 있는 단면으로 하여야 하되, 유입수로 및 유입수로 상류측구조물의 규격을 감안하여 결정하도록 하며, 관내유속은 최대 3.5m/sec 이하로 하고 토사나 이물질을 원활하게 배제할 수 있도록 최소 D=800 mm 이상의 규격을 사용하도록 한다.

3.5 토공설계

1) 흙의 분류

흙의 분류는 원칙적으로 흙의 공학적 분류방법(KS F 2324)인 통일분류법을 따르며, 필요한 경우 AASHTO 분류법을 설계에 적용한다.

2) 토질정수의 적용

토질정수, 토량변화율은 토질시험결과에 근거하여 산정한 값을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

3) 토적의 산출

토적은 각 측점의 횡단도에서 토공작업 난이도에 따라 토사, 리핑암, 발파암 등으로 산출하여야 한다.

4) 암석의 분류

암석의 분류는 역학적 특성 및 탄성파 속도에 따라 극경암, 경암, 보통암, 연암, 풍화암 등으로 구분하여 설계에 반영하되, 불연속(절리, 단층 등) 등 암반의 특성을 설계에 반영하여야 한다.

5) 토공계획

토공은 제반조사에 의한 자료와 선형계획에서 확정된 평면 및 종단선형, 횡단도 등을 기초로 하여 순성토 및 사토가 적어지도록 하고 유용토 처리에 대한 내용을 포함하도록 하여야 한다.

6) 연약지반의 처리

토질조사 결과 연약지반이 발견될 경우 발주기관과 계약상대자가 협의하여 추가조사 기준을 설정, 시행하며 토질조사의 성과를 토대로 연약지반 등 부등침하가 우려되는 지역에 대하여는 면밀히 조사하여 토공 종․횡단면도에 상세히 명기하고, 연약지반 처리대책 공법을 검토하여 제시하여야 한다.

7) 절토법면 경사지의 처리

영구 절토법면 경사는 비탈면 처리계획을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

8) 성토부 처리대책

성토부의 원지반이 연약하여 시공이 불량할 경우 치환공법 등 연약지반 처리대책을 강구하여야 한다.

9) 구조물의 측벽 되메우기

구조물의 측벽 되메우기에 대한 다짐재료, 시공방법과 다짐방법, 다짐기준, 시험기준 등을 명시한다.

10) 토취장 및 사토장 선정

국토교통부 “토속정보 공유시스템”을 확인하여 토취장 및 사토장의 운반거리는 정확히 조사․검토하고, 사취 가능량 등을 조사․분석하여 선정하여야 하며, 순성토에 사용될 토질은 공사용 재료로서의 적합성여부를 토질시험에 의하여 판정하여야 한다.

11) 도림천의 통수능을 증가시키기 위해 하상굴착이 필요할 경우 현존구조물(안전등급, 설계도)의 상태를 감안한 굴착계획을 수립해야 하며 굴착에 따른 구조물의 안정성 검토를 시행하여여 한다.

3.6 선형 설계

1) 기본설계에서 결정된 최적노선을 현황도(축척 1:1,200～1:1,000)에 정확히 재표정 재조정하여 중심선에 대한 측량을 실시한다.

2) 평면선형과 종단선형이 조화를 이뤄 차량 주행성 및 안정성을 확보하여야 하며 기존 도로시설물의 위치, 규모, 형식과의 연계성을 고려하여야 한다.

3) 선형설계의 측점은 20m 간격으로 한다.

4) 선형 제원은 가급적 기준치 이상의 바람직한 값을 사용하여야 한다.

5) 평면선형의 곡선부는 기준에 의한 완화구간을 설치하여야 한다.

6) 종단선형의 요철부는 기준치 이상의 종단곡선을 삽입하여 시거를 확보하여야 한다.

3.7 포장 및 보도설계

1) 포장설계

(1) 포장설계는 토질, 기후, 골재 및 교통량 등에 관한 조사자료를 기초로 포장구조 및 포장두께를 결정한다.

(2) 포장구조 및 공법은 기본설계에서 제시된 사항을 적용하는 것을 원칙으로 하나 지역여건, 지형여건, 경제여건이 변화할 경우에는 변경도 가능하며, 이 경우 구체적인 검토가 필요하다.

(3) 포장설계는 “도로포장 구조설계요령(국토교통부)”을 사용 한다.

(4) 시멘트콘크리트포장은 줄눈 및 표면처리에 대해서 상세하게 설계 한다.

(5) 길어깨포장은 폭우, 강설 등으로 인한 세굴 및 파손방지와 유지관리를 고려하여 설계 한다.

(6) 포장층은 동결심도 이상의 충분한 동결방지층을 두어 포장구조의 동결을 방지하여야 하며, 동결심도는 “도로 동상방지층 설계지침”에 의거 결정 한다.

(7) 포장구조 및 단면해석에 필요한 포장특성치와 물성치는 도로포장에 적용할 포장공법으로부터 설정토록 한다.

(8) 포장설계는 형식 및 주요인자를 비교․ 검토하여 최적의 설계가 되도록 하고 특히 복개구간 상부 포장형식은 일반 도로구간 포장과의 연속성, 건설 후 유지관리, 시공성, 저소음 등을 비교 검토하여 적정한 포장형식을 결정한다.

(9) 구조물과 접속부 및 신구포장 경계면에서 발생하는 단차가 포장파손의 원인이 되므로 이에 대한 대책을 수립 설계에 반영 한다.

2) 보도설계

(1) 보도관련 공사 설계 지도・점검 이행

① 보도포장 관련 공사(설계) 시행기관 및 부서에서는 설계용역 준공 전(디자인 심의 대상 사업의 경우에는 심의 완료 후) 사업개요, 사업설명서, 설계도서(설계도, 공사시방서) 등을 서울시 보도환경개선과에 제출하여 점검을 받고 점검 지적사항에 대한 조치계획서를 제출하여 승인받아야 한다.

(2) 설계도면, 공사시방서, 내역서 작성

① 보도포장 전문기술교육 전문기술교육 이수 의무화, 도시화로 인한 불투수 면적 증가에 따른 도시 물환경 변화 문제점 해결을 위하여 투수성 포장 설치 원칙 등이 반영되도록 공사시방서 작성한다.

② 내역서 작성시 건설공사 표준품셈을 활용하여 작성하되, 현장에 대한 사전조사를 철저히 하여 각 현장 실정에 맞게 각종 할증률을 반영하여 공사중 통행불편 및 공사하자 등을 사전 예방토록 한다.

(3) 설계시 준수사항 : 보도 유효폭 2m 준수, 횡단경사 2% 이내 준수 등

(4) 재료 선정시 주의사항 이행

① KS 및 서울시 관련 지침에서 정한 기준을 통과한 제품을 적용 한다.

(5) 보도공사 설계는 보도공사 설계시공 매뉴얼(서울특별시) 및 보도 턱낮춤 및 점자블록 설치기준(보도환경개선과)에 따른다.

3.8 지장물 이설 설계

1) 이설비의 산출

시공장비, 작업공간, 고압선 등 시공장비 사용에 지장을 주는 지장물을 포함하여 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 맨홀, 상․하수관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관 등)은 해당기관과 협의하여 이설비를 산출한다.

2) 이설계획

이설계획은 지하매설물 관리부서의 확인을 거쳐 이설 가능여부 및 공사 착공후 이설 시기등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 첨부하고, 지장물 이설공사 순서를 설계하고, 이설에 필요한 기간을 공사기간에 포함한다.

3) 보호방안의 수립

공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설에 대하여는 지하매설물 관리자와 협의하여 적절한 보호방안을 수립, 공사중 손상이 발생하지 않도록 한다.

3.9 가시설 설계

1) 설계 구간내 각종 지하매설물의 위치를 정확히 조사하여 구조물의 위치, 가시설의 굴착공법, 지장물 이설여부 판단 및 이설방법 등을 설계 한다

2) 공사에 필요한 가시설은 기존 교통통행에 지장이 최소가 되는 공법을 제시하여야 하며, 가시설 및 공사에 따른 단계별 교통처리방안 제시와 안전을 고려한 설계가 되어야 한다.

3) 가시설은 구조물 방수작업이 가능하도록 필요한 이격거리가 확보되도록 설계하여야 한다.

4) 복공구간과 기존도로와의 접속부는 포장면 단차가 발생하지 않도록 하고, 교차로 및 횡단보도 구간의 복공은 미끄럼방지를 고려하여 설계하여야 한다.

5) 흙막이공은 터파기의 규모, 지반조건, 지하수 상태, 주위 여건 등을 고려하여 적합한 흙막이공법을 선정하여야 한다.

6) 지장물은 관계기관과 협의하여 이전하거나, 안전하게 시공이 될 수 있도록 매달기 등 보호공을 설치토록 설계하여야 한다.

7) 공사 중 가시설 계측방법에 대하여 검토 ․ 반영하여야 한다.

8) 굴착 시 인접한 시설물에 대해 굴착에 따른 사전조사를 실시하고 공사중 재해대책 및 환경관련(소음, 진동, 비산먼지, 악취, 오염 등) 대책을 수립하여야 한다.

9) 지하시설물 통합정보시스템 활용 의무화(공간정보담당관 운영)

(1) 발주기관은 지하시설물 통합정보시스템을 활용하여 대상지 주변 지하 시설물도를 계약상대자에게 기본적으로 제공한다.

(2) 계약상대자는 발주기관에서 제공된 지하 시설물도를 참고하여 누락된 지하시설물이 없도록 유관기관과 협의 이행토록 한다.(협의결과 사전보고)

(3) 지하시설물 정보의 무단 유출 방지 및 보안 대책을 강화하여 관리·감독을 철저히 이행토록 한다.

(4) 지하시설물의 정보가 외부로 무단 유출되지 않도록 계약상대자 등에게 보안각서를 징수하고 보안교육을 실시하도록 한다.

(5) 사업완료 후 계약상대자 등에 제공한 관련자료를 완전 폐기한다.

10) 사업구간내 일정구간 줄파기 시행

(1) 지하시설물이 집중된 교차로, 관로 접속구간과 직접 확인이 필요한 일부지역은 기본설계시 줄파기를 선택적으로 실시, 설계비를 정산한다.

(2) 줄파기 및 사전 교통관리 협의를 통한 가시설계획, 굴착공법 등을 설계에 반영하고 반드시 자치구와 사전 협의를 진행토록 한다.

11) 띠장의 연속시공이 되도록 띠장 불연속 구간은 띠장 밀림방지앵글 설치를 의무화한다.

12) 시공구간의 주변 건물 손상을 최소화할 수 있는 공법을 채택하고 그 근거를 제시하여야 하며 공사에 따른 침하량 등을 요소별로 산정하고 이에 대한 보완대책을 수립하여야 한다.

13) 가시설 설계시 앵커 등 지하매설물의 사유지 저촉여부를 고려하여야 한다.

14) 시공단계에서 설치되는 가설 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려해야 한다.

※ 「건설현장 가설구조물시공·관리 개선 방안」기술심사담당관-16298. ‘17.9.19)을 반영하여야 하며 설계심의 시 가설구조물 관련 구조검토서를 첨부하고 부문별 설계변경이 가능하도록 설계도서(물량, 규격, 재료, 공법 등)를 명확히 작성하여야 한다.

3.10 구조물설계

1) 도로

(1) 주요 구조물은 설계조건, 시방서, 지침서에 따라 구조계산 및 기존의 허용지지력을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

(2) 장애자를 위한 시설이 필요할 때는 형식을 선정하여 설계에 반영하여야 한다.

(3) 설계등급을 충분히 고려하여 설계하여야 한다.

(4) 하중조합은 가장 불리한 조건으로 설계하여야 한다.

(5) 활하중 적용시 지상구조물은 DB, DL, 보도의 군집하중 등을 잘 고려하여 설계하여야 한다.

(6) 토압은 벽면에 작용하는 분포하중으로 설계하도록 한다.

(7) 기존 도로와의 연계가 용이하도록 설계하여야 한다.

(8) 구조물 설치상 부득이 가시설이 필요하다고 판단되면 가시설을 설계에 반영하도록 한다.

(9) 전문기술자에 의한 안정성 검토를 수행하여야 한다.

2) 옹벽설계

(1) 옹벽설계는 관련규정에 의거 신축이음부를 두고 부등침하 방지를 위한 대책을 검토 반영한다.

(2) 옹벽의 표면은 보기에 아름답고 중압감이 없도록 하며 주변환경과 조화가 되도록 설계하여야 한다.

3) 교량설계

(1) 교량의 설계조건

① 교량의 등급은 1등급(KL-510)으로 하며, 형하공간을 충분히 고려하고, 하중은 가장 불리한 조건으로 재하하여 설계한다.

② 곡선교의 경우, 전도가능성 여부 검토를 위하여 시공단계별 안정성 검토를 수행하여야 한다.

③ 교량공사 종료 후 공용 중 교대의 측방이동 가능성 여부를 판단하여 필요시 적절한 대책을 마련한다.

(2) 교량형식 선정

① 교량계획 기본사항

교량 구조물은 건설비가 고가이며 반영구적인 시설물이므로 다음과 같은 기본사항을 종합적으로 고려하여 교량형식 및 공법을 선정하고 합리적인 교량계획을 수립하여야 한다.

- 주변 지형과 조화를 이루며 지역미관을 고려한 조형계획 도입

- 환경 친화적인 교량 구조물 계획 및 민원발생 최소화

- 구조적 안전성 및 내구성이 확보된 교량 공법 적용

- 시공성이 원활하고 합리적이며 진보적인 건설기술 도입

- 가치공학 기법을 통한 최적설계 시행

② 본 과업구간 주요 고려사항

본 과업구간에서 교량구조형식 및 공법 선정시 중점적으로 검토할 주요 사항은 다음과 같다.

- 본 교량은 주변 자연경관 조화 및 미관을 고려한 구조형식을 선정하여야 한다.

- 본 노선 중 기존 도로를 통과하는 구간 및 접속하는 구간은 기존 도로의 차량통행에 지장이 적으며 시공속도가 빠른 형식으로 한다.

- 상부구조는 주행성 향상을 위한 구조로 설계되도록 한다.

- 강교를 선정하는 경우 유지보수를 위한 도장시 하천수 오염방지 대책을 수립한다.

- 교량의 점검로 설치 시 교량미관에 영향을 줄 수 있으므로 교량미관을 고려하여 점검통로를 설계한다.

- 본 노선의 기존 구조물을 확장없이 이용하는 경우, 변경되는 설계하중을 반영하여 기존의 안전성을 유지할 수 있도록 보강 계획을 수립한다.

(3) 시공방법과 순서의 명시

주요 구조물에 대한 시공방법과 순서를 개략적으로 도면과 보고서에 명시한다.

(4) 내진설계

도로교설계기준에 따라 내진설계를 적용하여, 교량전체의 구조계가 내진구조가 되도록 설계하여야 하며, 낙교방지를 위한 시설 등 구조세목에 대해서도 내진성을 향상시키도록 설계한다.

(5) 가시설의 구조계산

교량의 구조물 시공 및 상부공 가설에 따른 가시설 등 주요가시설에 대해서는 시공단계별로 구조계산을 하여 설계에 반영토록 한다.

(6) 신축이음장치

교량의 신축이음장치는 내구성, 방수성, 평탄성, 시공성, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

(7) 교량받침장치

교량받침장치의 받침부는 연직 및 수평하중에 대하여 충분히 검토하여야 하고, 특히 교량받침장치의 마찰계수는 시방서 규정대로 적용하며, 감소적용이 필요한 경우에는 분명한 근거를 제시하여 사전승인을 받아야 한다.

(8) 연단거리의 확보

교좌장치 설치부는 도로교 구조설계기준상의 연단거리 규정을 충족하여야 한다.

(9) 붕괴유발부재(Fracture Critical Members)

붕괴유발부재(Fracture Critical Members)를 포함하는 강교 또는 특수구조 교량형식으로 계획하는 경우에는 주요 부재에 대한 붕괴관리계획서(Fracture Plan)를 개략적으로 작성한다.

① 붕괴유발부재를 도면에 표시한다.

② 설계 및 용접, 재료 등의 성질에 대한 사항을 포함하여 기재하여야 한다.

③ 강교제작은 자격을 갖춘 공정에서 제작하고 점검이 이루어지도록 한다.

④ 붕괴유발부재는 관련 시방서에 따른 비파괴시험을 수행하도록 명기한다.

⑤ 피로해석 및 피로설계를 수행한다.

(10) 형하공간은 시설한계, 유지관리공간, 도로, 하천유지관리 등에 필요한 공간이 확보되도록 검토하여 설계한다.

(11) 작업여건의 고려

구조물은 제작후 시공장비, 작업공간, 지반지지력, 고압전선 등 장비사용에 지장을 주는 지장물, 현장운반로 등을 고려하여 운반부재의 크기 및 중량을 정하고, 이에 따라 구조물을 설계한다.

(12) 연결로 교량은 곡선반경이 작아 부반력 발생 가능성이 크므로 부반력에 대하여 검토하고 필요시 아웃트리거등 부반력 방지대책을 수립하여야 한다.

(13) 과업구간내 교량은 점검·진단 등의 이력 및 결과를 확인하고, 하천폭 변화에 따른 하중변화와 구조 안전성 및 내진안전성을 확보하는지 검토하여야 하며, 검토결과 구조안전성 및 내진안정성이 기준에 미치지 못할 경우 재설치 계획을 시행하여야 한다.

(14) 기타

① 하천부지내 설치되는 교량은 하상 유수단면 확보에 지장 없도록 한다.

② 하천상에 설치되는 구조물은 유수 단면적 부족 여부를 수리 검토하여야 하며, 하상 세굴평가결과, 세굴 보호공이 필요할 경우 시공성, 유지관리 및 경제성 등을 고려, 여러 가지 대안을 검토토록 하고 이에 대책을 설계에 반영해야 한다.

③ 홍수로 인한 최고수위에 충분한 안전도를 가질 수 있는 교량이 되도록 하고 수위 상승량에 대하여 검토한다.

④ 도로 공용중 도로법면(절토법면, 성토법면)의 붕괴 가능성을 판단하여 필요시 보강대책을 마련한다.

⑤ 도로 공용중 도로면의 땅꺼짐 가능성이 있는지 조사하고 필요시 보강대책을 마련한다.

4) 기초설계

(1) 기초형식

기초형식은 상부와 하부에서 작용하는 하중을 견고한 지지지반에 전달하는 구조물로서 입지적 여건 및 시공성, 경제성, 안전성, 지반조건, 하중조건 등을 면밀히 검토 후 계획을 수립하여야 하며 다음과 같은 사항을 중점적으로 검토하여 하부구조 형식을 선정하도록 한다.

- 작업공간, 현장여건, 지장물 유무

- 시공장비 및 공사기간 등 시공조건

- 연약지반 유무 및 측방 유동성

- 상, 하부 구조형식 및 작용하중 특성

- 시공시 환경에 미치는 영향 및 조건

- 수평방향 지진력에 대한 저항성

- 지진시 액상화 발생 대응성

- 유사지층에서의 시공실적 및 적용성

- 교량기초 시공중 수질오염 방지대책

- 시공중 홍수 발생시 처리대책

- 기존에 설치되어 있는 구조물의 기초형식

(2) 기초공법 선정

기초공법 선정은 공사현장 주변여견을 고려하여 시공시 진동, 소음 등으로 인한 민원발생 소지가 있는 경우 이를 방지할 수 있는 공법을 선택하여 한다.

(3) 기초의 지지력 평가 방법 및 시공중의 평가시험 기준에 대하여 선정․제시한다.

3.11 배수시설 설계

1) 기존자료 및 현지답사, 수리 및 수문의 조사 결과를 활용하여 용․배수계통계획 및 구조물의 형식, 단면을 검토하도록 한다.

2) 중요 배수시설물에 대한 강우강도는 설계조건에 기재하여 설계에 반영되도록 한다.

3) 도로 횡단 배수관의 최소규격은 [eqn: phi``]800mm이상으로 설계에 반영되도록 한다.

4) 배수암거의 유속은 가능한 3.5m/sec 이하가 되도록 하며, 초과시에는 침식 방지시설 설치를 설계에 반영하도록 한다.

5) 기존의 경험에 의한 배수 구조물설계를 반영하고자 할 때는 설계조건에 기재하도록 한다.

6) 유역면적은 시에서 작성한 1/500 하수관망도에서 산출하여야 한다.

7) 하수시설물은 세굴 및 퇴적이 되지 않도록 규정된 경사를 유지토록 설계한다.

8) 서울특별시 하수도기본계획, 기존자료, 현지답사, 수리․수문결과 등을 활용하여 지역특성을 종합적으로 조사․검토하고 배수계통계획 재검토, 기존관로에 대한 규격의 적정성 여부를 검토하여 신규배수 구조물의 형식, 단면을 결정하여야 한다.

9) 입체시설 설치구간에 대한 표면배수 처리체계와 지하 주요 배수시설에 대하여는 별도 도면을 작성하여야한다.

10) 배수관 및 암거의 도면 작성시에는 규격별로 표준도만 작성하지 말고, 개소별 상세한 설계도를 작성하고 각 암거마다 콘크리트, 철근, 거푸집 물량을 도면에 명기하여야 한다.

11) 배수로, 도수로 입 ․ 출구부의 도면을 작성하여야 한다.

12) 암거의 유지관리에 지장이 없도록 계획하고 필요시 유․출입시설 설치계획을 설계에 반영하여야 한다.

13) 도로배수에 관한 기준은 도로배수시설 설계 및 관리지침(국토교통부 2012년 11월) 기준을 적용한다.

14) 계획홍수량은 유역면적 등 유역 특성에 따라 합리식, 유역추적법, 합성단위도법, 동수역학적 추적법(운동파 방정식을 채택한 분포형 모형 등) 등에 의해 산정하며 가능한 범위 내에서 기왕의 홍수량이나 침수위 자료 등을 이용하여 매개변수의 보정과 검정을 최대한 수행한다.

15) 강우의 지속기간은 배수 시스템에 최대의 부하를 발생시키는 임계지속기간을 적용한다.

16) 서울시「빗물 가두고 머금기사업」에서 시행중인 식생수로(도로, 콘크리트 배수로를 식생형 수로로 조성), 빗물조성(볼록한 화단 등을 오목한 지형으로 조성), 빗물침투시설(침투통, 침투트랜치, 침투측구, 투수성포장 등)등을 설치하여야 한다.

17) 하수도관은 유지관리의 원활을 위하여 보도로 이설 검토

18) 차도상의 폐 하수도는 하수관 노후로 인한 포장체 파손을 방지하기 위해 확실히 제거 되도록 한다.

19) 단면확장에 따른 도림천에 연결된 지류 하수암거 (배수시설물)의 통수능력 등 수리수문검토를 실시하고 하수관거 정비계획을 수립하여 제시토록 한다.

20) 단면확장과 연계한 차집관거 복선화 및 CSOs 저류방안을 검토한다.

3.12 유 ․ 출입 시설 설계

1) 유 ․ 출입 시설은 진 ․ 출입시 운전자(보행자)에게 혼동을 일으키지 않도록 하고, 주 진행 교통에 미치는 영향이 최소가 되도록 기하구조기준에 의한 가 ․ 감속 차로 설계를 검토하여야 한다.

2) 유 ․ 출입시설 설계에 있어서 최대 교통량 발생시간(Peak Time)에 혼잡이 최소화되도록 검토하여 설계하여야 한다.

3) 유출입 시 엇갈림으로 인한 교통정체 최소화를 위해 교통류를 확실하게 분리할 수 있는 유도 시설 및 표지를 설치한다.

3.13 계측계획

1) 계측의 목적, 문제점 및 항목을 명확히 설정하도록 하여, 계측기의 선정, 설치, 빈도 등의 신뢰도가 높도록 계획한다

2) 지반조건 및 위험단면, 주변현황, 지장물 등을 종합적으로 고려하여 계획하도록 한다.

3) 계측위치는 구조물의 규모, 원지반 조건, 시공방법 등을 고려하여 계측목적에 부합되도록 선정한다.

4) 계측간격 및 측정빈도는 지반조건 및 굴착방법, 시공조건에 따라 변경 가능하도록 조절한다.

5) 계측과 병행하여 지보공 및 지질 상태를 파악, 평가하여 시공에 반영하도록 한다.

6) 계측결과와 당초 설계 조건을 비교․검토하여 시공에 반영될 수 있도록 역해석을 실시할 수 있는 자료를 제공하도록 한다.

7) 계측을 현장의 여건과 중요도에 따라 계측의 자동화 및 영구계측 시스템의 운영을 검토하도록 한다.

8) 계측기의 종목 및 수량은 계측관리 표준품셈이나 발주기관의 기준에 따른다.

9) 시공과 유지관리에 관련하여 발주기관의 별도 요구에 의한 계획을 수립한다.

3.14 기전설비 설계

1) 설계기준

본 용역수행과 관련하여 관련된 사항은 다음의 법령 및 규정에 명시된 사항을 준수하여 수행한다.

(1) 전기사업법, 동 시행령 및 시행규칙

(2) 전기공사업법, 동 시행령 및 시행규칙

(3) 전력기술관리법, 동 시행령 및 시행규칙

(4) 전기설비 기술기준

(5) 내선규정 및 배전규정

(6) 한전 전기공급약관, 한전공급규정

(7) 한국산업규격(KS) - KSA 3701 도로조명기준

(8) 서울특별시 도로시설물 유지관리 지침 및 규정

(9) 전기통신기본법, 시행령 및 시행규칙

(10) 정보통신공사업법, 시행령 및 시행규칙

(11) 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

(12) 전파법령 및 시행규칙

(13) 엔지니어링 산업진흥법, 시행령 및 시행규칙

(14) 도로교통법

(15) 경찰청 훈령 및 예규 또는 지시

(16) 교통신호제어시스템 NEMA 규격집

(17) 교통신호제어기 규격서(경찰청)

(18) LED 교통신호등 표준지침(경찰청)

(19) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(지식경제부 고시)

(20) 시각장애인용 음향신호기 규격서(경찰청)

(21) 기타관련 법령 및 기준

(22) 용역기간 중 법령 또는 기준이 바뀌었을 경우 새로운 법령 또는 기준에서 정하는 바에 따르며 법령 또는 규정이 서로 상충되는 부분이 있을 경우 발주기관과 협의하여 결정한다.

2) 기본원칙

전기 및 통신시설은 도림천 하천 부지내 해당 시설의 기능을 충족할 수 있는 설비로서 아래사항에 적합하게 시설한다.

(1) 각 설비별 에너지 절약에 우선을 두고 안정, 신뢰성이 높고 유지, 보수가 편리한 설비를 구성한다.

(2) 전기분야 기구 등의 선정 및 디자인 계획은 조경시설물과 잘 조화되도록 선정한다.

(3) 기타 과업내용서에 명시되지 않은 사항은 발주기관의 전기분야 감독자의 지시에 따를 것

(4) 공사시방서 및 설계도면 작성시 서울특별시 도로 기전시설물 유지관리 요령 및 도로 기전설비 설치 및 관리에 관한규정, 서울시 전문시방서(건축전기 설비편, 건축 전기통신편)를 반영하여 설계하여야 한다.

(5) 조명등의 형태 및 종류는 조경시설의 기능 및 경관에 조화되도록 설계한다.

(6) 하천내 전기, 통신케이블은 외관을 고려하여 지하매설을 기준으로 한다.

(7) 회로구성은 안전성, 경제성, 실용성, 등을 고려하여 구성하여야 한다.

(8) 보수 및 유지관리가 쉽고, 장래 증설 변경 및 개․보수에 대한 적용성이 있어야 한다.

(9) 보안등, 각종교량, 경관조명시설 등은 가로등 계약종별을 적용받을 수 있도록 선로를 구분하여야 한다.

(10) 차후 전기공급에 문제점이 없도록 조치하고 전기․통신시설에 있어서 에너지 절약형 기자재 및 재생에너지(태양, 풍력 등) 설치계획을 검토하여 반영한다.

(11) 기기 및 설비의 자동화시 재해(홍수, 낙뇌 등)로 인한 사고예방 대책을 수립한다.

(12) 기기 및 시스템이 최대 홍수위 이하에 설치되는 경우에는 이에 대한 공법, 사용  성능, 유지관리 및 안전에 대해 검토하고 발주자와 협의 조정 해야한다.

(13) 야간이용에 필요한 보안등 등 총 전력부하를 산정하고 이에 적합한 수전 방식으로 계획하되, 가장 경제적이고, 안정적으로 관리할 수 있는 방식을 채택한다.

3.15 전기설계

1) 전원설비

(1) 전원설비

① 저압수전 및 배전선로를 검토한다.

② 신재생 에너지로 전원을 사용하는 것을 검토한다.

(2) 전력간선설비

① 포설방법 및 간선종류 검토

② 전압강하 및 허용전류 등 검토

③ 간선의 전압강하는 대한전기협회가 정한 내선규정을 따른다.

(3) 전등 및 전열부하

① KS 조도규정에 맞도록 하며 준공 후 유지보수가 용이하도록 LED등기구로 종류를 단순화 한다.

② 각 분야별 분기회로별 총부하용량 계산 검토

③ 등기구의 배선은 격등이 가능토록 구성하고 무선 점․소등수신기 및 PC에 의한 자동 및 수동조작이 모두 가능토록 설계 할 것

④ 분전반에 콘센트를 설치하며 필요한 장소에 전원공급이 가능토록 한다.

⑤ 최대 홍수위 이하에는 가급적 기기나 연결부가 없도록 하고, 접속이 필요할 경우 완전 방수가 가능하도록 설계 할 것

⑥ 주변 도로나 교량의 빛 환경을 면밀히 검토, 자연회복에 맞는 적절한 광량이 되도록 빛의 양을 조절할 수 있도록 설계 할 것(과다한 광량으로 야간 생태환경을 저해하지 않도록 특별히 고려)

⑦ 등기구는 주변의 수목 배치 등을 감안하여 적절한 위치에 설치토록 하고,  이용자들이 눈부심(Glare) 등으로 피로·불쾌감을 갖지 않도록 적절한 높이 및 배광을 검토할 것

⑧ 옥외등은 고효율 에너지기자재 인증제품 또는 산업통상자원부 고시 효율관리기자재 운용규정에서 고효율조명기기로 등록된 LED 등기구를 사용하도록 한다.

3.16 통신설비설계

1) 통신설비

(1) 하천위기관리시스템(홍수예경보, 음악방송, 문자전광판, 음성출력경광등)

① 기존 구축된 시설물과 프로그램 연계하여 운영이 가능하도록 설계한다.

② 각 시스템은 구청, 펌프장, 모바일로 제어가능토록 설계한다.

③ 옥외의 방송시설은 관리시설과 연계하여 일반 및 비상방송을 할 수 있도록 한다.

④ 주변 환경에 적합한 디자인의 스피커를 그 설치방법과 함께 제시하여야 한다.

⑤ 정전대비 30분정도 방송 가능한 비상전원과 충전장치 구비를 검토한다.

⑥ 개별방송(회로구분)과 전체 방송이 가능하도록 구성한다.

(2) CCTV 설비

① CCTV는 주요지점을 감시할 수 있도록 한다.

② 하천부지내 재난 및 안전 등에 필요한 장소에 CCTV를 설치하되 가급적 사각지대를 없게 하고, 수목 등의 성장에 따라 시야가 방해 받지 않도록 적절한 위치를 선택한다.

3.17 하천환경정비공

1) 공간환경 계획

(1) 유수에 의한 국부세굴 작용으로부터 하안 및 제방을 보호하고 수로를 유지하는 치수 및 이수기능 뿐만 아니라 하천 생태계나 경관 및 둔치 활용에 있어 중요하다. 따라서, 수변의 생태계, 자연경관의 보전과 창출 및 하천공간 활용이 가능한 정비가 되도록 계획한다.

(2) 둔치 및 저수로 계획 수립시 계획된 토공형상이 유수흐름에 자연스럽게 대응할 수 있는 기법을 검토하여야 한다.

(3) 저수호안 법선은 가급적 적절한 비대칭 사행이 형성될 수 있도록 강구한다.

(4) 여유 있는 홍수소통 단면적인 경우 저수호안도 완경사화를 도모하여 수변식생의 다양화를 창출한다.

(5) 저수로의 하상변화에 충분히 대응할 수 있는 저수로 호안 및 비탈멈춤공 계획을 수립한다.

(6) 저수호안의 공법은 기 시행된 환경정비사업의 문제점을 분석하여 합리적인 설계가 되도록 하여야 한다.

2) 둔치계획

둔치의 정비는 다양화를 도모하되 특히, 다음 사항을 적극 검토하여야 한다.

(1) 하도의 사행 특성을 감안하여 좌․우 양안 둔치를 계획하되 대칭형 선형을 지양하고, 물터의 폭과 높이를 다양하게 하는 방안을 검토한다.

(2) 수목식재는 홍수소통 능력을 충분히 검토한 후 둔치내 종단방향으로 식재기준에 따라 계획한다.

(3) 둔치내에는 가급적 운동시설 등 인위적 이용시설은 지양하고, 정서적인 이용이 가능한 공간으로 계획하여야 한다.

(4) 둔치에는 친수공간 확보를 위하여 산책로를 조성하되 홍수시 침수되어도 훼손되지 않고 소류력에 견딜 수 있게 설계한다.

(5) 산책, 휴식 등의 활동수용을 위한 휴게공간과 시설물의 설치종류 및 수량은 하천의 물 흐름과 이용인원을 예측하여 적정수량으로 설계한다.

3)  하도정비 계획

(1) 하도정비공은 유수에 의한 국부세굴 작용으로부터 하안 및 제방을 보호하고 수로를 유지하는 치수기능 뿐만 아니라 하천 생태계나 경관 및 고수부지 활용에 있어 중요하다. 따라서, 수변의 생태계, 자연경관의 보전과 창출 및 하천공간 활용이 가능한 하도정비공이 되도록 계획한다.

(2) 둔치 및 저수로 계획 수립시 계획된 토공형상이 유수흐름에 자연스럽게 대응할 수 있는 기법을 검토하여야 한다.

(3) 현 하도의 저수로 법선형태를 유지하는 차원에서 저수호안 법선은 가급적 적절한 비대칭 사행이 형성될 수 있도록 강구한다.

(4) 홍수류의 소통에 장애를 초래하지 않는 지역 및 사수역 부근에서는 어류 생태계의 서식환경에 크게 도움이 되는 작은 만의 형태가 되도록 적절한 요철 형상을 검토한다.

(5) 여유 있는 홍수소통 단면적인 경우 저수호안도 완경사화를 도모하여 수변식생의 다양화를 창출한다.

(6) 저수로의 사행화에 따른 웅덩이의 형성으로 비탈멈춤공에 안전상 문제를 야기시킬 수 있으므로 저수로의 비탈멈춤공의 깊이를 충분히 고려한다.

4)  환경정비공

(1) 하도내에 생태기능 증진 또는 개선을 위한 여울, 징검다리, 자연정화시설, 수제 등과 같은 시설을 검토하여야 한다.

(2) 시민들의 이용에 따른 안내표지판 설치를 설계하여야 한다.

(3) 하천에 연결된 토구, 차집관거 우수토실등 하수관거로 인하여 하천 이용시민에게 악취, 심미적인 영향이 최소화 될 수 있도록 기존 하수도 시설물 정비 계획을 실시설계토록 하여야 한다

5)  식재설계

(1) 경관적으로 우수하고 바람직한 생태적 천이를 도모하고, 지속 가능한 녹지 기능을 유지할 수 있도록 가능한 한 자생식물종 재료를 선정한다.

(2) 식물식재는 계절별 특성을 느낄 수 있어야 하므로 식물종별로 질감과 생태적 특성, 식물의 형태와 색채를 고려 시각적 효과가 극대화될 수 있도록 설계한다.

(3) 식재 설계시 초화류와 수종별로 적합한 식재 밀도와 간격을 유지하여 조화롭게 식재한다.

(4) 저수로 식재 수목의 경우 세굴방지 대책을 수립한다.

(5) 식물종 선정은 식재지의 수변환경조건에 잘 적응하며 홍수시 침수 이후에도 생육이 가능하고, 물 흐름에 방해가 적어야 하며 생태적 특성에 따른 생물서식 기능이 우수한 종을 선정한다.

(6) 수질정화 기능이 있는 침수식물과 정수식물의 도입을 검토하여야 한다.

6) 하천변 초지군락 조성

(1) 하천변 습지식생의 구조를 고려하여 분포역에 의한 식생유형 구분 후 기존의 양호한 하천변 식생은 보존하고, 식생이 훼손된 지역은 식생복원계획을 수립하여야 한다.

(2) 하천에 자생하는 식물종 위주로 식생구조를 구성하여야 한다.

(3)수제부에는 유수, 침수에 적응할 수 있는 하천 식물종을 도입하여야 한다.

(4) 저수로 하단부는 기존 저수호안의 치수적 안정성을 저해하지 않으면서 생태적 재생이 가능하고, 수류에 따른 퇴적 특성을 고려한 식생호안의 도입을 검토하여야 한다.

(5) 수중․둔치 생태계를 고려한 계획을 수립하여 수중․수변 및 둔치 생태계의 연계성 회복을 도모하여야 한다.

(6) 수류의 영향이 적은 퇴적구간에는 갈대, 줄 등의 습생식물을 식재하여 수생식물 군락 형성을 유도하여야 한다.

(7) 다공질의 친수호안에 식물을 식재하여, 어류서식처를 제공하는 계획을 검토하여야 한다.

7) 하천환경 유지관리계획

(1) 하천환경정비 후 하천에서 이․치수 기능과 조화를 이루면서 하천의 환경적 기능을 확보하고, 보전해 나가기 위한 하천환경관리계획을 수립한다.

(2) 이용시민의 편리 및 학습효과 도모를 위하여 안내판, 수목표찰 등의 안내시설을 설치하며, 설치수량은 이용공간에 따른 이용자수를 예상하여 결정한다.

(3) 본 사업시행시 계획된 시설물에 대해서는 공사 후 유지관리를 위한 방안을 수립하고, 보고서에 상세히 수록하여 하천관리자로 하여금 활용할 수 있도록 하여야 한다.

3.18 유지용수공

1) 공간수량확보계획 수립

(1) 유역내 토지이용, 물이용 전망 등을 예측한 후 하천의 수량, 수질 및 취․배수현황을 파악하고, 기상 및 토질분석을 통하여 손실량을 산정하여 목표유량을 설정하여야 한다.

(2) 목표유량 설정후 건천화 원인을 분석하고 그에 따른 적합한 유량확보방안을 수립함으로서 하천 본래의 기능을 회복할 수 있도록 하여야한다.

(3) 수환경은 필요시 관리유량 확보를 위한 수량 확보계획과 수질 개선계획으로 구분하여 계획하여야 한다.

(4) 수질 개선계획은 가급적 인위적 개선계획은 배제하고, 자연재료에 의한 수질개선이 가능하도록 하여야 하며, 하천내 자정기능을 극대화 할 수 있는 계획이 되도록 하여야 한다.

(5) 유입수의 수질개선 방안(습지, 생태원 조성 등)을 강구하여야 한다.

(6) 하천 제외지의 하수도 시설을 조사하여 하수가 하천으로 유입되지 않도록 정비계획을 수립하며, 특히 우천시 합류식하수도 월류수가 유입될 경우 CSOs 처리계획을 수립하여야 하며, 우수관거의 경우 초기우수 유입으로 인한 하천오염이 가중될 경우 초기우수 처리대책을 수립하여야 한다.

(7) 목표유량공급시 하천의 각 구간별 유속과 수심을 검토하여 목표유량의 타당성을 검증하여야 하며, 주민설명회 등을 통해 목표유량에 대한 시민들의 의견을 반영하여야 한다.

2) 유지용수 확보 시설계획

(1) 송수시설

① 송수관로노선 선정시는 공사비, 공사의 난이도, 용지확보, 유지관리 등을 종합적으로 재검토하여 가급적 직선화할 수 있도록 하고 도시계획, 도로 확포장계획, 지하매설물 설치계획, 하천 정비계획 등을 검토하여 계획의 지장이 없도록 하여야한다.

② 송수관로 구조물(각종 밸브실 등)은 기초지반의 침하 및 지반 보강대책을 검토하여야 하고 기존구조물, 하천, 연약지반 통과구간의 공법 선정시에는 기술적 타당성, 경제성, 시공성 및 관련기관의 인․허가 실태 등을 고려하여야 한다.

③ 송수관로의 토공유용계획은 가능한 한 단위구간별로 하여야 한다.

④ 송수관로의 통수능력 검토와 운영시 관로사고의 간접피해 방지를 위해 필요지점에 유량계 설치방안을 검토하여야 한다.

⑤ 송수관로구간에 있어서 지반의 고저차가 심하거나 다른 배수구역의 높은 지구에서 낮은 지구로 항상 배수하는 경우 등 수리 및 수압을 면밀히 검토하여 감압시설의설치여부를 검토하여 관로 안전대책을 제시하여야 한다.

⑥ 압송방식의 송수관로 관경은 펌프장 공사비, 관로공사비, 전력비 등의 유지관리비를 감안하여 LCC 측면에서 가장 경제적인 관경을 결정하여야 한다.

⑦ 압송방식의 송수관로의 수충격(Waterhammer) 현상 발생 여부를 검토하여 관로 및 밸브류 등의 부속시설 손상 방지를 위한 수충격 방지시설을 반영하여야 한다.

⑧ 압송관로의 종단상에서 하향 굴곡부의 하단지점에 대해서는 공사중 탁질수 배제 및 유지관리상 관내 청소 및 정체수의 배제를 목적으로 배수설비(이토관)의 설치를 검토한다

3.19 교통성검토 및 공사중 처리계획 수립

1) 과업의 목적

본 과업의 목적은 도림천 단면확장에 따른 계획대상지역의 교통현황을 조사하고, 교통환경 분석과 교통수요예측을 실시함으로서, 설계에 필요한 교통시설규모와 교통관리체계를 설정하고, 교통시설계획 및 교통시설운영계획을 수립함으로서 교통시설 및 운영관리의 효율성을 제고함으로서 해당 교통시설 이용자의 편의를 도모함에 있다.

2) 과업의 내용

◦ 과업개요파악      ◦ 교통환경분석   ◦ 기존 도로체계 검토

◦ 교통수요예측       ◦ 소요시설규모 검토 및 최적교통체계 검토

◦ 교통시설계획 및 교통시설운영계획

3) 과업의 수행지침

◦ 과업개요 파악

∙ 과업의 목적, 범위(공간적, 시간적, 내용적), 계획수립방법 등의 설정

∙ 주요시설계획 및 토지이용계획 검토

∙ 교통시설계획 검토

∙ 관련계획검토

◦ 교통환경 분석

∙ 교통량 조사

∙ 교통시설물 조사

∙ 교통소통상태 분석

∙ 교통사고 발생현황

∙ 기타 과업수행시 필요한 사항

◦ 교통수요 예측 :

∙ 대상지역에 적합한 교통수요예측

∙ 가로구간교통수요예측

∙ 교차로 교통수요예측

◦ 소요시설규모 검토 및 최적교통체계 분석 :

∙ 교통수요에 따른 용량, 서비스수준분석(LOS,V/C)

∙ 공급가능 시설규모에 따른 최적교통체계 분석

∙ 교통소통과 안전을 위한 교통안전시설(안전표지, 차선도색, 가드레일 등)을 제시

∙ 보도(최소유효폭 준수) 구축가능성 검토

∙ 교통시설계획에 따른 교차로, 가로구간 등에 대한 교통처리운영계획 수립

4) 공사 중 교통처리계획 수립

공사 중 교통처리계획은 다음 사항을 면밀히 고려하여 이용시민의 불편을 최소화 할 수 있는 계획을 수립하여야 한다.

(1) 공사중 신호체계 운영계획, 공사 시행방안별 교통운영 효과 분석과 V/C 분석 및 용량부족시 용량 증대 방안 등을 강구

(2) 지하, 지상 지장물의 이설

(3) 우회도로 조사

(4) 야간공사의 필요성 검토

(5) 현장 진‧출입을 고려한 단계별 공사일정에 따른 도로점용 변화상황과 교통소통방안 검토

(6) 교통처리계획 수립 시에는 장비의 작업동선, 자재 적치공간, 각종 환경방지시설 설치공간 등의 작업공간을 감안하여야 한다.

3.20 사후평가

1) 사업 완료 후 수위측정 장치에 의한 실강우시 수위와 해당 강우시 침수모델과의 비교검토를 통해 설계적정성 및 수위저감 효과를 계측하는 방안 등을 제시한다.

3.21 시공 및 유지관리계획

1) 예정공정표는 단계별 공사 계획에 따라 공사항목, 흐름도(FLOW CHART), 사전계획에 기초하여 A3규격으로 축소하여 제출한다.

2) 예정공정표는 『서울특별시 설계용역관리편람』에 적합하도록 작성하며, 산출근거를 전자파일 문서로 첨부한다. 이때 유지관리에 사용하는 공정관리 프로그램은 발주기관에서 사용하는 공정관리 프로그램이나 이에 호환되는 프로그램을 사용한다.

3) 준공일자는 최소 소요일수에 여유일수를 감안하여 산정하며, 이는‘발주기관’과 협의하여 결정한다.

4) 건설 후 유지관리에 필요한 유지관리시설의 종류, 점검항목 등을 검토하여 제안한다.

5) 유지관리시설은 시설물의 안전관리에 관한 특별법 규정에 따라 설계하여야 한다.

6) 교량구조물 완공 후 유지관리를 위해 점검통로 및 계측시스템 등 향후 구조물 유지관리에 필요한 시설 및 장비를 검토하여 설계에 반영하되, 점검통로 등을 설치할 때에는 교량의 전체적인 미관을 고려 설계하여야 하며, 유지관리지침을 작성한다.

(1) 점검통로, 조명 및 환기시설, 계측기기, 교좌장치부, 기타

(2) 계측에 대한 범위설정 및 구체적인 유지관리방안 제시

(3) 특수교량인 경우 교량에 미치는 바람의 영향을 측정하기 위한 풍력계 설치를 계측 항목에 추가하고 그 위치 및 개소를 도면 등에 명기토록 하여야 한다.

7) 하천유지용수 유지관리지침 작성

8) 산책로 및 자전거도로, 하천 접근로, 정수로, 호안, 하도 유지관리지침 작성

9) 조경, 벽면녹화, 벽화 등 유지관리 지침 작성

10) 전기통신분야(홍수위 예경보시스템, 음악방송, 경광등, CCTV, 조명 등) 유지관리지침 작성

11) 시공관리 계획에서는 공사중 물돌리기(상류부 하천수, 인접하수관로 하수등), 기존 하수도시설물 파손 방지, 우기시 공사용 지장물 제거등의 내용을 포함한 상세시공계획서를 작성토록 한다

12) 밀폐된 공간에서의 돌발강우에 의한 고립사고나 질식에 의한 안전사고 방지를 위한 공사계획서를 작성토록 한다.

※ 유해가스 기준 및 관련 규정은 ｢밀폐공간작업 질식재해예방 매뉴얼｣(고용노동부, 2014) 참조)

3.22 폐기물 처리

1) 철거시 발생되는 폐기물은 환경오염이 최소화 될 수 있도록 관련 폐기물관리법령을 검토하고 처리기준에 맞게 폐기물처리계획을 수립하여 설계에 반영한다.

2) 건설폐자재 활용방안을 검토하고 건설폐기물 처리시 종류별 발생량을 산정, 처리장까지의 운반비용과 반입수수료를 고려하여 처리비용을 산출한다.

3) 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제38조 및 서울특별시 순환골재 등의 활용 촉진에 관한 규정 제6조에 의한 순환골재 법적 의무사항을 검토한다.

4.0 성과품 작성 및 납품

4.1 일반사항

1) 성과품 작성기준

계약상대자는 성과품 작성시 “서울특별시 설계용역관리편람” 및 “건설공사 설계도서 작성기준”에 의한 작성기준에 따라 작성하여 발주기관 검토 후 제출하여야 한다.

2) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 하되 도면, 집계표 등을 위해 A3크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용 할 수 있다.

3) 보고서 등 성과품은 CD-ROM으로 별도 작성하고 문서는 한글, 도면은 Auto Cad File로 작성한다.

4) 기본설계 단계별 설계의 경제성 등 검토 결과를 최종 보고서에 수록하고 설계서에 반영한다.

5) 하수도관리 전산시스템 데이터로 입력될 각종 자료(관로 현황 조사자료, 유량계산서, 하수도대장도, 정비자료 등)는 즉시 하수도관리 전산시스템에 탑재되도록 작성 하여야 한다.

6) 계약 상대자는 최종 용역 보고서에 용역 손해배상 보험‧공제 증권을 수록해야 한다.

7) 기술용역 성과품 공개 및 관리 강화 방안

(1) 용역 완료시 전체 용역성과품 3부 및 CD 1부(표준포맷)를 서울도서관에 제출

(2) 용역 준공시 정보소통광장 공개현황(화면출력) 및 서울도서관에서 발급받은 제출확인서 재무부서 제출

4.2 성과품의 구성 및 내용

1) 종합보고서 작성

(1) 표    지

(2) 제 출 문(용역수행업체의 대표이사 명의)

(3) 참여기술자(명단, 생년월일, 업무내용, 업무에 실제 참여한 기간 및 서명)

(4) 목    차

(5) 위 치 도

(6) 과업의 목적

(7) 과업의 개요(내용), 과업수행 지침

(8) 조사 및 분석(측량, 지장물조사, 지반 및 지하수위조사, 수리 ․ 수문 및 배수시설조사, 구조물조사, 토취장 및 사토장조사, 용지조사, 기타조사 등)

(9) 설계기준

(10) 관련계획 검토사항

(11) 기본설계내용 검토

(12) 실시설계내용 (설계기준, 토공, 가시설, 포장, 구조물, 배수시설, 부대시설 설계, 기타)

(13) 시공 및 유지관리 시설계획(공사 예정공정표, 시공순서, 시공방법, 공사중 교통처리, 지장물 이설, 유지관리시설)

(14) 부록 (각종 조사자료,  주요 설계도면 및 협의, 지시사항, 주요자재 및 공법 선정 ․ 비교, 승인된 설계VE 제안 반영 내용 등)

(15) 기술자문회의 지적사항에 대한 반영여부와 보완내용.

(16) 설계실명화를 위해 각 시행과정에 참여한 담당자에 대하여 과업 참여기술자별 인적사항, 업무내용, 참여기간 등을 기록하되 참여기술자 주민등록번호는 공공기관의 개인정보에 관한 법률 제9조의 규정에 의거 개인정보 누출방지를 위하여 뒷자리를 암호화 처리한다.

(17) 기타 발주기관 요구 사항

2) 요약보고서 작성

(1) 표    지

(2) 제 출 문(용역수행업체의 대표이사 명의)

(3) 참여기술자(명단, 생년월일, 업무내용, 업무에 실제 참여한 기간 및 서명)

(4) 목    차

(5) 위 치 도

(6) 과업의 목적

(7) 과업의 개요(내용), 과업수행 지침

(8)~(13) 종합보고서 작성 참조하여 간략히 작성

(14) 결언

3) 지반조사 보고서 및 성과물

(1) 보고서 수록내용

지반조사 보고서는 과업내용서에 명시한 사항과 조사방법 및 결과, 조사지역의 지층분포 및 기타 설계에 필요한 자료들을 검토하여 수록한다.

① 시료 및 지질특성 지층명, 두께, 토성 및 역학적 성질, 시료의 종류, 공학적 특성 등

② 도면, 시추위치의 평면도, 시추주상도, 지질단면 등

③ 기타 각종 현장시험결과 및 성과분석자료, 조사시험결과로 얻어지는 각종 지반의 토질정수, 계획지역의 지반구성상태, 연약지반 등

④ 지반조사 날짜가 명기된 작업사진

(2) 시추주상도

「서울특별시 지반조사편람」의 표준주상도에 따라 다음사항을 명시한다.

① 시추공 번호, 시추지점 좌표 및 표고

② 분류된 지층명과 특성

③ 암석명, 색상, 풍화정도

④ 강도, 절리간격, 절리면상태, 암질표시율(RQD), 코어회수율(TCR)

⑤ 지하수위 관측치

⑥ 표준관입시험 결과의 N치

(3) 성과물

시료상자, 사진촬영앨범 등 관련 조사자료를 보고서와 함께 발주기관에 제출 한다.

4) 구조 및 수리계산서 작성

(1) 개요

(2) 구조계획도(구조물 일반도. 주요단면도)

(3) 설계조건(구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건 및 물성치, 사용PROGRAM, 설계기준 및 지침, 유역이나 배수시설의 초기 조건, 설계강우, 조도계수 등 주요 매개변수, 유출계수나 유출곡선지수, Green-Ampt 공식 등 유효강우량 산정 관련 계수나 인자, 강우-유출 변환법과 주요 매개변수, 홍수위 산정법과 적용 조건, 하도 또는 저수지 추적법과 적용 조건, 기타)

(4) 구조계산 (개요, 구조해석방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조합, 구조해석, 설계단면적, 단면응력검토, 기초허용지지력, 안정성 검토)

(5) 가시설(개요, 구조해석방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 설계단면력, 단면응력검토, 안정검토)

(6) 수리계산 (개요, 설계빈도, 강우량, 홍수량, 수위, 유속, 통수단면적, Froude 수 등 수리 특성 자료와 대상 구조물 또는 시설물에 대한 기술적 분석 자료와 해석 또는 설계한 방법 및 결과를 제시. 특히 기왕의 홍수량이나 침수위 자료 등을 이용하여 사용한 모형의 매개변수 보정과 검정을 최대한 수행)

(7) 구조계산서 및 수리계산서 작성 방법

① 입력자료의 근거, 사용공식의 출처 명시

구조계산서는 정확하고 상세하게 정리 수록하여 검토가 용이하게 작성 되어야 한다. 특히 프로그램의  입․출력 자료는 모든 Case별로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함하여야 한다. 또한 입력자료의 근거를 명시하고, 사용공식의 출처를 명시하여야 하며, 그에 대한 출력자료가 정리되어 있어야 한다.

② 프로그램 명시

각종 계산서에 사용한 전산PROGRAM과 판 번호, 발표일자 등과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을 정리 수록한다.

③ 프로그램의 승인

구조계산용 범용(SAP2000, MIDAS/CIVIL, GT-STRUDL, NASTR AN, ADINA등)이 아닌  경우에는 프로그램 사용의 적정성에 대하여 승인을 득한 후 사용한다.

수리계산용 범용(HEC-HMS, HEC-RAS, XP-SWMM)이 아닌 경우에는 프로그램 사용의 적정성에 대하여 승인을 득한 후 사용한다.

④ 구조계산서의 구성

전산 프로그램을 사용하여 구조해석을 수행한 경우 입․출력 자료는 별책 부록으로 하되,  구조계산서에는 구조해석 모델, 경계조건, 하중, 사용한 유한요소의 종류, 주요해석결과(최대․최소 단면력, 최대변위 등)를 명시하며, 출력자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 ‘발주기관’과 협의 후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

⑤ 가정값의 표기

구조계산서 주요 설계계수가 가정값인 경우 반드시 가정값임을 표시하고, 시공시 확인이 필요한 경우에는 관련 도면 및 공사시방서에 동 사항을 명기하여야 한다.

⑥ 단위의 사용

구조계산서에 사용하는 주 단위는 SI단위를 사용하고, MKS단위는 보조단위로 사용하며, 특수 단위가 필요한 경우에는‘발주기관’과 협의하여 사용한다.

5) 설계도면

(1) 설계도면에 포함될 사항

∙ 표지, 목차

∙ 위치도 및 전체계획 평면도

∙ 표준단면도, 종 평면도, 횡단면도

∙ 구조물도 및 상세도

∙ 부대시설도 및 상세도

∙ 가시설도 및 상세도

∙ 교통처리계획도 (공사중 포함)

∙ 지장물 및 현황도

(2) 설명문의 기입

설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성하여야 하며, 도면내용이 시공자가 이해하기가 어렵거나, 해석상 혼란이 발생할 소지가 있는 부분은 설명문을 기입하여야 한다.

(3) 설계방법의 표시

실시설계의 구조물 도면에는 설계방법(허용응력설계법 또는 강도설계법)에 대하여 표시하고 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요 설계조건과 시공시에 유의하여야 할 사항 등 해당 도면에 공사내용에 대한 특기사항 등을 수록하여야 한다.

(4) 표제란

도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

(5) 서명, 날인

모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 분야별책임기술자가 서명 또는 날인을 한다.

(6) 특기사항의 반영 및 발주기관의 승인

설계도면에는 주석란(Note)을 만들어 구조물 설계방법, 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요 설계조건과 시공시에 유의하여야 할 사항 등, 해당도면 공사내용에 대한 특기사항 등을 수록하되, 시공시 불가피하게 조사, 확인, 검토등을 하여야 하는 조항을 둘 경우 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 대한 비용도 반드시 설계 내역서에 반영 하도록 한다.

(7) 관련 도면의 표기

설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관련이 있는 도면명을 표기한다.

(8) 도면의 전산 작성

설계도면 작성시 CAD로 작성하고, CD-ROM에 저장시 전산데이터간 호환 가능하여야 한다.

(9) 도면의 작성기준

설계도면은 KS A0005(제도통칙)과 KS F1001(토목제도통칙) 에 따라 작성한다.

(10) 붕괴유발부재

양수펌프장과 같은 주요구조물이 생길 경우 붕괴유발부재(FCM)을 설계도면에 표시하여야 한다.

(11) 설계도면의 작성 및 제출

∙ 설계도면 우측에 관련된 구조계산서, 수리계산서 등을 부착하고  종․평면도상 구조물의 위치 및 치수등과 사용재료의 규격, 수량 등을 책임기술자 등이 설계도면 우측 하단에 범례로 정한 색으로 검토에 맞춰 형광펜으로 표시하여 작성한 설계검토도면 1부를 제출하여야 한다.

∙ 설계도면 검토 및 수정 완료후 검토자와 검토 입회자가(‘발주기관’) 설계검토 도면에 소속, 직책, 성명을 기재하고 날인한다.

<범         례>

구 분	검토내용	비고
녹 색	적정 및 수정완료
청 색	부적정
노 란 색	재검토

6) 공사시방서

(1) 공사시방서는 공사에 사용되는 각 공종별 시공방법, 자재에 대한 시방을 상세하게 수록하며 서울특별시 전문시방서 공종분류 체계에 맞게 작성하고, 자재․입찰절차․공사비․공사여건 등을 고려하여 공사조건에 적합하게 전문시방서 내용을 수정․보완하여야 하며, 필요시에는 관련 표준시방서와 참고자료를 이용하여 작성하여야 한다.

(2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항을 포함한다.

① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세 사항

② 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

③ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세 사항

④ 시공자가 작성하여야 할 시공상세도 목록

⑤ 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

⑥ 각종 검사, 기성지급, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

⑦ 주요공종별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 관한 상세한 규정

⑧ 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

⑨ 기타 주요 공사사항

(3) 공사시방서 작성시 고려사항

① 관련시방 또는 지침에 규정된 주요자재의 허용오차의 변경이 필요한 경우 이를 기재한다.

② 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 해석에 이견이 없도록 하기 위해 정확하고 완전하며 간단 명료하게 작성한다.

③ 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

④ 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

⑤ 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다

⑥ 공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

⑦ 공사 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 공사순서대로 작성한다.

⑧ ‘발주기관’의 의도를 정확히 파악하고,‘발주기관’,‘시공자’,‘감독원(건설사업관리기술자)’등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

⑨ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

⑩ 주요 설계 계수가 가정값인 경우 현장시공에 앞서 확인이 필요한 경우 공사시방서에 이러한 사실을 명시한다.

7) 설계예산서

(1) 예산서의 구성

설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 일위대가표와 단가산출서로 구분하고 단가산출서는 별책으로 작성하며 일위대가표는 분량이 많을 경우 별책으로 작성한다.

(2) 설계예산서

설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재하며 총괄내역서에는 제경비의 산출근거가 포함되어야 한다.

(3) 노임의 기준

노임의 기준은 납품 전 공사노임단가 (대한건설협회가 통계청의 승인을 얻어 발표한 조사 노임)을 기준 한다.

(4) 품셈

공사원가 계산서는 당해연도 「건설공사 표준품셈」에 의하되 추정가격이 10억원 이상인 경우 「표준시장단가」를 우선 적용한다.

(5) 유류가

유류가는 해당 지역의 거래가격으로 적용한다.

(6) 재료비

재료비는 조달청에서 조사하여 매월 가격정보지에 제재하는 가격과 기획재정부장관에 등록한 기관이 조사하여 발행한 물가정보지 등 3개 이상의 물가자료를 비교하여 산출한다.

(7) 중기손료

중기손료 작성시의 외환환율은 당해 년도 금융결재원이 외국환은행장 등에게 통보하는 기준환율(외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율)을 기준으로 하나 연초의 외환환율 기준으로 3%이상 증감이 발생할 때는 변동시점을 기준으로 적용한다.

(8) 견적서

공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주기관과 상의하여 1개 또는 2개 업체의 견적서를 기준한다.

단, 견적가가 사회통념상 상당한 차이가 있다고 판단될 때는 시장조사 등을 실시하여 설계 하여야 한다.

(9) 설계예산서 양식

설계예산서는 발주기관에서 사용하고 있는 설계서 양식에 의하여 작성한다.

(10) 설계내역서의 수록사항

① 설계서 표지

② 설계내역 총괄 (설계예산, 도급공사, 원가계산서, 총괄내역서, 공종별 내역서, 일위대가 등)

③ 설계내역서 (도급비, 관급비, 이전비, 기타)

④ 일위대가표 (단가산출근거, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리, 조견표 등)

(11) 수량산출서의 작성

수량산출서는 별책으로 작성 한다

① 각 공종별로 수량을 산출 ․ 집계하여야 한다.

② 각 공종별 단위수량은 표준품셈 적용기준에 의하여 산출하여야 한다.

③ 각 품목별 단가는 품명 규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.

9) 용지도․지장물조서 및 인허가 서류

(1) 용지도 및 용지조서 작성

① 용지도

용지도는 작성자가 확인, 날인하여야 하며, 용지도상에는 도로부지 경계선 및 중심선을 표시하고 행정구역, 지번, 지적, 축척 등을 기입하고 주요건물(가옥, 전주, 지하매설물 등)을 표시하여야 한다.

② 용지조서

용지조서에는 지번, 지적, 지목, 소유자의 주소, 성명이 표시되어야 하고, 지적에는 당초지적과 계획도로로 분할될 지적을 구분하여 작성하여야 한다.

③ 특기사항

가. 소유권 이외의 권리(저당권, 지상권, 지역권 등)가 설정되어 있거나 예고등기, 가등기 등이 설정되어 있는 경우에는 그 내용을 기입하고 공유물일 때에는 공유지분을 기입한다.

나. 지적도상의 토지중 등기가 되어 있지 않거나 토지대장에도 미등록된 토지는 소유자란에 별도 기재하여야 한다.

④ 발주기관에 제출

용지조서 작성에 사용한 토지대장, 건축물 관리대장, 지적도, 등기부등본은 성과품 납품시 함께 제출하여야 한다.

(2) 보상대상 및 지장물 조서 작성

① 조사대상

과업구간내 보상대상 및 지장물은 종류별로 상세하게 조사 기입한다.

② 대상의 범위

보상대상 하수도 및 지장물은‘발주기관’과 협의하여 그 범위 등을 조사한다.

③ 도시계획시설사업 실시계획인가 서류작성

계약상대자는 발주기관의 요구에 따라 도시계획시설사업 실시계획인가 또는 공공하수도 설치인가 등 제반 인 ․ 허가에 필요한 자료를 작성하여 제출한다.

10) 기  타

(1) 수량산출서 작성시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사표준품셈에 준한다.

(2) 도면의 크기는A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 하되 도면, 집계표 등을 위해 A3크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용 할 수 있다.

(4) 소구역별 사업우선순위를 선정하여 사업 우선순위도 작성한다.

4.3 성과품 납품

1) 성과품 납품시기

(1) 모든 성과품의 인쇄는 발주기관과 협의하되 발주기관의 방침 등에 따라 성과품의 종류, 수량 및 제작방법이 변경될 수 있다.

2) 설계심의 제출자료

납 품 목 록		수 량	비 고
․기본설계 보고서		10부
․주요 구조 및 수리계산서		10부
․지반조사 보고서		10부
․기본설계 예산서	기본설계내역서	10부
	기본단가산출서	10부
	기본수량산출서	10부
․기본설계 도면		10부
․기타 성과자료		10부

3) 최종 성과품

성 과 품 종 류		수 량	비 고
기본 및 실시설계 보고서		10부
각종 계산서		10부
유지관리 지침서		10부
공 사 시 방 서		10부
설 계 예 산 서	설계설명서	10부
	설계내역서	10부
	단가산출서	10부
수 량 산 출 서		10부
단 가 산 출 서		10부
설 계 도 면		10부
지 장 물 도		10부
지적도 및 용지도		10부	용지조서 포함
현장조사 종합 보고서 (측량조사, 지장물조사, 지하매설물조사 등)		10부	설계에 적용된 현장 조사결과 보고서 포함
지반조사 보고서		10부
성과품 CD		10장
측 량 원 도 및 야 장		1식
현황조사 사진첩		1식
지 반 조 사 자 료		1식
인허가 서류 및 도서		1식
기타 발주기관이 요구하는 자료		1식

□위치도

[단면확장]

B=8m, H=2.5m, L=1.6km

승리교

동방1교

B=8.0m