「남산 예장자락 재생사업부지내 건물지 유구 이전·복원｣

과 업 내 용 서

2017. 5.

서울특별시 공공재생과

과 업 내 용 서

1. 과업의 목적

본 과업은 서울특별시 남산 예장자락 재생사업 부지 문화재 정밀조사결과 발굴된 건물지 유구 6호 및 9호와 현대 건축물 내부 벽체에 대해 향후 건립예정 전시 공간에 이전 · 복원을 실시하여 보존하고자 함.

2. 과업의 범위

가. 과 업 명 : 남산 예장자락 재생사업 부지내 건물지유구 이전복원 용역

나. 대상구역 : 서울특별시 중구 예장동 4-1번지 일원

다. 과업기간 : 착수일로부터 ‘18.8.30일까지

․ 이전 공사 – 착수일로부터 30일

․ 복원 공사 – 복원 착수일로부터 60일(본공사 진행에 따라 변경 가능)

라. 과업대상 : 건물지유구(6호 및 9호, 면적- 약 240.86㎡)

현대 건축물 내부 벽체 (면적 – 약 17.50㎡)

3. 과업내용

가. 일반사항

- 문화재보호법령을 준수하여 이전복원한다.

- 이전복원 전 기존 발굴조사자료를 검토한다.

- 이전복원지 내에 배치할 유구는 발굴조사에서 확인된 자료를 근거로 한다.

- 이전복원 각 단계에 맞추어 그 상태를 기록하고 도면 작성과 사진촬영 등을 실시하여 자료로 남긴다.

- 이전복원 시행시 조사단체가 준수해야 할 사항은 다음과 같다

・이전복원장소에서 잘 보이는 위치에 본 허가사항을 게시

・이전복원 단계에 따른 정밀기록 보존유지

・이전복원일지를 작성・비치하되, 이전복원과정의 상세한 내용을 기록

- 이전복원 단체는 제출한 이전복원계획서에 의해 이전복원을 성실히 이행하여야 한다.

- 본 과업수행 참여자는 문화재 이전복원과 관련한 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하고 합리적이고 효율적으로 과업이 이루어지도록 하여야 한다.

- 문화재 보존처리 공사는 문화재보호법 제17조의 규정에 의하여 보존과학업 등록을 필하고, 문화재 보존처리에 많은 경험이 있는 숙련된 자로서 문화재법이 정하는 보존과학기술자와 보존과학기능자가 시행하며 유네스코 및 국제박물관회의 등에서 권고하는 보존처리 규범에 따라 처리하며 원형 보존하는 것을 원칙으로 한다.

- 보존처리, 균열 및 박리, 박락부의 수지 접한 및 충전은 필요한 경우 문화재보존과학의 전공교수나 관계전문가의 자문 및 지도를 받아 보존처리 하도록 하고 도급자가 직접 시공하는 것을 원칙으로 한다.

- 사용하는 경화제 등의 재료는 문화재 수리, 복원용으로 일반화되어 있거나 문화재 수리복원용으로 공인된 것 또는 국립문화재연구소 등 관계 전문기관에서 권장하는 재료를 사용한다.

- 원형보존 전반에 대하여 필요시 발굴조사 관계자와 협의하여 시행한다.

- 유구 복원시 복원장소 설계자와 운영주체 등 관계자와 협의하여 시행한다.

- 다음의 경우에는 발주부서와 협의하여 과업기간 또는 설계내역을 변경할 수 있다.

□ 천재지변 및 기타 불가항력으로 인해 과업수행에 차질이 있을 때

□ 발주부서 방침에 따라 과업수행에 변경이 있을 경우

□ 발주기관의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때

□ 관계기관의 협의 및 검토가 발주청의 사유로 지연되었을 때

□ 기타 발주부서와 과업수행자가 필요하다고 인정할 때

나. 유구 이전

1) 사전조사

보존처리 공사 전 반드시 사전조사를 통해 현황을 면밀히 파악하고 그에 합당한 시공준비를 하도록 한다. 자세한 관찰과 정확한 손상부위 및 오염상태 등을 기록하고 사진촬영을 하여 작업의 순서와 처리 범위를 결정하고 임상실험을 통한 구체적인 적용방법을 선택하여야 한다.

① 사진촬영

대상지에 대한 잔존상태(무너짐, 균열, 부재배열 등)를 전경 및 세부사진을 촬영하여 유구의 특이사항에 대해 사진촬영을 실시한다.

② 기록물 작성

처리전 대상지의 상태 및 부재들의 상태를 확인 후 기록카드를 작성하고 복원을 위하여 부재들의 구조나 상태 등을 파악하고 기록한다.

2) 정밀실측

대상지 전체 및 유구의 치수, 면적, 체적 위치 등에 대한 정확한 상태를 기록 후, 부재별 좌표를 얻어 레벨을 확인할 수 있도록 실측도면을 제작한다.

3) 부재별 고유번호 부여

유구 표면의 흙 등 이물질을 제거한 후, 복원시 부재를 정확한 위치에 찾아 넣을 수 있도록 부재별 고유번호를 부여하고, 벽과 바닥 부재에 수평레벨을 표시한다. 부재의 고유번호 부여시 사북방위를 포함한다.

4) 유구 해체

이전 · 복원 대상 유구에 각각의 일련번호 기입, 수평 레벨표시 등 사진촬영을 실시하고 도면과 사진에도 같은 일련번호, 레벨을 기입하고 상부에서 하부로 운송이 용이한 중량으로 분리 및 해체한 후 수습을 하도록 한다. 이때 각 부재간에 정확한 위치를 동일지점에 표시하여 복원작업 과정에서 문제가 없도록 한다.

5) 부재별 포장

분리된 유구는 구획별로 충진제(우레탄, 에어캡 등)로 포장하여 훼손을 사전 방지하고, 항공마대 등 포장재에 담아 파렛트에 고정하여 운송 중 훼손 방지에 용이하도록 한다.

6) 대상지 바닥표면 FRP 전사

대상지의 바닥면 FRP 작업을 위하여 바닥 표면을 정리한 후 토층경화제를 이용하여 저농도에서 고농도로 수회 도포한다. 경화제가 완전히 경화된 후 표면 이형제로 한지를 여러겹 배접한 후 에폭시계 수지를 도포한 후 경화한다.

1차 도포 후 완전 경화되면 거즈를 이용하여 2차로 수지를 도포한다. 2차 도포면 완전 경화 후 유리섬유를 이용하여 3차로 수지를 도포한다.

유리섬유는 크기에 맞게 잘라서 사용하며 요철부분에 밀착하도록 가볍게 솔로 두드려 눌러준다. 에폭시 수지가 완전히 경화된 후 이동 및 보관이 용이하도록 적당한 크기로 유구를 분할한 후 넘버링을 한다. 그라인더를 이용하여 절단 후 토층에서 분리하여 보관한다.

7) 벽체 이전

대상 벽체를 파악한 후 우레탄 폼등 완충제를 사용하여 포장하고, 절단부를 컷팅하여 이전한다. 절단부의 컷팅은 벽체에 물리적으로 최소한의 영향을 줄수 있는 방법을 선정하여 적용한다.

8) 보관고 운송

개체별 포장된 유구는 서로 교차되거나 접촉되지 않도록 주의하여 보관고로 운송한다.

다. 보관시설물 설치 및 보관

과업대상의 유구는 이전, 복원 대상자의 책임하에 복원 시까지 보관 및 관리하도록 한다. 보관장소는 보안장치가 되어있는 장소로 하고 외부인의 출입을 통제하여 유구의 부재가 분실 또는 훼손되지 않도록 관리한다.

라. 유구 복원

1) 복원지 사전조사

복원은 관계전문가(설계자 및 운영주체 등)의 자문을 토대로 복원토록 한다. 필요시 복원은 사전에 자문회의를 거쳐 설계도면 등 자료를 계획에 반영하도록 한다.

2) 부재별 원형복원

복원은 유구 해체 전에 실시한 예비조사(실측도면, 레벨, 방안틀 사진, 일련번호 등) 자료를 바탕으로 유구의 경사도 등을 고려하여 작업하고, 분리 해체된 부재들은 각각 부여한 일련번호에 따라 교란이 일어나지 않도록 주의하여 복원작업을 실시한다.

3) 표면 강화처리 및 표토층 제현

복원시 발굴 당시의 주변 환경과 유사하도록 채취해 놓은 흙을 사용하여 보강 조치하도록 하여 외견상 지장을 초래하지 않도록 한다. 또한 필요에 따라 주변 환경에 맞도록 필요한 조치를 한다.

4) 마감처리

복원될 위치가 야외일 경우 기초공사시 지하수 등의 수분을 차단할 수 있도록 방수처리하여 수분의 동결 및 융해에 의한 붕괴와 곰팡이와 이끼의 발생에 대비한다.

5) 벽체 복원

전시될 공간에 이전된 벽체틀을 배치하고 지면과 측부의 접합부를 에폭시수지등으로 접합한다. 구조적으로 필요한 경우 철근과 몰탈등을 사용하여 접합한다. 접합부의 표면은 원 벽체와 이질감이 없도록 마감처리하고, 이전시 포장하였던 우레탄 폼등을 벽체 훼손없이 제거하여 복원한다.

마. 이전 · 복원 결과보고서 작성

이전 · 복원 결과보고서는 발굴조사에서 확인된 유적의 전반적인 특징을 중심으로 작성하며, 작업공정에 따라 진행된 모든 사항을 기술하여 향후 보존, 관리에 활용될 수 있도록 한다.

4. 과업의 일반사항

가. 발주부서와 과업수행자는 본 과업의 목적을 성공적으로 달성하기 위하여 계약의 제반사항과 과업지시서의 내용을 신의에 따라 성실하게 준수하여야 하며, 기타 기재되지 아니한 사항은 발주부서와 협의하여 시행한다.

나. 본 과업은 과업지시서 및 과업수행자가 발주부서에 제출한 수행계획서 및 제 법규 등 관련규정에 따라 수행하여야 한다.

다. 과업을 수행함에 있어 발주부서 협의 없이 처리한 사항에 관한 법적 책임은 과업수행자에게 있다.

라. 과업수행자는 과업을 수행하기 위하여 행하는 제반작업 수행시 관련법규에 의한 안전관리에 최선을 다하여야 하며, 과업수행자의 과실로 인하여 작업 도중 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

5. 과업의 착수와 추진

가. 과업수행자는 계약 체결일로부터 10일 이내에 착수해야 한다.

나. 과업수행자는 아래의 소정의 서류를 갖추어 발주부서에 착수서류를 제출 하여야 한다.

- 착수계 및 내역서 각 1부

- 과업책임자 및 보안관리자 선임계 1부

- 과업수행계획서(수행방법 및 공정계획, 추진일정표 등 포함) 1부

- 과업참여자 명단 및 보안유지각서 각 1부

다. 과업수행을 위한 각종 법률의 인,허가, 출입에 필요한 절차 등은 과업수행자가 담당하며, 행정상 필요한 사항에 대하여는 발주부서가 협조하여 처리한다.

라. 과업수행자는 계약 체결 후 과업 완료 시까지 과업참여자를 임의로 교체할 수 없으나 원활한 과업수행을 위하여 필요에 따라 발주부서와 과업수행자가 협의하여 과업참여자를 변경, 추가할 수 있다.

6. 성과품 제출

가. 성과품은 아래와 같다.

연번	성 과 품	규 격	형 식	수 량
①	결과보고서	A4 사이즈	도서 인쇄본	20부
②	결과보고서 전산파일	PDF, HWP	CD	5부
③	과업수행에 따른 각종 자료	DWG, PDF, HWP
④	사진첩(사진목록 포함)	JPG, HWP

나. 과업수행자는 결과보고서 작성 시, 발주부서의 검토의견을 반영하여 보고서를 작성한다.

7. 소요경비 정산

이 과업을 수행하는 단체는 소요경비 정산서 제출시 실제 사용된 비용에 대한 객관적인 자료를 제출하여야 한다.

8. 과업의 완료

가. 과업수행자는 과업기간 내에 모든 과업을 마치는 것을 원칙으로 한다.

나. 과업수행이 완료되면 과업수행자는 성과품과 준공을 위한 서류를 갖추어 발주부서에 제출해야 한다.

- 준공계 1부

- 준공내역서 1부

- 준공성과품(보고서 및 사진첩 등)

다. 과업수행자는 과업 수행 중 뿐만 아니라 과업이 완료된 후라도 발주처가 협의가 필요시 관련 업무에 대하여 적극 협조하여야 한다.

9. 보안대책

가. 과업수행자는 과업에 대하여 보안을 준수하여야 하며, 각 과업수행자 날인의 보안각서를 제출한다.

나. 과업수행자는 과업수행에 사용되는 각종 자료들이 다른 용도로 사용되거나 분실‧유출되지 않도록 하여야 하며, 현황도면 및 제반 성과품 등을 발주부서 허락없이 임의로 소유 또는 복사하거나 외부로 유출시켜서는 안되며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 과업수행자가 진다.

다. 발주부서의 승인을 거쳐 과업참여자를 교체한 경우, 인수인계를 철저히 하여 관련자료의 외부 유출을 방지해야 하고, 교체된 참여자의 보안각서를 반드시 제출하여야 한다.

마. 본 과업의 성과품 및 관련 자료는 납품물량 이외의 추가 발행을 금지하고 불량․파지 등은 파기하여야 한다.

10. 기타사항

가. 계약서 및 과업내용서에 명시되지 아니한 사항이나 자구의 해석 등 과업수행 중 의문사항 또는 문제점이 있는 경우 발주부서와 협의하여 시행한다.

나. 본 용역완료 후에라도 발주청의 요구가 있을 경우 수급인은 의견 등 필요한 자료를 제출하여야 한다.

다. 보고 등 발주청 및 문화재청의 요구가 있을시 중간보고서 등을 작성 제출하여야 한다.

라. 다음사항에 해당하는 사례가 발생하였을 경우 발주부서의 판단에 따라 계약을 해지할 수 있으며, 과업수행자는 이에 대하여 이의를 제기하거나 보상을 청구할 수 없다.

- 과업내용서에 부합하지 않게 과업을 수행하였거나 계약내용에 대한 발주 부서의 지시에 응하지 않았을 때

- 과업수행이 부진하여 기간 내에 과업 완료할 수 없다고 판단될 때

- 민원발생 등으로 인해 과업의 계속 추진이 불가능하다고 판단될 경우