과 업 내 용 서

<서울형 하수악취 저감 기본계획 연구 용역>

2019. 8.

물순환안전국

(물재생계획과)

Ⅰ		과 업 개 요

1

Ⅱ		과 업 내 용

2

Ⅲ		과업수행 단계

4

Ⅳ		과업수행 지침

6

Ⅴ		보 안 대 책

9

Ⅵ		성 과 품

10

Ⅶ		특 기 사 항

11

과 업 내 용 서

Ⅰ		과 업 개 요

1. 과 업 명 : 서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 연구 용역

2. 과업기간 : 착수일로부터 20개월

3. 계약방법 : 협상에 의한 계약(제한경쟁, 장기계속계약)

4. 과업의 목적

○ 체계적, 목표관리 가능한 하수악취 저감 방안 수립

○ 시민의 니즈에 부합한 공간 조성으로 쾌적한 서울거리 조성

○ 맞춤형 하수악취 저감 방법 개발을 통한 악취 저감기술 향상 및 효율 극대화

○ 서울시만의 악취 저감 및 관리기술 개발

5. 과업의 필요성

○ 하수 악취 관리는 '16년 하수도법 시행규칙 개정을 통해 200인조 이상 강제배출형 부패식 정화조에 악취저감장치를 설치하여 정화조 및 공공하수도시설물의 상당한 악취저감 효과를 가져왔음.

○ 하지만 아직도 관리방안이 마련되어 있지 않은 자연유하식, 비부패식 또는 소규모 정화조 등에서의 악취가 상당하고, 하수관로 등에서의 악취도 잔존하고 있는 상황에서는 시설 중심의 열거식 사업만으로는 하수관로 악취저감 2단계 목표가 요원한 실정임.

○ 따라서 현재의 시설 중심 사업을 서울시 전체의 공간 특성(중요도)에 따른 위계적 악취저감 및 관리방법으로 전환하고, 법제화(강제화) 되어 있지 않은 정화조의 인조, 형식, 그리고 배출방식에 따른 맞춤형 저감방안을 수립하며, 하수관로에서의 악취도 최소화시킬 뿐만 아니라, 의무화 되어 있는 200인조 이상 펌핑형 부패식 정화조 관리방법 등을 포함한 서울형 악취저감 기본계획 수립을 위한 용역을 시행하고자 함.

6. 과업의 범위

○ 공간적 범위 : 전 자치구(605.41㎢)

○ 시간적 범위 : 착수일 ~ 20개월간

○ 내용적 범위

- 하수도시설물 악취조사(악취 측정, 자료수집 및 현장조사)

- 서울시 전역 공간별(중요도) 등급 분류(등급별 악취지도 작성)

- 등급별 하수 악취 목표 기준 설정(기상 H2S기준)

- 등급별 하수도시설물 악취 저감 방안 강구 및 신공법 개발

- 법정 의무시설설치 정화조 외 정화조에 대한 유형별 악취저감 방법 개발    및 법제화 방안

- 정화조 공기공급장치의 적정 운용을 위한 감시인력 제도화 방안

- 시범사업 진행 후 악취측정

- 연차별 투자비용 산정

Ⅱ		과 업 내 용

1. 일반적인 사항

○ 정부가 제정 공포한 관계 적용 법률 및 기준, 발주기관의 관련 규정 및 과업내용에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이 과업을 수행하여야 한다.

○ 과업내용에 기술되지 아니한 사항이라도 이 용역을 추진하는데 있어 관계법령에 따라 시행하여야 할 사항 등 필수적이라고 판단되는 사항은 모두 이 용역의 과업범위에 포함된 것으로 한다. 또한 본 과업을 수행함에 있어 제반관련 규정을 반드시 숙지하여 과업수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

○ 하수악취 현황 조사(악취측정 및 발생원, 배출원 조사)에 따른 자료를 바탕으로 하수 악취 관리등급 선정, 등급별 목표 설정, 하수악취 저감 방법, 등급별 적용 및 확대 방안 등을 도출한다.

2. 기술 사항

○ 공간 중요도에 따른 하수악취 관리등급 선정

- 국내외 도심의 하수악취 저감 사례조사

- 25개 자치구 각 3개 구역, 구역당 30개소(총 2,250개소) 하수악취 현황 조사         (조사 구역과 지점은 발주자와 협의하되 발주자 추전지역을 우선한다.)

- 2018년 서울시 자치구 동별 악취민원 현황 조사

- 서울시 하수관리 전산시스템을 활용한 하수관로 현황 조사

- 등급별 하수 악취 시각화(지도 작성 등)

※ 예 : Ⅰ등급(도시 명소 등), Ⅱ등급(주거밀집 등), Ⅲ등급(일반구역) 등 3등급 혹은                   4등급으로 분류하여 악취 지도에 색상별 명시

- 맨홀 악취시료 채취시 영향을 줄 수 있는 인근 200인조 이상 정화조의 현황,         공기공급장치 유무 및 가동 상태, 관로퇴적 상태 등의 빅데이터 자료 별도 수집 제출

○ 등급별 목표 설정

- 분류된 등급에 악취관리 목표 설정

· 목표는 기상 황화수소농도(H2S)를 기준으로 등급에 따른 수준 목표를            달리 설정

※ 예 : Ⅰ등급 - 높은 수준(5㎎/ℓ), Ⅲ등급 – 일반구역(10㎎/ℓ)

· 목표 관리를 위한 측정지점을 확정하여 현장에 불가변적 방법으로 표시

‧ 등급별 최소 측정 지점 개수 산정

※ 발생원 및 배출원에 따라 측정 개수는 발주자와 조정 가능

○ (등급별 목표 달성을 위한) 맞춤형 악취저감 방법 강구

- 등급별 맞춤형 하수악취 저감 방법 마련

· 등급별 차별화된 일반적 하수악취 저감 방법 마련

· 목표 수준을 초과하는 각 구역별 강화된 맞춤형 하수악취 저감 방법 마련

- 법정 시설설치 의무대상 정화조 외 정화조에 대한 악취 저감 방법 제시

· 현장 여건에 맞는 기존에 제시된 공기공급장치, 약품, 스프레이 등 적용 방법 강구

· 탈취기, 활성탄 등을 활용한 신공법 적극 개발 및 적용

· 정화조 유형에 따른 악취저감 공법 제시(200인조 이상 부패식 자연유하식, 200인조 이상 비부패식 자연유하방식, 200인조 이상 비부패식 강제배출방식, 200인조 이하 정화조)

※ 법정 시설설치 의무대상 정화조 : 200인조 이상 부패식 강제배출식

- 배출원별 악취저감을 위한 사업의 맞춤형 방법 제시

‧ 현장(하수관로, 맨홀 등) 특성에 맞는 악취차단장치(낙차완화, 부관 및 인버트, 스프레이 시설, 빗물받이 등) 제시

- 빌딩 배수조 악취 저감 방법 제시

‧ 악취 현황 조사시 인근 빌딩 배수조 악취 조사

‧ 악취저감 방법과 설치 및 관리 기준 방안 마련

○ 민간시설 정화조 악취저감시설(공기공급장치)의 유지관리 방안 제시

- 정화조 전문지원단 제도화 검토

· 한국상하수도협회 등 단체에 교육 및 운영 등 위탁관리 방안 마련

· 제도화 시 적정 운영비용 및 인원 산정

○ 시범사업 진행

- 등급별 공간 선정 후 목표 달성 방안을 검증하기 시범사업 시행

· 모든 하수악취 등급이 포함된 자치구 선정

· 자치구와 협업으로 사업 진행(시범사업 중 시설설치는 별도 예산)

· 사업진행 후 악취측정

○ 연차별 투자계획 수립

- 등급별 목표 달성 및 유지관리를 위한 비용 산출

· 단기 5년 내 매해 투자비용 산출

· 중기 5년 이후 총 투자비용 산출

Ⅲ		과업수행 단계

과업수행은 계약상대자(수급자)가 아래 절차를 기준으로 작성하여 발주기관(도급자, 서울시)의 승인을 받은 ‘과업수행계획서’에 의한다.

1. 착수보고 : 계약일로부터 30일 이내

○ 과업수행 방향 및 방법 : 사업의 추진체계 및 추진 일정 등

○ 인력투입 계획서(분야별, 직능별 자격기준과 인원 수) 및 조직 편성표

○ 과업수행 세부계획서(예정공정표)

○ 기타 과업수행에 필요한 사항

2. 중간보고 : 용역 공정별 보고자료 작성 제출

○ 보고주기 : 4회(계약 후 6개월, 10개월, 14개월, 18개월 경과 시), 발주기관                   요청 시 수시 보고

○ 자문위원 : 서울시와 합의된 전문가 3명 이상으로 구성

○ 보고내용

- 과업 추진사항 및 공정 현황

- 업무관련 회의 및 서울시 지시사항 처리결과

- 다음 과업 수행 계획

- 과업수행상 문제점 및 대책

3. 최종보고회 : 계약만료 14일전

○ 용역 결과와 중간보고회 시 반영된 자문결과 종합 보고

○ 최종보고회 5일 전까지 최종보고서(안), 요약보고서(안)등 관련 자료 제출

○ 최종보고회 시에는 전문가 등이 참석한 가운데 요약보고서, 빔 프로젝트 등을 이용하여 용역 책임기술자가 연구결과를 종합 보고

※ 발주기관 요청 시, 개발된 지표, 시각화 자료 등에 대한 시민의견 수렴 절차 추진

4. 최종성과품 제출 : 계약만료일 전

5. 과업수행 공정표 : 착수일로부터 20개월까지

구 분		누적 개월
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
하수악취 관리등급 선정	국내외 하수악취 저감 사례조사
	등급 선정을 위한 악취측정 및 원인 시설물 조사
	서울특별시 하수도관리 전산시스템을 활용한 악취조사지점 주변 하수관로 조사
	관리등급 선정 및 시각화(지도 등)
등급별 목표 설정	등급별 목표 농도 설정
	동일성 유지를 위한 측정 지점 표시
	목표 관리를 위한 측정 지점 선정
맞춤형 악취저감 방법 강구	등급별 목표 달성을 위한 악취저감방법 연구
	200인조 부패식 강제펌핑형 정화조 외 악취저감방법 및 제도화 방법 연구
	배출원별 맞춤 악취저감사업 연구
	정화조 악취저감장치 유지관리 방안연구
등급별 적용	시범사업 진행
	연차별 소요예산 산출
보고서	보고서 작성

※ 발주자와 계약당사자는 상호 협의하여 과업범위 기간 내에서 각 공정 일정을 조정할 수 있다.

Ⅳ		과업수행 지침

1. 일반 지침

○ 본 과업은 계약체결 즉시 착수하여야 하며 착수 전 본 과업 내용서에 근거한 세부 ‘과업수행계획서’를 작성 제출하여 발주자의 승인을 받아야 한다.

○ ‘과업수행계획서’에는 현장대리인계, 과업참여자 명단, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 첨부 제출하고, 과업 착수 시에는 착수신고서를 제출하여야 한다.

○ 과업참여자 및 자문위원 변경 시에는 발주자와 협의하여 정하도록 한다.

○ 과업의 원활한 수행을 위하여 과업단계별 분야별 전문가로 구성된 자문위원회 또는 관련기관 협의회를 구성･운영할 수 있으며, 과업내용과 관련된 각계 전문가의 의견을 광범위하게 수렴하여야 한다.

○ ‘과업수행계획서’에 따라 실시하는 중간보고회 및 최종보고회는 책임연구원 또는 책임기술자가 직접 보고한다.

○ 기본계획 범위결정, 단계별 계획 등 과업수행 기본방향과 내용에 대해서는 발주기관, 분야별 전문가, 계약상대자가 참여하는 회의를 개최하여 수정, 보완, 의견제시 등으로 과업의 수준을 높이고 원활한 과업수행을 도모하며, 세부 추진일정 및 현지 조사계획 등에 대하여는 업무담당자와 사전 긴밀히 협의하여 추진한다.

○ 본 과업내용서에 규정되지 아니한 사항은 관계 법규 및 지침, 관련 지침서에 의거 업무담당자와 협의하여 수행하거나 결정한다.

○ 본 과업수행에 사용되는 통계데이터 및 자료는 그 근거가 명확하고 객관적으로 인정되는 자료를 적용하여야 하며, 사용된 자료의 출처를 명확히 기재하여야 한다.

○ 본 과업수행 중 여건변동 등으로 변동이 있을 때에는 발주자와 협의하여야 하며, 과업범위 또는 내용의 변경, 기타 발주자가 필요하다고 인정할 때에는 과업을 변경할 수 있다.

○ 본 과업은 예정공정표와 대비하여 매월 말 진도를 다음달 10일까지 보고 하여야 한다.

○ 발주기관은 본 과업수행에 부적격하다고 판단되는 과업참여자에 대하여 현장대리인에게 교체를 요구할 수 있으며, 현장대리인은 요구받은 즉시 과업참여자를 교체하여야 한다.

○ 최종보고서는 인쇄 전 그 내용에 대하여 발주자와 협의하여야 한다.

○ 자문회의 자료 등 각종 회의자료는 계약상대자가 작성하여야 하며, 회의록은 참석자 서명을 받아야 한다.

○ 본 과업내용서 해석에 의견차가 있을 때에는 발주자의 의견에 따른다.

○ 제출된 세부 ‘과업수행계획서’에서의 공정에 비해 실적공정이 지연될 때는 부진사유와 만회대책 및 만회공정표를 작성 제출하도록 한다.

○ 용역감독으로부터 부진공정에 대한 조치지시를 받은 경우에는 즉시 과업수행의 정상화를 위한 만회대책 및 만회공정을 수립하여 제출하여야 한다.

○ 시설을 설치하는 방안을 제시할 때는 초기투자비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 방법을 개발한다.

○ 과업변경은 추가업무 및 특별업무의 수행, 용역공정계획의 변경, 특정 용역항목의 삭제 또는 감소가 발생 시 실시한다.

○ 효과적인 과업수행을 위하여 업무수행 능력이 입증된 분야별 책임자로 연구팀을 구성하여 과제임무를 수행한다.

2. 기술 지침

○ 본 용역은 서울형 하수악취 저감 기본계획 연구에 관한 것으로써, 서울시 전역을       공간 중요도별 등급을 나누어 시각화 하고, 등급별 하수악취 목표 농도를 설       정하여 이를 달성하기 위한 기술을 개발하는 것이다.

○ 목표 농도는 공간 중요도에 따라 차별적으로 설정하고 현재의 악취저감기술로 달성 가능한 것이어야 하며 농도는 공간별 주민들의 기대에 부응하는 농도여야 한다.(필요시 설문조사 실시)

○ 적용된 하수악취 저감 기술, 새로이 개발된 기술은 다수의 기관에서 활용 가능해야 하며, 개발 및 적용, 유지관리비가 최소화 될 수 있는 기술이어야 한다.

○ 서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 연구용역에 핵심 과업

- 자치구 선정 악취관리 중점대상 지역, 서울특별시 하수도관리 전산시스템, 서울특별시 동별 하수냄새 민원 발생건수 현황도를 참조하여 직접 측정한 하수악취 농도를 기초로 공간별 하수악취 등급을 선정하고, 선정내용에 대한 검토 후(문제점, 개선대책 등) 그 결과를 보고한다.

- 공간(구역)별 도심에 최적화된 하수악취 농도 목표를 선정하고 이에 대한 측정방법 및 지점, 최소측정 개수 등을 도출한다.

- 목표 농도를 초과하는 지점에 대해 악취저감 방법을 조사하여 작성 보고         한다.

- 전문가 자문회의를 통하여 최종적인 공간 등급, 목표 농도, 저감방법을           선정한다.

○ 하수악취 저감 방법 최적 방안 도출

- 서울시에서 악취 저감사업으로 활용될 때, 초기 설치비용 및 유지관리비 등 경제성을 분석하여 그 총액을 제시해야 한다.

○ 단계별 추진계획

- 단계별 진행상황을 진도보고 하여야 한다.

- 최종보고 내용에는 단계별 세부지침의 내용을 보고하도록 한다.

○ 과업목표 검증

- 모든 공간별 등급이 포함한 자치구를 선정하여 악취저감사업을 진행하고 목표 농도를 달성할 수 있는지를 검증해야 한다.

- 시범사업을 하기 전 발주부서와 사전 협의하고 협의를 통해 측정일시, 장소, 횟수 등을 결정한다.

Ⅴ		보 안 대 책

○ 본 과업은 우리시의 주요 업무수행 내용이 포함된 과업으로, 의사결정 과정에 있는 사항의 보안관리를 철저히 하여야 한다.

○ 계약상대자는 보안대책을 수립하여 과업수행 대표자(현장대리인)와 참여자 및 관련된 각 개인별 보안각서와 함께 제출하여야 한다.

○ 연구용역 과정에서 취득한 중요한 대외비 과업폐기물은 소각 또는 문서세단기 처리를 하여야 하며 그 처리내용(일시, 장소, 방법, 처리자) 및 목록을 제출하여야 한다.

○ 과업수행 장소는 필요 시 ‘제한구역’으로 지정하고, 용역수행과 관련 없는 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

○ 용역수행 시 작성한 자료와 성과품에 대하여는 업무담당자와 협의하여 내용의 중요성에 따라 대외비 및 일반자료로 분류하여 보관하고, 정･부 관리 책임자를 지정･보고 하여야 한다.

○ 용역수행 시 대외비 이상의 자료는 반드시 업무와 직접 관계가 있는 자에 한하여 열람할 수 있도록 하여야 하며, 열람 기록전을 첨부하여야 한다.

○ 과업의 내용상 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 성과물을 작성시에는 참여인원은 최소화하고, 업무일지를 비치 작업내용을 기록하여야 한다.

○ 용역수행 과정에서 개최하는 각종 회의에서 본 과업내용이 포함될 경우에는 배포선을 감안하여 필요한 수량만을 생산하고, 회의 종료 후 회수 파기하여야 한다.

○ 대외비 이상으로 분류된 자료 및 성과물을 발간하고자 할 때, 발간업체 관련자의 보안관리는 계약상대자의 보안관리 기준에 따른다.

○ 과업수행 중 또는 수행 후 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약상대자가 진다.

Ⅵ		성 과 품

1. 제출내용

구분	성과품 및 제출자료 종류	규격	수량	비고
성과품 (최종)	기술용역 보고서	500p 내외	50부	A4, 210㎜×297㎜ 경인쇄
	기술용역 요약보고서	100p 내외	50부	〃
	기술용역보고서(CD)		3set
보고서 및 자료	과업수행세부계획서 및 착수신고서	30p 내외	3부	착수 전
	보안대책 관련 자료		3부	착수 전
	중간보고서	30p 내외	30부	자문회의 개최에 소요되는 수량
	중간평가 보고자료		1식	개최 시 지정
	최종보고서(안)		3부
	진도보고		1부	매월

2. 작성지침

○ 기술용역 보고서

- 보고서는 발주기관의 지침에 따라 한글･아라비아 숫자를 사용하는 것을 원칙으로 하며, 필요 시 영문을 사용할 수 있고 체계적으로 서술식 작성을 한다.

- 보고서의 내용은 본 연구용역 보고서 작성을 위한 기초조사, 분석, 정리내용, 관련계획과 정책의 분석내용, 기본구상과 방향, 기본계획 작성내용과 배경, 각 단계별 작업과정, 중간평가･보고 과정의 내용과 법제, 정책제도와 관련한 건의 및 개선방안 등 모든 내용을 포함한다.

- 필요한 경우 도표, 사진을 포함한다.

○ 과업수행계획서

- 개조식으로 작성하며, 도표 위주로 구성하고 필요하다고 판단되는 경우 도면을 첨부한다.

○ 중간보고서

- 개조식 작성을 원칙으로 하며, 발주기관과 협의하여 필요 시 파워포인트로 작성할 수 있다.

- 기초조사 분석, 정리, 법정계획 내용 및 도면을 포함하되 관련기관 협의와 중간평가, 보고자료 등 평가 시 활용 가능한 수준으로 수정 보완하여 작성한다.

○ 기타

- 매월 진도보고는 담당자와 협의하여 E-mail로 보고할 수 있다.

- 작성되는 모든 서류는 공공기관에서 사용하는 프로그램으로 작성하여야 하며, 보고서 또는 보고 자료와 별도로 File로 제출한다.

Ⅶ		특 기 사 항

○ 본 과업은 예산범위 내에서 기본인건비와 실소요 자재비, 연구비 등이 반영되었으며, 추가 소요 인건비 및 자재비를 포함한 모든 비용은 계약상대자가 자체비용으로 부담하며, 경미한 과업변경에 대해 발생하는 추가비용도 계약상대자가 부담하여야 하나, 중대한 과업변경에 대해서는 발주기관과 협의하여 비용 정산이 가능하다.

○ 계약상대자는 본 용역의 수행 중 수정, 변경, 검토 등에 대하여 발주자의 요구가 있을 시 이를 수용하여야 한다.

○ 과업수행과 관련하여 자문회의, 유관기관과의 업무회의 및 보고회, 설문조사 등이 필요한 때에는 발주자와 계약상대자가 협의하여 시행하며, 필요한 보고자료 등 용역 수행과 관련된 일체의 자료를 발주기관에 제출한다.

○ 발주자가 취득하고 있는 자료 중 본 용역수행에 필요하다고 생각되는 자료는 계약상대자가 요청 시 적극 협조하며, 계약상대자는 본 과업에 한하여 제공된 자료를 사용할 수 있다.

○ 본 과업이 완료된 후에라도 필요한 행정절차가 완료될 때까지 발주기관의 요구에 따라야 하며, 성과품에 대한 보완 및 추가 수록 등이 필요한 사항에 대하여는 과제수행자의 부담으로 즉시 보완하여야 한다.

○ 본 과업수행으로 인한 기술개발로 발생되는 특허･기술 등은 『국가연구개발 사업의 관리 등에 관한 규정』제20조 2항에 따라 계약상대자의 것으로 하되, 서울시 시책에 적용할 경우에는 해당기술(특허 등)을 무상으로 제공하여야 하며, 필요한 관련 자료 및 기술을 적극 제공하여야 한다.

○ 최종용역 보고 후 보완 납품된 용역결과는 서울시와 협의 후 서울시 자료실과 서울시립대 도서관, 서울연구원 자료실 등에 제공하여 많은 사람이 활용할 수 있도록 하여야 한다.

○ 본 과업 추진에 따른 과업변경 등 리스크 발생요인 예측 및 대응 등 리스크 관리계획을 수립하여 시행하여야 한다.

○ 본 과업 수행을 위한 실증시설 및 설비의 선정은 계약상대자가 하며 실증대상이 결정되면 즉시 우리시에 보고하여야 한다.

○ 개발된 시스템 설치 및 검증과 관련하여 과업수행 기간내 민원이 발생할 경우 계약상대자가 해결하여야 하며, 만일 계약상대자가 원인제공자가 되는 손해배상 등 경제적･법률적인 책임이 발생하면 계약상대자가 책임진다.

붙  임 : 기술용역 결과물 제작시 권고사항 1부.  끝.

<붙임 1>

기술용역 결과물 제작시 권고사항

Ⅰ. 자료 구성형태

- 연구보고서 구성의 형태는 아래와 같다

1. 표지

2. 표제면

3. 제출문

4. 서문

5. 요약문

6. 목차

7. 본문

8. 참고문헌

9. 색인

10. 판권기

Ⅱ. 상세설명

1. 표제면(標題面 : title page)

❍ 연구보고서 서명(書名), 저자(著者), 발행연도, 발행처

※ 다음 장에 제출문 첨부

2. 서문(preface, forward)

❍ 연구동기, 연구목적, 범위, 협조자에 대한 감사표시 등 기술(생략가능)

3. 요약문

❍ 보고서의 내용에 대한 간략하면서 정확한 표현

❍ A4용지 1페이지 정도의 양

❍ 본문에 있는 것과 동일한 전문용어 사용

4. 목차(contents)

❍ 내용, 표, 그림 등의 목차

5. 본문(text)

❍ 용  지 : A4 용지

❍ 글  자 : 본문 10 Point, 제목․소제목은 20~15 Point

❍ 글자체 : 신명 태명조

6. 참고문헌(reference)

7. 색인(Index)

8. 판권기(版權記)

❍ 보고서의 마지막 부분으로 각종 인쇄에 관한 사항이 포함됨

❍ 구성요소 : 발행부서, 인쇄처, 발행지, 발행일, 연락사항, 연구자

※ 자료납본에 관한 사항

⇒ 발간일로부터 10일 이내에 당해 책자형태 5부(요약문 포함)와 CD 1개

(종이 인쇄물 외 file 형태로 본문을 완벽하게 포함하고 있는 자료)를

제출하여야 한다.

※ 서울특별시 종합자료관운영규칙

※ 제출문 하단에 용역관리자 명시

⇒ 용역관리․책임자 : 서울시 물순환안전국장         성명 ○○○

물재생계획과장         성명 ○○○

하수악취저감팀장       성명 ○○○

담당 주무관            성명 ○○○