과  업  내  용  서

(용역명 :  쌈지공원 지하주차장 건설 타당성 조사 및 기본계획수립 용역)

2016 .  8

금천구

목                   차

제1장    총       칙

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 목적	1

3. 과업의 위치 및 개요	1

4. 과업의 범위	1

5. 과업 기간	2

6. 발주기관 및 연락처	2

7. 업무진행	2

8. 설계변경	2

9. 의무 및 보고	2

10. 일반사항	2

제2장    과업의 수행

1. 과업의 내용	5

2. 일반사항	6

3. 기본계획 자료작성	6

제3장    용역성과품 및 과업 예정공정표

1. 용역성과품	8

2. 과업 예정공정표	9

과  업  내  용  서

제 1 장  총   칙

1. 과업의 명칭

쌈지공원 지하주차장 건설 타당성 조사 및 기본계획수립 용역

2. 과업의 목적

본 과업은 금천구 독산4동 189-1번지에 위치한 쌈지공원이 노후하고 공원주변 주택가 주차여건이 열악하여 서울시 지원사업으로 공원을 리모델링하면서  지하주차장을 확보하여 주택가 주차난을 해소하고 지상공원은 어린이와 주민들의 휴식공간으로 재조성하여 토지의 이용 효율성을 높이고 이면도로 통행권 확보 및 소방도로의 기능유지로 지역주민들의 생활편익을 도모하고자 도시공원 자문전 타당성 및 기본계획을 실시하는 용역임

3. 과업의 위치 및 개요

가. 위 치 : 서울특별시 금천구 독산4동 189-1번지

쌈지공원 (982.0㎡)

나. 개 요 : 공원 및 주차장 설치 타당성 및 기본계획, 도시공원자문회의, 도시계획시설결정, 도시공원자문회의 완료시 투융자심사 등

계획주차면수 50면 내외, 지하2∼3층, 교통관련 편의시설 1식

4. 과업의 범위

쌈지공원 리모델링과 지하에 공영주차장 건설을 위한 입체적 도시계획시설 중복결정을 시행하여 공원 및 주차장 이용자와 인근 주민들에게 쾌적하고 안전한 공간을 제공함으로써 주민들의 불편을 해소하고 공원 활용성을 높이는데 있으며, 지하주차장과 지상공원에 대한 타당성과 기본계획을 실시하고 도시공원위원회 자문을 득하기 위한 용역으로 기본계획과 사업비 산정등 각종 조사와 도시공원위원회 자문회의 입안자료등 보고용 파워포인트 등을 포함한다.

5. 과업기간

착수일로부터 90일간으로 한다.

6. 발주기관 및 연락처

о 발주기관 : 금천구 주차관리과

о 주    소 : 서울시 금천구 시흥대로 73길 10

о 주차관리과 : Tel. (02) 2627-2172, Fax. : (02) 2627-2297

7. 업무진행

가. 업무진행 및 협의

도급자(이하“계약상대자”이라 칭함)는 업무의 진행에 관한 각종 사항을 금천구청(이하“발주기관”이라 칭함)과 수시로 협의하여 각종 자료에 대한 수정 또는 변경에 관한 지시를 받아야 한다.

8. 설계변경

가. 용역비의 산정은 인력투입에 의하여 산출된 것인바, 본 과업 완료 후 용역비에 맞추어 예산범위 내에서 조정 변경할 수 있다.

9. 의무 및 보고

가. 의무

о 본 과업을 수행하는 용역자는 수임의무, 협조의무 및 비밀보장의 의무를 가진다.

나. 보고

о 본 과업을 착수함과 동시에 예정공정표를 작성하여 감독원에게 제출하여야 하며, 예정공정과 현저한 지연이 발생할 때에는 즉시 이를 만회할 수 있는 방안을 강구하여야 한다.

о 본 과업의 수행 중 별도 감독원의 자료 요청이 있을 시는 즉시 충분한 자료를 확보하여 제출하여야 한다.

10. 일반사항

가. 착수신고서 및 기타 제출서류

1) 계약상대자는 계약일로 부터 5일이내에 다음 제반서류를 제출하여야 한다.

① 착수보고서

a. 사업 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

b. 예정공정표

c. 내역서

② 분야별 참여기술자 투입계획

③ 보안각서

④ 기타 용역 수행에 필요한 사항

2) 계약상대자는 필요시 다음 제반서류를 제출하여 승인을 득 하여야 한다.

① 용역 기성부분 검사원

② 준공기한 연기원

③ 준공검사원

④ 하도급 통지 또는 하도급 승인 요청

⑤ 기타 용역 수행에 필요한 사항

나. 과업수행계획서

계약상대자는 계약 후 7일 이내에 과업 수행 계획서를 제출하여야 하고, 발주기관의 승인을 받아야 한다.

다. 업무협의 및 공정보고

1) 계약상대자는 계약후 착수신고서 제출시 발주기관과 1차 업무협의를 하여야 한다.

2) 2차 업무협의는 과업수행 계획서 제출시 하고, 이후 다음과 같은 경우에는 반드시 업무협의를 한다.

① 조사 및 자료수집 완료시

② 기본계획 완료시

③ 도시공원자문회의 및 도시계획 결정시

③ 성과품 작성시

⑤ 기술자문 또는 심의시

⑥ 공정 보고시(필요시)

⑦ 준공시

3) 상기 협의를 포함하여 과업수행 기간 동안 발주기관과 계약상대자는 월 1회 이상의 업무 협의를 갖는다.

4) 계약상대자는 월1회 과업수행 계획서의 예정공정표를 기준하여 공정보고서(현장대리인 명의)를 작성하고 발주기관에 보고하여야 한다.

제2장   과업의 수행

1. 과업의 내용

본 과업은 금천구 독산4동 189-1번지 쌈지공원 리모델링 및 지하공영주차장 건설을 위한 타당성과 기본계획 및 공원조성계획(변경)결정조서 작성작업으로 작업진행중 도시공원위원회 자문 입안등의 작업이 포함되며 준공 이후라도 도시공원 및 도시계획, 투융자심사등 관련 자료에 대한 검토 요구시 성실히 협조하여야 하며 다음의 사항이 과업의 내용에 포함한다.

가. 현지조사

1) 현지조사 및 현황조사

2) 현황사진 촬영

3) 지형현황측량 (수치지형도 이용 가능시 현항조사로 갈음한다)

① 모든 측량작업은 지상측량으로 하되 측량법 및 동시행령, 동 시행규칙, 공공측량의 작업규정에 관한 기준에 의거 정밀하게 시행하여야 한다.

② 위치 선정

우리구의 도시계획 및 평면계획을 참고하여 우리구와 협의하여 결정한다.

③ 수준측량

기준 수준점은 1등 또는 2등 수준점으로부터 측량하여야 하며 평면도상에 그 위치와 표고를 표시하여야 한다.

③ 평판측량

평판측량 축척은 1/300 또는 1/500으로 하고 주차장 설치면적의 2배 이상, 주차장 경계선에서 10m이상 실시한다.

도면에는 건물, 전주, 가로수, 담장, 맨홀, 석축, 수목 및 기타 지하매설물(상ㆍ하수도, 체신케이블) 및 지상케이블 등을 상세히 표시하여야 하며 주위의 지형지물도 빠짐없이 표시하여야 한다.

나. 타당성 및 기본계획

1) 현황평면도 작성

2) 지하주차장 평면 및 단면도 작성

3) 공원 기본계획도 작성

4) 타당성 및 기본계획

다. 도시공원위원회 자문회의자료 및 보고용 파워포인트

1) 도시공원위원회 자문자료

2) 공원조서

3) 보고용 파워포인트

라. 입체적 도시계획중복결정을 위한 자료 및 보고용 파워포인트

1) 도시계획시설결정자료

2) 보고용 파워포인트

2. 일반사항

가. 용역사가 제공할 과업은 용역사의 종합적인 행정관리 및 기술적 지원이므로 과업의 질과 정확도에 대한 전적인 책임을 진다.

나. 본 과업수행 기간 중 용역사는 “발주기관”에게 전적으로 협력하여야 하며 “발주기관”은 본 과업내용서에 따라 필요한 자료와 편리를 제공하는데 협조한다.

다. 용역사는 각종 과업을 신중히 작성하여야 하며 그 정당성 및 정확도, 안정성 등 섬세하고 세밀한 작업을 하여야 한다.

라. 자료의 작성이 완료된 후 도면을 최종형식으로 완성하되 용역사가 작성한 도서에 필요한 자료가 누락 또는 오기 되었을 경우 필요한 추가작업은 용역사가 부담한다.

마. 본 과업이 완료된 이후에도 도시공원위원회 자문일정 변경, 도시계획시설결정, 투융자심사등 후속절차에 필요한 사항은 용역자 책임하에 성실히 지원하여야 한다.

3. 기본계획 자료작성

가. 기본계획 도서작성

1) A1 Size로 Design하되 관리 편의를 위하여 생산품은 A3와 A4등의 규격으로 출력한다

2) 위치도, 신축 예정지 전체현황 사진, 기타 참고용 사진, 현황평면도, 공원계획도, 주차장 배치계획 평면도 및 일반도와 단면도 등으로 구성.

3) 공원 조성계획 (변경) 결정조서 및 공원조성계획도

나. 보고용 파워포인트 작성

1) 도시공원자문회의 입안 및 도시계획 입안시 사용할 보고용 기술자료

2) 기타 필요한 CD 1식

다. 기술지원

1) 추후 도시공원자문회의 및 도시계획시설 중복결정시 기술지원

2) 투융자심사 진행시 기술 및 행정지원

제 3 장  용역성과품 및 예정공정표

1. 용역성과품

본 용역 과업을 완성 후 납품하여야 할 성과품은 다음과 같다.

(1) 설계원도 각 1부

(2) 설계도 (A3) 3부

(3) 측량원도 및 야장 각1부

(4) 도시공원자문회의자료 3부

(5) 도시계획시설결정자료 3부

(6) 타당성 및 기본계획 보고서 12부

(7) 디스켓 또는 CD 3셋

(8) 사진첩 및 기타 감독원이 납품을 요구하는 성과품 1부

2. 과업 예정공정표

о 과업명 : 쌈지공원 및 지하주차장 기본계획 용역

공 종	착 수 일																			비 고
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		90
현지조사 및 측량
조사정리
기본계획
공원 자문회의 자료작성																				도시 공원 자문
도시계획 시설결정 자료작성
보고서 최종보고
성과품