응봉유수지 CSOs 저류조설치 기본 및 실시설계

과업중지요청사유서

2019. 05.

(주)제일엔지니어링종합건축사사무소

1.		과 업 명

❍ 응봉유수지 CSOs 저류조설치 기본 및 실시설계 용역

2.		과업의 목적

❍ 응봉 배수구역에서 발생하는 합류식하수도 월류수(CSOs)를 적정 저류, 연계처리하여 방류수역의 수질을 개선하고 대상지역의 CSOs 발생현황을 조사 및 분석을 통한 합리적인 CSOs 처리(저류)시설 설치가 이루어지도록 설계를 수립하는데 그 목적이 있음.

3.		과 업 개 요

❍ 과업위치 : 응봉 유수지 일대 (성동구 고산자로 125-98, 유역면적 : 388,000㎡) ❍ 과업기간 - 2018. 4. 23 ~ 2019. 5. 20 (390일) ❍ 과업금액 : 262,180,000원 ❍ 과업범위 - 응봉유수지 CSOs 저류조 설치(Q : 4,000m3) - 수행조사 항목 → 지형현황측량 : 6,769m2 → 토질조사 : 3공 → 유량 및 수질조사 : 4개소 ❍ 과업수행사 - 대 표 회 사 : ㈜제일엔지니어링 - 공동도급회사 : ㈜이 산

4.		과업중지 요청 사유

❍ 금회 과업 수행시, CSOs 저류조 설치부지(응봉유수지 부지 내)의 협소함에 따라 저류조 설치를 위한 굴착깊이(약 17m)가 산정되었으며, 지하안전관리에 관한 특별법(2018.01)에 의거 굴착깊이 10~20m 내 굴착공사를 수반하는 사업의 경우 소규모 지하안전영향평가 대상임.

❍ 지하안전영향평가는 별도발주 사항으로써, 현재 업체가 선정(골든엔지니어링)되어 지하안전영향평가를 수행중이며 국토부 심의예정이므로, 지하안전영향평가시 나온 변경사항이 실시설계 내용에 반영되어 VE가 수행되어야 함.

즉, 금회 과업의 VE수행시 선결과제로 지하안전영향평가의 보완사항이 수반되어야 하는바 지하안전영향평가의 완료시 까지(현재~5개월 소요 예상) VE 연기는 불가피함.

❍ 대책방안으로 지하안전영향평가와 VE를 동시 수행함으로 서로 상호보완하여 과업기간을 단축할 예정이지만, 현재단계에서 준공기한인 ‘19.05.20 까지의 설계완료는 현실적 한계가 있기에 과업중지가 필요할 것으로 판단됨.

❍ 즉, 지하안전영향평가(별도발주)의 수행 및 경관심의 수행 등의 기존 과업수행공정과의 변동으로 인하여 각종 심의 완료시까지 과업중지가 필요할 것으로 판단됨.

5.		과업중지 요청 현황

당초 착수일	당초 준공일	당초 과업기간	과업중지 요청일	잔여일
2018. 4. 23	2019. 5. 20	390일	2019. 5. 2	18일