중랑천 좌안 차집관로 정밀조사 용역

과  업  지  시  서

2019. 07.

중랑물재생센터

목      차

제1장. 일반사항	01

1. 과업의 명칭	01

2. 과업의 목적	01

3. 과업의 범위	01

4. 과업의 기간	02

5. 과업수행 및 공정보고	02

6. 보안 및 비밀유지	03

제2장. 직접조사 및 결과분석	04

1. 차집관로 정밀조사	04

2. 직접조사 결과분석	04

제3장. 차집관로 정밀조사 결과보고서	05

1. 총설	05

2. 기초조사	05

3. 정밀조사대상 선정	06

4. 정밀조사 결과 분석	06

5. 노후‧불량관로 정비계획	07

6. 재정계획	07

7. 조사결과 활용계획	08

제4장. 납품도서	08

제5장. 과업수행 예정공정표	09

제1장. 일반사항

1. 과업의 명칭

중랑천 좌안 차집관로 정밀조사 용역

2. 과업의 목적

◦본 과업은 중랑물재생센터에서 유지관리하고 있는 차집관로 상태를 조사하는데 그 목적이 있으며,

◦조사결과를 바탕으로 차집관로 정비계획을 수립하여 안전하고 쾌적한 하천환경을 조성하는데 목적이 있다.

3. 과업의 범위

3.1 직접조사

3.1.1 차집관로 정밀조사 : L= 18km

◦ 차집관로 CCTV조사 및 분석(물 돌리기 없이 수중관로 측정)

- 만관 시 로프설치 비용 별도 조사조건

3.2 결과분석

◦ 정밀조사 결과자료 하수도종합정보관리시스템 등 입력

◦ 차집관로의 노후‧불량현황 조사 분석 및 DB화

◦ 기존 보고서 및 조사내역 분석 및 반영

◦ 정밀조사 결과등급 기준으로 개량 우선순위 산정 및 소요 사업비 산출

3.3 하수관로 정비계획 보고서

3.4 성과품 작성	1식

4. 과업의 기간

◦ 과업착수일로부터 2019.12.31.까지 한다.

5. 과업수행 및 공정보고

5.1 착수계 제출

계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 예정공정표, 사업 책임기술자 선임계가 포함된 착수계를 발주기관에 제출한다.

5.2 과업수행계획서 제출

계약상대자는 착수계 제출 후 현장여건 등을 검토한 후 과업수행계획서를 14일 이내에 제출하여야 하며, 이에 포함할 내용은 다음과 같다.

◦ 세부공정계획서

◦ 과업수행조직 및 인력 투입계획서

◦ 참여기술자 인적사항, 참여과업내용 및 참여예상기간

◦ 참여기술자의 보안각서

5.3 월간 공정보고

계약상대자는 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 월간 공정보고를 매월 말일을 기준으로 하여 다음달 3일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

◦ 금월 과업추진내용 및 공정현황

◦ 익월 과업수행계획 및 예정공정표

◦ 과업수행상 중요 문제점 및 대책

5.4 최초보고

과업 시작 후, 기초자료를 분석하여 구체적 실행방안을 수립한 세부 실시계획을 보고 및 승인받아 사업을 추진하여야 한다.

5.5 중간보고

과업중간 성과에 대하여 과업기간 중 1회 이상 중간보고를 실시하여야 하며, 용역감독관의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련자료를 제출하고 제반 사항을 설명하여야 한다.

◦ 주요 단계별 과업이 종료 되었을 때

◦ 주요계획 및 방침의 설정과 변경 시

◦ 세부조사를 실시하여 물량을 재산정하며, 재산정 물량에 따라 설계변경

5.6 최종보고

계약기간이 만료되기 전에 감독관에게 최종과업성과품을 기준으로 최종보고를 하여야 한다.

6. 보안 및 비밀유지

6.1 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자에 있다.

6.2 과업성과품 발간시 유의사항

계약상대자는 필요시 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 발주기관과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 한다.

6.3 보안 관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의해 보안 관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

제2장. 직접조사 및 결과분석

차집관로 정밀조사

차집관로 정밀조사는 서울시에서 제공하는 하수도대장 등 관련 자료를 활용하여 시행하며,「지반침하 대응 하수관로 정밀조사 매뉴얼(안) (2015.12, 환경부)」에 준하여 시행하여야 한다.

1) 정밀조사 대상 하수관로

건설 후 경과 년수, 긴급점검 결과 등을 고려하여 정밀조사 대상 차집관로로 선정한다.

2) CCTV조사

차집관로 CCTV 조사는 CCTV를 관로 내부로 투입하여 관로의 전반적인 파손상태를 조사하며, 그 결과를 TV로 관측하여 연속 기록 촬영 후 분석⋅활용하는 방법으로 인력진입이 불가능하여 육안조사가 어려운 관로에 대하여 수행하며, 물 돌리기 불가지역 등 특수한 경우에는 별도의 CCTV장비[CCTV카메라,CCTV카메라+초음파(SONAR PROFILER),초음파(SONAR PROFILER)]를 적용하여 수행한다.

직접조사 결과분석

1) 결과 작성 및 정비 판단기준

정밀조사 결과는 정형화된 보고서에 작성하고, 조사를 통해 확인된 관로 내 결함과 특징 등을 조사보고서에 기록하여야 한다. 특히 결함 이상항목은 이상항목 코드와 상태에 따라 등급을 분류하며, 결함이상항목 보고서에는 각 결함의 정도에 따라 정량적으로 표기하고, 각 결함의 정도에 따라 점수화하여 맨홀과 맨홀사이 관로의 5단계 양호도 및 개·보수 정비 여부를 판단하여야 한다.

또한, 정밀조사서 및 집계표를 바탕으로 노후관로에 대한 체계적인 이력관리 등을 위해 전체 및 금회 조사수행지역 관로 현황, 관로결함에 대한 원인 분석·대책 제시 등 별도의 결과보고서를 작성하여야 한다.

2) 행정사항 및 결과 활용 자료 작성

조사결과의 분석을 통한 관로 개량 및 이력관리 등 체계적인 노후 차집관로 시설 운영 및 유지관리에 활용할 수 있도록 조사결과 및 분석자료를 작성하고 정밀조사 결과등급 기준으로 개량 우선순위 산정 및 소요 사업비를 산출한다.

제3장. 차집관로 정비계획 보고서

1. 총설

1.1 목적 및 범위

• 정밀조사 목적

• 전체 차집관로 중 금회 사업범위(정밀조사 대상관로) 제시

1.2 정밀조사 결과 요약

• 정밀조사 결과 요약

• 차집관로 정비계획 및 우선순위를 계획평면도에 표기

• 소요 사업비 산정 및 향후 추진계획 등

2. 기초조사

2.1 일반현황

• 지역 연혁, 개황, 하천 및 수계현황

• 토질, 지하수 및 지반 현황 등

2.2 관련계획 검토

• 관로정비 사업 등 시행 및 추진 계획

• 차집관로 정비기본계획 등 장기 및 상위계획 검토 등

2.3 차집관로 시설 현황

• 차집관로시설 운영현황(관로 속성정보, 유지관리, 민원발생 등)

- 긴급점검 결과, 기타 사업 등 최근 조사결과 추가반영

• 하수도 관리대장, GIS 구축현황(미 구축 시 향후 계획)

2.4 지반침하 발생현황

• 차집관로 또는 기타 원인으로 인한 지반침하 발생현황

- 발생규모, 발생분포(위치도 포함), 피해현황, 원인분석, 복구현황 등

3. 정밀조사대상 선정

3.1 전체 차집관로 현황

• 처리구역 및 노선별 차집관로 현황(관로 속성정보, 주변여건, 지반침하 연관성 등) 및 분석

• 유지관리 현황(개량 및 교체, 보수, 준설, 관로내부조사 등) 및 분석

3.2 정밀조사대상 선정

• 차집관로 정밀조사를 위한 조사대상 기준 선정

• 전체 차집관로 중 금회 조사대상 선정 근거

• 조사대상 우선순위 및 단계별 조사대상 선정

4. 정밀조사 결과 분석

4.1 정밀조사 수행 개요

• 정밀조사 수행기간, 조사방법, 투입장비, 조사자 및 감독자 등

4.2 CCTV조사 결과

• 내부결함에 따른 이상항목, 양호도 평가결과 집계

• 처리구역 및 노선별 결함 원인분석 등 종합 검토 분석(오접 포함, 관망도 제출)

5. 노후·불량차집관로 정비계획

5.1 정비판단 기준

• 노후·불량관로 정비판단 기준 검토 및 수립

5.2 정비 대상관로 선정

• 처리구역 및 노선별 정비대상 차집관로 선정

• 차집관거 계획 수립

• 굴착 및 비굴착 교체 대상 선정, 공사방법 검토

• 부분 및 전면보수 대상 선정, 공사방법 검토

5.3 지반침하 우려지역에 대한 긴급복구 결과

• 지반침하 우려지역(긴급복구 대상관로) 선정

• 지반침하 우려지역에 대한 긴급복구(관로개량) 실시 및 결과

※ 정비개소수가 많고 예산이 부족한 경우 등 부득이 긴급복구가 어려울 경우 단기정비계획 수립

5.4 정비계획 우선순위

• 양호도 판정, 지반침하 개연성, 현장여건 등을 고려한 정비계획 우선순위 평가 및 선정

6. 재정계획

6.1 소요 사업비 산출기준

• 소요 사업비 수립에 필요한 기준, 원칙 등을 제시

6.2 관로정비 사업비 산정

• 노후·불량 차집관로 정비에 필요한 소요 사업비 산정

• 노후·불량 차집관로에 기인한 지반침하우려지역 소요 사업비 산정

6.3 유지관리비 산정

• 관로 내부조사비, 준설, 점검 및 청소 등 유지보수비 산정

6.4 단계별 투자계획

• 우선순위를 고려한 연도별 투자계획 수립

6.5 재원조달계획

• 총 사업비에 따른 단계별 재원조달계획 수립

7. 조사결과 활용계획

7.1 차집관로 이력관리

• 노후·불량관로에 대한 정비실적 및 단계별 정비계획 등 이력관리

• 전체 차집관로에 대한 유지보수(개량 및 교체, 보수, 준설, 관로정밀조사 등) 실적 및 계획 등 체계적인 이력 관리

• 하수도관리대장 및 GIS 내 관로속성정보 업데이트 실적 및 계획

• 차집관로 수명 예측 등 자산관리 활용 계획

7.2 유지관리계획

• 조사결과를 바탕으로 유지관리 방법, 시기, 횟수 등의 계획 수립

7.3 지반침하 대응 계획

• 노후·불량관로에 기인한 지반침하 예방 및 신속 대응 계획 수립

제4장. 납품도서

성과품은 아래 기준에 의거 작성하여 납품하되 최종 납품부수는 우리센터와 협의하여 조정할 수 있으며, 모든 성과품은 외장형 하드에 저장하여 우리센터에 제출하도록 하고, 우리센터의 방침 등에 따라 성과품 종류, 수량 및 제작방법은 변경 될 수 있다.

구 분	수 량	비 고
1) 차집관로 정비계획 보고서 및 부록	5부
2) 현장조사보고서 및 참고자료 (사진첩 등)	1식
3) 기타성과품 전산화일	1식

제5장. 과업수행 예정공정표

용역명 : 탄천 원형차집관로 정밀조사 용역

공 종	예정공정				비고
	30	60	90	120
기초자료수집 및 분석
1.1. 기초자료 조사 및 분석
직접조사
2.1. 조사대상 관로 선정
2.2. 노후하수관로 정밀조사
3. 직접조사 결과분석
3.1. 결과분석
3.2. 우선순위선정 및 소요사업비 산출 등
4. 정비계획 보고서
4.1. 총설
4.2 기초조사
4.3 정밀조사대상 선정
4.4 정밀조사 결과분석
4.5 노후,불량관로 정비계획
4.6 재정계획
4.7 조사결과 활용계획
5.과업성과품 작성