청계천 좌안 차집관로 물막이 공사 건설사업관리(시공감리)

과  업  지  시  서

2018.06.

중랑물재생센터

(시설보수과)

*********

1. 목 적	1

2. 적용범위	1

3. 건설사업관리단의 구성	1

4. 건설사업관리용역 운영에 관한 계약 및 업무관리	2

5. 건설사업관리용역 업무 대가산출	2

6. 건설사업관리용역 업무 수행계획 수립	3

7. 건설사업관리기술자의 경력확인 및 관리	3

8. 건설사업관리기술자의 지위 및 업무처리 원칙	3

9. 건설사업관리기술자의 근무지침	3

10. 건설사업관리기술자의 업무자세	4

11. 지도감독	4

12. 공사시행 단계별 건설사업관리 업무수행	6

13. 건설사업관리대행 기록관리	9

14. 계약대상자 또는 건설사업관리기술자 보고사항	9

15. 과외 업무수행	10

16. 건설사업관리업무 비용지급	10

17. 긴급 복구공사(특별사항)	11

과 업 지 시 서

목    적

서울특별시 중랑물재생센터(이하 ‘발주처’라 한다.)에서 시행하는 청계천 좌안 차집 관로 물막이 공사의 건설사업관리 용역 업무 중 일부를 건설사업관리(시공감리)로 운영 하는데 필요한 사항을 규정함에 있다.

2. 적용범위

이 지침은 청계천 좌안 차집관로 물막이 공사의 건설사업관리 용역 계약서(이하 “계약서”라 한다)에 명시된 업무 전반에 대하여 적용한다.

기타 조사, 점검 및 민원처리 등 발주처에서 필요하여 지시하는 사항

3. 건설사업관리단의 구성

1) 건설사업관리단 인원구성은 상주 건설사업관리기술자 1명으로 한다.

2) 상주 건설사업관리기술자는 토목분야 중급기술자로 한다.

3) 건설사업관리기술자는 계약상대자를 대표하여 건설사업관리기술자 업무를 총괄 하고, 전체적인 관리를 위한 업무를 담당하는 자로 선임하여야 한다.

4) 건설사업관리기술자의 배치 및 방법

가. 건설사업관리기술자는 상주를 원칙으로 하며, 현장 입회감독에 지장이 없도록 하여야 한다.

나. 계약상대자는 발주처로부터 건설사업관리기술자의 배치 및 등급별 인원에 대한 조정 요청이 있을 경우 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다.

다. 건설사업관리기술자는 업무수행기간 중 발주처의 지시가 있을 경우 특별한 사정이 없는 한 이를 수행하여야 한다.

라. 계약상대자는 배치된 건설사업관리기술자가 당해 용역업무에 적합하지 않다고 인정되어 발주처에서 교체 요구할 경우 이에 응하여야 하고, 계약상대자 사정으로 인한 대체근무 또는 일부 교체시에는 발주청의 승인을 받아 시행하여야 한다.

마. 건설사업관리기술자의 휴일 및 야간근무는 감독관의 지시에 의하거나, 사전승인을 득한 경우에 한한다. 이에 따른 노임은 근로기준법에 따르며 노임 할증분(50%)에 대한 직접경비 및 제경비는 반영하지 아니한다.

4. 건설사업관리용역에 관한 계약 및 업무관리

1) 하수도분야

건설사업관리(시공감리) 용역에 관한 계약은 발주처 재무관과 감독업무 수행자(이하 “계약상대자”라 한다)가 체결하되, 해당 발주처 감독관은 용역업무 전반(작업지시, 이행실태 점검 및 확인, 시공감리 대가산출 등)에 대하여 관리․감독하고, 그 결과를 토대로 대가를 지급한다.

2) 계약기간은 계약일로부터 3개월로 하되, 불가피한 사정이 있다고 상호 인정하는 경우에는 계약기간을 조정할 수 있다.

3) 계약은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 지방자치단체입찰 및 계약집행기준에 따른다.

4) 입찰참가자격은 과업내용서의 감독대행자 수 이상을 확보할 수 있는 업체로써 다음 중 하나의 자격을 갖춘 자로 한다.

가. 건설기술진흥법 제26조 규정에 의거 종합 또는 설계·사업관리(일반건설사업관리) 기술용역 등록한 업체

나. 엔지니어링산업진흥법 제21조 규정에 의거 산업통상자원부장관에게 건설분야 중 상하수도부문을 기술부문으로 신고 등록한 업체

다. 기술사법 제6조 1항 및 동법시행령 제18조 규정에 의거 미래창조과학부장관에게 상하수도부문을 기술부문으로 신고 등록한 업체

5. 건설사업용역 업무 대가산출

1) 참여기술자 노임은 “건설사업관리기술자 임금 기준” 건설사업관리기술자  노임단가를 적용하여 산출한다.

2) 직접경비는 도서(보고서 작성)제작비로 한다.

3) 기술료, 제경비 및 직접경비 등은 계약심사(원가) 결과에 의한다.

6. 건설사업관리용역 업무 수행계획 수립

1) 계약상대자는 과업내용서에 의거 연간 업무수행계획을 수립하여야 한다.

2) 계약상대자는 계약 후 계약내용에 따라 아래 내용이 포함된 업무 수행계획서를 제출하여야 한다.

가. 건설사업관리 업무 내용

나. 건설사업관리기술자의 조직과 구성 및 배치에 관한 사항

다. 건설사업관리기술자 개개인의 자격, 경력(학력 포함) 및 업무분담 계획

라. 일반 행정지원 계획

마. 건설사업관리기술자에 대한 자체 교육계획

바. 공사의 성질별 중점 감독대행 계획

사. 건설사업관리 업무 수행 단계별 보고계획

아. 기타 발주처 지시사항 처리계획 등

7. 건설사업관리기술자의 경력확인 및 관리

1) 계약상대자는 건설관리기술자의 자격을 확인할 수 있도록 건설사업관리    기술자의 경력확인서를 제출하여야 한다.

2) 감독관은 상기 1)항의 경력확인서를 검토하여 건설사업관리기술자가 당해 업무 성격에 적합지 아니하다고 인정되는 때에는 계약상대자에게 건설사업관리기술자의 변경을 요청할 수 있다.

8. 건설사업관리기술자의 지위 및 업무처리 원칙

1) 용역업무를 수행함에 있어 건설사업관리기술자는 해당 발주처에게 고용 또는 예속 되지 아니하며, 계약서에서 정한 건설사업관리 업무를 독립적으로 대행하게 된다.

2) 건설사업관리기술자는 업무를 수행함에 있어 필요한 지침, 설계도서 및 설계자의 의도를 정확히 파악하고 객관적이면서도 공정하게 처리하여야 한다.

9. 건설사업관리기술자의 근무지침

1) 건설사업관리기술자는 당해 공사가 계약서, 시방서 및 관련지침에 의거 적정하게 시공되고 있는가를 공정별로 확인, 검측하여 엄격하게 품질을 관리하여야 하고, 시공자 에게 공사품질 및 안전관리 등에 관한 기술지도 등 감독업무를 성실히 수행하여야 한다.

2) 건설사업관리기술자는 시공자의 업무와 책임을 면제시킬 수 없으며 임의로 설계를 변경하거나 공사기간 연장 등 공사계약조건에 위배되는 지시나 결정을  할 수 없다.

3) 건설사업관리기술자는 공사 추진과정에서 문제가 발생하거나 시공과 관련된 중요한 변경 및 예산 관련사항에 대하여는 신속히 발주처에 서면으로 실정 보고를 하여야 하며 감독관은 이에 대한 조치계획(결과)를 회신하여야 한다.

4) 건설사업관리기술자는 시공자가 설계도서, 시방서, 지침 및 기타 관계서류의 내용과 적합하지 아니하게 시공하는 경우에는 재시공, 공사 중지명령 등 필요한 조치를 하여야 한다.

5) 건설사업관리기술자는 시공자에게 재시공, 공사 중지명령 등 기타 필요한 조치를 한 때에는 지체 없이 발주처에게 보고하여야 한다.

6) 건설사업관리기술자는 공사의 시공품질 유지를 위해 야간 및 공휴일 근무가 불가피 할 경우 감독관의 보고 및 사전승인을 받고 근무에 임하여야 한다.

10. 건설사업관리기술자의 업무자세

1) 건설사업관리 업무에 종사하는 자는 공사 품질향상에 노력하여야 하며 건설사업 관리기술자로서의 품위 유지 등 신의․성실의 자세로 근무에 임하여야 한다.

2) 건설사업관리기술자는 부실시공, 부적합 자재사용 및 시민불편 사항이 발생하지 않도록 공사감독 및 현장관리에 최선을 다하여야 한다.

3) 건설사업관리기술자는 건설사업관리 업무와 관련하여 제3자로부터 일체의 금품, 이권 또는 향응을 받아서는 아니된다. 위반시 계약상대자는 지체없이 건설사업관리 기술자를 교체하여야 하며 이후 재배치할 수 없다.

11. 지도감독

1) 감독관은 원활한 건설사업관리 업무가 이루어질 수 있도록 업무수행에 필요한 지침 및 지시사항을 숙지토록 교육하는 등 계약에 규정된 바에 따라 건설사업관리기술자를 지휘․감독하여야 한다.

2) 감독관은 건설사업관리기술자의 일일 출근사항을 확인하여야 하며, 당일  건설사업 관리기술자 업무의 수행결과를 일일 결산하여 이후 건설사업관리업무 수행에 필요한 적절한 조치를 강구하여야 한다.

3) 감독관은 건설사업관리기술자가 시공자에게 지시한 명령에 대해 시공자로부터 불만 제기가 있을 경우 그 내용을 조사하여 적절한 조치를 강구하여야 한다.

4) 감독관은 건설사업관리기술자에게 업무지시, 협의 등을 할 때에는 서면으로 하는 것을 원칙으로 한다.

5) 감독관이 시공자에게 통보한 내용은 건설사업관리기술자에게도 서면으로 통지 하여야 한다.

6) 감독관은 건설사업관리기술자로부터 규정에 의한 재시공, 공사 중지명령 등에 관한 보고를 받은 때에는 지체없이 적절한 조치를 하여야 한다.

7) 감독관은 건설사업관리 업무가 성실히 수행되지 아니함으로서 부실공사가 발생되거나 발생할 우려가 있는 경우에는 계약상대자와 건설사업관리기술자에 대하여 건설기술 진흥법 제53조(건설공사등의 부실측정), 동법 시행규칙 제47조(건설공사등의 부실측정 결과의 관리) 기준에 의거 부실벌점 부과를 의뢰할 수 있다.

8) 감독관은 건설사업관리기술자가 건설사업관리 업무를 성실히 수행하고 있는지 지도 점검을 실시하고, 부적정하게 수행하고 있다고 판단될 때에는 계약상대자에게 이 사실을 통보하여 시정토록 하여야 하며, 수행능력이 부족하다고 판단될 경우에는 계약상대자 에게 교체를 요구할 수 있다.

가. 점검주기 : 월 1회 이상

나. 점검내용 : 복무자세 및 행정처리 사항

① 복무자세

- 건설사업관리기술자의 적정자격 보유 여부 및 업무처리 상태

- 공사현장 관리 상태

- 품위손상 여부 및 근무자세

- 발주처의 지시사항 이행상태 등

② 행정처리 사항

- 행정서류 및 비치서류 처리상태

- 정기보고서의 처리상태

- 감독 권한대행 기록문서 관리 상태 등

12. 공사시행 단계별 건설사업관리 업무수행

12.1 건설사업관리 주요 업무내용

건설사업관리의 주요 업무내용은 다음과 같다.

구 분	업무내용	비 고
차집관로 물막이 공사 관리	• 차집관로 물막이 공사에 대한 시공감리 업무 수행 • 공사장 주변 통행시민들에 대한 안전관리 감독 등

12.2 공사착공 단계 업무수행

1) 공사착공 전에 물막이 공사의 중요한 기술적 검토사항과 공사감독관이 요청한 사항을 검토하여야 한다.

가. 현장 조건에 부합 여부

나. 시공의 실제가능여부

다. 타 사업 또는 타 공정과의 상호부합 여부

라. 설계도면, 시방서 등의 내용에 대한 상호 일치여부

마. 설계도서에 누락, 오류 등 불명확한 부분의 존재 여부

바. 시공 시 예상 문제점 등

사. 사업비 절감을 위한 구체적인 검토 등

12.3 공사시행 단계

1) 건설사업관리기술자는 현장조건과 설계도서를 연계 검토하여 시공자가 공사를 원활히 수행할 수 있도록 의견을 제시하여야 한다.

2) 건설사업관리기술자는 반입된 자재에 대해서 적합한 자재인지 확인하고 필요시 공인기관에 시험을 의뢰하여 그 결과를 발주처에 보고하여야 한다.

3) 건설사업관리기술자는 특히 다음 각 호의 사항에 대하여는 현장 입회감독을 통하여 적정하게 시공되도록 최선을 다하여야 하고 부적합한 경우에는 서면으로 보고하여야 한다.

가. 안전관리에 관한사항

나. 공사장 주변 교통 및 환경관리에 관한사항(교통대책, 소음‧진동‧먼지 대책)

다. 기타 발주처에서 중요하다고 지시한 사항

4) 건설사업관리기술자는 업무수행 중 설계도서가 현장여건 등과 상이하여 부득이 변경 시공하여야 할 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 감독관에게 서면으로 실정 보고 하고 감독관의 지시를 받아 시공토록 조치하여야 한다. 다만, 현장여건에 따른 위치 변경이나 연장의 증, 감 등 설계의 기본이 변경되지 않는 경미한 사항은 우선 변경 시공토록 조치하고 감독관에게 서면 보고토록 한다.

5) 건설사업관리기술자는 시공자가 설계도서, 시방서, 기타 관련지침의 내용과 적합 하지 않게 시공하거나 건설사업관리를 회피하기 위한 착공일 변경, 고의적인 작업중단 또는 공사지연 등을 할 경우에는 시공자에게 시정지시를 하여야 한다.

6) 시공자가 시정지시에 응하지 않을 경우 건설사업관리기술자는 그 내용을 감독관에게 지체 없이 보고하여야 한다.

7) 건설사업관리기술자는 당해 공사가 당초 계획대로 완료될 수 있도록 지도점검을 하여야 하며, 공사과정에서 문제가 발생될 때에는 해결방안을 제시하여야 한다.

8) 건설사업관리기술자는 시공계획서에 의한 일정단계의 작업이 완료되면 시공자로 부터 검측요청서를 제출받아 시공상태를 확인하여야 한다.

9) 건설사업관리기술자는 다음 각 호의 사항이 유지될 수 있도록 검측체크리스트를 작성하여야 한다.

가. 체계적이고 객관성 있는 현장 확인과 승인

나. 부주의, 착오, 미확인에 의한 실수를 사전 예방하여 충실한 현장확인 업무 유도

다. 검측작업의 표준화로 작업원들에게 작업의 기준 및 주안점을 정확히 주지시켜 품질향상을 도모

라. 객관적이고 명확한 검측결과를 시공자에게 제시하여 현장에서의 불필요한 시비를 방지하는 등의 효율적인 검측을 도모

10) 건설사업관리기술자는 다음 각 호의 검측업무 수행 기본방향에 따라 검측업무를 수행하여야 한다.

가. 현장에서의 시공확인을 위한 검측은 해당 공사의 규모와 현장조건을 감안한 『검측 업무지침』을 현장별로 작성․수립하여 발주처의 승인을 득한 후 이를 근거로 검측업무를 수행. 다만, 「검측업무지침」은 검측하여야 할 세부공종, 검측절차, 검측시기 또는 검측 빈도, 검측체크리스트 등의 내용을 포함

나. 수립된 검측업무지침은 모든 시공관련자에게 배포하여 주지시켜야 하고, 보다 확실한 이행을 위한 교육 실시

다. 현장에서의 검측은 체크리스트를 사용하여 수행하고, 그 결과를 검측체크리스트에 기록한 후 시공자에게 통보하여 후속 공정의 승인여부와 지적사항을 명확히 전달

라. 검측체크리스트에는 검사항목에 대한 시공기준 또는 합격기준을 기재하여 검측 결과의 합격 여부를 합리적으로 신속히 판정

마. 시공자가 검측요청서를 제출할 때 공사참여자 실명부가 첨부 되었는지를 확인

11) 건설사업관리기술자는 시공자가 공사계약문서에서 정한 품질관리(또는 시험)계획 요건대로 품질에 영향을 미치는 모든 작업을 성실하게 수행하는지 검사 및 확인 하여야 한다.

12) 발주처는 시공자가 기성부분검사원을 제출하였을 시 필요한 경우 건설사업관리 기술자로 하여금 기성 신청된 시공내역을 검측하여 서면으로 제출하게 할 수 있다.

13) 발주처는 필요시 공사완료 후 정산에 필요한 모든 자료를 건설사업관리기술자 에게 조사 및 검측하여 서면으로 제출하게 할 수 있다.

14) 건설사업관리기술자는 하수도공사 지시건에 대하여 현장건설사업관리 결과와 시공자가 작성한 작업완료보고서의 내용이 일치하는지 여부를 확인한 후 날인 하여야 한다.

12.3 공사준공 단계

1) 감독관은 시공자로부터 준공계가 접수되면 필요하다고 판단되는 경우 건설사업 관리기술자로 하여금 정산 또는 준공검사를 위한 기초 자료의 확인 및 검측을 시행 토록 할 수 있다.

2) 건설사업관리기술자는 1)항의 지시를 받은 때에는 계약내용과 같이 준공되었는지 면밀하게 확인, 검측을 실시하여 결과를 보고하여야 한다.

13. 건설사업관리대행 기록관리

1) 건설사업관리기술자는 다음 문서를 기록 및 비치하고 해당 공사의 준공전에 관련 문서를 발주처에 인계한다.

가. 공사착공 예정현황

나. 주요 공종 사진첩

다. 건설사업관리 관리대장

라. 시정지시 및 일일결산일지

2) 문서는 성격별로 분류, 관리하며 손실되는 일이 없도록 목차 및 페이지를 기록 하여 보관한다.

3) 문서접수 및 발송대장을 비치하여야 한다.

4) 현장조사 보고사항은 그 내용을 구체적으로 작성하여 현장을 답사하지 않고도 현황을 파악할 수 있을 정도로 명확히 기록한다.

5) 주요한 공종은 시공과정을 알 수 있도록 동일장소에서 전․중․후 사진을 촬영하여 관리한다.

6) 건설사업관리기술자는 공사 후 외적으로 확인이 곤란한 공종은 반드시 사진 및 시공당시 직접 검측한 상세기록 등의 방법으로 그 시공내용을 명확히 입증할 수 있는 자료를 작성하여 비치하여야 하고, 시공자가 완료보고서를 제출할 때 현장건설사업 관리 결과와 일치여부를 확인하여 날인한다.

14. 계약대상자 또는 건설사업관리기술자 보고사항

1) 건설사업관리기술자는 업무수행 내용을 월 단위로 중간보고서를 작성 제출하고, 건설사업관리 업무가 완료되면 종합보고서 형태의 완료보고서를 제출하여야 한다.

2) 계약상대자가 제출하는 중간 및 완료보고서에는 건설사업관리 업무 수행 과정에서의 입회건설사업관리 실적, 시정조치, 기술검토 및 개선사항, 지시사항 처리 등 건설사업 관리기술자의 업무수행 내용을 총 망라하여 수록하여야 하고, 계약상대자는 매 보고서 마다 건설사업관리 업무 수행결과에 대한 분석․평가를 실시하여야 한다.

3) 건설사업관리기간 만료시 작성 제출하는 완료보고서는 종합보고서 형식으로 건설 사업관리 업무 전체에 대하여 작성하고 분석 및 평가를 하여야 한다.

4) 평가항목 및 기준은 계약상대자가 자체적으로 목표를 설정하여 계약시 제출하고, 이후 상호 협의하여 조정할 수 있다.

15. 과외 업무수행

1) 발주처는 건설사업관리 대상 공사를 포함한 모든 공사건에 대한 점검 및 조사 등 사실 확인 업무를 계약상대자(건설사업관리기술자)에게 요구할 수 있으며, 계약상대자 (건설사업관리기술자)는 특별한 사정이 없는 한 이에 성실히 응하여야 한다. 단, 과외 업무가 계약서에 의한 건설사업관리대행 업무에 우선 할 수 없다

2) 계약상대자(건설사업관리자)는 1)항의 업무를 요구받은 경우 건설사업관리기술자 처리절차에 준한 계획서를 제출하고 완료 후에는 업무수행 결과보고서를 제출하여야 한다.

3) 발주처는 계약상대자(건설사업관리기술자)가 1)항의 업무를 원활히 수행할 수 있도록 관련 자료제공 등에 적극 협조하여야 한다.

16. 건설사업관리업무 비용지급

1) 건설사업관리업무 비용는 계약내용에 따라 월 단위로 기성검사를 실시하여 지급 하는 것을 원칙으로 한다.

2) 발주처는 매 월 건설사업관리 업무 수행결과를 확인하여 기성검사를 실시하고 그 비용을 계약상대자에게 지급한다.

3) 건설사업관리기술자에게 불가피한 사유(교육, 휴가, 병가 등)가 발생한 경우 건설 사업관리업무에 지장이 없도록 대체근무자를 별도로 배치한 경우 이외에는 대가를 지급하지 아니한다. 다만, 건설사업관리기술자가 건설기술진흥법, 민방위기본법 및 향토예비군설치법 등에 의한 교육 또는 서울시 방침에 의하여 지시한 교육을 받는 기간에 대하여는 예외로 하나, 계약상대자는 건설사업관리 업무 공백이 발생하지 않도록 적정 조치를 하여야 한다.

4) 건설사업관리 업무 수행이 완료되면 감독관은 완료보고서 등 건설사업관리기술자 업무 수행결과를 확인하여 준공검사를 실시하고 관련서류 사본을 발주처에 제출하여야 한다. 감독관은 이를 토대로 비상주 부문을 합산하여 최종비용을 정산 지급한다.

5) 야간 및 공휴일 근무시는 주간 근무노임의 50%를 가산하여 지급할 수 있다.

17. 긴급 복구공사(특별사항)

17.1 세부 시행내용

1) 과업지시 방법 : 발주처는 건설사업관리기술자에게 유선 또는 서면으로 과업을 지시할 수 있다.

2) 과업수행 범위

가. 감독관은 침수 등으로 긴급공사 발생시 건설사업관리자로 하여금 공사 관리 토록 한다.

나. 감독관은 건설사업관리업무가 효과적으로 운영되는지 수시로 점검(조사 및 확인) 하여야 한다.

다. 건설사업관리자는 유관기관의 공사현장의 입회를 포함하되, 현장을 면밀히 점검 하고, 전 공정을 시공감독하며, 건설사업관리토록 한다.

라. 건설사업관리대행자는 업무량 과다로 과업수행이 불가할 경우 즉시 유선 또는 서면으로 발주처에 보고하고, 감독관은 과업지시 내용을 검토하여 건설사업관리 업무가 효율적으로 수행될 수 있도록 재조정 등의 조치를 하여야 한다.

3) 건설사업관리기술자 인력배치

가. 긴급 복구공사의 건설사업관리기술자는 1인을 원칙으로 한다. 다만 긴급 공사 발생 건수 등을 감안 조정요구 시 감독관은 이를 검토하여 타당할 경우 계약상대자 에게 증감 배치토록 하여야 한다.

나. 발주처는 건설사업관리 인력의 여유가 발생할 때에는 수시로 공사와 관련한 조사, 점검, 확인 등 과외업무를 수행토록 지시 할 수 있다.

17.2 행정사항

1) 건설사업관리기술자는 과업지시 접수 및 처리대장을 기록관리 한다.

2) 건설사업관리기술자는 시공자가 작성한 작업완료보고서와 건설사업관리 결과가 일치하는지 여부를 확인하여 건별로 날인하여야 한다.

3) 휴일에도 하수도 공사의 건설사업관리업무가 차질 없이 수행될 수 있도록 감독관과 협의하여 건설사업관리기술자가 근무를 할 수 있도록 한다.

<별표1> 건설사업관리자 업무일지

건설사업관리기술자 업무일지

년 월 일( 요일), 누계공정 %
건설사업관리기술자 업무일지					날씨 : (기온 ℃)
공사명 : 청계천 좌안 차집관로 물막이 공사
주요작업상황	공 종	단위	설계량	금 일			누계 작업량	공정(%)	특이사항
				작업위치		작업량
업무수행내용	성 명	서 명	주 요 업 무 수 행 내 용 (상세내용은 개인별 건설사업관리 업무일지에 작성)						발주처 지시사항
	건설사업 관리기술자 1
특 이 사 항
※작성요령 1. 건설사업관리기술자 본인의 업무내용을 6하 원칙에 의거 기록함은 물론 공사추진내용, 검측결과, 현장실정 보고 등을 빠짐없이 기록, 작성한다. 2. 주요작업상황은 공사추진계획에 따라 당일 작업을 수행하였거나 그와 관련된 공종에 대하여 업무수행내용을 상세히 기록하여 작성한다.

<별표2> 검측요청‧결과 통보내용

검측요청․결과 통보내용

1 검측요청서 및 검측결과통보

검 측 요 청 서

번호 :                                               2018.   .   .

받음 : 청계천 좌안 차집관로 물막이 공사 건설사업관리기술자  ○○○

다음과 같은 세부공종에 대하여 검측요청 하오니 검사 후 승인하여 주시기 바랍니다.

위 치 및 공 종
검 측 부 위
검 측 요 구 일 시
검 측 사 항

붙임 : 시공자의 검측 체크리스트, 시험성과, 시공자의 야장 및 도면, 공사 참여자(기능공 포함) 실명부

시공자     점 검 직 원          (인)

현장대리인           (인)

....................................................................................................................................

검 측 결 과  통 보

번호 :                                              20  .   .   .

받음 : ○○공사 현장대리인  ○○○

문서번호 ○○로 검측요청 한 건에 대하여 20  .   .     . 검측한 결과를 다음과 같이 통보합니다.

1. 검측결과

2. 지시사항

붙임 : 건설사업관리기술자의 검측 체크리스트

검측건설사업관리기술자           (인)

※ 작성요령

1. 재검측시에는 붉은 글씨로 “(재)”를 우측 상단에 작성합니다.

2. 시공자가 재검측 요청할 때에는 잘못 시공한 기능공의 성명을 받아 그 명단을 첨부하여야 합니다.

3. 2부 작성하여 시공자, 건설사업관리기술자 각 1부를 보관하여야 합니다.

(제 2 쪽)

2 공사 참여자(기능공 포함) 실명부

공사명 :

작업일	작업위치 및 공종	소 속	직 위	성 명	생년월일 (성별)	공사한 내용	서 명
※작성요령 1. 직위란에는 공사관리, 형틀 또는 철근 작업반장, 목수, 철근공, 콘크리트공, 특별인부, 보통인부 등으로 구분하여 기재합니다. 2. 공사한 내용란에 - 형틀의 경우에는 공사관리, 작업총괄, 자재운반, 거푸집 및 동바리 제작, 거푸집 및 동바리 조립, 박리제 도포 등으로 구분 기재하고 - 철근의 경우에는 가공, 현장 운반, 조립, 청소 등으로 구분하여 기재하며 - 기타 공종도 무슨 일을 하였는지 구분하여 기재합니다. 3. 생년월일 : 주민등록상 생년월일

(제 3 쪽)

3 검측 체크리스트

공종 CODE №		위치 및 부위
공종(세부공종)		공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격

시공자 점검일자	년 월 일	점 검 직 원	(인)
건설사업관리 기술자 검측일자	년 월 일	검측건설사업 관리기술자	(인)

※작성요령

1. 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측건설사업관리기술자가 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는 검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 기재합니다.

2. 매몰부분은 사진을 첨부한다

3. 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 건설사업관리기술자와 협의하여 기재합니다.

<별표3> 검측대장

검 측 대 장 공사명 : 청계천 좌안 차집관로 물막이 공사 건설사업관리기술자 : (인)
공 종	검 측 부 위 (설계규격, 단위, 수량 포함)	검측일	검 측 내 용	합격 여부	검측결과 또는 입증자료
주) 매몰부분은 사진 첨부