2022년 노면하부 공동(空洞)조사 용역 과업지시서

2022. 3.

중      구

목   차

Ⅰ. 사업안내

1. 사업의 명칭	1

2. 사업목적	1

3. 사업개요	1

4. 주요업무 사전승인	2

5. 신고 또는 보고사항	2

6. 용역 수행 및 감독	4

7. 계약상대자의 책임 및 의무	5

8. 용역자문	6

9. 보안 및 비밀유지	6

10. 하도급 사항	7

11. 과업내용 변경 및 계약금액 조정	8

12. 용역수행자의 교체	9

13. 용어의 해석	9

14. 기타 준수 및 고려사항	10

Ⅱ. 조사 및 분석업무

1. 1차 조사 및 분석	11

2. 2차 조사 및 확인	11

3. 공동등급 분류기준	12

4. 공동 신속복구	13

5. 기타사항	13

Ⅲ. 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항	14

2. 성과품 납품	14

[붙임자료]

【별 표】

1. 공동조사대장	16

2. 공동조사서	17

3. 공동신속복구 결과조사서	18

Ⅰ. 사업안내

1. 사업의 명칭

본 과업의 명칭은 “2022년 노면하부 공동조사 용역” 으로 한다.

본 과업에서는 중구(생활도시친화국 도로시설과)를 “발주기관”이라 하고, 용역 수행자를 “계약상대자”라 한다.

2. 사업목적

가. 본 과업은 발주기관이 지정하는 도로에 대하여  “차량형 GPR탐사 장비”를 이용하여 교통흐름을 방해하지 않고 계약된 도로구간의 노면 공동을 조사하고, 천공 및 내시경 카메라로 공동임을 정확하게 입증하여 도로함몰 사고를 사전에 방지하는 것을 목적으로 하며, 조사를 완료한 구간에서 지반침하가 발생하지 않도록 성실하게 수행하여야 한다.

나. 2018.1.1.일부터 처음 시행된 지하안전관리에 관한 특별법 제34조, 같은법 시행규칙 제16조에 따른 지표투과레이더 탐사의 적용방법 등을 확보하고자 한다.

3. 사업개요

가. 위    치 : 중구 관내 구 관리도로

- 관내 이면도로

- 기타 발주기관이 지정하는 구간

나. 사업기간 : 착수일로부터 180일

다. 사 업 비 : 200백만원

라. 사업내용

a. 공동조사 : 공동탐사·자료분석 190km, 목표공동 95개소(조사연장×0.5개/km)

b. 신속복구 : 친환경 유동성채움재 주입 86개소(목표공동에 90% 적용)

4. 주요업무 사전승인

가. 계약이 체결되면 계약상대자는 다음 사항에 대하여 사전에 발주기관과 협의하여 용역을 진행한다.

a. 사업수행계획서 및 착수신고서의 내용이 변경될 경우

b. 용역 수행에 따른 관계 기관과 협의할 사항이 있을 경우

c. 용역 수행자를 교체할 경우

d. 기타 감독원의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항이 있을 경우

나. 건설기술진흥법 제30조 제1항에 의거 건설기술용역 통합관리시스템(www.cems.kr)에 10일 이내 등재(계약체결, 변경계약, 준공)하여야 한다.

5. 신고 또는 보고사항

가. 착수신고서 및 기타 서류 : 계약상대자는 계약문서에 정하는 바에 따라 용역을 착수하고 관계 법령에서 정한 서류와 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 7일 이내에 발주기관에 제출한다.

a. 착수신고서

- 사업 책임기술자 선임계(이력서 첨부)

- 기술용역 예정공정표

b. 분야별 참여기술자 및 장비투입 계획서

- 투입되는 참여기술자 인적사항 및 장비를 사전에 발주기관에 제출하고, 승인을 받아야 한다.

c. 용역수행에 필요한 다음 서류

- 내국기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서

- 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류

d. 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

e. 공동수급일 경우 공동 계약상대자 상호간에 과업분할 협의서를 작성하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

나. 사업수행계획서 : 계약일로부터 10일 이내에 사업의 특성 및 현장 여건을 감안한 사업수행계획서(공동수급일 경우 공동수급인 상호간의 사업분할 협의서 첨부)를 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 포함될 내용은 다음과 같다.

a. 노선 탐사계획을 포함한 세부공정계획

b. 월별 공동조사결과 및 종합(준공) 보고서 제출계획

c. 사업수행 조직, 인력, 장비 운영계획

d. 용역수행 단계별(1차 탐사, 2차 조사) 안전관리계획서

e. 건설기술 경력사항 확인서

f. 참여기술자 인적사항, 참여하고 있는 사업내용 및 예상기간

g. 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

다. 보고시기

a. 착수보고(계약일로부터 20일 이내) : 사업수행계획 수립·보고

b. 월간보고 : 매월 말 진도를 익월 10일까지 보고(일정은 별도 협의)

- 매월 말일 기준으로 1개월간의 과업수행 실적을 정리하여 제출한다.

c. 종합보고 : 사업종료 20일 전에 발주기관에 제출하여 협의완료 후 인쇄

d. 기타보고 : 사업내용 변경 시, 중요 보고사항 발생 시, 기타 필요시

라. 계약상대자는 「건설기술진흥법」 제 30조에 따라 건설기술용역 실적관리 시스템에 해당 용역의 정보를 입력한다. 그리고 같은법 시행규칙 제 27조(별지28호 서식)에 의거 설계 등 용역업자의 현황통보 및 관리를 위한 자료(전산파일)를 발주기관에 제출한다.

마. 작업일지의 작성

a. 계약상대자는 착수와 동시에 작업일지를 작성하여 과업수행 완료시 제출하여야 하며, 작업일지 양식은 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정에  따른다.

b. 참여기술자 투입일수 기록(Time Sheets) 제출

- 계약상대자는 참여기술자의 투입일수에 대한 개인별기록을 월간 단위로 작성하여 3개월 단위로 제출하되, 과업 착수 후 3개월이 지난 후 10일 이내에 투입기록을 제출하여야 한다.

참여기술자별 투입기록(  월)

성      명 :       인

사업책임기술자 :       인

월/일	투입시간	휴일(야간) 근무시간	수행업무	비 고

6. 용역 수행 및 감독

가. 용역감독 : 발주기관은 본 사업을 시행함에 있어 계약상대자에 대한 다음의 계약관련 업무내용을 확인·감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

a. 일일 작업내용, 기술인력･장비동원 현황, 단계별 사업추진내용 및 공정현황 등

b. 기타 용역 수행과 관련하여 확인에 필요한 사항

나. 용역점검

a. 발주기관은 적정한 조사 수행확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시 점검을 실시 할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 감독원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

b. 용역 감독은 착수 후 일정 구간을 탐사, 분석, 천공하여 공정추진 평가를 시행하고, 그 결과 기준에 미달한 경우 탐사․분석기술 만회대책을 위하여 필요한 조치를 계약상대자에게 요구할 수 있다.

다. 공정추진 평가 : 공정회의 등을 통해 탐사･분석･천공 결과가 공동발견 수량 기준에 미달(km당 0.5개)한 경우 계약상대자에게 공정만회대책을 요구할 수 있다.

라. 공정추진 평가 결과가 기준에 미달하여 발주기관에서 탐지․분석 기술 개선, 기술협력, 참여인원 변경 등 공정만회대책을 요청하는 경우에 계약상대자는 개선이 가능한 방향으로 발주기관과 협의하여 개선한다.

7. 계약상대자의 책임 및 의무

가. 계약상대자의 책임범위 : 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 과오나 오류 등으로 사업수행 상 발생한 모든 하자는 계약상대자의 책임이 면제되지 않는다.

나. 문서의 기록비치 : 사업의 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 사업추진에 따른 주요사항을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

다. 안전관리 의무 : 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여는 책임을 져야한다.

라. 법률준수 의무 : 계약상대자는 이 사업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야한다.

마. 성실의 의무 : 탐사를 완료한 구간에서 탐사분석 오류로 인해 지반침하이 발생하지 않도록 수행하고 업무의 공백, 지연, 중단이 없도록 하여야 한다.

a. 교차로 가각부 및 측구(10cm 이상 포함)에 대한 탐사계획을 수립･시행하여야 하며, 탐사 범위(구간)는 아래 그림과 같다.

과업

외

도로

과업

외

도로

탐사 구간

(과업대상 도로)

탐사 구간

(과업대상 도로)

과업

외

도로

과업

외

도로

탐사 구간

(과업대상 도로)

탐사 구간

(과업대상 도로)

b. km당 0.5개 이상의 공동을 발견하여 성과목표를 달성하였어도 계약구간에 대하여는 성실하게 탐사･분석･천공하여 지반침하 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

바. 준공 후 2년 이내에 지반침하 발생시 책임부여

a. 탐사구간에서 계약상대자 귀책사유(미탐사, 분석오류 등)로 인하여 지반침하가 발생하는 경우 발생된 피해에 대한 민･형사상 책임을 진다.

사. 공정추진 평가 결과가 부진하여 발주기관으로부터 공정만회대책을 요청받은 경우 계약상대자는 공정만회대책을 수립하여 제출하여야 한다.

8. 용역자문

가. 자문회의 개최 : 발주기관은 계약상대자의 탐사․분석․천공실적을 점검하여 공동탐사･분석 기술 향상이 필요하다고 판단되어 발주기관 부담으로 전문가 자문회의를 개최하는 경우에 계약상대자는 자료를 제공하여야 하며, 추가비용이 발생할 경우 상호 협의하여 정한다.

나. 자문의견 조치 : 자문회의 결과 의견에 대해서는 면밀히 분석․검토하여 조치계획을 수립하고, 비용부담 사항이 있을 경우 상호 협의하여 정한다.

9. 보안 및 비밀유지

가. 보안관계 법규준수 : 계약상대자는 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야한다. 특히, 확정되지 않은 자료 등이 유출되지 않도록 자료 관리에 철저를 기하여야 하며, 발주기관과 사전협의 없이 자료를 유출해서는 안 된다.

나. 사업성과품 발간 시 유의사항

a. 계약상대자는 월간 및 최종보고서 등 사업성과물을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하고 대외비로 분류되는 자료는 발주기관과 협의하여 발간한다.

b. 본 용역과 관련하여 생산되는 모든 자료의 지적소유권은 발주기관에 속하며, 모든 성과품은 계약상대자가 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출하여서는 안 된다.

다. 보안 관리의 책임

a. 계약상대자는 관계법규에 의해 보안 관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대해서 책임을 져야 한다.

b. 사업 참여자를 교체하는 경우 인수․인계 및 보안교육을 철저히 하여 자료의 외부유출을 방지하고, 이의 불이행으로 인한 책임은 계약상대자에게 있다.

c. 발주기관으로부터 제공받은 모든 자료는 본 사업 수행을 위한 목적 이외에는 사용을 금한다.

d. 계약상대자는 안전관리자와 보안책임자를 선임하여 안전 및 보안을 철저히 하여야 한다. 특히 전산보안을 철저히 하여 자료가 전자우편이나 전산파일 형태로 유출되지 않도록 하고, 용역 수행으로 인하여 발생한 안전 및 보안 사고에 대한 책임은 전적으로 계약상대자에게 있다.

e. 계약상대자는 본 용역과 관련하여 취급 또는 습득한 행정정보에 대하여 용역수행 기간은 물론 그 이후라도 정보유출 등에 관한 보안사항을 준수하여야 하며, 보안 사고에 대한 민․형사상의 모든 책임을 진다.

f. 계약상대자가 사업수행 과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 산출물에 대한 소유권은 발주기관에 있으며, 발주기관이 인가하지 않은 자에게 제공․대여․열람을 금지한다.

g. 발주기관이 제공한 자료는 사업 종료시 반환하여야 한다.

h. 사업수행 참여직원에 대해서 각 개인의 친필 서명이 들어간 보안서약서를 제출하여야 하고, 참여직원은 임의로 교체할 수 없으며 교체하는 경우에는 사전에 발주기관의 승인을 받아야 한다.

10. 하도급 사항

가. 건설기술용역의 하도급 계약과 관련하여 관계법령이나 계약서 등에 특별히 따로 정한 경우를 제외하고는 건설기술용역 하도급 관리지침에 따른다.

나. 계약상대자는 건설기술진흥법 시행규칙 제 31조에 따라 하도급 승인을 받기 위해서는 같은법 시행규칙 별지 제 32호 서식의 하도급 계약승인신청서를 발주기관에 제출하여야 한다.

다. 발주기관은 건설기술용역 하도급 관리지침에 따라 하도급 계약의 적정성  여부를 검토하여 7일 이내에 그 승인 여부를 계약상대자에게 알려야 한다.

다만, 하도급 적정성 판단에 상당한 시일이 요구되는 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 1회에 한해 통지기간을 연장할 수 있으며, 통지기간을 연장한 경우에는 그 사유와 7일 이내의 통지 예정기한을 정하여 지체 없이 계약상대자에게 알려야 한다.

라. 하도급으로 시행한 당해 용역성과에 대하여 전적으로 계약상대자의 책임으로 한다.

11. 과업내용 변경 및 계약금액 조정

가. 과업내용 변경사항이 발생하였을 경우, 발주기관은 "지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(제 14장 용역계약 일반조건)"에 따른다.

나. 계약상대자는 용역수행 중에 주요 과업내용에 대한 변경 없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우에는 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 발주기관의 지시를 받아 우선 반영하여 과업을 수행하여야 한다.

다. 다만, 주요 과업내용의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업내용 변경에 필요한 내역서 등 관련 자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

라. 계약상대자와 발주기관은 다음 항목에 해당하는 경우 과업내용의 변경을 상호 요구할 수 있다.

a. 과업 업무량 조정으로 변경이 필요할 때

b. 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

c. 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

d. 관계 기관과의 협의, 발주기관의 계획이 변경된 때

마. 본 과업의 성과목표를 기한내 충족하지 못하면 지연배상금 징수 사유가 발생하고 그 금액이 계약금액의 100분의 10 이상인 경우로서 계약상대자의 책임 있는 사유로 인하여 계약을 이행 할 가능성이 없음이 명백하다고 인정되는 경우에는 계약의 해제․해지 사유가 된다.

바. 계약 해지 또는 기타 등으로 정산이 필요한 경우 아래 기준에 따른다.

a. 1차탐사 연장, GPR자료 분석 연장, 보고서 작성 : 발견공동 1개당 2.0km 적용한다.(공동발견 기준 0.5개/km당)

b. 2차조사비(천공 및 내시경) : 계약된 천공 수량 범위 내에서 공동발견 수량을 기준으로 한다.

12. 용역수행자의 교체

가. 사업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관에서 사업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서 발주기관으로부터 교체요구가 있는 경우 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

나. 사업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타, 다른 사유로 사업을 수행할 수 없을 때는 발주기관의 승인을 받아야하며, 교체되는 기술자가 사업책임기술자, 각 분야별책임기술자, 분석분야기술자인 경우 그와 동등 이상의 기술을 갖춘 자로 교체하여야 한다.

다. 사업수행을 위하여 투입된 기술자는 사업기간 중에 계약상대자가 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전 동의를 받아야 하고, 본 사업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다.

13. 용어의 해석

가. 사업내용서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

나. 사업성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현방법 등은 발주기관과 계약상대자 간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 알기 쉽게 정확히 정의한 후 사용하여야 한다.

14. 기타 준수 및 고려사항

가. 준수사항

a. 사업수행 중 정책변경 등 불가피한 경우는 본 사업의 일부 또는 전부를 중단하거나 사업내용을 변경할 수 있다.

b. 계약서류에 명시되지 않은 사항이라도 발주기관이 사업 수행에 필요하다고 인정하는 추가사업에 대하여는 상호 협의하여 결정하며 계약상대자는 이를 성실히 수행하여야 한다.

c. 사업내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의불가 시에는 ‘지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 제14장 용역계약 일반조건’에 따른다.

d. 발주기관은 다음과 같은 사유로 계약상대자가 사업수행을 계속하기가 곤란하다고 판단될 때는 계약을 해지할 수 있다.

- 사업 수행이 불가능하다고 인정될 때

- 발주기관의 정당한 지시에 불응할 때

나. 기타 고려사항

a. 공동조사에 필요한 자료 수집 중 허가를 요하는 사항에 대해서는 발주 기관과 협의하여야 한다.

b. 공동조사에 앞서 발주기관과 협의를 통해 정해진 사항을 준수하고, 통행차량과 보행자 등이 위험에 노출되지 않도록 안전 관리상 필요한 대책을 수립하여 시행한다.

c. 공동조사 업무 수행 중 제3자에게 손해를 끼친 경우에는 계약상대자가 그 손해를 배상하여야 한다.

d. 위 사항이 발생한 경우에는 계약당사자는 발주기관 담당자와 협의한다.

Ⅱ. 조사 및 분석업무

1. 1차 탐사 및 분석

가. 탐사장비를 차량에 장착하여 주변차량 흐름에 방해하지 않는 속도로 노면하부를 탐사한다.(이를 ‘1차 탐사’라 한다.)

나. 탐사를 착수하기 전에 탐사 대상 노선에 대한 공동, 침하 등 과거 이력과 발주기관이 제공하는 상･하수도 GIS 현황도를 참고하여 구체적인 탐사계획을 수립한다.

다. 탐사대상 노선별 교통정체상황 실태를 파악하고 도로 혼잡도와 점유시간을 고려하여 탐사 시기 및 방법을 결정한 후 아래의 사항을 포함하여 구체적인 탐사계획을 수립한다.

라. 1차 조사를 위해 도로상에 주차된 차량에 대한 조치가 필요시는 발주부서 지원 하에 관계부서‧기관과 사전 협의하여 이동조치 할 수 있도록 계획한다.

마. 1차 조사는 차량형 탐사장비(인접 주행차량의 속도로 탐사하는 장비)를 사용하여 탐사하여야 한다.

바. 탐사연장은 1개차로 전폭을 기준으로 산정하였으며, 공동의 탐사 크기는 지중에서 평면상 좁은 폭이 0.5m 이상이고, 면적이 0.5㎡ 이상이며, 빈 공간 높이는 0.2m 이상으로 한다.

사. 1차 조사에서 취득한 데이터를 분석하여 ‘공동조사대장’【별표1】을 작성하여 2차 조사가 정확히 시행될 수 있도록 한다.

2. 2차 조사 및 확인

가. 2차 조사는 조사작업 구간에 대한 통행차량 통제가 선행되어야 하므로 작업 전에 우리구 주차관리과, 교통행정과, 관할경찰서와 협의를 통해 공동확인(천공)작업 교통통제 계획을 수립하여 관할 경찰서의 신고절차를 이행하여야 한다.

나. 2차 조사 시행 전에 그 지점에 인접한 지하매설물 관련 부서 및 기관을 입회시켜서 저촉에 대한 매설 심도, 매설물 규격, 부설연도 등을 확인하고, 지하매설물 관계자에게 대응대책을 마련할 수 있도록 하는 계획을 수립한다.

다. 천공 전 공동, 지하매설물 위치 정확성 확인을 위해 핸디형 GPR 장비를 사용할 수 있다.

라. 2차 조사는 천공 후 공내 360° 회전단면 촬영을 실시하여 공동 내부사진 등을 공동조사서에 기재한다.

마. 개소별로 2차 조사가 완료되는 경우 분석공동조사서를 바탕으로 내시경 자료가 기재된 ‘공동조사서’【별표2】를 작성하여 월간보고시 함께 제출하여야 한다.

바. 공동을 확인하기 위해 천공한 곳은 물이 침투되지 않도록 복구해야 한다.

a. 공동이 확인된 경우는 천공 홀에 고무패킹을 포장면에서 5cm내외까지 밀어 넣고 상온아스콘으로 복구

b. 천공 결과 공동이 없거나, 규격 미달규모 공동인 경우 포장복구(천공홀)는 계약상대자의 책임으로 복구조치 한다.

① 공동이 없는 경우는 모래자갈 등을 채우고 상온아스콘으로 복구

② 규격미달 공동은 유동성채움재로 빈공간을 채우고 상온아스콘으로 복구

3. 공동등급 분류 기준

가. 계약상대자는 아래와 같이 ‘서울시 공동등급 분류기준’에 따라 분석공동 및 발견공동의 등급을 구분하여야 한다.

등 급	분 류 기 준
긴급복구	• A.C포장 두께 10㎝ 이내인 공동 중 공동 토피 20㎝ 이내인 공동 • 포장 균열 깊이가 50% 이상 진행된 모든 공동(잔여 A.C포장 두께가 10cm 이내)
우선복구	• A.C포장 두께 10~20㎝ 이내인 공동 중 공동 토피 10~30㎝ 이내인 공동 • 공동 좁은 폭 150㎝ 이상인 모든 공동 • 포장 균열 깊이가 10~50% 진행된 모든 공동(잔여 A.C포장 두께가 10~20cm 이내)
일반복구	• 긴급/우선/관찰 등급을 제외한 모든 공동
관 찰	• A.C포장 두께 30㎝ 이상인 공동 또는 공동 토피 40㎝ 이상인 공동 중에서 공동 평균 폭 80㎝ 미만인 공동 ※ 모두 평균 폭 80㎝ 미만

나. 계약상대자는 분석공동을 천공하여 긴급복구 등급으로 확인되면 SNS를 통하여 발주부서에 알려야 한다.

4. 공동 신속복구

가. 공동신속복구 대상은 천공 작업 전에 결정하여 재료 등을 사전 준비한다.

나. 공동신속복구 시공시 주의사항

a. 유동성 채움재의 추정량을 주입하면서 공동내부를 관찰하여 빈공간이 채워지는지를 확인한다.

추정량 : 분석공동 조사서에 기재된 규모(가로×세로)와 천공하여 확인된 공동내부 높이로 산정한다.

b. 추정량을 주입하면서 중간 중간 관찰하여 채움재가 차오르는 경우는 빈 공간을 채운 후 고무패킹과 상온아스콘으로 포장(천공홀)을 복구한다.

c. 추정량의 1.5배를 주입하여도 채움재가 차오르지 않는 경우는 주입을 중단하고 고무패킹과 상온아스콘으로 포장(천공홀)을 복구한다.

d. 채움재의 강도는 재령 28일 기준 0.3~0.6MPa 정도의 강도가 발현되는 제품을 고려한다.

e. 공동신속복구가 완료된 공동의 결과는 【별표3】에 작성하여 제출한다.

5. 기타사항

가. 공동조사서에는 저촉되는 지하매설물을 위치도에 표기하여야 한다.

나. 공동조사결과 중간(월1회) 및 종합보고서(최종 월)를 작성하여 보고한다.

다. 최초의 월간 보고서는 매월 말일을 기준으로 과업수행 실적을 정리하여 보고한다.(단, 착수일이 15일 이후인 경우는 익월 말 기준)

라. 공동조사 및 자료 분석 결과를 반영하여 공동발생 취약구간(탐사노선)을 제시한다.

마. 소유권 및 저작권

a. 계약상대자는 계약내용을 수행함에 있어 제 3자의 특허권 또는 저작권 침해로 발주기관을 상대로 발생하는 모든 문제에 대하여 민․형사상 책임을 져야한다.

Ⅲ. 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항

가. 성과품은 수정 가능한 파일(한글, 엑셀 등)과 PDF 변환파일을 함께 제출하여야 한다.

나. 성과품 작성기준 : 계약상대자는 성과품 작성 시 서울시 출판물 발간 지침에 따라 작성하고 발주기관 검토 후 제출하여야 한다.

다. 성과품의 인쇄 : 모든 성과품은 발주기관과 협의 완료된 자료로 인쇄하여 제출하여야 한다.

라. 도면상의 문자는 한글 및 영어를 혼용할 수 있으나, 한글사용을 원칙으로 하고 숫자는 아라비아 숫자를 사용한다.

2. 성과품 납품

가. 계약상대자는 본 용역의 성과품은 과업종료 20일 전에 감독관에게 제출하여 사전검토를 받아야한다.

나. 설계도면이 작성되는 경우 도면작성자, 검토자, 사업 책임기술자가 적정 여부를 확인 후 각각 서명 또는 날인하여 제출한다.

다. 성과품 데이터 자료의 공동조사 Raw Data는 지반탐사·노면영상·GPS 데이터로 구성되고 3개의 데이터는 동시에 취득 제출하여야 한다.

a. 제출범위는 과업범위 전체 탐사구간을 말한다.

b. 파일형식 : Raw Data는 발주기관 분석프로그램 또는 발주기관 보유 범용프로그램에서 열어볼 수 있는 파일로 제출하여야 한다. 단 발주기관 프로그램으로 열어볼 수 있는 파일로 변환이 어려울 경우, 제출할 Raw Data를 열어서 공동신호를 확인할 수 있는 프로그램을 제공하여야 한다.

c. 데이터 저장 : 조사노선에 해당하는 동일한 폴더에 데이터 및 각 조사노선에 해당하는 야장을 외장하드에 저장한다. 또한 Raw Data를 열어서 확인 가능하도록 엑셀파일에 연번, 지역(자치구), 조사방향, 차로, 분석공동 관리번호, 발견공동 관리번호, 파일번호(Raw Data명), 거리(종, 횡)로 구분하여 정리하여 제출한다.

라. 최종 보고서 작성 시 참고사항

1) 표  지

2) 표제면

3) 제출문

4) 요약문 : 보고서의 내용에 대하여 간략하면서 정확한 표현

5) 목  차 : 내용, 표, 그림 등

6) 개  요 : 목적, 조사일시, 조사연장 등

7) 조사위치도 : 서울시 중구 전체 도면, 구역별 도면 등

8) 조사방법 : 탐사흐름도, 1차 탐사방법(장비제원 등), 2차 조사 장비제원 등

9) 조사결과 : 1차 탐사결과, 2차 조사결과, 탐사결과 총괄표 등

10) 조사결과도

11) 조사결과 총괄

12) 첨부자료-1. 조사결과 목록표

13) 첨부자료-2. 공동조사서

14) 첨부자료-3. 조사노선 및 공동

15) 판권기 : 보고서의 마지막 부분으로 각종 인쇄에 관한 사항이 포함됨

(구성요소 : 발행부서, 인쇄처, 발행지, 발행일, 연락사항 등)

마. 성과품 종류와 납품 부수

구 분	성과품 및 제출자료 종류	수 량	비 고
성과품 (최종)	종합보고서(부록 포함)	30부	(A4,210mm×297mm)
	CD(용역 종합보고서 수록)	3set
	성과품 데이터 자료 일체(2.5″ 외장하드)	3set	기초 조사 자료, Raw Data, 각종 보고자료 등
보고서 및 자료	과업수행계획서 및 착수신고서	1식	계약일로부터 7일 이내
	중간보고서	1식	중간보고회 개최 시 지정
	수시 보고 자료(월간)	1식	공정보고 시
	최종 보고서(안)	1식	최종보고서 인쇄전
	자문자료	1식	필요시

【별표1】		공동조사대장

관리 번호	등급	천공일자			굴착일자			도로명	주소 (공동위치 기준)	주소 (도로 기준)	위치	방 향	공동규모			공동	바닥	아스콘	굴착원인조사 결과 발생원인	원인시설	원인내용	복구방법	토질	관리 기관	탐사업체	위도	경도	공동 신속복구
		연도	월	일	연도	월	일						가로	세로	높이	토피	깊이	두께 (m)										주입량 (m3)	제외	완료	안됨
2020-2-001	일반	20	8	4				선릉로	강남구 도곡동 1-1		1차로	ㅇㅇ사거리 → ㅇㅇ초등학교	0.8	1.6	0.3	0.35	0.65	0.19											1
2020-2-002	일반	20	8	4				도곡로 86번길	강남구 도곡동 1-2		1차로	ㅇ사거리 → ㅇㅇ역사거리	0.7	0.8	0.3	0.34	0.64	0.12										0.256			1
2020-2-003	일반	20	8	4	19	8	13	논현로 21번길	강남구 역삼동 1-1		3차로	ㅇㅇ역사거리 → ㅇㅇ역사거리	0.9	1.1	0.28	0.4	0.68	0.26	채움재주입	굴착미시행	굴착미시행	충진						0.24		1

※ 용역 수행과정에서 변경될 수 있음

【별표2】

공동조사서(용역납품용)

공동관리번호	2020-1-001

탐사 / 천공

탐사일 2020.03.01 / 천공일 2020.03.03

위치

위도

37°28'50.19"N

공동규모

토피(㎝)

47

발견공동

번호

SP-19

지 번 주 소

서울 강남구 도곡동 1-1

경도

127°7'31.24"E

도로종단 길이(㎝)

74

등급

관찰

도로명 주 소

선릉로

차선

중앙선 기준 2차로

도로횡단 폭(㎝)

69

분석

공동

번호

SP-91-2

탐 사 방 향

00 교차로 → 00역사거리

지점

-

바닥 깊이(㎝)

74

등급

관찰

공동 위치도

공동 주변사진

<분석사의견/현장조사 내용>

- 포장상태 : 균열 없음

- 토질 : 자갈섞인 모래

- 기타 : 버스전용차로와 인접한 공동

(상단) 탐사영상 평면 / (하단) 노면영상

탐사영상 수직단면

공동확인 내시경 영상

		ASP (34cm)
		모래자갈 (13cm)
		공동내부 (27cm)

※ 용역 수행과정에서 변경될 수 있음

【별표3】

공동신속복구 결과 조사서(용역납품용)

공동관리번호	2020-1-001

탐사 / 천공

탐사일 2020.03.01 / 천공일 2020.03.03

위치

위도

N37° 30′ 22.54″

공

동

규 모

토피(㎝)

35

공동관리

번호

2020-1-001

지 번 주 소

서울시 강남구 대치동 1-1(동부금융앞)

경도

E127° 3′ 17.31″

도로종단 길이(㎝)

60

등급

일반등급

도로명 주소

서울시 강남구 테헤란로 1

차선

중앙선 기준 4번째 차로

도로횡단 폭(㎝)

150

분석

공동

번호

업체 분석번호

탐 사 방 향

동향(선릉역 → 삼성역)

지점

맨홀 후방 6.4m

바닥 깊이(㎝)

GL-70

등급

우선등급

공동 위치도

공동 주변사진

No.9

(4차로)

No.10

(4차로)

<신속복구 결과>

- 주 입 량 : 0.00㎥

- 특이사항 :

- 기타 :

<분석사의견/현장조사 내용>

- 포장상태 :

- 토질 :

- 기타 :

(상단) 탐사영상 평면 / (하단) 노면영상

탐사영상 수직단면

공동확인 내시경 영상

도로 종단면

도로 횡단면

AC층

(35㎝)

공동내부

(35㎝)

※ 용역 수행과정에서 변경될 수 있음