『무단수 급수체계 구축 타당성 조사 용역』

과 업 내 용 서

2016. 1.

	서울특별시 상수도사업본부

목      차

제 1 장  총   칙

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 목적	1

3. 과업의 개요	1

4. 기본방향	2

5. 일반사항	2

5-1. 과업의 준수사항	2

5-2. 과업수행 및 공정보고	3

5-3. 발주기관 제공자료	6

5-4. 주요업무의 사전승인 등	7

5-5. 과업 수행기간 변경	7

5-6. 설계변경	7

5-7. 용역수행자의 교체	8

5-8. 계약상대자의 책임	8

5-9. 하도급의 범위	9

5-10. 보안 및 비밀유지	10

5-11. 설계 성과품의 품질관리	10

5-12. 용어의 해석	11

5-13. 발주기관 및 연락처	11

제 2 장  과 업 내 용

1. 기본현황 조사	12

2. 타당성 조사	13

3. 경제성 조사	16

4. 사업시행 계획	16

제 3 장 과업성과품 제출

1. 과업성과품 제출	18

2. 과업의 기간	19

단수없는 안정적 급수체계 구축 타당성 조사 용역 과업지시서

제1장   총    칙

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 “단수없는 안정적 급수체계 구축 타당성 조사 용역”이라 한다. 본 과업에서는 편의상 서울특별시 상수도사업본부를 “발주기관”이라 하고, 용역사를 “계약상대자”라 한다.

2. 과업의 목적

본 과업은 최적의 상수도관망 정비를 통한 효율적 급수운영과 더불어 누수 등 돌발 사고에 대비한 지역 배수지간 연결관로 구축과 주요관로 복선화로 비상 상황에서도 단수없는 안정적인 급수체계를 구축할 수 있도록 타당성 조사 용역을 수행하는데 그 목적이 있다.

3. 과업의 개요

가. 과업의 위치 : 서울시 급수구역 전체

나. 과업범위 : 단수없는 안정적인 급수체계 구축을 위한 타당성 조사

다. 과업수행 기간 : 착수일로부터 8개월(공휴일 및 휴지일수 포함)

라. 과업의 주요내용

1) 기본현황 조사

과업수행에 필요한 기본자료 및 현황 조사

2) 타당성 조사

단수없는 안정적 급수체계 구축 방안에 대한 주요 시설물 설치계획

- 상수도관망 최적화(블록시스템 구축)

관로신설	관로폐쇄	유량계	제수밸브
D=400~2,200 L=135,844m	D700 L=1,500m	D400~2,200 88개소	D400~800 2개소

- 정수장, 지역 배수지간 공급체계 구축 : 비상연계관로 신설
(D600~2,200㎜, L=9.0㎞)

- 주요관로 복선화 구축 : 복선화관로 신설 (D500~2,400㎜, L=23.0㎞)

- 주요밸브 전동화 시범 구축 : D600~1,200㎜, 9개소

3) 경제성 조사

사업추진 타당성 평가

4) 사업시행 계획

단계별 사업시행 방안 수립

5) 성과품 작성 및 납품

마. 상위계획 : 2030서울 수도정비기본계획(변경)

4. 기본방향

가. 계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 항상 서울시와 국가의 이익을 보호하는 입장에서 과업을 수행하며, 경제적 기술적 등의 방법을 통하여 예산을 절감토록 하여야 한다.

나. 기초조사는 실측조사를 원칙으로 하고 실측 및 조사된 자료는 공인된 기관에서 발간된 최근 자료를 활용하여 비교, 검토하여야 한다.

다. 사용하는 용어는 수도법, 수도법시행령, 수도법시행규칙  또는 환경부제정 상수도시설기준 및 상수도시설기준 유지관리 편에 정의된 용어를 사용한다.

라. 가능한 기존시설의 활용도를 극대화하고 유지관리상 문제점을 분석하여 대책을 제시하고 개량계획을 제시한다.

5. 일반사항

5-1. 과업의 준수사항

가. 과업수행 기준

본 과업 수행상 필요한 법규는 정부가 제정 공포한 관계 법규 및 용역 규정에 준하고 과업지시서에 의거 시행하며, 통계자료는 정부기관 및 관련기관에서 발행하는 최근의 자료를 이용하여야 하며, 장래 계획에 관한 추정치는 2030서울 수도정비기본계획(변경)에 의한다.

나. 기타 발주기관이 제공하는 관련자료 및 설계지침

5-2. 과업수행 및 공정보고

가. 과업수행방법

1) 계약상대자는 과업지시서와 관계법령 및 제 규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

2) 용역수행 절차는 과업지시서에 따르고, 과업지시서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 협의하여 처리함으로서 내실 있는 타당성 조사가 되도록 하여야 한다.

나. 과업보고서의 제출

1) 착수신고서 제출

계약상대자는 계약문서에 정하는 바에 따라 기술용역을 착수하여야 하며 착수 시 관계법령에서 정한 서류 및 다음사항이 포함된 착수 신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

가) 용역공정 예정표

나) 인력투입 계획서

(1) 사업 책임기술자 선임계(이력서 포함), 분야별 책임기술자 등

(2) 책임기술자 중 내국인은 기술자 자격수첩사본 및 한국 건설기술인협회 발행 건설기술자 경력증명서, 외국인은 졸업증명서, 경력확인서 등 학력 및 경력을 확인할 수 있는 서류(건설기술진흥법 시행령 별표1의 규정에 의함)

다) 기타 계약담당 공무원이 지정한 사항

2) 과업수행 계획서 제출

계약상대자는 착수신고서를 제출하고 현장여건 등을 검토한 후 14일 이내에 서울특별시설계용역관리편람에 의거 과업의 특성 및 현장여건이 감안된 과업수행계획서(공동수급일 경우 공동수급인 상호간의 과업분할 협의서 첨부) 3부를 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며 이에 포함될 사항은 다음과 같다.

가) 세부 공정계획서

나) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

다) 과업 수행조직 및 인력(장비) 투입계획서

라) 건설기술 경력사항 확인서

마) 참여 기술자 인적사항, 참여 과업내용 및 참여 예상기간

바) 참여 기술자의 보안각서

3) 월간 정기 공정보고

계약상대자는 과업수행 기간 중 다음 사항을 포함한 월간 진도보고서를 매월 말일을 기준하여 다음달 5일까지 발주기관에 제출하고 발주기관의 요구가 있을 시는 과업내용에 대한 설명을 하여야 한다.

가) 과업추진내용 및 공정현황

나) 관련기관(부서) 업무협의 등 추진사항

다) 업무관련회의 및 발주기관 지시사항 처리결과 (승인사항 포함)

라) 과업수행 상 중요 문제점 및 대책

마) 참여기술자 현황

바) 다음달 과업수행 계획

다. 과업 공정보고

1) 보고시기

다음의 경우에는 발주기관에 사전 보고하여 검토를 받아야 한다.

가) 조사 및 자료수집 완료 시

나) 과업수행계획서 제출시

다) 용역착수, 중간단계, 마무리단계 검토 시

라) 기술심의 또는 자문회의 시

마) 성과품 작성 시

바) 준공 시

사) 공정보고 시(매월 1회 이상)

아) 기타 발주기관의 요청이 있는 경우

2) 과업 보고회의

가) 과업추진 보고회의

(1) 계약상대자는 착수․중간․완료보고회 등을 통하여 기술자문 및 검토를 받아야 한다

(2) 계약상대자는 발주기관 또는 각종 기술자문 및 검토회의 등에서 지적받은 사항을 면밀히 분석 검토하여 발주기관에 조치계획을 보고하고 특별한 사유가 없는 한 그 결과를 용역에 반영하여야 한다.

나) 과업착수 보고회의

계약상대자는 발주기관의 요구사항에 대한 내용을 파악하고 용역 업무내용 추진방향 및 총괄 공정계획에 대한 착수보고회의를 용역착수 후 14일 이내에 하여야 한다.

다) 과업중간 보고회의

계약상대자는 용역감독자의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 용역감독자의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)을 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

(1) 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

(2) 분기별 1회 이상의 중간보고회 시행(필요시)

(3) 주요계획 및 방침의 설정과 변경 시

라) 완료 보고회의는 추진공정 90% 일때 시행 한다.

라. 용역감독 등

1) 업무협의

가) 초기협의시에 계약상대자는 발주기관의 요구사항에 대한 내용 파악과 용역 업무내용 및 총괄 공정계획에 대한 협의를 하여야 한다.

나) 공정계획에 의한 과업수행 중 중요 결정사항 등에 대한 사항은 수시로 협의하여 공정추진에 지장이 발생하지 않도록 하여야 한다.

다) 계약상대자는 최적의 성과품이 되도록 인쇄 전 성과품에 대한 최종 협의를 하여야 한다.

2) 용역감독

용역감독자는 본 과업을 수행함에 있어 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인 감독 할 권한을 가지며 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

가) 기술인력 동원현황

나) 용역단계별 과업추진 내용 및 공정현황

다) 기타 확인이 필요한 사항

3) 용역점검

가) 계약상대자는 발주기관이 설계품질 확인과 용역업무의 적정 수행여부 확인 등을 위해 실시하는 정기 또는 수시점검에 성실히 응해야 한다.

나) 정기점검과 수시점검시 발주기관으로부터 지적받은 내용 및 요구내용은 과업범위를 벗어나지 않는 한 모두 반영하여야 한다.

5-3. 발주기관 제공자료

가. 본 과업수행을 위해 계약 후 발주기관이 제공할 자료는 다음과 같다.

1) 서울시 전역에 대한 배관망도 및 수치지도

2) 서울시 운영중인 전체 상수도시설 운영자료

- 취․정수장 운영자료(월, 일별)

- 배수지 운영자료(월, 일별)

- 가압장 및 기타시설 운영자료(월, 일별)

- 단수 등 사고 발생 현황 자료

- 시설물 및 설비 등의 개․보수 이력에 관한 자료

3) 2030서울 수도정비기본계획(변경) 및 기타 관련자료

나. 상기 자료는 과업수행 참고용이므로 계약상대자는 그 내용의 오류, 정확성을 검토․확인 후 사용하여야 하며, 준공 전 발주기관에 반납하여야 한다.

다. 상기 자료외에 자료의 변경이나 추가 조사사항이 발생시에는 발주기관과 협의하여 자료조사 후 반영한다

5-4. 주요업무의 사전승인 등

계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 발주기관의 승인을 득하여 과업을 수행하여야 한다.

가. 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

나. 관계기관과의 협의사항

다. 조사 및 자료수집 완료 및 주요사항 결정 시

라. 성과품 작성 시

마. 각종심의 또는 보고(검토)회의 개최 시

바. 기타 용역감독자의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

5-5. 과업 수행기간 변경

계약 상대자는 다음과 같은 사유로 과업기간의 변경이 필요할 때에는 사전에 발주기관에 과업수행 기간의 변경을 서면으로 요청하여 승인을 득하여야 한다.

가. 본 과업수행 중 발주기관의 정책변경 등 발주기관의 책임 있는 사유로 과업기간의 조정이 필요할 때

나. 발주기관 또는 관계기관의 책임 있는 사유로 관계기관과의 업무협의 또는 검토가 지연되었을 때

다. 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

라. 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능 하거나, 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않는 이유로 인하여 지체된 경우

5-6. 설계변경

가. 용역수행 중에 계약변경 사항이 발생할 경우에는 지방자치단체 용역계약 일반조건(행전안전부 예규 334호 ‘10.10.26)에 따른다.

나. 계약상대자는 다음과 같은 설계변경 사유가 발생하여 계약금액의 조정이 필요한 때에는 사전에 발주기관에 보고하여 승인을 득하여야 한다.

1) 과업 업무량 조정으로 참여 기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때

2) 계약내용에 따른 이행수량에 의해 정산 변경 시

3) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

4) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능 할 때

5) 지자체 및 관계기관의 협의 지연과 발주기관의 계획이 변경되었을 때

6) 기타 설계변경 및 계약금액의 조정 필요성이 인정될 때

다. 계약상대자는 설계용역수행 중  주요 설계과업내용에 대한 변경 없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 용역감독자의 지시를 받아 우선 과업 변경하여야 한다.

라. 다만, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 설계변경에 필요한 내역서 등 관련 자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

5-7. 용역 수행자의 교체

가. 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격(엔지니어링산업진흥법 시행령 제4조 관련 별표2. 엔지니어링 기술자 기준)을 갖추어야 하며, 발주기관은 용역에 참여하는 기술자 등이 과업수행에 부적격하다고 판단하는 경우 용역수행자의 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

나. 과업수행에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 사유로 과업을 수행할 수 없을 때는 그와 동등하거나 그 이상의 자격을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

5-8. 계약상대자의 책임

가. 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자 잘못으로 발생된 과오나 오류 등 과업수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대하여 발주기관의 수정․보완 요구가 있을 때는 계약상대자의 부담으로 시정 조치하여야 한다.

나. 문서의 기록비치

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계 기관과의 협의 사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성 비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

다. 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 민․형사상의 모든 책임을 져야 한다.

라. 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해 사항에 대하여 책임을 져야 한다.

5-9. 하도급의 범위

가. 계약상대자는 본 설계용역을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

나. 계약상대자는 발주기관으로 부터 도급받은 용역에 대하여 법률이 정하는 범위 내에서 하도급계약을 체결할 경우 그 계약을 체결한 날로부터 15일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주기관에 통지하고 관리를 받아야 한다.

1) 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

2) 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

3) 하도급 기간 및 하도급 금액 등

다. 계약상대자가 하도급인을 선정할 때는 아래 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

1) 엔지니어링산업 진흥법 제21조 제1항 규정에 의거하여 지식경제부 장관에게 상하수도, 토질․지질, 구조분야 등에 대하여 엔지니어링 사업자로 신고를 필한 업체 또는 『기술사법』 제6조 규정에 의거 교육과학기술부 장관에게 상기 분야 기술사사무소 개설 등록을 필한 업체

라. 계약상대자는 하도급 부분에 대하여 발주기관으로 부터 선급금, 기성금 및 준공금 등 대금을 지급받았을 경우에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급하여야 한다. (하도급거래 공정화에 관한 법률 제6조 및 제13조3항)

마. 책임한계

계약상대자는 하도급으로 시행한 당해 설계 성과에 대하여 모든 책임을 진다.

5-10. 보안 및 비밀유지

가. 본 과업은 정부 또는 발주기관이 정한 모든 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 이의 불이행으로 인한 책임은 계약상대자가 져야 한다

나. 계약상대자는 과업수행 중 또는 과업완료 후에도 과업목적, 내용 및 성과품 일체를 타인에게 발설, 제공하여서는 안된다.

다. 본 과업 수행과정에서 발생한 폐기물에 대하여 계약상대자는 관련규정에 의하여 소각등의 조치를 취하여야 한다.

라. 본 과업 수행 중 용역 과업자료의 분실, 도난, 누설을 방지하고 자료의 철저한 보안을 위하여 보관함을 별도로 비치하고 관리책임자를 지정하는 등의 보안대책을 강구하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

마. 본 과업수행 종사자의 변동이 있을 경우는 인수인계를 철저히 하며 자료의 외부 유출을 방지하고 불이행으로 인한 책임은 계약상대자가 져야 한다.

바. 계약상대자는 중간 및 완료(최종) 보고서 등 과업성과품을 감독과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류․관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 용역감독자와 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간한다.

사. 기타 보안과 관련되는 사항은 발주기관과 협의하여 보안상 결함이 없도록 하여야 하며 이의 불이행으로 인한 책임은 계약상대자가 져야 한다.

5-11. 설계 성과품의 품질관리

가. 계약상대자는 설계의 실명화를 통한 설계도서의 품질관리를 위해 최종 용역보고서 및 설계도면에 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관의 담당자(타당성조사시에 수요예측을 수행한 자 및 설계 등 용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인 후 날인하도록 하여야 한다.(건설기술진흥법 제23조)

5-12. 용어의 해석

가. 발주기관과 계약상대자간에 과업지시서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

5-13. 발주기관 및 연락처

가. 발주기관 : 서울특별시상수도사업본부(급수부 배수과)

서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)

나. 연락처 : TEL 02-3146-1437 (FAX : 02-3146-1429)

제 2 장  과업내용

1. 기본현황 조사

계약상대자는 과업의 내용을 수행하기 위한 사항을 다음과 같이 종합적으로 검토하여 타당성 조사를 체계적이고 성실히 수행하여야 한다.

가. 현지답사

계약상대자는 과업 대상시설을 현지 답사하여 운영 현황 등을 조사하고, 계획시설물 등이 현장여건에 적합한 지를 확인 검토하여 가장 최적의 대안을 제시하여야 한다. 또한, 계약상대자는 지형, 지질, 하천 등의 자연 상황, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 계획시설물 설치 공간, 공사용 도로 부지, 작업장 등의 확보 가능 여부를 판단하여야 한다.

나. 사회 및 인문현황 조사

급수 대상지역 및 신규시설 설치 예상 지역의 사회 및 인문에 대한 전반적인 조사를 수행하여야 한다.

다. 기존시설 현황 조사

1) 기존 취·정수시설

가) 시설제원, 시설용량, 취수원, 수처리 공정, 급배수 구역, 시설이력 등

나) 용도별 사용 현황

다) 각종 실적 원단위(부하율, 유수율, 보급률, 단위 급수량)

라) 수원 수질(유량, 수온, pH, 탁도, 알칼리도, 경도, SS, Jar-Test 실적 등에 관한 과거 5년 이상의 실적), 취수 및 급수 장애 이력 등

2) 기존 송·배수시설 및 블록시스템

가) 시설제원, 시설용량, 급배수 구역, 시설이력 등

나) 송·배수시설 운영현황

다) 블록시스템 구축 및 운영현황

라) 단수사고 및 급수 장애 이력 등

3) 시설확장 및 폐쇄계획

라. 용수 수요조사

기 수립된 수도정비기본계획 등 관련 및 상위계획에 반영된 장래 용수수요량 및 정수장별 급수구역 등을 조사하여 본 과업에 적극 활용하여야 하고, 최근의 용수수요 패턴을 포함하여 분석 검토한다.

마. 도시 및 관련계획 조사

1) 기존 또는 현재 조성 중이거나 계획된 도시개발계획 등을 조사하여야 한다.

2) 상위 관련 계획(도시기본 및 재정비 계획, 수도정비에 관한 계획 등)

바. 기타 자료의 조사

1) 이 과업 수행과 관련된 타 계획 수립 등 관련 자료

2) 본 사업구역 내 측량성과 또는 D/B 구축 자료

3) 현재 진행중인 각종 상수도 관련 사업

4) 시설 예정 용지 및 지장물 조사

5) 본 사업 시행에 따라 주변 시설에 미치는 환경, 경관, 민원발생 문제 등 조사

6) 기타 관련자료

2. 타당성 조사

가. 기 수립 수도정비기본계획 및 관련계획 검토 분석

1) 수도정비기본계획의 송․배수시설 개량계획, 상수도시설 안정화계획, 상수도시설 정보화계획 등 시설개량 및 확충 계획을 검토하고 기타 관련계획과 연계된 경제적이고 효율적인 급수체계 구축을 검토한다.

2) 기존 송․배수관로 및 블록시스템의 활용 방안과 문제점 및 개선방안을 검토하고, 비상 급수에 대비한 송․배수관로 및 블록간 상호 연결 등 운영 방안에 대해 검토하여야 한다.

나. 용수수요량 검토 및 수급전망 분석

1) 정수장별 용수수요 및 용수공급 계획은 기 수립된 2030서울 수도정비기본계획(변경)의 계획지표를 참고하여 검토한다.

2) 계획지표 및 기준은 서울특별시, 환경부 및 국토교통부 등에서 최근 제정한 각종 기준을 조사하여 비교 검토한다.

3) 공공단체에서 발간한 자료 또는 국내외의 자료나 문헌을 참고하고자 할 때는 그 출처와 근거를 명확히 한다.

4) 주요 계획지표 설정을 통해 최종 용수수요량을 산정한 다음, 발주자와 충분한 협의를 거쳐 최종 확정한다.

5) 수도정비기본계획 등 관련 계획을 참고하여 용수 수급전망 분석 후 가장 최적의 시설용량으로 계획될 수 있도록 면밀히 검토하여야 한다. 필요시, 중요도를 감안하여 시설용량 결정을 위한 내․외부 자문을 거쳐 최종 결정할 수 있도록 한다.

다. 상수도관망 최적화(블록시스템 구축)

1) 기 수립된 수도정비기본계획 상 서울시 블록시스템 구축현황 및 정비계획과 블록관리방안을 검토/분석한다.

2) 급수환경 변화가 수반되는 신도시 개발계획 등 상위계획을 조사하여 반영여부를 검토한다.

3) 관망해석을 통한 블록구축 적정성을 검토하여 비상시 수계전환 및 상수도관망 최적 운영을 위한 블록규모 적정화 및 중블록시스템 재구축 방안을 제시하여야 한다.

가) 기 수립된 수도정비기본계획 상 블록시스템 재구축방안의 적정성을 검토한다.

나) 미고립 블록에 대한 정비방안을 검토하여야 한다.

다) 블록간 효율적 유지관리를 위한 유량계 설치계획을 검토하여야 한다.

라) 블록경계 및 관말 정체구간 수질개선을 위한 정비방안을 검토하여야 한다.

마) 비상시를 고려한 블록간 연계 및 공급 안정화 방안을 검토하여야 한다.

바) 급수환경 변화에 따른 송․배수관에 대한 관경 적정여부를 검토하여야 한다.

사) 상기 방안 외 효율적인 방안을 강구하며, 여러 가지 대안이 있을 경우에는 가장 경제적인 방안에 의한 블록시스템 재구축방안 및 사업비를 제시한다.

라. 정수장, 지역 배수지간 공급체계 구축

1) 기 수립된 수도정비기본계획 상 상수도시설 안정화계획을 검토/분석한다.

2) 돌발사고에 대비한 정수장, 지역배수지간 비상연계관로 설치를 검토하고 무단수급수시스템 구축방안을 제시하여야 한다.

가) 비상시 인근 정수장에 대한 공급 가능량을 산정하고, 각 정수장(배수지)의 수돗물 공급이 중단될 경우, 인접 정수장(배수지)과 연결된 비상 연결관로를 통한 수돗물 공급방안을 검토하여야 한다.

나) 비상연계관로 계획 시 인접정수장 및 지역배수지와 기 연결된 비상연계관로 활용방안을 우선 검토하여 신설을 최소화 하여야 한다.

다) 비상연계관로에 대하여 수질 악화를 방지하고 비상연계시 즉시 사용이 가능하도록 평상시 운영방안을 제시하여야 한다.

마. 주요관로 복선화

1) 기 수립된 수도정비기본계획 상 주요관로 복선화계획을 검토/분석한다.

가) 2030 서울시 수도정비기본계획(변경)의 복선화 사업대상 우선순위 및 관경결정 기준, 생산시설 안정화, 수도시설 비상연계 등 관로의 복선화기준 및 계획을 검토하여야 한다.

2) 단수 등 긴급사고 발생 시 파급효과가 큰 중블록 인입관로에 대해 비상시 공급이 가능하도록 관로 복선화를 계획하여야 한다.

3) 관로노선 계획 시 현장 및 지하매설물 조사를 통해 시공성을 검토하여야 하며 경제성 및 유지관리성을 종합적으로 고려하여야 한다.

바. 주요밸브 전동화 시범구축

1) 기 수립된 수도정비기본계획 상 주요관로 원격감시제어체계 도입계획을 검토/분석한다.

2) 비상시 신속한 체계전환, 최적 블록시스템 구축 및 지능형 상수관망체계 도입 등을 확인할 수 있는 지점을 선정하여 밸브 전동화 및 원격감시제어체계 시범도입을 계획한다.

3. 경제성 조사

가. 개략사업비 산정 및 연차별 공사 시행계획

1) 사업의 규모 등 시설물 계획(안)이 결정되면 사업비를 산출하되 당해 사업의 총사업비와 향후 사업추진 과정에서 공사비가 증가하여도 사업의 타당성을 유지할 수 있는 총사업비 한도를 제시하여야 한다.

2) 개략사업비는 공사비, 설계비, 감리비, 보상비 등으로 주요 공정별로 구분하여 산출한다.

3) 유지관리비는 약품비, 동력비, 인건비, 유지수선비 등으로 구분하여 연간 유지관리비를 산정한다.

4) 소요사업비 및 유지관리비에 대하여 수도요금, 융자 등 발주자의 재정여건과 공사기간을 고려하여 연차별 시행계획을 수립한다.

5) 용수공급, 유지운영관리 등을 감안하여 사업비를 산정하고 사업의 경제적 타당성을 평가하여야 한다.

나. 전력 생산원가 추정 및 손익분석

시설 선진화 계획에 따른 생산원가 및 전기요금 산정 후 연차별 손익 및 자금수지 분석을 통하여 향후 장기적으로 예상되는 손익을 분명히 하여 그 경제성 및 사업의 타당성을 최종적으로 분석한다.

다. 사업의 효과분석

모든 계획을 종합 분석하여 사업의 타당성을 평가한다.

4. 사업시행 계획

각 세부 방안별 투자계획은 재원별, 단계별, 연도별, 공정별로 수립하되 실현 가능성을 고려하여 투자 우선순위를 결정하여야 하며, 투자계획은 전체사업비를 기초로 수립하고 단계별 투자계획은 개발 단계에 부합되도록 수립하여야 한다.

가. 설계와 건설에 소요되는 공사기간을 산정하여 제시한다.

나. 재원조달 방안

1) 사업추진에 필요한 적정 규모의 사업비를 공종별, 연차별, 재원별로 산정하고, 이를 근거로 다양한 재원조달 방안을 제시하여야 한다.

2) 재원조달 방안은 공공, 민간, 민관합동 등 다양한 입장에서의 사업추진 방식을 검토하고, 동시에 적절한 실천 방안을 제시하여야 한다.

다. 사업시행 관련 관계법령 및 인허가 사항 검토 등

1) 계약상대자는 시설정비, 처리시설 도입과 관련한 관계법령, 인․허가사항, 지자체 조례 등을 조사하고 검토하여 사업추진이 원활히 이루어질 수 있도록 제시하여야 한다.

제3장 과업성과품 제출

1. 과업성과품 제출

가. 유의사항

1) 성과품은 건설공사의 설계도서 작성기준(국토교통부) 및 발주처에서 제시하는 기준에 맞도록 작성하여야 한다.

2) 모든 성과품의 인쇄는 발주자와 협의하여 승인을 득한 후 실시하여야 한다.

3) 성과품은 과업지시서에 따라 작성되어야 하며, 주요 공정 검토사항 등 과업수행 중 검토사항들이 모두 수록되도록 하여야 한다.

4) 모든 도면은 CAD로 작성되어야 하며, 보고서, 계산서, 기타성과는 워드프로세서를 이용하여 작성한다. 단, 사진첩과 같이 워드프로세서로 작성이 불가능한 경우는 이미지 형태로 작성한다.

5) 발주기관은 과업수행 과정에서 성과품의 구분, 수량 등의 수정을 지시할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다.

6) 용역준공 후에 설계오류에 대한 발주처의 수정 보완요구가 있을 때에는 이에 따라야 하며, 이에 소요되는 비용은 계약상대자 부담으로 하여야 한다.

나. 성과품 제출

1) 최종 성과품은 계약기한 20일전에 제출하여 감독원의 검토를 받은 후 수정, 보완 요구사항이 있을시 수정, 보완한 후 계약기한까지 납품하여야 한다.

2) 본 과업 수행결과에 대한 성과품 최종보고서를 다음과 같이 작성하고, 또한 CD-ROM에 기록하여 제출한다.

성 과 품 명	제출수량	비 고
가. 보고서 - 타당성조사 보고서 - 타당성조사 보고서(부록)	20부 20부
나. 기타 성과 - 용역 성과품 CD-ROM 및 각종 조사 성과 - 기타 과업수행관련 수집자료 및 참고문헌 사본	4Set 1식

2. 과업의 기간

본 과업은 착수일로부터 8개월간으로 한다.

구 분	용 역 수 행 기 간
	1개월	2개월	3개월	4개월	5개월	6개월	7개월	8개월
기본현황 조사
타당성 조사
경제성 조사
사업시행 계획
성과품 작성