과업내용서

- 2018년 강동수도 관내 포장,시설물 건설폐기물처리용역 -

2018. 03.

강동수도사업소

(급수운영과)

과  업  내  용  서

1. 개    요

○ 용 역 명 : 2018년 강동수도 관내 포장,시설물 건설폐기물처리용역

○ 위    치 : 서울특별시 송파구 관내

○ 용역내용 : 폐기물 수집․운반 및 처리(상차포함)

○ 폐기물처리 용역 규모 :

- 건설폐기물 수집 및 운반 : 1,717㎥

- 건설폐기물 중간처리 : 4,021톤

2. 과업 기간

○ 착수일로부터 2019년 04월 30일까지

○ 다음과 같을 경우에는 용역기간을 연장할 수 있다.

- 천재지변 또는 발주기관의 사정에 의하여 용역과 함께 시행되는 송파구 관내 상수도공사가 중단되거나 지연되어 용역기간 내에 준공이 어렵다고 판단될 경우

- 다만, 용역 수행 중 강우 등 작업이 불가능한 일수는 용역기간에 포함되어 있으므로 이로 인한 용역기간의 연장은 할 수 없다.

3. 일반 사항

1) 본 과업은 강동수도사업소 포장도로굴착복구공사, 송파구 관내 시설물공사에서 발생하는 건설폐기물 등을 수집․운반, 처리하는 것으로 한다

2) 폐기물관리법에 의한 사업장폐기물 배출신고 등 과업수행에 필요한 관계기관의 관련업무 수속 및 허가 등은 수요기관을 대행하여 득하고, 소요되는 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

3) 계약상대자는 계약의 내용에 따라 착수계를 제출하여야 하며, 공정별 공정계획, 안전 관리계획, 용역수행에 따른 교통소음 및 환경오염 방지에 관한 대책을 수립하여 발주기관에 제출하여야 한다.

4) 공사장 안전관리는 관계법규에 따라 시행하며, 기능공, 인부, 기타 출입인의 단속과 화기취급, 안전관리, 보건위생 등에 대하여 세심한 주의를 할 것이며, 사고방지에 최선을 다하고, 공사중 발생하는 제반사고에 대하여는 계약상대자 책임 하에 수습한다.

5) 공사장에서 발생한 분진이 대기오염의 주요 원인이므로, 쾌적한 환경을 조성하기 위하여 환경보전법에 의한 분진방지 조치를 아래와 같이 시행하고, 일체의 비용은 계약상대자가 부담한다.

① 공사장 내․외 살수, 골재와 흙 등 분진우려가 있는 출입차량은 덮개 사용

② 야적된 폐자재는 비산되지 않도록 덮개 등 사용

③ 반출 차량이 사업장 내․외부 등 주변을 오염시킬 우려가 있는 경우는 공사용 차량의 세척대를 공사 시공자와 협의하여 주진입도로 인근에 설치한 후 세척하고 차량을 출입하도록 조치하여야 한다.

④ 폐기물 반출과 관련하여 발생하는 소음 및 분진 등이 인근으로 확산되지 않도록 관리에 철저를 기하여야 한다.

6) 계약상대자는 과적, 과중차량 등 운행 제한차량을 공사장에 투입하여서는 아니되며, 이를 위반할 경우에는 계약상대자를 의법 조치함은 물론 당해 용역 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

7) 과업 수행 중 기존의 시설물이 훼손 및 오염되지 않도록 하며, 시설물의 오염 및 훼손이 발생하였을 경우에는 원상복구하거나 복구에 필요한 비용을 계약상대자가 부담하여야 한다.

8) 과업 수행에 필요한 전기, 수도 등의 공공요금 및 기타 소요 비용은 계약상대자가 부담한다.

4. 설계변경

1) 본 용역의 추정물량 중 기초 등 땅속에 있어 확인이 어려운 구조물은 추정하여 산출한 것으로, 실제 배출된 폐기물 물량과 차이가 있을 수 있으므로, 발생 폐기물의 물량증감에 대하여는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 정산하여 처리한다.

2) 발생폐기물의 추정물량은 기존 폐기물 처리 과정에서 발생하는 재활용이 가능한 폐기물과 불가능한 폐기물(지정폐기물) 및 폐기물의 성상별로 구분하여 배출하되, 그 확인을 건설사업관리기술자(감독자)에게 받아 배출하여야 하며, 배출물량은 처리내용에 따라 정산 설계변경 한다.

3) 발주기관의 사업범위 변경 등의 사유로 지장구조물 수량증감이 있을 때

4) 현장여건 변동 및 민원으로 인한 수량변경, 수량계산 착오가 있을 때

5) 중간처리장은 현장에서 30㎞에 위치한 것으로 산정 하였으므로, 계약당사자는 착수시 중간처리장의 위치, 운반차량의 가장 짧은 이동경로 및 평균 이동속도 등을 기재한 문서를 제출하여 건설사업관리기술자(감독자)의 승인을 받은 후 이에 따라 도급금액 범위 내에서 설계변경 한다. (단, 중간처리장의 운반거리가 늘어난 경우에는 설계변경(증액)하지 아니한다)

5. 처리결과 보고

1) 중간처리업자는 폐기물간이인계서, 계량전표를 폐기물을 인계받는 날로부터 3일 이내에 건설사업관리기술자(감독자)에게 제출하여야 한다.

2) 용역업체는 폐기물처리 완료 후 총 처리물량에 대하여 수집․운반 확인서 및 반입확인서를 건설사업관리기술자(감독자)에게 제출하여야 한다.

6. 기타 사항

1) 폐기물처리 용역업체는 발생된 폐기물은 현장 내에 방치되지 않도록 수집운반 작업 지시일로 부터 1일 이내에 즉시 배출하고 배출 시에는 건설사업관리기술자(감독자)의 배출량을 확인 받아야 하며,  또한 공사 계약당사자와 긴밀히 협의를 하여 반출계획을 수립하여야 하며, 원활한 업무수행을 위하여 용역내용을 통보하고 수시로 공정협의 등을 하여야 한다.

2) 본 과업내용서상 명시되지 않은 사항은 건설사업관리기술자(감독자)의 의견에 따라야 한다.

3) 현 폐기물량은 추정치이므로 추후 정산처리 한다.

□ 운반 장소(처리장:30Km, 경기 광주시 초월읍 신월리 687-13)

□ 운반 속도 및 경로[강동수도사업소→처리장]

○ 강동수도사업소→둔촌사거리→서하남IC→하남JC→산곡JC→처리장

강동대로:33.8km/h
강동수도사업소→ 둔촌사거리
		외곽순환고속도로:77km/h
		둔촌사거리→ 서하남IC
			외곽순환고속도로:77km/h
			서하남IC→ 하남JC
				중부고속도로:97km/h
				하남JC→ 산곡JC
					중부고속도로:97km/h
					산곡JC→ 처리장