문서번호	수상관리과-@N
결재일자
공개여부	비공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	수상관리과장	운영부장	한강사업본부장		행정2부시장
협 조
	총무과장
	기획예산과장
	문화홍보과장
	공원사업과장
	치수과장
	시설관리과장
	기전설비2과장
	주무관
	주무관

관공선 셔틀페리 시범운항계획

2015. 3

한강사업본부

(수상관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	선박검사 및 준설의뢰
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□	본부T/F 구성논의
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□	확인완료

관공선 셔틀페리 시범운항 계획

한강공원 내 대중교통 접근성 개선과 관련하여 새로운 수상교통수단 도입일환으로 관공선을 활용한 셔틀페리를 시범적으로 운항하고자 함

1		사업개요

○ 운항기간 : 2015.5.1.~10.31

○ 운항선박 : 서울 한가람호

- 제원 : 24톤 30인승, 10노트/18km/h

○ 운항노선 : 잠실지역과 뚝섬지역 왕복운항

<한가람호>

- 편도 2.4km 구간, 20분 소요

※ 기존 수상택시 승강장을 활용

뚝섬

잠실

○ 승선요금

- 성인 2천원, 어린이 1천원

(서울특별시 한강공원 보전 및 이용에 관한 기본조례)

- 결재수단 : 티머니카드, 현금

<노 선 도>

※ 대중교통(버스‧지하철) 환승체계 요금연동 불가

○ 운항시간

- 매일 10:00~17:50까지 운항, 매주 월요일 휴항 (선박 정비)

- 운항노선 (뚝섬~잠실)  편도 1일 12회 운항

※ 운항시간표

출 발 (뚝섬→잠실)		회 항 (잠실→뚝섬)		비고
뚝섬(출발)	잠실(도착)	잠실(출발)	뚝섬(도착)
10:00	10:20	10:30	10:50	첫 배
11:00	11:20	11:30	11:50
14:00	14:20	14:30	14:50
15:00	15:20	15:30	15:50
16:00	16:20	16:30	16:50
17:00	17:20	17:30	17:50	마지막 배

※ 12:00~14:00 운영인력 중식 및 선박장비·주요기기 정비

○ 운영인력 : 해양수산직 6명 활용 (부족인원 2명은 기간제 채용)

- 운영팀 2개조 (4명×2조=8명) 편성, 1개조 1일씩 교대근무

※ 검표 안내원 등 추가인력 : 본부 직원 참여 검토(총무과 협의 필요)

2		운항준비계획

▢ 선박안전검사 및 수리용역 시행

○ 검사일시 : ‘15.3.30~4.10

○ 검사기관 : 선박안전기술공단 인천지부 (정부대행 검사기관)

○ 소요예산 : 57,146천원

▢ 선박 및 승선자보험 가입완료

○ 가입기간 : ‘15.1.1~12.31

○ 가입기관 : 한국지방재정공제회 (12,898천원)

○ 보장한도 : 선박보험 (498백만원)

승선자보험 (1인당 100백만원, 1사고당 1,500백만원)

※ 보험료는 3월말경 고지서 송달 받은후 납부예정

▢ 셔틀페리 승강장 주변 입출항로 수심확보

○ 뚝섬선착장 부근 준설 필요 (잠실선착장 주변은 양호)

- 현 수심 1.5m, 한가람호 흘수 1.0m (여유수심 0.5m)

- 여유수심 1.0m이상 확보(0.5m이상 준설)필요 ⇒ 워터제트 엔진 손상 방지

※ 워터제트 : 강물을 빨아들여 내보내면서 추진력을 확보하는 방식

○ 작업시기 : ’15.4.6~4.10

○ 시행부서 : 치수과 (‘15.2.26. 협조공문 발송)

▢ 셔틀페리 승강장 주변 환경정비

○ 작업시기 : ‘15.4.6~’15.4.10

○ 정비목적 : 장기간 방치된 뚝섬,잠실 수상택시승강장 주변 환경정비

※ 수상택시사업은 ‘14.4월 세월호 사고이후 사업자 부재로 중단

○ 소요예산 : 2,000천원 (한강 관공선 등 운영 및 관리 - 시설비)

▢ 선박외판 한강캐릭터 도장작업

○ 작업시기 : ‘15.4.13~4.17 (선박안전검사후 실시)

○ 도장목적 : 한강몽땅 캐릭터를 이용하여 친근한 이미지와 상징성 고취

○ 소요예산 : 2,000천원 (한강 관공선 등 운영 및 관리 - 시설비)

< 한강몽땅 캐릭터 행몽이>	< 선박측면 디자인>	< 선박정면 디자인>

▢ 승선요금 결재시스템 설치

○ 설치장소 : 선박내 설치‧운영 (통신방식:LTE무선통신)

- 고객용 영수증(승선시 티켓으로 활용) 및 보관용 영수증 출력

- 승객은 비치된 승선신고서 별도 작성

○ 설치시기 : ‘15.4.13~4.17 (선박외관도장 작업후 설치)

○ 소요예산 : 2,000천원 (한강 관공선 등 운영 및 관리 - 공공운영비)

- 단말기(600천원), 월사용료(65천원) / 소모품 및 부가세 별도

▢ 셔틀페리 운항 기간제인력 채용

○ 채용인력 : 기간제 2명 (소형선박조종사 또는 해기사6급이상 소지자)

○ 소요예산 : 30,000천원 (한강공원 기전시설 유지관리 - 기간제근로자등보수 예산활용)

○ 채용기간 : ‘15.5월~10월 (6개월)

○ 채용공고 및 합격자발표 : ‘15.3.24~4.17

○ 협조부서 : 기획예산과, 기전설비2과

▢ 셔틀페리 승강장 안내시설물  설치

○ 설치장소 : 총 22개소 (뚝섬 9개소, 잠실 13개소)

구 분	계	안내판	현수막	기둥도색
계	22	14	6	2
뚝 섬	9	5	3	1
잠 실	13	9	3	1

○ 설치시기 : ‘15.4.20~4.27

○ 소요예산 : 10,000천원 (한강 관공선 등 운영 및 관리 - 시설비)

○ 시행부서 : 시설관리과(‘15.3.19. 협조공문 발송)

※ 한강공원 종합안내판은 시설관리과에서  설치

▢ 선박 운항인력 유니폼 구매

○ 구매대상 : 셔틀페리 운항직원 16명

○ 디 자 인 : 활동이 편하고 친근감을 주는 디자인으로 구매

○ 구매시기 : ‘15.4.13~4.17

○ 소요예산 : 7,000천원 (한강 관공선 등 운영 및 관리 - 사무관리비)

3		추진일정 및 소요예산

▢ 추진일정

구 분	추진사항	추진일정	비 고
선박보험료 납입	∘선박 및 승선자 보험료 납입	3.23~3.31	수상관리과
기간제 채용	∘선박운항인력 기간제 채용	3.24~4.17	수상관리과
선박 안전검사	∘한가람호 안전검사 및 수리용역 시행	3.30~4.10	수상관리과
입출항로 준설	∘뚝섬승강장 주변 입출항로 준설의뢰	4.06~4.10	치수과
승강장 정비	∘셔틀페리 승강장 환경정비	4.06~4.10	수상관리과
외판 캐릭터도장	∘선박외판 한강캐릭터 도장 작업실시	4.13~4.17	수상관리과
운항인력 조편성	∘셔틀페리 운항인력 조편성	4.13~4.17	수상관리과
보도자료 배포	∘셔틀페리 보도자료 배포의뢰	4.13~4.17	문화홍보과
홈페이지 사전홍보	∘셔틀페리 홈페이지 사전홍보 의뢰	4.13~4.17	총 무 과
결재시스템 설치	∘요금결재시스템 유지관리용역 시행	4.13~4.17	수상관리과
운항인력 유니폼구매	∘선박 운항인력 선원복 구매	4.13~4.17	수상관리과
안내판 설치	∘승강장주변 안내판 설치 작업실시	4.20~4.27	시설관리과

▢ 소요예산 : 168,044천원 (관공선 138,044천원, 기전 30,000천원)

구 분	소요예산 (천원)	예산과목	산출조사서(천원)	비 고
계	168,044
선박보험료 납입	12,898	관공선-공공운영비	- 선박보험: 12,547 - 승선자보험 : 351
기간제 채용	30,000	기전-기간제근로자보수	- 2,500×6개월×2명	타과예산 (기전설비2과)
선박 안전검사	57,146	관공선-시설비	- 선체설비 : 14,229 - 기관설비 : 42,917
승강장 정비	2,000	관공선-시설비	- 페인팅 등 2,000
외판 캐릭터도장	2,000	관공선-시설비	디자인 : 300 페인팅 :1,550	부가세별도
결재시스템 설치	2,000	관공선-공공운영비	단말기 :600천원 월사용료 :65천원	소모품 및 부가세 별도
운항인력 유니폼구매	7,000	관공선-사무관리비	- 1식 400천원×16명	부가세별도
안내판 설치	10,000	관공선-시설비	- 잠실 10개소 - 뚝섬 6개소
유류비	45,000	관공선-공공운영비	- 1일 250천원×180일	국제유류가 등락에 따라 유동적

4		행정사항

▢ 다양한 홍보 실시

○ 시보유 홍보채널 적극활용 및 각 자치구 홍보협조 공문발송

- 대중교통망 연계와 관련하여 본부T/F팀 구성하여 홍보

- 한강연계 지하철, 버스 홍보 (시민소통과에 협조요청)

- 반상회보 게재, 지역신문 게재, 각 자치구 홈페이지 표출

○ 한강사업본부 홈페이지 홍보의뢰 (총무과)

○ 보도자료 배포의뢰 (문화홍보과)

▢ 각 부서 협조사항

○ 셔틀페리 승강장 안내시설물 설치 (시설관리과)

○ 셔틀페리 승강장 주변 입출항로 준설 (치수과)

○ 검표안내원 등 추가인력 확보, 본부 홈페이지 홍보내용 표출 (총무과)

○ SNS, 블로그, 보도자료 배포 등 다양한 채널을 통한 홍보 추진(문화홍보과)